2014년 설계심의 사후평가 대상

□ 총 36건 (심사총괄팀 9, 기술관리팀 12, 토목심사팀 8, 건축심사팀 5, 설비심사팀 1, 조경심사팀 1)

연번	공사시행 현황							시공부서 (담당자및연락처)	담당팀
	공사명	공사개요	공사비 (백만원)	공사기간	시공사	'14.6.30 공정율(%)	'14.12.31공정율(%)
1	마포구민 체육센터 신축공사	-위치:서울시마포구망원동450-3 망원유수지내 -대지면적:52,577.40M2	8,226	`14,02~15,06	㈜계산종합건설	20%	65%	마포구 건축과 (박진국3153-9323)	건축심사팀
2	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	빗물저류조 설치 65,000㎥	46,600	‘12.01~15.05	남광토건㈜	55%	70%	도기본 방재시설부 (조동협 3708-8774)	토목심사팀
3	위례지구 차집관로 증설공사	차집관거설치D=700~1,100mm, L=4,412m	8,682	13.11~2014.11	LIG건설	32%	100%	도기본 방재시설부 (오수양, 3708-8763)	토목심사팀
4	서남권 야구장 건립공사	-지하2/지상4층,연면적80,451㎡ -문화및집회시설(관람장),운동장	168,671	09.2.4~15.2.28	현대산업개발	74%	95%	도기본 건축부 (윤용훈 3708-2608)	건축심사팀
5	종각역 개선공사	대합실개선및승강장확장(연장L=45m) 에스컬레이터 1200형2기, 엘리베이터 15인승1기	21,000	13.02.~15.07.	GS건설	35%	57%	종로구 도시개발과 (김성길, 2148-2672)	기술관리팀
6	시흥계곡방수설비공사	저류용량(v)=24,000톤	10,000	13.11~14.11	㈜금강주택	50%	100%	금천구 안전치수과 (최진경, 2627-1852)	토목심사팀
7	친환경농산물집배송센터 건립공사	-연면적:5,666.13㎡, -규모:지상3층 -용도:창고시설(집배송시설)	10,722	13.6~'14.7		95%	100%	농수산식품공사 건축설계팀 (백정환 02-3435-0363)	건축심사팀
8	풍납펌프장 유입관거 개량공사	PCBOX▣1.2×1.2~2.5×2.0L=1,757m 하수관로 D=600~1,100mm, L=3,241m	15,800	12.10~15.10.	신성건설㈜	58%	72%	송파구 치수과 (정원식 2147-3356)	토목심사팀
9	탄천물재생센터 하수열 이용 지역난방공급 민간투자사업(BOT)	-시설용량:63Gcal(9Gcal/hx7대) -사업방식:BOT(15년간운영)	34,133	‘13.10~’14.10	포스코ICT	60%	100%	녹색에너지과 (이경택,2133-3573)	설비심사팀
10	약수고가차도 철거 및 교통개선공사	-고차차도철거420m -환기구이설2개소	8,500	13.12~'14.08	용성종합건설(주)	25%	100%	도기본 토목부 (김성권,3708-2547)	심사총괄팀
11	망우본동 복합청사 건립	*기간:2008.9~2015.5 *위치:중랑구망우동340-17외6필지 *대지면적:1,134㎡ *규모:연면적4,656㎡(지하2/지상6)	19,461	08.9월~15.5	라이드건설주식회사	50%	70%	중랑구 자치행정과 (이진수/2094-0424)	건축심사팀
12	서남권 돔야구장주변보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사	보행광장설치(B=28.3m,L=150m)	22,608	13.04~'15.02.	대지건설(주)	68%	94%	도기본 토목부 (최연섭,3708-2579)	심사총괄팀
13		고척교확장(B=37.5m→52.5m,L=203m)						도기본 토목부 (이상근,3708-2579)	심사총괄팀
14	신림2 빗물펌프장 설치공사	-집수정용량:V=5,300㎥ 펌프416hpX4대, 175hpX1대	14,000	13.01~'14.06.	임원개발㈜	70%	100%	도기본 방재시설부 (이정국3708-8764)	토목심사팀
15	서대문고가철거공사는12년2월에실시설계완료하였으며, 14년하반기발주예정임.							도기본 토목부 (장기철,3708-2546)	심사총괄팀
	아현고가 철거공사	연장 939m, 폭 15m	7,500	14.02~'14.03.	준경산업개발외 1	100%		도기본 토목부 (손준호,3708-2570)	심사총괄팀
16	서울지하철9호선3단계 923공구건설공사	지하철건설1728m -정거장1개소204m -본선1,524m(터널410,개착1114)	98,224	'10.9～'16.3	대림산업(㈜ 외4개사	43%	51%	도기본 도시철도토목부 (문병종772-7214)	기술관리팀
17	서울지하철9호선3단계 922공구 건설공사	연장1,470m, 본선 1,222m, 정거장 1개소,	131,686	'10.9.~'16.03.	㈜대우건설 외4개사	43%	53%	도기본 도시철도토목부 (홍숭희772-7241)	기술관리팀
18	사당체육관 신축공사	지하1층/지상2층, 연면적 7,207.27㎡	15,083	13.06.~15.06	아필건설	21%	70%	동작구 건축과 (송은숙 820-1393)	건축심사팀
19	홍제천고가교 내진성능개선공사(성산2-2, 3램프)	-면진받침교체61개소 -전단키설치4조	1,800	'13.5~'14.5	(주)나라로드	100%		서부도로사업소 교량보수과 (백운경300-8452)	심사총괄팀
	홍제천고가교 내진성능개선공사(성산1,2-1, 3램프)	-면진받침교체73개소 -전단키설치5조	2,000	14.5~'14.12	계약중	20%	100%	서부도로사업소 교량보수과 (백운경300-8452)	심사총괄팀
20	경춘선 폐선부지 공원조성 공사(1단계)	규모:48,170㎡,1.9㎞ 공원조성(옹벽485m,아스콘포장1,479㎡,수목식재50,837주등)	9,215	13.10~'15.1.	에스케이임업 승일토건 시대전기 아산정보통신	50%	100%	공원조성과 (이용남,2133-2061)	조경심사팀
21	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	기존고가교철거510m, 고가교설치405m	27,300	11.1~'14.12	㈜흥화	55%	100%	도기본 토목부 (박근우,3708-2566)	심사총괄팀
22	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사	연장1,742m, 본선 1,408m, 정거장 2개소,	170,748	`09.12~`15.12	㈜포스코건설, 코오롱클로벌㈜	38	49	서도기본 도시철도토목부 (정성환772-7235)	기술관리팀
23	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사	연장1,390m, 본선 1,226m, 정거장 1개소,	153,218	'09.12.31~ '15.12.29	롯데건설㈜ 외1개사	41	53	도기본 도시철도토목부 (김용선772-7211)	기술관리팀
24	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사	연장1,560m, 본선 1,230m, 정거장 2개소,	204,114	09.12.~'15.12.	삼성물산㈜ 외2개사	38	46	도기본 도시철도토목부 (윤원섭772-7242)	기술관리팀
25	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사	연장1,290m, 본선 1,125m, 정거장 1개소(165m),	137,677	10.02.~'16.02.	SK건설(주) 외4개사 (1개사탈퇴)	39.3	52.8	도기본 도시철도토목부 (김찬오772-7221)	기술관리팀
26	지하철 서울1,4역혼잡도개선공사	-서울역 환승통로 확장 10.7m →16.7m(L=77m)	5,694	'11.09~'13.09	신화건설㈜	54%	100%	서울메트로토목개량팀 (이용기,6110-8623)	기술관리팀
	지하철 교대2,3역혼잡도개선공사	-교대역 2호선 환승통로 확장 5.0→7.4m(L=45m) -3호선 환승통로 확장 5.8→12m(L=35m)	11,901	'12.01~'15.01	남양진흥기업㈜	계약해지(소송중)		서울메트로토목개량팀 (나재동,6110-8612)	기술관리팀
27	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장(6차로→10차로) 연장900m(지하차도580m포함)	80,933	10.10~15.12	대보건설(주)	54%	62%	도기본 토목부 (김동현,3708-2576)	심사총괄팀
28	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업4공구	L=3,095m, 터널=2,858m 개착=20m, 정거장=218m	123,500	09.9.~'14.9.	포스코건설	57%	63%	도기본 도시철도사업부 (안규홍 772-7178)	기술관리팀
29	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업3공구	L=3,171m, NATM=2,879m 개착및정거장=292m	123,200	09.9.~'14.9.	고려개발	51%	63%	도기본 도시철도사업부 (변재홍 772-7179)	기술관리팀
30	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업2공구	L=3,233m, 터널=1,007m 개착=1,977m, 정거장=249m	150,100	09.9.~'14.9.	두산건설	62%	63%	도기본 도시철도사업부 (위성환 772-7187)	기술관리팀
31	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업1공구	L=1,908m, 차량기지=318m 개착=1,414m, 정거장=176m	159,400	09.9.~'14.9.	대우건설	55%	63%	도기본 도시철도사업부 (김정수 772-7186)	기술관리팀
32	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	시설현대화(70만톤/일) 고도정수처리시설60만톤/일	230,005	‘09.12~’15.01	삼성물산㈜	49%	62%	상수도사업본부 시설안전부 (송병욱3146-1451)	토목심사팀
33	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확장(4차로→6차로) 연장3.2km	165,814	08.12~'16.12	한라건설(주)	45%	54%	도기본 토목부 (장종환,3708-2577)	심사총괄팀
34	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	도로개설폭4차로,연장867m 터널2개소포함	24,014	12.12~15.12	㈜현대건설	25%	60%	도기본 토목부 (이상근,3708-2578)	심사총괄팀
35	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	시설현대화1식 고도정수처리시설110만톤/일	165,852	‘09.10~’14.10	고려개발㈜	91%	100%	상수도사업본부 시설안전부 (변병수3146-1491)	토목심사팀
36	강북정수장 고도정수처리시설공사	고도정수처리시설 95만톤/일	112,399	‘10.2~’14.10	대보건설㈜	94%	100%	상수도사업본부 시설안전부 (이용구3146-1492)	토목심사팀