중∙장기 지방재정계획 변경관련

<신규사업 현황>

2016. 7

상수도사업본부

(생산부)

암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업

직 책	성 명	전화번호
생산관리과장	한희선 (인)	3146-1310
담 당 자	이규현 (인)	3146-1316

□ 사업개요

○  목 적 : 배출수 방류수 수질기준이 86년 건설당시 SS기준 80(ppm)이 10(ppm)으로

대폭 강화됨에 따라 배츨수처리시설의 증설 및 노후 시설 개량이 필요함

○ 위    치 : 암사정수센터 1정수장 배출수 시설(배출수지, 배슬러지)

○  규    모 : 배출수지(2지), 배슬러지(2지) ⇒ 각 1개지씩 증설 및 노후설비 개량

○  사업기간 : 2017. ~ 2019.

○  총사업비 : 10,200백만원

□ 사업근거 및 추진경위

○  사업근거 : 2030 수도정비기본계획

- 암사정수센터 1정수장 배출수 시설은 86년 건설이후 증설 및 개량 미시행

- 배출수 수질기준 강화로 수질기준 준수에 어려움이 많으며, 14년 ’고도정수시설

도입으로 배출수시설의 부담은 표준공정처리 운영 시 보다 더 증가된 실정임

○  추진경위

- 암사정수센터 배출수시설 개선에 따른 TF팀 구성 운영 : ’16. 6 ~ 현재

∙ 외부 전문가 및 관련 직원15명으로 구성 진단, 문제점 발굴

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022~
최고 품질의 아리수생산	10,300	300	5,000	5,000	-	-	-

강북정수장 취수원 이중화 구축

직 책	성 명	전화번호
생산관리과장	한희선 (인)	3146-1310
담 당 자	유양현 (인)	3146-1315

□ 사업개요

○  목 적 : 취수원 안전망 구축을 위해 인근 他 취수장과 이중화 시스템 구축

○ 위    치 : 남양주시 삼패동

○  규    모 : D1500㎜, L=150M

○  사업기간 : 2018. ~ 2019.

○  총사업비 : 1,650백만원

□ 사업근거 및 추진경위

○  사업근거 : 광암정수센터 및 자양취수장 기본 및 실시설계에 따른 취수원 구축

-  강북정수장 원수공급을 강북취수장에서만 공급할 수 있도록 구축 되어 있음

-  강북취수장 각종 사고를 대비하여 안정적 공급을 위해 취수원 이중화 구축 시행

(자양취수장, 암사취수장  활용)

○  추진경위

- 자양취수장 활용 기본 및 실시설계시 강북정수장 취수원 이중화 검토

- 광암정수센터 취수원 이중화 타당성 용역시 강북정수장 이중화 필요

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022~
최고 품질의 아리수생산	1,650	-	150	1,500	-	-	-

(※ 광암정수센터 취수원 이중화 구축사업과 연계하여 사업추진)

취수원 이중화로 단수 없는 서울 만들기 !

<보조자료>

최근 자연재해, 정전, 수질오염 등 각종 재난사고가 증가함에 따라  취수원 이중화 구축으로 어떠한 재난에도 단수 없는 수돗물 공급 추진

□  서울시 취수장 현황

○ 시설현황: 4개 취수장(자양, 풍납, 암사, 강북)

○ 운영실태: 각 취수장별로 정수센터에 단독으로 원수 공급

□  추진배경

○ 서울의 취수장은 큰 규모로 건설되어 가동 중단 시 단수가 불가피 함

- 강북취수장의 경우 서울 47% 전체 시민의 42% 공급하고 있음

○ 취수원 안전망 구축을 위해 인근 他 취수장과 이중화 시스템 구축

□  추진방향

○ 강북지역: 폐쇄 예정인 자양취수장을 활용 3개 정수장 비상공급

- 별도의 도수관을 부설하지 않고 기존관로를 활용하여 이중화 구축

○ 강남지역: 강북(구의․뚝도) 도수관로 ⇔ 암사 도수관로 연결하여 이중화

- 광암정수장: 암사취수장 잉여량을 도수관로를 부설하여 공급

※ 영등포정수장은 서울시⇔ 인천시 간 도수관로 이중화 구축 완료(‘11.6)

- 인천취수장 화재시 서울 풍납취수장에서 인천 공촌정수장(52만명) 원수공급

○ 연도별 이중화 추진계획

구 분	계	’15년	’16년	’18년~20년
정수센터	5개소	뚝도	구의	강북, 광암
소요예산 (억원)	128.5	29	83	16.5억 985억

□  기대효과

○ 각종 재해, 정전 수질사고 등 돌발적 상황에서도 단수 없이 수돗물 생산

○ 기득수리물량 및 한강원수 취수로 원수구입비 년 297억원 절감

(뚝도 91억원, 구의 55억원, 광암 151억원)

□ 취수원 이중화 구축 계획도

구의정수장

2200㎜×2열

강북취수장

자양취수장

뚝도정수장

1500㎜

2200㎜×2열

1650㎜×2열

강북정수장

1500㎜

2600㎜×2열

암사정수장

광암정수장

암사취수장

2600㎜×2열

1500㎜

2200㎜

1500㎜

뚝도정수장

강북정수장

구의정수장

2600×2열 강북

D2200 구의

D2200 뚝도

자양취수장

D2200 뚝도

D2200 뚝도

D1500

D1650

D1650

D1650

자양․강북 연결

2600×2200

암사정수장

서울풍납취수장

수자원공사

(팔당취수장)

암사취수장

D2200×2열

D2400

강북취수장

인천풍납취수장

인천성산가압장

비상관로연결

(D1350,2개소)

영등포정수장

D2400

광암정수장

지능형 스마트 정수장 구축 사업

직 책	성 명	전화번호
기전설비과장	서대훈 (인)	3146-1330
담 당 자	오준식 (인)	3146-1331

□ 사업개요

○  목   적 : 정수센터 운영시스템을 첨단 IT 기술을 접목한 센서 고도화, 정수처리공정을 연계한 완전 자동화, 시설물관리시스템을 통한 예방정비, 수요예측을 통한 계획생산 등 지능형 첨단 정수장 구축운영

○ 위    치 : 6개 정수센터(강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포, 광암)

○  규    모

- 중앙제어실 제어시스템 구축 정비 및 현장 계측기기 개량

- 자동화운전 기반구축(취수설비, 송수펌프, 약품투입설비, 염소투입설비 등)

○  사업기간 : 2017. 3 ~ 2023. 12

○  총사업비 : 48,000백만원

□ 사업근거 및 추진경위

○  사업근거 : 2030 수도정비기본계획 및 “본부장 방침” 기전설비과-3281

(2015.5.20.)

○  추진경위 : 강북정수센터 지능형 스마트 정수장 구축 기본계획 수립용역

기전설비과-7664(2015.10.27.)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
최고 품질의 아리수생산	40,000	-	500	8,000	8,000	8,000	8,000	7,500

암사정수센터 수전전압 변경 사업

직 책	성 명	전화번호
기전설비과장	서대훈 (인)	3146-1330
담 당 자	오준식 (인)	3146-1331

□ 사업개요

○  목   적 : 154kV 수전설비 및 장거리 수전용 인입케이블 노후로 개량이 필요하고 광암정수센터 취수원 이중화, 활성탄재생시설 도입 등 전력설비 증설이 요구됨에 따라 시설개량 및 유지관리비용 절감과 안정적인 전력수급을 위한 수전전압 변경을 추진하고자 함.

○ 위    치 : 암사정수센터 구내

○  규    모

- 22.9kV 수․배전설비 설치공사 및 154kV 수변전 설비 철거

- 인입케이블 포설 및 제어시스템 정비 및 한국전력공사 배전공사 1식 등

○  사업기간 : 2017. 3 ~ 2020. 12

○  총사업비 : 25,000백만원

□ 사업근거 및 추진경위

○  사업근거 : 암사정수센터 수전전압 변경 기본계획 수립용역 추진계획

“본부장 방침” 기전설비과-4474(‘16.5.19)호

- 1985년도 설치 30년 이상 경과된 노후설비로 조속한 교체 정비 필요

○  추진경위 :

- 암사정수센터 수전전압 변경 기본계획 수립 용역 :기전설비과-4998(‘16.6.8)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2016	2017	2018	2019	2020
최고 품질의 아리수생산	25,000	48	476	7,300	14,889	2,287

정수센터 노후 탈수기 개량 사업

직 책	성 명	전화번호
기전설비과장	서대훈 (인)	3146-1330
담 당 자	이상록 (인)	3146-1335

□ 사업개요

○  목   적 : 설치 후 최대 30년이 경과되어 노후 및 가동효율이 저하된 탈수기를                   연차적으로 개량 탈수공정 연속성 확보 및 함수율 제고

○ 위    치 : 서울시 5개 정수센터 배출수 처리시설(광암 제외)

○  규    모 : 노후 탈수기 34개 개량

○  사업기간 : 2017. 2 ~ 2019. 10

○  총사업비 : 8,000백만원

□ 사업근거 및 추진경위

○  사업근거 : 2030 수도정비기본계획

- 일반형 탈수기를 고압형으로 현장 개조되어 설비변형 발생

- 1986년도 최초 설치되어 30년 이상 경과된 노후설비로 조속한 교체 필요

○  추진경위

- 암사정수센터 탈수기 교체 실시설계 용역 : ’16. 8

∙ 암사정수센터 탈수설비 개량을 기본으로 유사 탈수시스템을 보유중인 타 정수센터   탈수설비 개량을 과업에 포함하여 추진

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
최고 품질의 아리수생산	8,000	2,800	2,350	2,850	-	-
		암사 12대	강북6+영등포4	뚝도6+구의6