도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제4차)

◉ 신당역 일대 보행환경지구 조성사업 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사구간 내 버스정류장(신당역, 중앙시장앞)에 정차하는 버스 막차시간(차고지 막차시간이 아닌 당 정류장 막차시간)을 고려하여 공사시간 조정 검토하고, 전 단계 조정이 불가하다면 임시버스정류장을 운영하는 3-1 및 3-2 단계에 대해서는 공사시간을 늦추는 방안 검토

- 야간 공사시에만 차로통제가 이루어지고 주간에는 차로통제가 이루어지지 않음에도 불구하고, 공사중 도로통제 안내표지가 종일 설치되어 있으면 주간 시간대 운전자들에게 혼란 야기할 수 있어 차량용 공사안내표지에 통제시간을 병기할 수 있는 방안 검토

- 공사중 교통통제수가 사고 위험에 노출 되지 않도록 배치 위치 재검토    및 철저한 안전관리 요망, 필요시 로봇통제수 배치

- 보고서 내 대상도로 ‘종로’가 아닌 ‘퇴계로’ 로 오기 수정

- KB 국민은행앞 도로점용 공사로 인한 기존 횡단보도에서 임시보행 동선으로 보행시 이용자의 불편과 공사장의 위험이 있으므로 드림부동산앞쪽으로 횡단보도 임시 이전 검토 바람.

- 공사규모에 비해 공사기간이 과다하다고 판단됨으로 주민통행 및 통행차량의 불편을 감소하기 위해서는 공정 재검토로 공사기간 단축 필요. (공사규모 : 보도확장, 차도축소 L= 218m, 공사기간 : 21년4월~12월 중 60일)

- 공사 착공전 지하지장물 및 지상지장물(노상가판대등)을 사전에 조사를 철저히 하여 이전계획을 수립한 후 공사를 착공하여 진행중에 공사가 중단되는 사례가 없도록 공정계획을 수립 바람.

- 서울중앙시장 이용 주민들의 야간공사기간에 보행에 불편함이 없도록 보행안전도우미 운영 및 보행로 관리를 철저히 하기 바람.