자문 검토 의견서

○ 신월3 배수분구 하수관로 종합정비사업

안  건

검 토  의 견

신월3

배수분구

하수관로

종합

정비사업

1. 국회대로의 경우 약 16일간 도로를 폐쇄하는데 인접한 건물의 진출입에 문제가 없는지 확인하고, 향후 민원이 발생하지 않도록 조치계획 수립 및 사전 협의 바람

2. 강서로

1) 1-2단계에서 직진차량의 흐름을 고려할 때 차로변경표지가 1차로를 향하도록 변경하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

2) 4단계에서 설치한 보행로의 안전휀스를 횡단보도까지 연장하기 바람

3) 6단계의 경우 공사구간이 점용구간에 맞닿아 있으므로 여유있게 차로폭을 점용하여 원활한 공사가 이루어지도록 하기 바람

4) 7, 8, 9, 11단계와 같이 점용공간이 협소함에도 교통소통에 미치는 영향이 큰(LOS F) 단계의 경우 작업량을 고려하여 공사시간을 늦추는 방안을 검토하시기 바람

5) 10, 11단계 2개 차로 점용이 맞는지 확인 바람

6) 11단계 공사차량 배치 제시하기 바람

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람