도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(12차)

◉ 장안교(구교) 성능개선공사 : 조건부 시행

1. 4, 5단계 보도 철거 및 재설치 단계 도면을 추가하기 바람

2. 공정표 상에서 공사중 교통소통대책 단계를 포함하기 바람

3. 장비 배치도 및 재원을 표기 하기바람

4. 장안교 지하차도에서 장안교 사거리 방향, 장안교사거리에서 장안교지하차도 양방향으로 차로폭 감소 및 차로폭 분리로 인한 교통정체가 예상됨으로 우회안내, 차로추가 설치, 신호운영 등 방안을 검토하여 정체해소 방안을 제시하기 바람

5. 5단계 포장 공사시 가교를 활용하여 정체를 해소할수 있는 방안을 검토하기 바람

6. 3단계 가교 시정부에서 종점부로 기존 도로의 설계속도에 맞게 곡선반경을 조정하기 바람

7. 4-4단계 공사시 신호운영이 어려움으로 재검토하기 바람

8. 4-3, 4-4, 5-3단계 직진차로 이용이 어려움으로 이에 대한 방안을 다시 재시하기 바람

9. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)