준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명   : 2018 이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역

나. 도급금액   : 금15,700,000원

다. 도급업체   : ㈜스포츠그룹지인 대표 정구석

라. 계약년월일 : 2018. 10.29.

마. 착수년월일 : 2018. 10.29.

바. 준공기한   : 2018. 11.27.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

┍ 당   초 : 2018. 10.29. ~ 2018. 11.27.

┕ 변   경 : 2018. 10.29. ~ 2018. 12. 7.

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 2019년 전국체전을 위하여 새롭게 조성되는 롤러경기장 새로운 규격이 뱅크형 트랙에서 Parabolic Track으로 변경됨에 따라 자문 및 협의를 위한 절대 공기 부족

2018년    11월

공원사업과장    (인)

한강사업본부 (분임)재무관 귀하