문서번호	설비부-10220
결재일자	2018.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장

『서울기록원 건립 기계공사』

항온항습기 냉매배관 추가 구매 검토

2018.07.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울기록원 건립 기계공사」

항온항습기 냉매배관 추가 구매 검토

우리 본부에서 추진하고 있는「서울기록원 건립 기계공사」에 소요되는 항온항습기의 압축기 장착위치(실내기→실외기)으로 인한 냉매배관 추가 구매 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울기록원 건립 기계공사

□ 위    치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 내)

□ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 15,004m2(공공업무시설)

□ 공사기간 : 2016.5.19.~2018.10.17.(1차 ’16.5.19.~’18.10.17.)

□ 공사금액 : 4,675,453,700원(1차 98,846,000원)

□ 도 급 사 : 신흥설비(주)

□ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링

Ⅱ		추진경위

□ ’18.07.05. : 항온항습기 설계변경 검토 보고

- 서울기록원 제2018-187호(2018.07.05.)

□ ’18.07.17. : 항온항습기 압축기 장착위치(실내기→실외기) 변경 검토 보고

- 설비부-9874호(2018.07.17.)

□ ’18.07.17. : 항온항습기 변경계약 의뢰(설비부 → 건설총괄부)

- 설비부-9874호(2018.07.17.)

□ ’18.07.20. : 변경계약 요청사항 중 일부만 변경계약됨

- 기존에 계약된 냉배배관에 대한 물량증감에 대해서만 변경계약됨

- 변경계약 현황

품명	납품요구 번호	계약업체	금액	납품기한
항온항습기	12-18-2-23535-01	㈜에이알	173,082,000원	2018.10.17.

Ⅲ		검토내용

□ 항온항습기 냉매배관에 대하여 일부 변경계약되고, 일부는 추가 구매하는 사유

- 당초 항온항습기 압축기 장착위치 변경으로 인하여 변경되는 냉매배관 전체물량에 대해 변경 계약 요청하였으나

- 경리과로부터 기존에 계약된 사항은 품목의 물량 증감만 가능함으로 신규품목은 별도로 추가 구매토록 함

□ 변경계약 내용 및 물량증감 내역

- 변경계약 내용 : 계약금액 변경

품명	계약업체	금액(원)			납품기한
		당초(할인전)	변경	증감
항온항습기	㈜에이알	200,899,000	173,082,000	-27,817,000	2018.10.17.

- 물량증감 내역

품명	규격	단위	수량		금액(원)		비고
			변경전	증감	변경전	증감
			변경후		변경후
냉매배관	3.18kW용	M	196	감196	6,664,000	-6,664,000	3RT 압축기 내장형 배관
			0		0
냉매배관	5.35kW 듀얼용	M	201	감201	14,673,000	-14,673,000	10RT 압축기 내장형 배관
			0		0
냉매배관	8.31kW 듀얼용	M	273	감72	24,570,000	-6,480,000	10RT 압축기 외장형 배관
			201		18,090,000
합계					45,907,000	-27,817,000
					18,090,000

※ 기존계약은 다수 구매 할인 1%가 적용되었으나, 변경계약 시 계약금액이 2억 미만으로 할인 적용 안됨

□ 추가 구매 계획

품명	규격	단위	수량		금액(원)		비고
			변경전	증감	변경전	증감
			변경후		변경후
냉매배관	5.35kW용	M	0	증196	0	7,840,000	3RT 압축기 외장형 배관
			196		7,840,000
냉매배관	10.85kW 듀얼용	M	0	증273	0	26,481,000	15RT 압축기 외장형 배관
			273		26,481,000
합계					0	34,321,000
					34,321,000

□ 보고자 의견

- 건설총괄부에 신규 품목에 대해 추가로 구매 요청하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

Ⅳ		향후계획

□ 2018. 7월 : 냉매배관 추가 구매요청

□ 2018.10월 : 설치 완료.

붙임 : 항온항습기 압축기 장착위치 변경 검토보고 1부.  끝.