현장실정보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 한강공원 야외 수영장 보수공사(토목분야)

나. 공사기간 : 2016. 03. 23. ~ 2016. 09. 30.

다. 공사개요 :  타일시공 8,796㎡ ,수성페인트칠 2,997㎡,탑코팅 11,267㎡

라. 도급금액 : 1,321,402,870원

마. 도 급 자 : 목양건설(주)

바. 발 주 청 : 서울특별시 한강사업본부

사. 감 독 자 : 서울특별시 한강사업본부 (기반시설과)

2		보고내용

가. 내용 : 한강사업본부 기반시설과 현장점검 지적사항에 대한 개선방안을 실정보고하라는 지시와 관련하여 현장조사 후 아래와 같이 실정보고를 하오니 검토바랍니다.

1) 뚝섬 수영장 바닥타일 시공으로 인한  급수구교체 :

성인풀[75개] + 어린이풀[17개] = 총92개

2) 수영장 바닥타일 시공으로 인한  수조내 배수구인상 :

뚝섬[5개소] + 여의도[5개소] + 망원[2개소] = 총12개소

나. 주요 공종 물량산출

공 종	규 격	수량	개략공사비	비 고
급수구교체	STS304, 125A, 50A	92개	9,967,760
수조배수구인상	2m*1m	12개소	3,050,740
합계			13,018,500

다. 개략공사비 : (증) 13,018천원

* 따로붙임 : 1. 물량산출 및 공사비산출 내역서 1부.

2. 현황사진 1부.                     끝.