가로수 관리시설 정비 추진현황

< 조경과 >

인도(人道) 10계명』추진과 관련 보행지장 가로수 및 관리시설에 대한 정비를 추진하여, 가로수로 인한 보행불편사항을 적극 해소하고자 함

□ 사업 개요

○ 위    치 : 종로구 종로 등 1,327개 노선

○ 사업규모 : 띠녹지 정비 54㎞, 가로수보호판 정비 17,307조 등

○ 사업기간 : 2014 ~ 2019년 이후

○ 사업내용

- 빗물유입 화단조성, 가로수 메워심기, 뿌리융기 가로수 정비, 보호판 정비 등

○ 소요예산 : 18,424백만원

○ 시설현황

시 설 명		총계	시설 현황		비고
			정비대상	비대상
가로수	뿌 리 융 기	303,144	8,621	294,523
	공 분	303,144	2,357	300,787
	보 호 판	212,200	17,307	194,893	도급공사
	유효 보도폭	303,144	8,246	294,898
	띠녹지 경계턱 (km)	428.6	54	374.6

□ 추진 경과

○ 2013. 12. : 보행지장 가로수 전수조사(자치구 공원녹지과)

- 보도중앙 위치, 유효보도폭 미만, 뿌리 융기, 가로수보호판 파손 등

○ 2014. 3. 11 : 2014년 가로수 및 관리시설물 정비계획 수립(조경과)

○ 2016. 2. 05 : ′16년 가로수 생육환경개선 사업계획 수립·시달

작 성 자	조경과장 :이원영☎2133-2100 조경관리팀장 :조윤래☎2122 담당 : 이진범☎2124

□ 2016년 정비 계획 및 실적

○ 정비 계획 및 실적                             (2016.12.15. 기준)

정비 대상		정비 계획(2016년도)		정비 실적(누적치)				비고
				11월 말 기준		12월 15일 기준
시설물	정비내용	수 량	편성예산 (백만원)	계획(목표)	실 적	계획(목표)	실 적
가로수	소 계		1,430
	뿌리융기	1,000	100	900	2,798	1,000	2,922
	보호판 파손(도급)	1,200	480	1,100	3,312	1,200	3,487
	공분 메워심기	300	300	270	669	300	691
	유효보도폭 미확보	100	100	90	145	100	145
	띠녹지 경계턱	3	450	2.7	2.7	3	3.9

○ 정비실적 자체평가 결과

정비대상		자체 평가 내용(12월15일 기준 목표대비 실적)			부진 사유
		정 상 (100%)	지 연 (80% 미만)	부 진 (60% 미만)
가로수	뿌리융기	●
	보호판 파손(도급)	●
	공분 메워심기	●
	유효보도폭 미확보	●
	띠녹지 경계턱	●

○ 주요정비 전후 전경

	▶
뿌리융기 정비 전		뿌리융기정비 후

	▶
보호판 정비 전		보호판 정비 후

	▶
공분 메워심기 전		공분 메워심기 후

	▶
유효보도폭(지장) 가로수 정비 전		유효보도폭(지장) 가로수 정비 후

	▶
경계턱 낮추기 정비 전		경계턱 낮추기 정비 후

□ 정비 계획(2017~2019)

○ 정비 계획

정비 대상		정비 계획 (2017년도)		정비 계획 (2018년도)		정비 계획 (2019년도)		비고
시설물	정비내용	수 량	편성예산 (백만원)	수 량	편성예산 (백만원)	수 량	편성예산 (백만원)
가로수	소 계		1,350		1,350		1,350
	뿌리융기	200	20	200	20	200	20	사대문안
		800	80	800	80	800	80	사대문밖
	가로수 보호판	200	80	200	80	200	80	사대문안
		800	320	800	320	800	320	사대문밖
	공분 메워심기	50	50	50	50	50	50	사대문안
		250	250	250	250	250	250	사대문밖
	유효보도폭 확보	20	20	20	20	20	20	사대문안
		80	80	80	80	80	80	사대문밖
	띠녹지 경계턱	0.7	100	0.7	100	0.7	100	사대문안
		2.3	350	2.3	350	2.3	350	사대문밖

□ 현안 사항

○ 유효보도폭 미확보된 보도상 가로수 정비

- 정비물량 : 약 8,200주

- 발생유형 : 보도중앙 위치, 최소 유효보도폭(1.5m) 미확보

- 고려사항 : 환경오염 저감과 녹음제공 등 공익적 기능이 많음

- 정비방향 : 2017년 가로수 관리계획 연구 용역 등을 통해 도로 유형별 분류하여 그에 따른 차별화된 처리계획 수립

□ 향후 계획

○ 가로수 생육환경 개선사업 시행

- 인도10계명 사업과 연계하여 자치구별 가로수 생육환경 개선사업 시행

(‘17. 3. ~ 11)

○ 가로수 관리계획 연구용역 시행

- 서울시 가로수 관리계획(10년 계획) 연구용역 시행(‘17. 5. ~ ’18. 4)