건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	2018 연등회 축제 행사 관련 준공기한 연기 검토
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사	검 토 자	책임건설사업관리기술자 강 종 빈
검토기간	2018. 04. 16. ∼ 2018. 04. 19.	회신공문
근거공문	천마산(종로)18-059호, 도성2018-2022

□ 개   요

「종로 중앙버스전용차로 설치공사」중 2018 연등회 축제 행사 관련 준공기한 연기 검토에 대한    적정성을 검토함.

□ 현  황

○ 준공기한 연기 신청 사유

- 2018 연등회 축제 행사로 지원으로 인한 연기

○ 관련근거

- ‘18.03.23 :  2018년 연등회 및 봉축행사 협조요청의 건(대불봉 제2018-099호)

- ‘18.04.03 :  2018 연등축제 개최에 따른 협조요청(문화예술과-4619호)

- ‘18.04.10 : 2018 연등회 축제 행사관련 준공기한 연기 검토(본부-18-3498호)

○ 시공사

구 분	당 초	변 경	증 감
준공기한	2017.08.29. ∼ 2018.04.30	2017.08.29 ∼ 2018.06.30	2개월
공사금액	7,673,102,000	7,673,102,000	변경없음

※ 투입비는 실비 정산 요구

○ 감리단

구 분	당 초	변 경	증 감
준공기한	2017.08.21. ∼ 2018.05.31	2017.08.21 ∼ 2018.06.30	1개월
공사금액	411,500,000	411,500,000	변경없음
	감리4인 (토목3인,전기1인)	감리2인,비상주5%

○ 건설폐기물 처리용역

구 분	당 초	변 경	증 감
준공기한	2017.09.13. ∼ 2018.04.30	2017.09.13. ∼ 2018.06.30	2개월
공사금액	521,065,000	521,065,000	변경없음

□ 결 론

- 준공 기한에 대해 검토한 결과, 5월 연등행사 및 마무리 작업등을 고려하여 공사

기한을 ‘18.06.30까지 연기하는 것은 적정한 것으로 판단됨. 끝.

밤고개로 확장공사외1 건설사업관리용역                                  책임건설사업관리기술자  강    종   빈