계약심사(일상감사) 결과

□ 연    번: 2023-227

□ 공 사 명: 옥인동 정비기반시설 조성공사(소로3-1, 골목길)

□ 사업개요

위 치	옥인동 47번지 일대
공사개요 (설계변경)	하수관매설(106m → 204m), 아스콘포장(16.21 → 21.21a), 보강토옹벽(160㎡) 등
공사기간	2022.08.04 ~ 2023.06.30
예산과목	주택정책실 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을 만들기 추진, 주거지 재생사업 추진, 옥인동 역사문화형 주거환경개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 심사평가 결과

◦	당초금액:	449,298	천원
◦	변경금액:	693,388	천원	증)	244,090
◦	심사금액:	690,266	천원
◦	절 감 액:	3,122	천원
◦	절 감 률:	1.28	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 신규 일위대가

- 14호표 화강석 판석 계단. 석공 0.35인 → 0.284인 적용(서울형 품셈 및 연간단가 사업)

◦ 자재단가

- 지오그리드 9,500원/㎡ → 7,048원/㎡ (실적공사비 적용)

◦ 기존 물량에 대한 단순 증·감 심사제외

□ 그 밖의 사항

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 절감된 예산을 동일사업에 다시 사용하는 경우에는 예산부서와 사전협의를 거쳐야 함

◦ 제경비 정산철저 : 기성대가 및 준공대가 지급 시 정산 철저

- 고용개선지원비(주휴수당)는 서울시 매뉴얼에 따라 정산

- 산재보험료, 고용보험료는 가입내역을 확인하여 정산

- 건강보험료, 연금보험료는 지출내역을 확인하여 정산

- 청소인건비, 청소도구(빗자루, 쓰레받이 등) 구입비용은 환경보전비로 정산 불가
→ 부대비용(경비)으로 계상

- 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용 (계약금액조정 검증시스템 - 산업안전보건관리비 정산 검토 이행)

◦ 관급자재비 및 이설비는 심사 제외