우이~신설 1공구 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	109,927	135,442	물가변동	43,897	36,591	31,801	4,790			13,228
시설비	107,021	132,429	물가변동	42,404	35,945	31,155	4,790			12,828
감리비	2,906	3,013	물가변동	1,493	646	646				400

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	13,228
․ 시설비등	12,828
공 사 비	12,828	1. 토목분야 7,842백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 차량기지 4,266백만원 - 토공 : 7,000㎥ × 79천원 = 550백만원 - 구조물공 : 8,300㎥ × 360천원 = 2,986백만원 - 되메우기 : 4,500㎥ × 162천원 = 730백만원 • 정거장 2,592백만원 - 토공 : 33,000㎥ × 79천원 = 2,592백만원 • 본선개착 984백만원 - 토공 : 2,800㎥ × 79천원 = 220백만원 - 구조물공 : 1,800㎥ × 360천원 = 648백만원 - 되메우기 : 715㎥ × 162천원 = 116백만원 2. 건축분야 1,351백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 차량기지 1,351백만원 - 가설공사 : 1식 × 240,561천원 = 241백만원 - 골조공사 : 1식 × 804,291천원 = 804백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 306,026천원 = 306백만원 3. 기계분야 1,949백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 차량기지 768백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 507,320천원 = 507백만원 - 위생배관공사 : 1식 × 260,971천원 = 261백만원

구 분	2014 요구	산 출 내 역
		• L01정거장 414백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 185,201천원 = 185백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 47,161천원 = 47백만원 - 승강기설치공사 : 1식 × 181,408천원 = 181백만원 • L02정거장 397백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 172,320천원 = 172백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 51,359천원 = 51백만원 - 승강기설치공사 : 1식 × 173,414천원 = 173백만원 • L03정거장 369백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 145,917천원 = 146백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 50,520천원 = 51백만원 - 승강기설치공사 : 1식 × 172,984천원 = 173백만원 4. 일반전기분야 1,686백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 차량기지 871백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 576,494천원 = 576백만원 - 동력공사 : 1식 × 81,160천원 = 81백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 34,446천원 = 34백만원 - 전등공사 : 1식 × 111,097천원 = 111백만원 - 전열공사 : 1식 × 67,880천원 = 68백만원 • L01정거장 224백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 54,886천원 = 55백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 139,361천원 = 139백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 10,063천원 = 10백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 19,609천원 = 20백만원 • L02정거장 299백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 54,886천원 = 55백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 204,699천원 = 205백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 18,179천원 = 18백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 21,282천원 = 21백만원 • L03정거장 292백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 54,886천원 = 55백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 197,970천원 = 198백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 17,105천원 = 17백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 21,632천원 = 22백만원
․ 감 리 비	400	- 상주감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원 - 기술지원감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원

우이~신설 2공구 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	118,540	146,554	물가변동	40,593	47,090	38,768	8,322			31,093
시설비	115,746	143,641	물가변동	39,002	46,322	38,000	8,322			30,831
감리비	2,794	2,913	물가변동	1,591	768	768				262

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	31,093
․ 시설비등	30,831
공 사 비	30,831	1. 토목분야 26,678백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 정거장 8,814백만원 - 토 공 : 30,755㎥ × 76천원 = 2,342백만원 - 구조물공 : 12,000㎥ × 345천원 = 4,142백만원 - 되메우기 : 18,000㎥ × 129천원 = 2,330백만원 • 본선개착 14,147백만원 - 토 공 : 60,000㎥ × 76천원 = 4,569백만원 - 구조물공 : 15,000㎥ × 345천원 = 5,178백만원 - 되메우기 : 34,000㎥ × 129천원 = 4,401백만원 • 본선터널 3,716백만원 - 굴 진 : 150m ×10,031천원 = 1,505백만원 - 라 이 닝 : 600m × 3,686천원 = 2,212백만원 2. 건축분야 732백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L04정거장 485백만원 - 가설공사 : 1식 × 60,905천원 = 61백만원 - 골조공사 : 1식 × 188,403천원 = 188백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 235,235천원 = 235백만원 • L05정거장 147백만원 - 가설공사 : 1식 × 27,435천원 = 27백만원 - 골조공사 : 1식 × 92,532천원 = 93백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 27,429천원 = 27백만원

구 분	2014 요구	산 출 내 역
		• L06정거장 47백만원 - 가설공사 : 1식 × 34,334천원 = 34백만원 - 골조공사 : 1식 × 12,354천원 = 12백만원 • L07정거장 53백만원 - 가설공사 : 1식 × 37,281천원 = 37백만원 - 골조공사 : 1식 × 15,818천원 = 16백만원 3. 기계분야 2,071백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L04정거장 431백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 174,354천원 = 174백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 57,007천원 = 57백만원 - 승강기공사 : 1식 × 199,430천원 = 199백만원 • L05정거장 432백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 178,376천원 = 178백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 57,608천원 = 58백만원 - 승강기공사 : 1식 × 196,060천원 = 196백만원 • L06정거장 557백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 174,879천원 = 175백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 63,796천원 = 64백만원 - 승강기공사 : 1식 × 318,038천원 = 318백만원 • L07정거장 652백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 196,406천원 = 196백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 56,830천원 = 57백만원 - 승강기공사 : 1식 × 398,601천원 = 399백만원 4. 일반전기분야 1,349백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L04정거장 410백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 16,309천원 = 16백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 386,251천원 = 386백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 7,412천원 = 7백만원 • L05정거장 106백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 8,101천원 = 8백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 91,261천원 = 91백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 6,879천원 = 7백만원 • L06정거장 228백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 8,101천원 = 8백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 212,723천원 = 213백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 7,300천원 = 7백만원 • L07정거장 605백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 9,517천원 = 10백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 588,546천원 = 589백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 7,059천원 = 7백만원
․ 감 리 비	262	- 상주감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원 - 기술지원감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원

우이~신설 3공구 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	99,878	123,792	물가변동	24,409	40,691	34,048	6,643			29,397
시설비	96,798	120,587	물가변동	22,711	40,089	33,446	6,643			28,668
감리비	3,080	3,205	물가변동	1,698	602	602				729

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	29,397
․ 시설비등	28,668
공 사 비	28,668	1. 토목분야 25,331백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 정거장 11,516백만원 - 토 공 : 35,210㎥ × 76천원 = 2.684백만원 - 구조물공 : 23,000㎥ × 367천원 = 8,445백만원 - 되메우기 : 5,000㎥ × 77천원 = 387백만원 • 본선터널 13,814백만원 - 굴 진 : 1,100m × 10,042천원 = 11,047백만원 - 라 이 닝 : 750m × 3,690천원 = 2,768백만원 2. 건축분야 239백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L08정거장 79백만원 - 가설공사 : 1식 × 36,504천원 = 37백만원 - 골조공사 : 1식 × 21,392천원 = 21백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 21,041천원 = 21백만원 • L09정거장 71백만원 - 가설공사 : 1식 × 35,618천원 = 36백만원 - 골조공사 : 1식 × 17,894천원 = 18백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 17,000천원 = 17백만원 • L10정거장 89백만원 - 가설공사 : 1식 × 40,293천원 = 40백만원 - 골조공사 : 1식 × 21,670천원 = 22백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 27,106천원 = 27백만원

구 분	2014 요구	산 출 내 역
		3. 기계분야 1,849백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L08정거장 637백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 184,187천원 = 184백만원 - 승강기공사 : 1식 × 452,603천원 = 453백만원 • L09정거장 563백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 206,393천원 = 206백만원 - 승강기공사 : 1식 × 356,407천원 = 356백만원 • L10정거장 650백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 209,000천원 = 209백만원 - 승강기공사 : 1식 × 440,755천원 = 441백만원 4. 일반전기분야 1,250백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L08정거장 464백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 6,739천원 = 7백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 384,715천원 = 385백만원 - 동력공사 : 1식 × 22,570천원 = 23백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 10,547천원 = 11백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 39,172천원 = 39백만원 • L09정거장 366백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 3,761천원 = 4백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 299,976천원 = 300백만원 - 동력공사 : 1식 × 20,141천원 = 20백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 9,317천원 = 9백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 32,858천원 = 33백만원 • L10정거장 420백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 3,546천원 = 4백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 353,058천원 = 353백만원 - 동력공사 : 1식 × 15,121천원 = 15백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 9,014천원 = 9백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 39,461천원 = 39백만원
․ 감 리 비	729	- 상주감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원 - 기술지원감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원

우이~신설 4공구 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	103,927	128,045	물가변동	36,973	43,393	33,967	9,426			35,517
시설비	100,609	124,576	물가변동	35,167	42,361	32,935	9,426			35,070
감리비	3,318	3,469	물가변동	1,806	1,032	1,032				447

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	35,517
․ 시설비등	35,070
공 사 비	35,070	1. 토목분야 31,453백만원 ● 세부내역(경상가기준) • 정거장 9,778백만원 - 구조물공 : 22,051㎥ × 367천원 = 8,085백만원 - 되메우기 : 18,800㎥ × 90천원 = 1,693백만원 • 환기구 1,542백만원 - 구조물공 : 2,780㎥ × 367천원 = 1,019백만원 - 되메우기 : 5,800㎥ × 90천원 = 522백만원 • 본선터널 20,133백만원 - 굴 진 : 960m × 10,028천원 = 9,627백만원 - 라 이 닝 : 2,851m × 3,685천원 = 10,506백만원 2. 건축분야 407백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L11정거장 79백만원 - 골조공사 : 1식 × 6,794천원 = 7백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 71,767천원 = 72백만원 • L12정거장 127백만원 - 골조공사 : 1식 × 6,618천원 = 7백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 120,409천원 = 120백만원 • L13정거장 201백만원 - 가설공사 : 1식 × 56,124천원 = 56백만원 - 골조공사 : 1식 × 16,180천원 = 16백만원 - 내부마감공사 : 1식 × 128,642천원 = 129백만원

구 분	2014 요구	산 출 내 역
		3. 기계분야 2,185백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L11정거장 776백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 391,113천원 = 391백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 65,417천원 = 65백만원 - 승강기공사 : 1식 × 319,487천원 = 319백만원 • L12정거장 669백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 389,570천원 = 390백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 58,981천원 = 59백만원 - 승강기공사 : 1식 × 220,081천원 = 220백만원 • L13정거장 740백만원 - 공조닥트공사 : 1식 × 339,264천원 = 339백만원 - 자동제어공사 : 1식 × 67,720천원 = 68백만원 - 승강기공사 : 1식 × 333,088천원 = 333백만원 4. 일반전기분야 1,025백만원 ● 세부내역(경상가기준) • L11정거장 450백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 13,025천원 = 13백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 382,098천원 = 382백만원 - 동력공사 : 1식 × 16,739천원 = 17백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 17,994천원 = 18백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 19,956천원 = 20백만원 • L12정거장 271백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 12,776천원 = 13백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 225,355천원 = 225백만원 - 동력공사 : 1식 × 13,422천원 = 13백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 10,643천원 = 11백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 8,913천원 = 9백만원 • L13정거장 304백만원 - 수변전실공사 : 1식 × 14,772천원 = 15백만원 - 전력간선공사 : 1식 × 254,161천원 = 254백만원 - 동력공사 : 1식 × 15,361천원 = 15백만원 - 조명제어공사 : 1식 × 10,711천원 = 11백만원 - 터널전등공사 : 1식 × 8,913천원 = 9백만원
․ 감 리 비	447	- 상주감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원 - 기술지원감리원 인 × 12개월 × 천원 = 백만원

우이~신설 시스템공구 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	114,966	145,244	물가변동	8,851	83,336	78,317	5,019			39,972
시설비	111,114	141,392	물가변동	8,424	82,076	77,057	5,019			39,267
감리비	3,852	3,852	물가변동	427	1,260	1,260				705

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	39,972
․ 시설비등	39,267
공 사 비	39,267	1. 신호분야 : 17,100백만원 - 현장반입 및 설치공사 : 1식 × 17,099,645천원 = 17,100백만원 2. 통신분야 : 4,539백만원 - 정거장 통신공사 및 개별시험등 : 1식 × 4,538,991천원 = 4,539백만원 3. 송변전분야 : 5,144백만원 - 수전선로 및 변전장비 설치공사 : 1식 × 5,144,477천원 = 5,144백만원 4. 전차선분야 : 전차선공사 등 2,438백만원 5. 궤도분야 : 궤도부설공사 등 8,965백만원 6. SE : 반기별 보고서 등 843백만원 7. MIS : 237백만원 - 반입 및 설치공사 : 1식 × 236,746천원 = 237백만원
․ 감 리 비	705	- 시스템 : 512백만원 - 궤도 : 193백만원

우이~신설 운영설비분야 세부산출내역

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비			기투자 (2012 이 전)	2013					2014 요 구	비고
	당초	변경	증감사유		예산	결산전망
						집행액	이․전용	이월	불용
계	66,162	85,778	물가변동	7,977	51,594	51,594				938
시설비	66,162	85,778	물가변동	7,977	51,594	51,594				938

□ 2014년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	938
․ 시설비등	938
운영설비비	938	1. 제1~2편성 공장시험 : 938백만원 (편성당 469,000천원 X 2편성)
․ 감 리 비