공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 화곡고가 내진보강공사

2. 위    치 : 양천구 신월동 455 ~ 강서구 화곡동 889

3. 사업시행 목적

최근 지진발생 횟수가 증가 추세에 있고 내진 부족 시설에 대한 보강이 요구되고 있는 실정으로 금번 화곡고가에 대한 내진 보강공사를 시행하므로써 지진발생 시 시설물의 안전성 확보 등 시민생활 안전도모

4. 사업개요

○ 교량인상 48개소, 교량받침 교체 32개, 신축이음설치 20m 등

○ 총공사비 : 410,027천원(도급비 362,393천원, 관급비 42,634천원, 이전비 5,000천원)

5. 공사기간 : 착공일로부터 2018. 12. 31까지

6. 하자담보책임기간 : 준공일로부터 3년

○「건설산업기본법시행령 제30조 별표4 하자담보책임기간 적용.

7. 신기술 및 특허관련

○ 본 공사는 특허가 적용되는 공사로 기술보유자와 서울시가 사용협약서를 체결하여 시공

특허번호	신기술(특허)명	내용	특허권자
제10********호	MAS공법	상부구조물인상유닛, 교량의 상부구조물 인상장치 및 이를 이용한 교량의 상부구조물 동시인상공법	포엠 주식회사

8. 현장설명 및 설계도서 열람장소

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 15조, 제3항에 의거 현장설명은 생략

○ 설계도서 열람 문의: 강서도로사업소 시설보수과 (담당자 강연홍, 02-2657-7971)

9. 기타사항

○ 계약상대자는 착공시 현장조사를 실시하여 설계서와 현장여건상 적합여부를 확인하여 설계상의 오류 등에 대하여는 발주청에 서면 보고하여야 한다

○ 연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비, 안전관리비 등의 정산과목은 증빙서류를 제출하여 준공시 정산

○ 관급자재 : 교량받침 32개

10. 공사예정 공정표

일정 공종	30			60			90			2018.12.31. 까지			비 고
현장조사, 시공준비
교량인상 및 받침교체
현장정리 및 준공처리
공 정(%)	20			35			35			10
누계공정(%)	20			55			90			100