공  사  설  명  서

□ 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선공사(신설동오거리)

□ 공사위치 : 동대문구 신설동 53-3(신설동역),

종로구 숭인동 200-6(농협신설동지점)

□ 공사기간 : 착공일로부터 ～ 2018. 12. 31.

□ 총공사비 :  91,000,000원

○ 도 급 비 :     79,587,000원

○ 도 급 비 :     11,413,000원

□ 공사개요

○ 교통신호기 설치 1식

□ 공사목적

○ 본 공사는 종로 중앙버스전용차로의 교통흐름을 개선하기 위한 공사임.

□ 공사 예정공정표

일 정 공 종	착공일로부터 ~ 2018.12.31까지																		비고
	7월			8월			9월			10월			11월			12월
착공 및 기자재 준비
제어기 신설 및 교체
신호등 신설 및 교체
지주 신설 및 교체
케이블교체 및 기타
공 정 율(%)	10			20			20			20			20			10
누 계 공 정 율(%)	10			30			50			70			90			100