해빙기대비 공사장 특별 안전점검 결과(총괄)

[ 시설국] : 27개 현장

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과(예정일)
1	강남순환4공구 (4건)	2/25	강병윤 하상우 (김삼식, 김학지)	○ 강재거푸집 관리사항 - P6 교각 시공을 위한 코핑부 강재거푸집의 강판결손이 심하여 시멘트 페이스트 누수 등으로 안한 교각의 강도가 곤란할 것으로 판단되므로 구조적 지지 가능여부에 대해 안전성 검토후 시공요함 ○ Tie-Bolt하단 균열 관리사항 - P9교각의 Tie-Bolt하단에 발생된 균열들은 콘크리트가 밀실하게 충진되지 않은 상태에서 양생되어 발생된 손상으로 판단되므로 향후 품질확보를 위한 방법을 검토후 시공하여야 할것으로 판단됨 ○ 가벤트 설치구간 관리사항 - P6가벤트 설치구간 기초부 성토는 일정 성토재료 사용 및 동결되지 않은 재료를 사용하고 성토부 침하에 따른 기초콘크리트 지지력 및 침하 안전성확보 관리요함 ○ 철근 녹제거사항 - P6이음부 철근은 장기간 노출로 녹이 발생되고 있으니 녹 제거후 시공바람	○ 조치 중 - 결손부위 용접처리후 코핑 거푸집 거치할 예정임 ○ 조치완료 - 차후 Con'c 타설시 다짐작업을 철저히하여 재료분리 및 균열을 최소화하고, Con'c구조물에 발생하는 균열에 대해 조사 및 관리 기록후 균열보수를 완료 하겠음. ○ 조치완료 - 가벤트 기초부 성토시 일정 성토재료를 사용하여 다침후 평판재하시험을 실시하여 지지력이 확보된후 기초 Con'c 타설을 하여 안전성 확보하겠음. ○ 조치완료 - P6 이음부 노출철근 녹제거 및 방청처리 실시후 후속작업 진행하겠음.
2	강남순환5공구 (1건)	2/25	강병윤 하상우 (김삼식, 김학지)	○ 방수보호재 관리사항 - 시점부 환기소 외부측벽 되메우기 부분 침하에 따라 구조물 방수Sheet 보호재 손상부분은 보완바람	○ 조치완료 - 시점부 환기소 외부측벽 방수 Sheet 보호재 손상부분 보완조치 완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과(예정일)
3	강남순환6-1공구 (4건)	2/20	김은겸 이문희 (김삼식, 김학지)	○ 사면부 녹생토 시공관리사항 - 터널갱문사면 해빙에 따른 녹생토 손상부 및 풀이나지 않은 부분은 보완요함 ○ 가시설 관리사항 - 어스앵커 이완부 점검하여 필요할 경우 재긴장할 필요가 있음 ○ TRcM 벽체부 시공사항 - TRcM 벽체부 수화균열 발생 가능성이 있으므로 양생온도 및 보온양생시트 관리를 철저히 하는것이 바람직함 ○ TRcM구간 공정추진에 따른 수방대책수립 - 도림천에 연결된 관을 통하여 현장저류시에 대한 대책 및 TRcM시공구간 침수방지를 위한 방수벽 설치 검토요함	○ 조치예정(3/25~29) - 녹생토 손상부에 대하여 보완 시공(재취부) 예정 ○ 조치완료 - 어스앵커 긴장상태에 대하여 육안점검 결과 이상없으며 지속적으로 관리하겠음 ○ 조치완료 - 동절기 시공관리계획에 따라 보온양생(열풍기, 보온천막, 할로겐등) 및 온도관리(자기온도계, 수화열 측정기)를 실시하고 있음 ○ 조치예정(협의) - 우기전 물관리국과 협의하여 현장 임시저류시 TRcM시공구간 침수방지 대책수립 예정
4	강남순환6-2공구 (3건)	2/20	김은겸 이문희 (김삼식, 김학지)	○ 사면부 녹생토 시공관리사항 - 남태령쪽 터널 갱구부 녹생토 손상부 및 풀이나지 않은 부분은 보완요함 ○ 가시설 관리사항 - 어스앵커 이완부 점검하여 필요할 경우 재긴장할 필요가 있음 ○ 콘크리트 타설부 보온양생사항 - 갱구부 부근 라이닝 콘크리트 타설시 동해를 입지 않도록 보온양생을 철저히 할 것	○ 조치예정(4.15한) - 사면부 녹생토 손상부 및 풀이 나지 않는 부분에 대하여 2013년 4.15까지 보완조치 완료하겠음 ○ 조치완료 - 시점부 가시설내 감리단.시공사 합동 어스앵커 점검결과 이상이 없으며, 정기적으로 점검을 하여 어스앵커 이완부 발견시 즉시 재긴장 하겠음 ○ 조치완료 - 콘크리트 타설시 보온양생을 철저히 실시하고 있으며, 앞으로도 품질관리에 만전을 가하고 있음.(횡갱부 천막 설치, 갱문폐쇄, 열풍기 가동 등)

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과(예정일)
5	강남순환7-1공구 (2건)	2/19	김양중 이송 (김삼식, 김학지)	○ 절토부 측면 사유지 상단 부석정리 - 절토부 측면 사업지구밖 사유지 상단에 부석이 많아 해빙기시 탈락 및 낙하 등이 발생할 수 있으니 해당부서에 통보하여 위험요소를 제거토록 조치바람 ○ 절토사면 녹생토 시공구간 관리사항 - 시점부 사면의 녹생토시공구간의 일부는 녹생토 mesh가 보이므로 최대한 빨리 면처리 할 것	○ 조치완료 - 서초구 공원녹지과에 공문발송 완료 ○ 조치완료 - SF녹화공법중 발파암구간 취부두께는 5cm이므로 일부철망노출이 불가피한 실정이나 추후 발아시 미관상 저해요소가 해소될 예정이며, 향후 1,2단 사면 추가 시공 시 추가 면처리도 검토하겠음
6	강남순환7-2공구 (1건)	2/20	이규웅 이장섭 (정삼기, 홍광호)	○ 사면관리사항 - 장기간 공사가 중단되어 공사에 따른 특별한 지적사항은 없으나, 선암터널 갱구부 사면은 시공된 지 3년 이상이 되었으므로 주기적으로 사면 관찰 요함 (안전점검 수시시행)	○ 조치완료 - 감리단 및 시공사가 정기적으로(월 1회) 터널 갱구부사면 관찰 및 점검토록 하겠음
7	강남순환8공구 (3건)	2/19	김양중 이송 (김삼식, 김학지)	○ 구조물 누수구간 시공사항 - 구룡지하차도 일부 누수구간은 현재 건기상태이므로 우기에 대비하여 외벽방수를 빨리하고 내부도 누수대책을 세울것 ○ 복공판위 과중한 적치지양 - 구룡지하차도 되메우기를 위하여 되메우기 토사를 과도하게 적치되지 않도록 주의요망 ○ 시공관리사항 - 콘크리트 타설시 시공Joint 부분의 다짐관리를 잘하도록 할것	○ 조치완료 - 외벽방수조치, 내부 누수구간 보수완료 및 누수대책 수립함 ○ 조치완료 - 향후 되메우기시 집중하중이 발생하지 않도록 토사를 넓게 분포토록 교육 실시 ○ 조치완료 - 콘크리트 타설공 및 관리감독자 교육실시

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과(예정일)
8	서빙고 고가교 및 강변북로 연결도로공사 (6건)	2/18	조선규 김용준 (신정, 조태현)	○ 기존교량 철거 관련사항 - 기존 교량 철거 공사중 안전관리시설 및 교통처리계획의 철저한 검토와 조치 및 이에 따른 합리적 시행이 요망됨 ○ 사보강재 용접 관련사항 - 사보강재(기둥과 주거더의 사방향 지거 부재)를 연결부재(기둥과 주거더)에 이음처리 함에 있어 복부판 만을 용접으로 접합시켰으나, Flange부도 접합시킴이 효율성을 증대시킬 수 있으므로 검토가 요망됨 ○ 가설Bent 관련사항 - 가설 Bent의 부재 연결부에 있어, 기둥부재와 수평지지 부재(strut)와의 접속부에 Gap이 있으므로, 이의 밀착시공이 요구됨 ○ 공사장 환경정비 사항 - 공사 종점부에 방치된 공사자재 (모래주머니 등) 정비 요함 ○ 공사장 교통처리 사항 - 가설 교량구간에 대한 교통처리를 위한 안내표지판을 정비 할 것 ○ 기존교량 관련사항 - 철도 횡단구간의 기존 교량(steel Box girder교) 사용은 현재의 구조적 기능 상태 확인이 필요함. · 부재의 변형 및 손상상태 (국부적 손상 포함) · 용접상태 및 splice부의 안전성 상태 · 도장 및 부식 상태 등	○ 조치완료 - 공사중 교통소통대책 심의 결과에 따라 단계별 시행예정 ○ 조치완료 - 사보강재 플랜지부분 용접 완료 ○ 조치완료 - 즉시조치 완료 ○ 조치완료 - 즉시조치 완료 ○ 조치완료 - 즉시조치 완료 ○ 조치완료 - 기본 및 실시설계 종합보고서의 정밀안전 진단결과 지적사항에 대한 내용은 양호한 상태로 평가되었음
9	암사대교건설공사 (2건)	2/19	김상효 이영우 (신정, 조태현)	○ 노출 제방사면 관리사항 - 북측 제방면의 법면 보호블럭이 일부 철거된 부분에 대한 유실방지막을 설치할 것 ○ 폐기물 반출사항 - 북측 고수부지에 적치되어 있는 공사물 잔재를 정리하도록 할 것	○ 조치완료 - 북측 제방면의 법면 보호블럭 철거구간 사면보호천막 설치 완료 ○ 조치완료 - 북측 고수부지에 적치되어 있는 공사물 잔재 분진망 설치 완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과(예정일)
10	헌릉로 연결도로 (강남순환접속) (4건)	2/18	조선규 김용준 (신정, 조태현)	○ 굴착사면 관리사항 - 성남방향 진출 Ramp측의 우측 토사 절취부에 대한 사면 안정성(해빙기를 맞이하여) 검토가 필요함. 특히 나무뿌리가 돌출된 구간에서는 나무의 제거 또는 덮개 재료를 설치하여 외부로부터 우수 유입이 차단되도록 조치 필요함 ○ 스라브 및 타일 얼룩 제거사항 - 경부고속도로 하부 지하차도 종점부 스라브 및 측면 타일 얼룩에 대한 원인 규명 및 얼룩 제거 요함 ○ joint부 관련사항 - 경부고속도로 횡단 지하 BOX 구조물에 있어 U-Type구간의 Joint(construction -joint and contraction-joint) 및 U-Type 옹벽과 지하 BOX culvert 구조의 연결부 마감처리가 매끄럽지 못함. 따라서 균열 발생의 상태 처리를 자연스러운 형태로 유도하기 위하여 실런트 채움 시공의 정밀 작업이 요구됨 ○ 시트방수 이음구간 보완사항 - 헌릉지하차도 종점부 외벽 시트방수 이음구간이 미비하여 누수 예상되니 보완요함	○ 조치완료 - 성남방향 진출 Ramp-D 사면안정성 검토는 실시하여 이상이 없는 것으로 판단하였으며, 돌출된 나무제거 및 천막덮개 설치하여 외부우수 유입방지 하였음. ○ 조치완료 - 경부고속도로 하부 지하차도 종점부 스라브 및 측면타일 얼룩제거 완료하였고, 타일얼룩은 중성화방지 도막 시공과정에서 발생하였음 ○ 조치완료 - 경부고속도로 횡단 지하 BOX 구조물 Joint 및 U-TYPE 구조물과 BOX 구조물 사이의 마감처리 미흡부분 실런트 채움 실시 ○ 조치완료 - 헌릉지하차도 종점부 외벽 시트방수이음구간 보완 및 보호재 설치완료
11	월드컵대교건설공사 (3건)	2/19	김상효 이영우 (신정, 조태현)	○ 품질관리사항 - 우물통 상부에 교각용 철근이 노출된 상태에서 가물막이를 제거하여, 철근이 상시 수중에 노출되어 부식이 우려됨. - 교각의 하부기초 연결용 철근은 구조적으로 매우 중요한 철근으로 관리를 철저히 하여야 할 것임. - 우물통 타설용 가물막이를 철거하기 이전에 교각 하부를 3m 정도 타설하여 노출된 철근이 수중에 노출되지 않도록 관리하여야 함. 이 경우에도 철근이 부식되지 않도록 철저히 관리하여야 할 것임. ○ 방수 관련사항 - 우물통 벽체와 상부 CAP의 이음부에 대한 방수처리를 철저히 하기 바람 ○ 안전발판 보완사항 - 바지선과 P9 우물통(Cap 철근조립 등) 연결부에 안전발판을 설치하여 작업원의 안전 확보 요함	○ 조치완료 - 현재 수중에 노출된 교각용 철근은 2개소로 철근 방청작업을 하여 수중에서 3개월 이상 녹이 발생되지 않게 사전 조치한 상태이나, - 현장여건 내에서 조속한 시일내 가물막이 거푸집을 설치(5월중순)하여, Dry상태를 만들고 녹이 발생된 철근은 녹제거를 철저히하여 소요 품질을 확보한 후 교각 3m를 시공하겠음 - 그 외 우물통 구간은 현재 CAP 콘크리트 를 시공중에 있으며, 교각하부 3m를 타설시까지 가물막이 거푸집을 설치하여 교각용 철근이 수중에 노출되지 않도록 사전관리 하겠음. ○ 조치완료 - 우물통 벽체와 상부 CAP 이음부는 시공계획과 같이 무수축 모르타르를 활용하여 방수처리 예정으로 품질관리를 철저히 하겠음 ○ 조치완료 - 바지선과 우물통 연결부에 안전발판 조치완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
12	신림~봉천터널 2공구 건설공사 (6건)	2/21	김재성 이섬범 (정삼기, 홍광호)	○ 흙막이가시설 관리에 관한 사항 - 흙막이벽 결빙부분 토류판 부식변형부분 및 배면 Crack부분에 대한 안전보강 조치 - 토류벽 구간 벽면에 얼어 붙어 있는 얼음을 제거하고 안전통로 상의 눈이나 얼음 잔재를 제거하기 바람 ○ 계측관리에 관한 사항 - 사당방향(STA4+976)구간은 당초 지보패턴 TYPEⅤ에서 현장적용패턴은 TYPEⅢ로 적용진행중 Face Mapping 및 RMR값을 근거로 승인을 받고 TYPEⅣ로 변경 적용한 구간임 - 급작스런 암질변화로 패턴 변경 적용 시 반드시 A계측을 하여 지반거동을 종합분석하여 터널안정성 확보하기 바람 ○ 터널 막장관리사항 - 막장이 암질변경이 심한 흑운모 편마암으로 절리면 충진물이 흑색, 백식의 운모가 섞여 있어 풍화상태가 심한 것으로 판단되니, 막장 Face mapping 및 선진수평보링 등에 의해 막장관리를 강화하고 지보재 보강, 발파패턴, 계측위치 등을 적기에 조정 관리하기 바람 (※ 흑운모 편마암 절리 충진물은 풍화가 심해질수록 백색으로 바뀜) ○ 가설전기 관련사항 - 터널내에 설치된 전기배전반에 미설치된 충전부 접촉 방지 덮개를 즉시 설치하기 바라며, - 현장내 설치된 모든 전기시설은 반드시 가설전기 안전 및 사용기준에 의거 누전차단기경유, 접지 및 충전부 접촉 방지 덮개(아크릴) 설치하기 바람 ○ 사면 배수로 정비에 관한 사항 - 사면배면에 쌓여 있는 눈 및 결빙된 잔재물 등은 제거하시고 전반적인 배수로 정비요망 ○ 발파 진동․소음관리 사항 - 발파 진동․소음 계측은 적정하게 시행되는 것으로 판단되나, 소음이 0.5km 떨어진 영어마을에서 73dB정도 되는 것은 관리한계치 이내에 있다고 하더라도 감소시킬 필요가 있음. 발파시 방진커텐, 터널입구부 폐쇄 등 관리를 철저히 하여 발파소음을 최소한으로 줄이기 바람	○ 조치완료 - 배면 Crack발생구간에 대한 계측치 확인결과 변위가 없는 것으로 확인되었으며, Crack발생부위에 지표수 등의 유입으로 인한 배면의 영향을 미치지 않도록 시멘트 밀크 충진후 표면처리 완료 하였음. - 토류벽 벽면 얼음 발생구간 및 안전통로상의 눈과 얼음 잔재를 제거 완료 하였음. ○ 조치완료 - 추후 급작스런 암질변화로 인한 지반거동의 불확실성이 예상되는 구간에 대하여 계측기를 설치하고 분석하여 굴착중 터널의 안정성을 확보하겠음 ○ 조치완료 - 터널 지보패턴 변경시 매 회 암판정을 실시하여 지보변경의 적정성을 확인후 작업을 실시하고 있으며, 필요한 구간에 Face Mapping, 선진수평보링, TSP탐사등의 막장면 관리 시스템을 적기에 적용하여 안정성을 확보하겠음 ○ 조치완료 - 전기배전반내 충전부 접촉 방지 덮개 설치 완료 하였음 ○ 조치완료 - 사면배면부의 눈 및 결빙 제거후 배수로 정비 완료하였음 ○ 조치완료 - 발파시 방진커텐, 갱문출입문 폐쇄등을 실시하여 소음을 최소화 하겠으며 필요시 굴진장, 굴착패턴 변경등을 통하여 소음, 진동 저감 방안을 강구 하겠음

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
13	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 (5건)	2/21	김재성 이섬범 (정삼기, 홍광호)	○ 흙막이가시설 관리에 관한 사항 - 띠장 단면손실부분 단면복구조치하시기 바라며, 토류판 변형부, Crack 부분은 앵글 등으로 보강조치 요망 ○ 계측기 설치에 관한 사항 - 공대폭포 구간에 설치된 계측기(지중경사계 및 지하수위계) 3개소 설치위치가 엄지말뚝에 설치된 바,설계도면대로 흙막이 배면에 재설치 하기 바람 ○ 배전반 설치에 관한 사항 - 배전반에 사용되는 전선이 배선용차단기를 경유하여 사용하고 있는바, 향후 전기 안전사고 예방을 위한 조치로 반드시 누전 차단기를 경유하여 사용되도록 누전 차단기 설치 요하며, - 향후 설치할 전기 시설은 반드시 누전 차단기경유, 접지 및 충전부 접촉방지 덮개등의 조치로 전기 안전사고 예방 하시기 바람 ○ 배수로 관리에 관한 사항 - 흙막이 벽 배면에 쌓여 있는 눈 및 결빙된 잔재물은 제거하시고, 전반적인 배수로 정비하시기 바람 ○ 점검통로 설치사항 - 가시설 벽면이 E/A로 시공되어 있으나 점검통로가 설치되어 있지 않아 E/A점검이 어려울 것으로 판단되니 조치바람	○ 조치완료 - 띠장 단면손실부분 단면복구완료, 토류판 변형부 엑스브레싱설치 , Crack 부분은 철판으로 보강조치 완료 ○ 조치완료 - 흙막이 배면에 3개소 재설치 완료 ○ 조치완료 - 배전반에 사용되는 전선이 누전 차단기를 경유하여 사용되도록 누전 차단기 설치 완료 ○ 조치완료 - 흙막이 벽 배면에 쌓여 있는 눈 제거 완료 ○ 조치완료 - E/A점검할수 있도록 이동식 사다리 설치 완료
14	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 (4건)	2/21	김영욱 이효배 (김삼식. 김학지)	○ 안전시설 설치사항 - 공사시점 한전전력구 설치구간 가시설 단부에 설치된 안전로프를 안전난간 및 안전방망으로 교체하여 설치요함 ○ 자재 정리사항 - 공사시점부 흙막이 단부의 낙하 우려가 있는 자재는 제거조치 바람 ○ 분전반 접지사항 - 공사종점부 분전반에서 인출된 전선(2P)의 접지가 미흡하니 접지선이 포함된 3P전선으로 교체바랍니다. ○ 안전통로(계단) 설치사항 - 한전전력구 설치구간으로 근로자가 안전하게 출입할 수 있도록 안전통로 설치바람	○ 조치완료 - 안전난간 및 안전방망 설치함 ○ 조치완료 - 낙하물 우려자재 등 제거함 ○ 조치완료 - 접지된 콘센트로 연결조치 및 3P전선 교체함 ○ 조치완료 - 안전계단 및 난간, 안전망 설치함

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
15	동부간선도로확장 공사(2공구) (6건)	2/21	김영욱 이효배 (김삼식. 김학지)	○ 가시설 관리사항 - 목재토류판 사이로 누수가 많은 구간은 배면측에서 토립자가 유출되는지 수시로 모니터링 필요함 ○ 소화기 설치사항 - 용접 및 보일러 양생지역에 소화기를 추가 설치하여 화재 예방 ○ 작업자 통행로 관리사항 - 도봉지하차도 4단계 작업계단 하부에 돌출(1개소)되어 있는 파이프에 안전시설(위험표지) 설치 ○ 줄걸이 용품 관리사항 - 현장 바닥에 놓인 줄걸이 용품(섬유로프, 와이어로프)은 걸이시설을 활용하여 관리 요함 ○ 장비 실명제카드 관리사항 - 현장에서 사용중인 크레인의 실명제카드에 보험유효기간이 경과하였으므로 개선 요함 ○ MSDS(물질안전보건)표지판 관리사항 - 현장 위험물저장소에 부착된 MSDS(물질안전보건)표지판은 규격품으로 교체 (사각표시에서 삼각표시로 변경됨)	○ 조치완료 - 목재토류판 사이로 누수가 많은 구간에 대하여 배면측 토립자가 유출되는지 여부를 수시로 모니터링하고 계측 관리를 철저히 하겠음 ○ 조치완료 - 용접 및 보일러 양생지역에 소화기를 추가설치 하였음 ○ 조치완료 - 도봉지하차도 4단계 작업계단 하부에 돌출되었던 파이프는 점검후 공정상 해체되어 위험요소가 제거 되었으며, 향후 동일사례가 발생시 안전조치를 철저히 하겠음 ○ 조치완료 - 현장 바닥에 놓인 줄걸이 용품(섬유로프, 와이어로프)은 걸이대 시설을 설치하여 관리토록 조치하였음 ○ 조치완료 - 현장에서 사용중인 크레인의 실명제카드 중 보험 유효기간이 경과한 것에 대하여 보험기간 연장여부 확인후 교체 하였음 ○ 조치완료 - 현장 위험물저장소에 부착된 MSDS(물질안전보건)표지판은 변경된 규격품으로 교체하였음
16	응봉교 확장 및 성능개선공사 (2건)	2/21	정희영 이종규 (신정, 조태현)	○ 캔틸레버 옹벽구간 관련사항 - 시점부 캔틸레버 옹벽에 차량이 임시 이용할 경우 인장하중에 의해 위험할 것으로 판단되니 추가 버팀을 설치 보강하는 것이 좋을것으로 판단됨. ○ 구조물과 토공 경계부 균열 예방대책 - 옹벽구간 캔틸레버부와 토공구간 경계부 부등침하에 의한 종방향 균열 예방대책.	○ 조치 예정(3월말) - 시점부 캔틸레버 옹벽 구간에 차량 임시 통행 전(3월말경) 추가 버팀 등을 설치하여 보강할 예정 임 ○ 조치완료 - 옹벽구간과 토공구간 경계부 부등침하에 의한 종방향 균열 예방을 위해 접속슬래브 시공할 계획임

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
17	용비교~행당중간 도로개설공사 (2건)	2/21	정희영 이종규 (신정, 조태현)	○ 교좌장치 관련사항 - 기존교량과 신설교량 신축방향의 신축죠인트와 교좌장치 파손 우려되니 시공전 확인 요망 ○ 공정 관리사항 - 자전거 우회 가설도로 사면은 우기 전 우수에 의한 토사 유실 사전 방지를 위하여 최소한 3월내에 교각(P8) 시공을 완료해야 할 것으로 판단됨.	○ 조치완료 - 기존교량과 신설교량의 교좌장치 이동 방향이 동일하게 시공되므로 신축조인트 및 교좌장치 파손 우려는 없을 것으로 판단됨 ○ 조치완료 - 수방기간전 3개월내 교각(P8) 시공완료 후 자전거우회 가설도로를 우기전 원상복구 예정이며, 복구전까지 사면의 유실이 발생하지 않도록 사면보호 조치하겠음
18	용마터널 건설공사 (3건)	2/26	김홍석 허웅 (김삼식, 김학지)	○ 차수턱 설치사항 - 공사시점 갱구부 상부는 우기시 공원측 노면수가 공사장내로 유입되지 않도록 펜스하부에 마대로 차수턱 등을 설치하여 관리요함 ○ 하수관 이음부 관리사항 - 공사시점부 매달기 되어 있는 하수관(D=1,500㎜)의 이음부는 우기시 수압으로 인해 연결부가 취약할 수 있으니 강재 등으로 보강요함 ○ 점검통로 설치사항 - 지하차도구간 매달기 되어 있는 하부BOX와 근접하여 점검통로는 조속히 설치요함	○ 조치완료 - 갱구부 상부 우기시 공원측 노면수가 공사장내로 유입되지 않도록 펜스하부 천막을 깔아 천막내부 마대를 넣어 차수턱을 설치함 ○ 조치완료 - 공사시점부 매달기 되어 있는 하수관(D=1,500mm)의 이음부 우기시 수압으로 인해 연결부가 탈락되지 않도록 와이어를 이용하여 보강조치 완료함 ○ 조치예정(3.8한) - 지하차도구간 매달기 되어 있는 하부BOX와 근접하여 점검통로는 현재 작업 중이며, 3월 8일 완료 예정임.
19	천호대로(광나루역) 확장공사 (2건)	2/26	김홍석 허웅 (김삼식, 김학지)	○ 사면관리사항 - 지하차도구간 절개지 사면은 face mapping을 병행하여 사면보강을 조속히 시행요함 ○ 비산방지망설치 및 차면시설 설치 - 우측 배수지측 노출된 사면은 비산방지망 설치가 요망되면 상수도이설 가시설구간은 차면시설 설치요함	○ 3월말 한 조치예정 ○ 4/10한 조치예정 - (사면보강이 3월말까지 완료됨)

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
20	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 (2건)	2/26	구자갑 우종태 (조태현)	○ 신축이음부 관련사항 - 박스구간과 U-TYPE 구간의 신축이음부는 현재 물기와 습기가 있으므로 하자 발생이 많이 이루어지는 부분이므로 동결이 되지 않도록 건조시키기 바라며, - 아울러, 구조적으로 누수 발생이 예상되니 이에 대한 검토가 필요함 ○ U-TYPE구간 벽체 관련사항 - U-TYPE구간 벽체의 마감이 문양거푸집이므로 시공이 밀실하게 완료되도록 확인 바람	○ 조치완료 - 신축이음부 건조 완료 - BOX와 U-TYPE구간의 구조물 거동 형태가 다른 양상으로서 이음부가 취약하여 2중으로 쉬트방수 시공중임. ○ 조치완료 - U-TYPE구간 con'c타설시 진동다짐 관리 철저 시행 중
21	남부순환로 (개봉역앞) 구조개선공사 (3건)	2/26	구자갑 우종태 (조태현)	○ 품질관리사항 - 기 시공된 부분의 콘크리트는 동결에 노출되지 않도록 조치 필요. (바닥면의 물기 및 습기 또는 적치물 제거 바람) - U-TYPE 구간 벽체는 염화칼슘 비산에 의한 열화대책에 대한 마감처리 검토바람. ○ 잡석 포설 등 관련사항 - 토공 최하단 바닥면은 적설과 물기를 제거바람. - 바닥 콘크리트 타설이 동절기에 이루어질때는 잡석 포설 높이를 증가시키는 방안 검토 필요함. ○ 유로폼 설치사항 - 벽체구조물 유로폼 설치중으로 외면 일부 유로폼 청소 상태가 미비하니 조치요함.	○ 조치완료 - 기 시공된 콘크리트 동결에 노출되지 않도록 조치, 바닥면의 물기 및 습기, 적치물 제거조치 완료 - 벽체 노출콘크리트 마감시공 방안은 본부, 시설물유지관리 기관과 협의 및 디자인심의 결과에 따라 반영 ○ 조치완료 - 토공바닥 적설과 물기제거 완료 - 토공 굴착면 지지력 시험확인 후 잡석 30Cm 포설 완료 ○ 조치완료 - 청소가 미비한 벽체유로폼 교체 조치 완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
22	우면산 산사태 복구(1공구) (7건)	3/4	이강일 이오형 (정삼기, 홍광호)	○ 유지관리 매뉴얼에 관한 사항 - 유지관리 지침서 작성이 요망됨(유지관리에 필요한 매뉴얼) ○ 안전시설(펜스) 보강사항 - 안전펜스 기초가 흔들리고 움직이고 있으니 등산로 안전 펜스 기초보강이 요망됨 ○ 세굴방지공 추가설치사항 - 세굴발생으로 배면토사 유출가능성이 있으니 래미안 목1교 기초 세굴방지공 추가설치 요망 ○ 토질조사에 관한 사항 - 준설하여 성토된 지역은 시험굴(Test pit)을 조사하여 지반의 함수상태 및 토질상태를 점검하여 유지관리시 활용할 것 ○ 등산로 설치에 관한 사항 - 금번 복구공사로 인해 인위적으로 형성된 등산로가 해빙으로 인하여 질척거리니 쇄석 등을 포설하여 보행환경을 개선 할 것 ○ 공군부대 협조 요청 사항 - 우면산 정상(공군부대)좌․우측 보강사면(격자 블록식 록앵커)에 대한 불안정 요인이 일부 확인(침하)되어 현 상태에 대한 안전점검을 실시하고 사후 관리 방안계획을 수립토록 협조 요청 공문을 공군부대에 통보 요망(돌수로 스크린 제거 및 능형망 추가 설치 포함) ○ 서초구청 협조 요청사항 - 전원마을 돌수로 하부에 서초구청에서 설치한 하수암거 및 개수로가 갑자기 좁아지게 시공되어 있어 병목으로 인한 통수 단면적 및 부목 등에 대한 영향이 없는지 서초구청과 협의하여 재검토 필요
23	우면산 산사태 복구(2공구) (3건)	3/4	이강일 이오형 (정삼기, 홍광호)	○ 사면붕괴 대책수립에 관한 사항 - 하수BOX에 토석류가 유입될 가능성이 있으니 보덕사 시점 좌안 토석류 방지시설 설치요하며, 비탈면 배수로(현타콘크리트) 설치요망 ※ 붕괴시 토사 및 부목처리 방안검토 ※ 일부 주변 위험지역, 토석류의 원인이 되는 참나무제거, 나무뿌리, 잡목 등 제거 요망 ○ 성토재료 다짐에 관한 사항 - 보덕사 초입부 우안 사면 성토재가 느슨하므로 성토 상태를 점검하여 다짐 방안 강구 요망 ○ 서초구청 협의사항 - 하수암거 유입부가 병목현상이 우려되니 서초구청과 협의요망

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
24	우면산 산사태 복구(3공구) (3건)	2/20	이규웅 이장섭 (정삼기, 홍광호)	○ 배후지 유지관리 계획사항 - 우면산 배후지의 전체적인 유지관리 계획을 세워 철저한 관리가 이루어지도록 해야 합니다 ○ 서초구청 협조 요청사항 - 서초구청에서 시공한 개수로 폭이 본부에서 시행한 상류 보다 좁고 개수로가 곡선으로 설치되어 있어, 직선화 및 단면 병행 검토토록 서초구청에 공문통보 요함 (배수로 통수단면이 서초구 시공구간의 통수단면과 차이가 있어 이에 대한 재검토가 요구됨) ※ 홍수시 유목,토사류 등으로 개수로를 월류하여 주택가의 침수가 우려될 것으로 판단됨 ○ 원주목 울타리 설치에 관한 사항 - 제형 돌수로 사면 단부에 추락방지를 위하여 원주목 울타리를 설치 하였으나, 일부 볼트부식방지용 캡이 누락되어 있으니 전수조사하여 설치 요함	○ 조치예정(3월말) - 유지관리계획서(메뉴얼) 작성 검토 중(3월말까지 완료 예정) ○ 조치완료 - 경계부 시공한 서초구(재난치수과)에 통수단면 재검토 공문통보 완료 ○ 조치완료 - 누락된 볼트부식방지용 캡 설치 완료
25	장충체육관 리모델링 (3건)	2/22	권기혁 박용호 (김삼식, 감학지)	○ 현장 관리사항 - 경기장 바닥부위를 자재 적치장과 철근가공 및 거푸집제작 장소로 사용되고 있어 동선이 혼잡하여 안전이 우려되니 적치장과 작업공간을 구분하고 작업자 전용통로를 확보해 주기 바람 ○ 통행 안전 확보사항 - 경기장 일부 open부위에 작업자통행시 다칠 우려가 있으니 위험표지와 충격보호재를 설치바람 ○ 기존건물 존치에 관한사항 - 기존건물 재사용 철근에 대하여 부식이 발생하지 않도록 관리하고 기존부위와 신축부위 연결부는 이물질 제거 등 시공시 주의요함	○ 조치완료 - 적치장 및 보행자 통로 구분 및 정리 ○ 조치완료 - 기계실 OPEN부위 작업자 보호위해 위험표지 및 충격보호재 설치 ○ 조치완료 - 기존건물 재사용철근 보양조치, 존치 및 신축 연결부 시공시 이물질 제거 후 CON'C 타설로 품질 확보 하겠음

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
26	서남권 야구장 건럽공사 (10건)	2/22	권기혁 박용호 (김삼식, 감학지)	○ 가설전선 관리사항 - 가설용 전선이 통로바닥에 깔려 있는 곳이 많아 위험하니 거치대를 사용하여 작업하시기 바람 ○ 작업자 통로 관리사항 - 야구장 내부바닥 및 작업자통로가 결빙되어 있어 작업자 통행시 안전사고 우려되니 조치요함 ○ 세륜시설 설치사항 - 현장 차량진.출입로에 세륜시설이 없어 도로에 현장에서 묻어 나온 돌과 흙이 있으니 세륜시설을 설치하거나 흙이 외부로 유출되지 않도록 관리요함 ○ 안전시설 설치사항 - 철골조 상부로 올라가는 가설계단 하부가 미고정되어 있으니 고정조치요함 ○ 기초품질사항 - 구조물에 발생된 백화에 대한 처리방안 및 기둥등에 발생한 표면오염 처리방안 제시바람 ○ 균열관리사항 - 철골기둥하부 콘크리트에 발생된 균열들에 대한 관찰. 기록하고 마감공사 이전에 보수바람 ○ 위험물 보관소 관리사항 - 위험물 보관소 근처에는 소화기를 비치하고 MSDS(물질안전보건) 표지판 부착하여 관리요함 ○ 작업자 가설계단 설치사항 - 외야에서 철골조로 이동하는 가설계단을 일자형사다리로 설치하여 사용하고 있어 안전사고 우려되니 작업자이동용 표준가설계단을 설치요함 ○ 작업자통행계단 관리사항 - 외야 PC스텐드 구간에 설치되어 있는 작업자통행계단의 동선이 일직선으로 설치되어 있지 않고 미고정된 상태로 통행시 흔들리고 있어 위험하오니 작업자가 안전하게 통행할 수 있도록 재설치요함 ○ 자재운반에 관한사항 - 작업자가 중량물의 자재를 혼자 운반하는 경우가 있으니 안전하게 운반할 수 있는 방안 마련필요	○ 조치완료 - 전선거치대를 분전함에 고정설치하여 가설전선 및 거치 완료 ○ 조치완료 - 야구장 내부 바닥 및 작업자 통로 결빙구간 얼음을 제거하고 안전통로 확보 조치 완료 ○ 조치 중 - 후문 간이 출입문 구간의 차량 진,출입을 전면 통제하고 해당 도로구간 청소완료 및 향후 도로 세륜시설 철저한 관리예정 ○ 조치완료 - 철골조 상부 가설계단하부를 파이프로 고정 완료 ○ 조치 중 - 당현장 콘크리트 균열관리계획서의 표면처리 공법에 준하여 공정진행상화에 따라 그라인딩 후 견출작업 시행예정 ○ 조치 중 - 당현장 콘크리트 균열관리계획서에 의해 지속적으로 균열관리하고 최종적으로 균열보수 예정 ○ 조치완료 - 위험물 보관소 근처에 소화기를 배치하고 MSDS(물질안전보건) 표지판 부착 완료 ○ 조치 중 - 외야 철골조 가설계단의 일자형 사다리를 수거,폐기처분하고 작업자 수직통로로 통행하도록 관리감독을 강화 예정 ○ 조치예정(3월말) - 외야 PC스텐드 구간에 작업자 통행 계단은 본공사 진행중으로 3월 말까지 PC스탠드 전구간 작업자 통행계단 설치완료예정 ○ 조치완료 - 교육을 통하여 필요시 장비를 사용하는등 완전교육 시행

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
27	중랑물 재생센터 (2건)	2/26	이현범 김영수 (오반교)	○ 지하수 배수계통 검토 - 부지내 공사용 지하수 배수처리를 위하여 생물여과 질산화탈질조 R구간 바닥스라브 하부에 맹암거를 설치하여 배수처리중으로 배수처리계획을 재검토하여 주기 바람. ○ 구조물 양생관리 - 콘크리트 양생시 slab의 균열이 발생되지 않도록 콘크리트 양생 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.	○ 조치완료 - 배수계획을 재수립하여 슬라브 하부로 배수가 되지 않도록 배수계획을 조정함. ○ 조치완료 - 동절기 보온양생 및 하절기 습윤양생, 평상시에도 수분의 급격한 증발이 발생하지 않도록 양생관리 하겠음.

[ 도시철도국] : 13개 현장

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
1	지하철 915공구 (6건)	2/22	전준태 염동신 (신정, 조태현)	○ 되메우기 관련사항 - 구조물 완료후 뒷채움 되메우기 구간은 토사가 해빙되면서 느슨해 질 수 있으므로 뒷채움 구간에 대해서는 관리를 철저히 하시기 바람 ○ 터널 바닥 시공죠인트 보수 - 터널 시공상태는 양호하나 28K280 부근 바닥 시공죠인트부분의 일부 파손 및 균열부위는 커팅하여 채움재로 보수조치 요함 ○ 중간 파일 매립부 정밀시공 - 926정거장 중간Pile 매립부 시공시 Pile 커팅 후 구조물 면 정밀시공 요함 ○ 유도 배수 설치사항 - 개착구조물과 터널 구조물 접속부는 향후 유도 배수 조치요함 ○ 지하수위 점검 수시 시행 - 해빙기 지반침하에 대비한 지하수위 점검을 수시로 시행하여 안전시공 요함 ○ 공사장 환경정비 사항 - 926정거장 구조물 내부 및 작업장 구간은 환경정비 요함	○ 조치완료 - 되메우기 구간 다짐실시 ○ 조치완료 - 균열부위 커팅 후 채움재 보수 ○ 조치완료 - 시공시 파일 커팅 후 구조물 면 정밀시공 실시 ○ 조치완료 - 도면대로 시공예정 ○ 조치완료 - 지하수위 점검 수시 실시 ○ 조치완료 - 구조물 내부 및 작업장 구간 환경정비 완료함
2	지하철 916공구 (5건)	2/22	전준태 염동신 (신정, 조태현)	○ 흙막이가시설 배면 관리사항 - 928정거장 종점부 좌측 출입구(SK주유소) 구간은 Side Pile 인접부 토사가 해빙되면서 주유소측 Con`c Slab 하단의 토사가 유실되어 파손이 우려되는 바 토류판을 상부로 추가 설치하고 뒷채움하는 것이 바람직함 ○ 되메우기 관련사항 - 구조물 완료후 뒷채움 되메우기 구간은 토사가 해빙되면서 느슨해 질 수 있으므로 뒷채움 구간에 대해서는 관리를 철저히 하시기 바람. ○ 복공판 진동ㆍ소음 점검사항 - 929정거장 상부 복공판의 차량 통행시 진동 및 소음 방지를 위해 받침부의 점검 요함. ○ 계측 관리사항 - 개착구간 인접부에 발생되어 있는 균열이 확대되는지 확인 요함. - 해빙기 지반침하에 대비한 지하수위 점검을 수시로 시행하여 안전시공 요함. ○ 공사장 환경정비 사항 - 928S1 환기구에 적재된 폐자재를 즉시 반출하고 청소 정비하고, 구조물 내부 및 작업장 구간은 환경정비 요함	○ 조치완료 - 토류판 추가 설치 및 뒤채움 조치 완료 ○ 조치완료 - 측벽 되메우기 구간 다짐 작업을 하여 조치작업 완료 ○ 조치완료 - 복공판 점검 후 노후된 복공판 교체하여 진동, 소음 방지 조치 완료 ○ 조치완료 - 균열부위 보수조치하였으며, 추후 계측점검을 통하여 관리하겠음 ○ 조치완료 - 적재된 폐자재를 반출하고 청소 조치 완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
3	지하철 917공구 (0건)	2/22	백영현 윤현섭 (정삼기, 홍광호)	○ 지적사항 없음	○ 지적사항 없음
4	지하철 918공구 (5건)	2/22	백영현 윤현섭 (정삼기, 홍광호)	○ 계측 관리사항 - 터널 갱구부, 정거장복공부 등은 지하수 유출이 상당히 많고, 지하수 유출에 따른 토립자 유출 시 공동발생, 지반침하 등의 우려가 있으므로 계속하여 해빙기에 관측, 현장순찰을 강화하고 계측관리 강화 요망 ○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 930S1환기구(32K760) CIP돌출부 하부에 숏크리트로 보강 바람 ○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 정거장 시점부(35K240)CIP와 띠장 사이 홈메우기(자바라이용)를 실시하였으나, 30~60cm철근으로 지지하였으나, 탈락이 되지 않도록 받침철근 보완 바람 ○ 중앙파일 제거사항 - 구조물 구간 중간파일제거(절단)부 부식방지 대책 유지하는 것이 강재부식 방지에 유리하니, 파일 표면에 콘크리트 피복을 유지하는 방안을 검토 바람 ○ 주입압 관리에 관한 사항 - 정거장 시점부 지하수 유출부는 토류벽 콘크리트 타설전 주입 호스를 선행 설치하였음. 토류벽 시공 후 주입관리 방안을 수립하여 시행하시기 바람(특히 주입압 관리 철저)	○ 조치완료 - 현재 계측 및 육안 관찰결과 특이사항 없음, - 주1회이상 합동점검(SK건설현장소장/공사/공무/안전/품질/협력업체소장 등) 이행중 ○ 조치완료 - CIP돌출부 하부 숏크리트 타설완료 ○ 조치완료 - CIP와 띠장 사이 홈메우기(자바라이용) 실시한 곳에 탈락되지 않도록 받침철근 보완함 ○ 조치완료 - 중간파일제거(절단)부 강재부식방지를 위해 절단부 및 콘크리트 면정리 후 방청페인트 도포토록 계획을 수립함. ○ 조치완료 - 주입작업시 주입압 관리를 철저히하여 밀실하게 주입토록 관리하겠음

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
5	지하철 919공구 (4건)	2/26	황제돈 이호현 (정삼기)	○ 지하수 처리에 관한 사항 - 쉴드 TBM 1구간(STA35K+050)시점부 토사 반출시 발생되는 지하수를 처리할 수 있는 조치방안 강구 바람. ○ 계측관리에 관한 사항 - 8호선 본선하부 통과 구간 (STA 35K+200) 본격적인 굴착 이전에 각종 계측기 설치 요망 - 초기 계측자료 확보하여 굴착시 안전성을 확보하도록 정기적인 점검필요. ○ 8호선 본선하부 통과 가시설 검토에 관한 사항 - 933정거장 8호선 하부통과부 (STA35K+200) 시공계획에서 강재 밑받침 중간파일의 적용목적과 역할에 대해 재검토후 시공에 반영 바람. ○ 개착구간 배면 관리사항 - 해빙기 개착구간 배면의 토사유실 혹은 공동여부에 대한 수시 점검으로 안전관리 바람.	○ 조치완료 - 토사피트를 설치하여 토사반출 시 발생되는 지하수를 처리하겠음. (H:1.2m × L:12.5m × D:8.0m) ○ 조치완료 - 현재 8호선 구조물 내부 자동화 계측기 설치 완료 상태이며, - 하부통과 굴착시 정기적인 점검을 실시하고 계측자료를 확인하여 관리하겠음. ○ 조치완료 - 현재 강재 밑받침 중간파일의 적용목적과 역할에 대하여 재검토 중에 있으며 도시철도공사 자문 및 발주처와 협의 후 시공에 반영할 예정임. ○ 조치완료 - 토사유실 및 공동여부 점검결과이상 없었으며 추후 수시 점검하여 안전관리토록 하겠음.
6	지하철 920공구 (3건)	2/26	황제돈 이호현 (정삼기)	○ 굴착면 관리사항 - 933S1E1 수직구 굴착면 일부에 휘장이 설치되어 육안 안전 점검이 어려운 바, 굴착면 거동등을 관찰할 수 있도록 계측등 정기적인 점검이 필요할 것으로 판단됨. ○ 개착구간 토류벽 설치에 관한 사항 - 개착구간 CIP 미 시공부 토류벽 콘크리트 설치시기를 띠장 설치전에 시공하기 바람. ○ 개착구간 배면 관리사항 - 해빙기 개착구간 배면의 토사유실 혹은 공동여부에 대한 수시 점검으로 안전관리 바람.	○ 조치완료 - 주기적으로 휘장을 걷고 지속적인 육안관찰 실시 및 계측관리 (락볼트6개소) 시행중 ○ 조치완료 - 토류벽설치후 띠장시공 실시 ○ 조치완료 - 배면부 토사유실대비 정기점검 시행 및 공동발생 우려 구간 수평그라우팅 시행중

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
7	지하철 921공구 (4건)	2/19	이덕영 신창범 (정삼기, 홍광호)	○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 935정거장(STA36K730) 중앙파일 하단부 챤넬 및 앵글 보강요함 ※ 토공굴착이 완료된 구간에서 즉시 강재 설치하여 안정성 확보 요함 ○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 935정거장(STA.36K+730) 작업구 구간의 종횡으로 강재 보강구간에 자재 투입 작업으로 제거한 강재 대신 수직앵글 보강 요함 ○ 시공이음부 설치에 관한 사항 - 935정거장 구조물 시공구간의 시공이음부는 구조물 완료 후 일정기간 양생후 치핑으로 인하여 부실한 경우가 발생되고 있으므로 양생되기전 치핑으로 신․구 콘크리트 접착력이 강화 될 수 있도록 조치 요하며, 치핑 대신 Metalmesh망 사용 요함 ○ 안전시설(작업발판) 관련사항 - 통로가 완전하게 덮여 있어 큰무리 없이 작업자가 Shield back up 설비를 점검하며 통행을 할 수 있음. 단지 연결부간 단차가 없도록 조치가 요청됨 (STA. 38K+089)	○ 조치완료 - 935정거장(STA36K730)중앙파일 하단부 횡방향 ㄷ-찬넬 대신 H-Beam 즉시 설치하여 안정성 확보함 ○ 조치완료 - 935정거장(STA.36K+730) 작업구 구간의 종횡으로 강재 보강구간에 자재 투입 작업으로 제거한 강재 대신 수직앵글 보강 조치 완료 ○ 조치완료 - 935정거장 구조물 시공구간의 시공이음부는 완료구간에 접착력이 강화 될수 있게 치핑을 하였으며, 차후 구조물 거푸집 설치 시 접착력이 높은 Metalmesh망 사용 예정임. ○ 조치완료 - 통로가 완전하게 덮여 있어 큰무리 없이 작업자가 Shield back up 설비를 점검하며 통행을 할 수 있는 발판에 단차 부분 수정 조치 완료
8	지하철 922공구 (2건)	2/19	이덕영 신창범 (정삼기, 홍광호)	○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 정거장 종점부 중앙파일을 종방향으로 챤넬 보강 요함 ※ 설계도에 없을 지라도 시각적으로 장주 현상을 보이고 있으므로 보강 필요 ○ 상수도 관리에 관한 사항 - 광역 및 서울시 상수도의 강관 피복온도를 체크하여 신축량을 측정하는등 관리를 잘하고 있으나 토공작업이 진행 중인 대형상수도 보강부의 지속적인 특별 관찰이 요망됨	○ 조치완료 - 정거장 종점부 중앙파일을 종방향으로 챤넬 보강조치 완료함 ○ 조치완료 - 일일점검 당번제를 도입하여 대형상수도 보강부의 지속적인 점검 및 특별 관찰 실시함.

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	치 결 과
9	지하철 923공구 (2건)	2/26	이현범 김영수 (오반교)	○ 교통안전시설 상시점검 - 공사구간의 야간차량 운행에 대한 교통표식, 안전시설의 조명등은 야간관리자가 수시점검하여, 일몰 후 차량운전자가 안전운전 할 수있도록 상시점검 바랍니다. ○ 현장관리 권고사항 - 굴착이 완료된 구간에서의 지중경사계 및 기타 계측자료를 토대로 향후 보훈병원 측 굴착시 안전관리 자료로 활용하기 바람	○ 조치완료 - 공사구간의 야간차량 운행에 대한 교통표식, 안전시설의 조명등은 야간 관리자가 수시로 점검하고 있으며, 일몰 후 차량운전자가 안전운전 할 수 있도록 안전관리에 만전을 기하겠음. ○ 조치완료 - 굴착이 완료된 구간에서의 지중경사계 및 기타 계측자료를 토대로 향후 보훈병원 측 굴착시 안전관리 자료로 활용하여 안전관리에 만전을 기하겠음.
10	경전철 우이~신설 1공구 (6건)	2/20	박찬학 김완준 (신정, 조태현)	○ 토류판 관리사항 - 시점부 차량기지 어스앙카 설치부 일부 토류판이 토압을 받아 배가 불러오고 있으니 L형강으로 보강요함 ○ 물돌리기용 주름관 관리사항 - 백운천 하수BOX 철거구간 임시수로(물돌리기용) 파형강관(Φ1,200mm, 3개소) 연결부에서 일부 누수되고 있으니 철저한 지수처리요함 ○ 굴착사면 관련사항 - 차량기지 STA.-0K010지점 토공 굴착사면은 경사 완화 요구됨 ○ 차선도색 관련사항 - 차량기지 복공판 설치구간의 차선 도색이 퇴색되어 있으니 재 도색요함 ○ 하수박스 조속 재설치 - 백운천 하수박스 철거구간 공정 재검토하여 차량기지 구조물 및 하수박스 조속 재설치 완료하여 3월 폭우 대비 철저 ○ 파일제거부분 면정리 사항 - 본선 구조물 파일 제거부분 정밀하게 마감면 시공요함	○ 조치완료 - 시점부 차량기지 어스앙카 설치부 토류판에 L형강 보강조치 완료 ○ 조치완료 - 백운천 하수BOX 철거구간 임시수로(물돌리기용) 파형강관(Φ1,200mm, 3개소)연결부 면벽콘크리트 타설하여 지수처리 완료 ○ 조치완료 - 차량기지 STA.-0K010지점 토공 굴착사면 안식각이 유지되도록 완화 작업완료 ○ 조치완료 - 차량기지 복공판 설치구간의 차선 재도색 완료 ○ 조치완료 - 예정공정표 재검토 및 수정하여 첨부하였으며 토공작업시 극경암 발생 및 민원 등으로 다소 지체되었으나 구조물 작업시 주.야간 작업 실시하여 늦어진 공기를 만회하여 2013. 04. 15일 내에 완료 예정이며, 갈수기 유량 대비하여 가배수로(파형강관 Φ1000 x 5열) 설치 하였음 ○ 조치완료 - 본선 구조물 파일 제거부분 마감면 보수 완료

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
11	경전철 우이~신설 2공구 (5건)	2/20	박찬학 김완준 (신정, 조태현)	○ 터널굴진 관련사항 - 종점방향 본선터널(STA.4K870지점) 구간 막장의 암질이 점점 연약화되므로 주의 요하며, 가능한 선진 Boring 등 전방 암질 확인요함. ○ 집수정 등 설치사항 - 터널내 배수로 또는 집수정 설치 위치는 터널 측면에서 1m정도 이격이 요구됨 ○ 횡단보도 도색사항 - 우이초교 교차로 주변 복공판 상부 횡단보도 도색이 삭제된 상태이니 재 도색요함 ○ 파일제거부분 면정리 사항 - 본선 구조물 파일 제거부분 정밀하게 마감면 시공요함 ○ 토공 굴착 사항 - 4번 정거장 종점구간(우이초교사거리) 토공 굴착 조속 시행 요함	○ 조치완료 - 양 막장 선진수평Boring 실시 ○ 조치완료 - 터널 집수정 측면에서 1m 이격 설치함 ○ 조치완료 - 우이초교 교차로 주변 복공판 상부 횡단보도 도색완료 ○ 조치완료 - 본선 구조물 파일 제거부분 마감면 면정리 완료 ○ 조치예정(3월중) - 우이초교사거리 상부 복공설치 미완료 인해 2013년 03월 중 토공작업 실시 예정임
12	경전철 우이~신설 3공구 (2건)	2/25	채영수 강형우 (정삼기, 조태현)	○ 변화구간 계측관리 철저 - 현 계측 전담팀의 계측 데이터를 매일 확인 할 것. ○ 막장관리 등에 관한 사항 - L08E 환기구 굴착부 시종점막장(경암)구간 공사 재개시 우선적으로 Shotcrete 및 Sealcoating 요망. - 작업재개시 전구간 총괄적으로 안전 및 품질 점검 후 시행할 것.	○ 조치완료 - 계측 데이터 일일 확인 및 일일 순찰을 통한 지속적 안전관리를 하고 있으며,더욱 철저한 확인을 통한 안전을 확보 하겠음 ○ 조치완료 - 공사 재개시 우선적으로 Shotcrete 및 alcoating을 실시 후 작업에 착수하겠음 - 작업재개 전 시공사(본사)기술팀과 기술지원 감리원의 총괄적 안전/품질 점검 이후 작업에 착수하여 안전/품질을 확보하겠음

연번	공 사 명	점검 일자	점검 위원	점 검 결 과	조 치 결 과
13	경전철 우이~신설 4공구 (6건)	2/25	채영수 강형우 (정삼기, 조태현)	○ 터널굴진 관련사항 - 본선터널 2구간 종점방향 막장(6호선 보문역 하부 통과구간)은 강관 그라우팅(보강 및 누수방지) 부분이 누수가 있어 숏크리트 등이 흘러내리고 있으므로 유도 배수 후 숏크리트 보수 후 시행토록 할 것. ○ 수발공 설치사항 - 본선터널 천장부 누수 사항에 대하여 유도 배수를 적기에 처리하도록 할 것.(전구간 일반적 형태) ○ 토공굴착 관련사항 - L11정거장 토공 작업시 작업구 주변(측벽부) 굴착 후 조속히 숏크리트 공사를 시행하도록 할 것. ○ 버력처리에 관한 사항 - L10정거장과 L10E 환기구사이(본선터널1구간) 버력은 조속히 반출 요함 ○ 배수처리에 관한 사항 - L10E환기구와 L11정거장 사이 터널(1-2구간) 구간에 하부 펌프고장으로 물이 체수 되어 있으니 배수처리 요망 ○ 시공 및 계측관리에 관한 사항 - 기존 4호선(성신여대역), 6호선(보문역), 1호선(신설동역)과의 경계부에서의 시공 및 계측 관리 철저 요망.	○ 조치완료 - 숏크리트 보수 완료 ○ 조치완료 - 유도배수처리 완료 ○ 조치완료 - 숏크리트 타설 완료 ○ 조치완료 - 버력 반출 완료 ○ 조치완료 - 체수구간 배수처리 완료 ○ 조치완료 - 기존역 인접 공사구간 시공 및 계측관리 철저히 하겠음