『잠실운동장 주변지역 연계 활성화방안 타당성조사』

과업내용서

2019. 04.

지역발전본부

(동남권사업과)

- 목    차 -

제1장 과업의 개요	1

1. 과업의 명칭	1

2. 용어의 정의	1

3. 과업의 목적	1

4. 과업의 개요	1

제2장 과업의 세부내용	3

1. 현황조사	3

2. 아시아공원 일대 정비사업 기본구상 검토 및 개선방안 제시	3

3. 아시아공원 일대 정비사업 타당성 분석	4

4. 아시아공원 일대 사업계획(안) 수립	5

5. 정비사업 사업추진전략 수립	6

6. 기타 행정절차 지원	6

제3장 과업수행 지침	6

1. 일반사항	6

2. 보안 및 비밀유지	13

3. 보고서 및 성과품	14

4. 기타 특기사항	16

제1장   과업의 개요

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “잠실운동장 주변지역 연계 활성화방안 타당성조사” 라 한다.

2. 용어의 정의

가. “발주기관”이라 함은 서울특별시(동남권사업과)를 말한다.

나. “계약상대자”라 함은 용역계약을 체결한 계약상대자(용역사)를 말한다.

3. 과업의 목적

가. 잠실운동장 주변지역 연계 활성화방안 검토용역(′18년 준공) 결과 ‘아시아공원 일대 정비 기본구상’이 제시되었음

나. 잠실운동장 일대 민자사업 등 서울 국제교류복합지구 개발사업과의 적기 연계 및 정합성 등을 고려하여 아시아공원 일대 정비사업의 타당성조사 실시

4. 과업의 개요

가. 과업의 공간적 범위 : 아시아공원 일대

나. 과업의 시간적 범위

1) 기준년도 2019년

2) 목표연도 2028년

다. 과업의 내용적 범위

1) 현황조사

2) 아시아공원 일대 정비사업 기본구상 검토 및 개선방안 제시

3) 아시아공원 일대 정비사업 타당성 분석

4) 아시아공원 일대 사업계획(안) 수립

5) 정비사업 사업추진전략 수립

6) 기타 행정절차 지원

※ 과업의 범위와 내용은 상위 및 관련계획 변경, 분석결과 등에 따라 과업수행과정 중 조정될 수 있음

[ 공간적 범위 : 아시아공원 일대 ]

라. 과업기간

1) 계약일로부터 240일 (공휴일 및 휴일 등 포함)

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

- 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

- 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

- 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

제2장   과업의 세부내용

1. 현황조사

가. 아시아공원 일대 현황조사

1) 지역주민, 방문객 등 공원 이용현황 조사

2) 인근 공공시설 유무 및 운영현황 조사

3) 공원 내 시설물 현황 및 지장물(지하, 지상) 현황 등 조사

4) 도시관리계획 및 주변지역 개발계획 등 관련 계획 조사

나. 올림픽로 일부구간 현황조사

1) 사업대상도로 및 주변도로 교통환경 조사(교통 현황, 문제점 등)

2) 대중교통(버스, 지하철) 현황 조사

3) 버스정류장, 지하철 출입구 등 교통시설물 현황 조사

다. 아시아지하보도 현황조사

1) 지역주민, 방문객 등 지하보도 이용현황 조사

2) 지하보도 구조물(층고, 단차 및 구조 등) 및 지장물 현황 조사

3) 2호선 및 9호선 지하철 환승 등 지하통로 현황 조사

라. 기타 발주기관이 요청한 아시아공원 일대 주변부 현황조사

2. 아시아공원 일대 정비사업 기본구상 검토 및 개선방안 제시

가. 기본구상 검토

1) 공통사항

- 입지, 인문사회 및 경제적 환경 등 분석

- 관련 법령 및 도시단위계획 등 상위계획, 연관계획과의 정합성 검토

- 향후 사업 추진을 위한 도시관리계획 변경 필요성 검토

2) 아시아공원 정비사업

- 공원 내 부지활용방안 및 정비계획(용도, 규모) 등 적정성 검토

- 잠실운동장과의 보행 연계 방안 검토

- 인근 주민 요구사항 검토

3) 올림픽로 일부구간 도로다이어트 사업

- 도로다이어트 구간 및 사업계획 등 검토

- 도로다이어트 이후 잠실운동장 연계 및 거리활성화 방안 등 검토

- 휴게공간 및 문화복합공간 등 세부 계획 검토

4) 아시아지하보도 개선사업

- 지하보도 내・외부 개선 방안 검토

- 보행활성화 방안(EX : 선큰 설치, 횡단보도 개선 등) 검토

나. 기본구상에 대한 개선방안 제시

1) 기본구상 보완 및 개선 도출

- 장・단기 추가 정비사업 계획 도출

- 인근 주민 요구사항에 대한 검토결과 및 대책 등 수립

- 타당성 분석을 위한 구체적인 세부 조성계획 및 운영방안 등 수립

2) 주변지역 연계활성화를 위한 추가 잠실운동장 일대 연계방안 제시

3. 아시아공원 일대 정비사업 타당성 분석

가. 경제성 및 재무성 분석

1) 타당성 분석기준 검토

2) 경제성 분석

- 경제적 파급효과와 투자적합성 분석

- 비용-편익분석 (Cost-Benefit Analysis)

※ 비용과 편익을 사회적 입장에서 측정하여 경제적 타당성(B/C, NPV, IRR) 도출

3) 재무성 분석

- 사업주체의 입장에서 금전적 비용과 수입(현금흐름) 추정

- 재무적 수익성 산출

- 수익성 지수(PI), 재무적 순현재가치(FNPV), 재무적 내부수익률(FIRR) 등

4) 경제성 및 재무성 분석 시 비용, 편익 추정에 대한 산출 근거 제시

- 공사비, 토지보상비 등 비용 및 편익 항목에 대한 세부근거 제시

5) 경제성 분석 시 사용한 제요인이 변경될 경우 경제성에 미치는 영향을 검토하기 위하여 민감도 분석 실시(필요시)

나. 정책적 타당성 분석

1) 사업의 효과(impact)와 위험요인(risk) 분석

- 화폐적으로 측정하기 어렵거나 직접적인 비용·편익(혹은 수입·지출)으로 보기 어려워 경제성 분석에서 포함시키지 못하는 요소

2) 재정 여건 및 재원조달(지방재정 영향), 사업의 시급성 등 검토

다. 주변도로 교통영향 분석

1) 현재 사업대상도로 및 주변도로 교통 통행량 조사(보행자, 자전거 및 자동차 등)

2) 향후 잠실운동장 일대 개발에 따른 주변도로 통행량 검토

3) 도로다이어트 등 사업시행 교통성 검토

라. 종합적인 분석・평가 등 결과 도출

4. 아시아공원 일대 사업계획(안) 수립

가. 아시아공원 정비사업계획 수립

1) 아시아공원의 종합적인 정비사업계획 수립

2) 중앙광장, 야외 전시장 등 상설시설 조성 및 활용방안 수립

3) 복합문화공간 운영 프로그램 수립(중앙광장 내 임시전시시설, 프리마켓 등)

4) 잠실운동장과 연계를 통한 야외공간 통합 활용방안 수립

5) 잠실운동장과의 보행환경 연계방안 수립(광폭횡단보도 신설 등)

나. 올림픽로 도로다이어트 사업계획 수립

1) 도로다이어트 계획 수립

2) 보행환경, 교통안전시설 설치 및 차로 운영방안 수립

3) 아시아공원과 통합・연계한 복합문화공간으로 활용방안 수립

다. 아시아지하보도 개선사업계획 수립

1) 시민 휴게공간 및 선큰 등 시설물 설치 계획 수립

2) 방문객 유입을 위한 기타 보행환경 개선방안 수립

3) 보행활성화를 위한 세부 프로그램 운영방안 수립

라. 추가 개선방안에 대한 세부 사업계획 수립

마. 관련 도서 작성

1) 평면도, 단면도 및 투시도 등 작성

2) 도시관리계획 변경(안) 작성

3) 그 밖에 발주기관에서 요청한 자료

5. 정비사업 사업추진전략 수립

가. 사업추진 로드맵 제시

나. 사업비 산정, 재원조달계획 및 연차별(단계별) 투입계획 수립

다. 설계기간, 공사기간 등 사업기간 산정

라. 사후관리계획 수립

6. 기타 행정절차 지원

가. 행정절차 지원

- 관계기관(송파구 및 경찰청 등) 업무 협의

나. 주민의견 수렴 및 분석

- 아시아공원 일대 활성화를 위한 주민설명회 개최 및 설문조사 등 주민의견 수렴

- 수렴된 자료 분석 및 결과 보고 등

다. 기타 발주기관이 요청하는 업무 지원

제3장   과업수행 지침

1. 일반사항

가. 주요업무의 사전승인

1) 계약상대자는 다음 사항에 대하여 발주기관과 사전협의를 통해 과업을 수행하여야 한다.

가) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나) 관련 기관과의 협의사항

다) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

나. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행 방법

가) 계약상대자는 과업내용서와 관련 법령 및 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

나) 과업수행 절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 용역이 되도록 하여야 한다.

다) 과업내용은 과업지시의 목적 및 취지에 적합하면 발주기관과 협의하여 유연하게 수행할 수 있다.

2) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수 시 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

가) 착수신고서

- 사업 책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술용역 예정 공정표, 과업수행 조직표

나) 분야별 참여기술자 투입 및 작업계획서

- 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

다) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

라) 용역수행에 필요한 다음 서류

- 내국인 기술자인 경우, 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

- 외국인 기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

마) 기타 계약 담당 공무원 또는 법령이나 과업에서 제출하도록 한 사항

3) 과업수행계획서 제출

과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 여건 등을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호 간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

가) 세부 공정계획서

나) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

다) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

라) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

마) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

4) 업무협의 및 공정보고

가) 보고 시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전보고하여 검토를 받아야 한다.

- 조사 및 자료수집 완료시

- 용역 착수단계(20%), 중간단계(50%), 마무리단계(90%) 검토 시

- 자문회의 시

- 성과품 작성 시

- 준공 시

- 공정보고 시(필요 시)

- 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

나) 월간 정기 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간정기공정(진도)보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음 달 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

- 과업추진 내용 및 공정 현황

- 관련 기관(부서) 업무협의 등 추진사항

- 업무 관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항 포함)

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 다음 달 과업수행 계획

다) 중간보고

계약상대자는 다음 각각의 경우 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명하도록 하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

- 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

- 공정률 20%, 50%, 70%, 90% 진행시

- 주요계획의 설정과 변경 시

- 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

라) 최종보고

발주기관과 상의하여 결정한다.

다. 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원 현황

나) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정 현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

라. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임 범위

가) 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역준공 후라 할지라도 용역 및 설계 과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나) 이 계약상대자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 용역성과의 붙임자료로 된 경우도 계약상대자의 책임한계는 동일하다.

2) 문서의 기록․비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관련 기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 법률준수와 안전관리 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관련 법령을 준수하여야 하며, 안전관리에 최선을 다하여 과실이나 부주의로 인하여 사고가 발생하지 않도록 노력하고 발생하는 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 자문위원회 구성 및 운영

1) 자문

가) 계약상대자는 과업의 원활한 수행을 위하여 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련 기관 협의회를 구성 운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

※ 자문위원의 구성 또는 위촉은 발주기관과 협의하여야 한다.

나) 발주기관에서 단계별 과업수행 결과에 대하여 전문가 자문 등을 받을 수 있으며, 이와 관련하여 발주기관으로부터 자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 자료를 제출하여야 한다.

2) 자문결과의 반영

계약상대자는 자문 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하며 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 과업내용에 반영하여야 한다.

바. 타 계약상대자와의 업무한계

과업을 수행함에 있어 공동도급일 경우 계약상대자 상호 간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

사. 하도급 사항

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

가) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

2) 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

가) 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급하는 경우

나) 하도급 대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

3) 계약상대자는 하도급인으로 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자를 선정하여야 한다.

4) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

5) 책임한계

하도급으로 시행한 용역 및 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

아. 계약내용 변경

1) 용역수행 중 계약내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 계약상대자는 용역수행 중 발주기관으로부터 경미한 사항의 수정 또는 추가 요구가 있을 경우 이에 응하여야 한다. 다만, 주요과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용의 변경이 계약금액의 조정을 수반하는 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건 Ⅵ-1에 따라 처리한다.

자. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자 및 연구원은 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입 지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

차. 용어의 해석

사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

1) 성과품 작성에 사용하는 용어

가) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

나) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

다) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

라) 정부 제정 기준 용어

마) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

가) 한글 맞춤법

나) 외래어 맞춤법

다) 기본 외래어 용어집

3) 성과품 작성에 사용하는 문장 구성

가) 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용 한다.

다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장을 사용한다.

라) 의사전달이 명확하도록 간결한 문장을 사용한다.

카. 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역업무를 지연시킬 때

타. 발주기관의 제공자료

1) 과업수행 시 관련 자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우 발주기관은 관련 기관(부서)와 협의하여 관련자료 등을 계약상대자에게 제공할 수 있으며, 제공된 자료에 대하여 계약상대자는 그 내용의 정확성 여부를 확인한 후 사용하여야 한다.

파. 적용규정 및 설계기준

1) 관련 규정 및 기준은 최신의 것을 적용하고, 용역수행 중 개정된 경우에는 용역완료 전까지 수정된 최신의 것을 적용하며, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

2) 관련 법령 및 기준에 대해 명기한다.

3) 통계자료는 공신력 있는 서울특별시, 정부기관, 지방자치단체, 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

2. 보안 및 비밀유지

가. 보안 관련 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에 필요한 보안 관련 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

나. 보안관리의 책임

1) 계약상대자는 관련 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

2) 계약상대자는 과업내용을 과업진행 이외의 다른 목적에 사용할 수 없으며, 발주기관의 승인 없이 임의로 소유 또는 복사하여 외부에 유출하거나 반출하여 사용할 수 없다.

3) 참여 기술자․연구원은 용역내용에 대한 보안책임이 있으며 과업수행 중 보안규정 준수 의무를 지고 발주기관에게 보안각서를 제출하여야 한다.

4) 용역수행 시 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람할 수 있도록 하여야 하며, 열람기록전을 첨부하여야 한다.

5) 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과를 작성할 때에는 참여인원을 최소화하고, 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록하여야 한다.

6) 용역수행 과정에서 개최하는 각종 회의 시 본 과업내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 회의 종료 후 회수․파기하여야 한다.

7) 과업 수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

3. 보고서 및 성과품

가. 일반사항

1) 보고서 작성 과정에서 계약상대자는 항상 발주기관과 긴밀한 협의를 하여야 하며, 본 과업수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시에는 이에 따라야 한다.

2) 성과품의 품질관리 및 실명제를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면 등에 각 시행과정에 참여한 관련 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

3) 과업 완료 시 용역 성과품을 준공예정일 15일 전에 발주기관에게 제출하여 사전검토(사전검토에 소요된 기간도 본 과업기간에 포함)를 받아야 하며, 성과품 납품과 동시에 준공계를 제출하여야 한다.

나. 보고서 작성

1) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하는 것을 원칙으로 하며, 미터법을 사용하여야 한다.

2) 자료는 발주기관의 특별한 요구가 있는 경우를 제외하고는 A4 양식으로 작성하여야 하며, 도면 등은 A3 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3) 내용 및 편집의 구성은 개조식으로 작성하여 간결하고 명확하게 표현하여야 한다.

4) 종합보고서에는 본 과업수행과 관련한 모든 내용이 종합적으로 기술되어야 하며, 제출문과 참여기술자 명단을 수록하여야 한다.

5) 종합보고서에는 배경, 기초조사(현황조사 및 사진 포함) 및 분석, 관련 계획과 정책의 분석, 기본방향 및 구상, 계획내용, 각 단계별 작업과정(일지 및 추진과정), 중간보고․평가과정 및 내용, 정책․제도 등 개선방안 및 건의사항 등 모든 내용을 포함한다.

6) 시각화 자료(조감도 등) 등의 제작은 반드시 발주기관과 협의하여야 하며, 발주기관의 요구사항이 있을 시 이를 수용하여야 한다.

7) 모든 성과품 일체는 감독관의 검사를 받아 제출하여야 한다.

8) 기타 세부사항 및 성과품 작성 등과 관련된 사항은 용역과정 중에 상호 협의하여야 한다.

다. 성과품 제출

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성과품 (최종)	종합보고서	50 부	내지 300면 (옵셋 및 경인쇄)
	요약보고서	50 부	내지 150면
	개략 설계도 (평면도, 단면도)	2 부
	투시도	2 부	조감도 또는 투시도
	데이터 수록 USB	5 SET
보고서 및 자료	과업수행계획서 및 착공계(보안서류 포함)	3부	착수 전
	중간보고서 및 최종보고서	소요량	보고회 시
	공정보고	1 부	매월
	각종 설명회 자료(필요시) 및 기타자료	1 식	참석인원 등에 따라 결정

※ 제출수량은 추후 과업성과품 배부계획에 따라 조정될 수 있음

1) 용역결과물의 저작권

본 용역의 성과품에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 서울특별시가 소유하며, 서울특별시는 정책상 필요 시 용역결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

4. 기타 특기사항

가. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에는 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

나. 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 양질의 연구성과 도출이 가능한 방향에서 협의에 따라 결정하되, 협의가 어려울 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건 Ⅸ-3-나 항목에 따른다.

다. 계약상대자는 발주기관이 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행한다.

라. 본 과업수행에 필요하다면 국내․외의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등 최신기술을 이용할 수 있으며, 발주기관과 협의 또는 발주기관의 필요에 의하여 관련 전문가로부터 자문을 받아 과업을 수행할 수 있다.

마. 과업수행과 관련하여 공청회, 토론회, 유관기관과의 회의 및 보고회 등이 필요한 때에는 발주기관과 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련 자료를 발주기관에 사전 제출하여야 한다.

바. 각종 보고서의 내용은 보고회 등 상황에 적절하고 검토 가능한 수준이어야 한다.

사. 본 과업완료 후에도 발주기관으로부터 경미한 사항의 수정 요구가 있을 경우 이에 응하여야 한다.

아. 본 용역을 통하여 법령 및 지침 등의 개정사항이 발생하는 경우, 이행에 필요한 도서의 작성, 시뮬레이션 자료 등을 작성하여야 한다.