물재생센터 공동구 노후설비개선 타당성조사 및 기본계획수립 용역

과  업  내  용  서

2018. 1.

서울특별시

(물순환안전국)

목     차

제1장 일반사항	1

1. 과 업 명

2. 과업의 목적

3. 과업의 개요

4. 과업내용

5. 과업기간

6. 주요업무의 사전승인

7. 과업수행 및 공정보고

8. 용역 감독 등

9. 계약상대자의 책임

10. 기본계획 심의 및 자문

11. 신기술, 신공법의 도입 등

12. 보안 및 비밀유지

13. 용역수행자의 교체 등

14. 용어의 해석

15. 손해배상

16. 특기사항 및 기타

제2장 현황 조사업무	12

1. 조사항목

2. 현지조사

3. 공동구 조사

4. 공동구내 배관류 조사

5. 공동구내 기계설비류 조사

제3장 타당성 조사 및 기본계획	14

1. 일반사항

2. 타당성 조사

3. 기본계획

제4장 성과품의 작성 및 납품	17

1. 일반사항

2. 납품시기

3. 성과품 목록 및 납품수량

4. 작성기준

제5장 과업수행 예정공정표	19

제1장 일반사항

1. 과 업 명

본 과업의 명칭은 「물재생센터 공동구 노후설비 개선  타당성 조사 및 기본계획수립 용역」이라 한다.

본 과업에서 서울특별시(물순환안전국 물재생시설과)를□발주기관□이라 하고 용역사를 □계약상대자□라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 서울시 물재생센터 4개소에 대한 공동구내 배관 등 노후설비 실태를 조사하고, 이를 개선하기 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립을 그 목적으로 한다.

3. 과업의 개요

3.1  위치 및 과업범위

1) 위치

센터명	위 치
중 랑	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64
서 남	서울특별시 강서구 양천로 201
탄 천	서울특별시 강남구 개포로 625
난 지	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426

2) 과업범위

물재생센터 4개소에 대한 공동구 노후설비 개선사업을 위한 타당성조사 및

기본계획수립을 위한 용역으로 그 범위는 다음과 같다.

(1) 시설운영 자료수집 및 공동구 배관계통 등 조사

(2) 공동구내 설비별 노후도 평가지표 마련, 평가 및 개선방안 제시

(3) 물재생센터 장래계획(시설현대화, 총인처리 등)과의 연계성 검토 반영

(4) 노후설비 개선 타당성 조사 및 기본계획수립

4. 과업의 내용

4.1 기초자료 수집 및 분석

4.2 공동구 배관계통 등 조사

4.3 설비별 노후도 평가기준 제시

4.4 설비별 노후상태 점검 및 평가표 작성

4.5 배관 등 설비자재 비교검토 및 선정

4.6 중·대형관의 철거 및 교체(개선)방안 제시

4.7 철거곤란 관로에 대한 개선방안(대안) 제시

4.8 시설운영 중단(최소화)없는 최적의 개선방안 제시

4.9 개선 대상관로 기본개략도면 작성

4.10 연차별 설비개선, 투자계획 및 재원조달 계획

4.11 시설개선 타당성 조사 및 기본계획수립

4.12 사업과 관련한 전문가 자문·각종심사·보고회 등 서류작성 및 지원

5. 과업기간

5.1 과업기간은 계약일로부터 240일로 한다.

1) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

(2) 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

(3) 민원발생에 의해 과업수행이 상당기간 지연될 때

(4) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

(5) 행정절차상 용역기간이 추가 소요되었을 때

(6) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

6. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대하여는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

6.1  과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

6.2  주요 계획내용 및 방침의 설정 또는 변경

6.3  관계기관과의 협의사항

6.4  용역수행자의 교체

6.5  계획기준의 설정 및 변경

6.6  성과품 작성시

6.7  기본계획 자문 및 건설기술심의 등

6.8  기타 발주기관의 주관부서 업무담당자(이하□감독원□이라 한다)의 지시나

계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

7. 과업수행 및 공정보고

7.1 과업수행 방법

1) 계약상대자는 과업내용서의 관계법령 및 재규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 과업내용서와 발주기관이 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 하고 발주기관의 지휘감독을 받아야 하며, 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자, 참여기술자는 수행능력 평가시 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직, 질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때는 수행능력 평가시와 동등 이상의(자격, 경력, 유사실적) 자로 발주기관의 승인을 받아 변경하여야 하고 과업수행 도중에 부득이 변경하거나 발주기관의 필요에 의해 교체요구가 있을 경우에도 또한 같다.

3) 용역 수행절차는 본 과업내용서에 따르고 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

4) 용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역참여기술자간 합동회의를 주기적으로 추진하여야 한다.

7.2 착수신고서 제출 등

1) 본 과업은 계약체결 후 10일 이내에 착수하여야 하며, 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

① 착수보고서

② 기술용역 예정공정표

③ 책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본첨부)와 필요한 경우 분야별 책임기술자의 선임계 포함

④ 내역서

⑤ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과

(2) 분야별 참여기술자 및 장비투입계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

② 외국 기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 계약상대자는 과업착수신고서 제출시 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제27조(별지28호 서식)에 의거 건설기술용역 참여기술자 현황통보 및 관리를 위한 자료를 전산파일로 제출한다.

(5) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

7.3 과업수행 계획서 제출

1) 과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동도급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부) 2부를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함)

(2) 용역업체 선정을 위한 사업수행능력 평가시 작성하여 제출한 참여건설기술자의 투입계획

(3) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(4) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(5) 과업수행 조직 및 인력(장비) 투입계획서

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

7.4 업무협의 및 공정보고

1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

(1) 조사 및 자료수집 완료시

(2) 착수, 중간, 최종성과품 작성시

(3) 각종심의, 자문회의 등

(4) 성과품 작성시

(5) 준공시

(6) 월간공정 보고시

(7) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 월간공정 보고

계약상대자는 착수신고시 제출한 기술용역 예정공정표의 매월말일을 기준으로 작성한 월간공정보고서를 익월 7일까지 발주기관에 제출하여야하며 공정보고서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

(1) 과업추진내용 및 공정현황

(2) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(3) 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항 포함)

(4) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

(5) 제출된 추진계획과 대비하여 공정이 지연(누계 5%이상) 될 시 부진사유 분석, 만회대책 및 만회 공정표를 작성하여 제출

(6) 다음달 과업수행 계획

3) 착수보고 등

계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고, 보고자, 시기, 장소 등 세부사항을 발주처와 협의 후 수행하여야 한다.

(1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

(3) 착수, 중간, 최종보고 등

(4) 기타 발주처 업무지시관련 사항

7.5 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별 기록을 월간 단위로 작성하여 월간보고시 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

투입기술자 성명 :        인

책임기술자 :        인

월/일	투입시간	휴일(야간)근무시간	수 행 업 무	비고
1
․
․
30

7.6 안전사고예방 철저

책임기술자는 공동구 작업시 사전안전사고 예방교육을 철저히 하고, 2인 이상      한조가 되어 작업을 실시하며, 안전장비 착용 및 유사시 긴급한 조치가 이루      어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

8. 용역감독 등

8.1 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 관련규정에 따라 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인 감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원 현황

2) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정현황

3) 기타 확인이 필요한 사항

8.2 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

9. 계약상대자의 책임

9.1 계약상대자의 책임 범위

1) 계약상대자는 발주기관과 협의 및 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오･오류 등으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정보완 요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정조치 하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업내용서의 업무 및 계약서에 명시된 계약조건을 성실히 이행하여야 하며, 과업과 관련된 중요한 모든 사항은 발주기관의 서면승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3) 발주기관으로부터 계획변경 등으로 추가과업을 서면으로 요청받은 경우에는 계약상대자는 과업변경에 대한 제안서 검토서를 제출하여야 하며, 발주기관으로 부터 추가 과업내용 및 비용에 대한 서면승인을 얻은 후 과업을 착수하여야 한다.

4) 계약상대자의 해당 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 용역손해배상보험 또는 공제증서를 과업을 완료하기 전까지 발주기관에 제출하여야 한다.

9.2 법률 준수의 의무

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임져야 한다.

9.3 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

9.4 문서의 기록비치

계약상대자는 과업수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및   조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

10. 기본계획 심의 및 자문

10.1 본 과업은 발주기관의 필요에 의한 요청시 각종심의 및 자문을 받아야 하며, 계약상대자는 이에 대한 자료를 준비하여 제출하여야 한다.

10.2 각종 심의 지적사항에 대하여는 검토 후 반영여부를 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

10.3 본 과업 수행기간중 발주기관은 상기 사항과는 별도로 필요시 수시로 본 과업의 자료 등에 대하여 검토할 수 있으며 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

10.4 기본계획 심의 및 자문 등은 발주기관과 협의하여 적정시기에 시행한다.

10.5 계약상대자는 심의 및 자문 등에서 나타난 지적사항에 대하여 면밀히     분석·검토하여 발주기관에 조치계획을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

11. 신기술, 신공법의 도입 등

11.1 계약상대자는 「건설기술진흥법 시행령 제34조」에 따라, 신기술과 기존공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교분석하여 해당 건설공사의 적용가능 여부를 검토해야 한다(환경신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 기본계획에 반영 여부 검토)

11.2 계약상대자는 신기술, 신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 반영하고자 할 경우에는 본 사업과 관련한 자문회의에 관련 자료를 제출 자문회의 결정에 따라야 한다.

12. 보안 및 비밀유지

12.1 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

12.2 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류․관리하여야 하고, 대외비로 분류되는 자료 발간 시 용역감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

12.3 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이 있는 경우 계약상대자가 모든 책임을 진다.

12.4 계약상대자는 보안대책을 수립하여 과업수행계획서 제출시 대표자 및 참여기술자들의 보안각서를 제출하여야 하며, 용역내용 및 성과에 대하여 발주기관의 승인 없이 계약상대자가 소유하거나 복사 또는 외부로 유출을 금한다.

12.5 과업수행 중 자료보관함 비치, 자료보관함 관리자의 지정, 과업진행과 관련된 자료의 유출 분실에 유의하여야 하며 보안을 철저히 하여야 한다.

12.6 본 과업 수행 중 종사자의 변동이 있을 시에는 인계․인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 하며, 보안사항 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

12.7 발주기관으로부터 제공받은 자료는 본 과업 이외에 사용할 수 없으며 성과품 납품시 반드시 소각처리 하여야 하며 작업용 보안사진을 발주기관에 제출하여야 한다.

12.8 대외비로 분류된 문서는 별도 관리토록 하고 폐기시는 소각하여야 한다.

13. 용역수행자의 교체 등

13.1 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적합하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

13.2 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타, 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

13.3 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 계약상대자 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

14. 용어의 해석

14.1 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

14.2 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

15. 손해배상

15.1 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다

15.2 본 과업 수행중에 사고(인명, 재산 포함) 발생시 계약상대자는 즉시 발주기관에 보고하고 지시에 따라 계약상대자 부담으로 보상 또는 원상복구 등 제반조치를 취해야 한다.

16. 특기사항 및 기타

16.1 계약의 해지 및 중지 명령

다음과 같은 사항이 발생시 발주기관은 계약위반 행위로 간주하여 일방적으로 계약상대자에게 계약의 해지 또는 중지를 명할 수 있으며, 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

1) 제반 지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지 않을 때

2) 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 당초 공정보다 현저하게 미달될 때

3) 과업수행상 성실하지 못하거나 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 때

4) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 하였을 때

5) 발주기관의 정당한 지시에 불응하여 부실한 용역 업무를 진행할 때

6) 기타 계약조건을 위반할 때

16.2 과업내용의 소유

본 과업내용(보고서와 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위)은 발주기관의 소유로 하며, 과업수행자가 타 목적으로 활용할 경우에는 발주기관의 사전 승인을 받아야 한다.

16.3 지적재산권 사용

본 과업수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때 계약상대자는 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

16.4 과업완료 후 보완 요청 등

1) 과업완료 후라도 본 용역과 관련하여 누락된 분야 및 검토단계에서 발생한  문제점으로 인하여 시설의 변경이 있을 시에는 계약상대자는 별도의 비용 청구 없이 발주기관과 협의하여 재검토 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업완료 후 본 과업으로 인하여 발생하는 모든 민･형사상의 책임을 져야 한다. 단, 상호책임이 없는 불가항력 사고에 대하여는 상호 협의하여 결정한다.

3) 계약상대자는 계약완료 후라도 보고서와 현장여건이 상이 또는 발주기관에서 하자로 판단 재설계 및 기술검토 요청 시 계약상대자 부담으로 변경도서와 기술검토서를 작성, 제출하여 사업추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

16.5 기 타

1) 본 용역의 중요 결정사항에 대하여는 자문회의 심의를 받아 결정할 수 있으며, 필요한 제반서류를 작성하여 자문(심의)을 거친 후 이를 보완하여야 한다.

2) 관계법령에 따라 관련된 조항은 상호 유기적으로 검토하고, 사전 협의를 통하여 문제점이 없도록 하여 과업기간내 완료하도록 한다.

3) 보다 과학적이고 능률적인 과업수행을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 한다.

제2장 현황 조사업무

1. 조사항목

1.1 현지조사

1.2 공동구 조사

1.3 공동구내 배관류 조사

1.4 공동구내 기계설비류 조사

2. 현지조사

2.1 계약상대자는 과업 지역에서의 시설물, 지형, 지물 등을 파악․확인한다. 또 추가 조사 등을 실시하는 경우 계약상대자는 그 이유를 밝히고 조사내용에 관해서 발주기관에게 보고한 후 지시를 받도록 한다.

2.2 현지답사를 하여 과업지역의 시설물, 지형, 지물, 각종 시설물의 정확한 현황을 파악하고 사진 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성 한다.

2.3 물재생센터 시설현황 및 운영실태 등을 조사하고 공동구 노후설비 개선계획 수립에 반영한다.

3. 공동구 조사

3.1 계약상대자는 물재생센터내 공동구 현황을 조사한다.

3.2 조사내용은 공동구 설치년도, 설치위치, 구간, 배치, 규모 등을 조사하여

본 용역수행의 기본자료 및 향후 유지관리 자료로 활용될 수 있도록 한다.

4. 공동구내 배관류 조사

4.1 설치년도, 관종, 관경, 연장, 경사, 유향, 유종, 관압, 설치위치(구간) 등을   조사하고 기록·도면화하여야 한다.

4.2 공동구 관통구간을 포함한 배관의 규격, 용도, 유체별 처리계통을 조사한다.

1) 하수, 슬러지, 가온수, 세정수, 재이용수, 처리수배관 등

4.3 각종 밸브 및 기계설비류에 대한 노후상태 등 점검

4.4 계약상대자는 관련규정에 따라 배관 노후상태별 등급기준을 마련하고 배관의 부식정도, 도장상태, 마모 및 누수상태 등에 따라 배관 노후상태를 점검하고 평가표를 작성하여 보고하여야 한다. 배관 노후상태 조사는 육안검사 외에 필요시 계약자 부담으로 측정 장비를 활용할 수 있다.

5. 공동구내 기계설비류 조사

5.1 품명, 규격, 동력, 설치년도, 제작사, 노후정도, 작동상태 등을 조사한다.

제3장 타당성 조사 및 기본계획

1. 일반사항

1.1 제2장 현황 조사업무를 통하여 물재생센터 공동구 노후설비개선 타당성조사

및 기본계획을 수립한다.

1.2 본 과업에 관련되는 관련법규, 주요사업 등 각종계획을 명시하여 계약상대자       가 이를 조사하여 기본계획에 반영하도록 한다.

2. 타당성 조사

2.1 공동구내 설비시설에 대한 조사결과를 바탕으로 물재생시설 처리공정과 공동       구내 시설과의 처리계통 및 연동관계 등을 분석하고 공동구내 설비 등에         대한 장래의 계획을 반영한 노후설비의 신설, 교체, 개량 등에 대한 타당성       조사를 시행한다.

2.2 물재생센터 현대화, 총인, 환경개선, 건조시설설치 사업 등 공동구내 배관시       설과의 연계성을 검토하고 이를 반영한다.

2.3 중대형 관로는 시설운영중단 없이(최소화) 교체할 수 있는 방안을 검토하되        필요시 계열별 개선방법, 공동구 추가설치, 임시 우회관로 설치, 기존관로         활용한 신소재 사용 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

2.4 중대형 관로는 철거자재와 설치자재를 반출, 반입 할 수 있는 방안 등을          제시하여야 한다.

2.5 타당성 조사를 토대로 개략사업비 산정 및 경제성을 분석 한다.

사업비는 공동구별 구역별 공정별 연차별로 구분하여 산정하여야하며, 사업기간,

사업내용, 사업구간 등을 조사하며 재원조달 방안을 제시한다.

또한, 사업의 기술적 평가, 시급성 등을 평가하여 사업비의 연차별 투자계획을

수립한다.

2.6 조사·검토 자료는 센터별 특성을 감안하여 의견을 제시하여야 한다.

2.7 발주기관 요구시 타당성 조사 등에 따른 재정투융자심사에 필요한 자료를         작성하고 관련 근거자료 등을 제시하는 등 심사자료 작성에 협조하여야          한다.

3. 기본계획

3.1 관련계획, 현장조사 및 타당성조사에서의 기초자료를 수집·종합하여

센터별 특성에 맞는 계획을 수립한다.

3.2 기본계획 수립과정에는 다음의 지표를 충분히 검토하여야 한다.

1) 공사의 목표 및 기본방향

2) 공사의 내용 및 기간

3) 사업의 타당성 및 우선순위

4) 연차별 개선계획, 사업비 및 재정확보 방안

5) 중·대형 배관의 철거반출, 반입설치 및 시설중단 최소화 방안

6) 중·대형 배관 종류별 특성검토 적정배관 선정, 시공방안 등 검토

7) 운영 및 유지관리

8) 기대효과와 그 밖에 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

3.3 주요 설계내용

1) 공동구 현황조사 자료 개략도 작성

도면화 작업은 현황도, 처리계통도(평면도, 단면도 등), 복잡구간의 상세도 등을 작성하되  시설현황 등을 고려하여 센터별로 작성한다.

2) 공동구내 주요설비 개선방안 등 도면화

공동구내 배관 등에 대한 조사결과 개선방안, 대체의견 등에 대하여 계통도 등이 포함된 도서로 작성하여야 한다.

3) 배관재질 선정

교체되는 배관의 장 ․ 단점 등을 면밀히 분석하여 제시하고 그 중에서 최적의 처리시설이 선정되도록 하여야 한다. 또한, 교체가 곤란한 구간에 대한 대체(개선)방안을 제시하여야 한다.

3.4 재정 및 운영관리계획

1) 개략공사비 산정

2) 경제수지 분석

3) 운영관리비

4) 운영관리계획

3.5 관련법규 검토 및 확인

1) 환경정책기본법

2) 대기환경보전법

3) 소음․진동규제법

4) 폐기물관리법

6) 전력기술관리법

7) 기술된 사항이외 본 사업에 관련된 법규 및 예규

8) 공사시행과 관련된 공사기준, 기술지침

9) 구조 등 안정성 검토

3.6 필요시 지장물 이설, 대체관로 부설, 공동구 설치방안 등 제시

3.7 개략공사비 산정

공사비는 공동구내 노후배관 개선을 위주로 산정하되, 필요시 토목, 전기, 기타 등으로 구분하여 최근의 물가정보, 물가자료, 가격정보지 등을 기준으로 단위시설물별로 산정하고, 기타 부대비용을 포함한 개략사업비를 산정한다.

제4장 성과품의 작성 및 납품

1. 일반사항

1.1 용역성과품은 가장 최근의 서울특별시 기준에 따르되, “서울시 설계용역 관리편람”의 성과품 작성기준에 따라 작성하고 발주기관 검토 후 제출한다.

1.2 각종 조사 자료는 보고서 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되   그 양이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주기관과 협의 후 작성하여 보고서에는 요약 분을 수록한다.

1.3 자문심의내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 목록에 수록한다.

1.4 도면화 요구자료는 반드시 도면화 또는 도면에 표기 되어야 하며, 도면상의 문서는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

1.5 용역참여자의 실명관리를 위하여 설계용역에 참여한 관계공무원 및 용역기관의 담당자(설계도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대해 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록한 용역참여자의 현황을 보고서에 수록하고 설계참여기술자 명단은 “건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정”별지 제19호 서식에 의거 작성하되, 생년월일 중 생년은 *로 암호화 처리한다.

1.6 성과품 작성 규격

1) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

2) 모든 보고서는 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 관련도면, 집계표 등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3) 모든 보고서, 도면을 비롯한 성과품은 CD나 DVD 및 USB에 저장하여 발주기관에 제출하여야 하며, 도면은 Auto Cad File로 작성한다.

2. 납품시기

과업성과품은 계약일로부터 기산하여 최종성과품을 240일내 납품하여야 한다.

3. 성과품 목록 및 납품수량

성과품은 발주기관과 협의하여 승인을 득한 후 납품한다.

3.1 타당성 조사 및 기본계획보고서	20부

3.2 부록, 각종조서(조사·분석 보고서, 각종계산서 등)            20부

3.3 지침서상 요구 도면(A3반책, 백도)                  센터별 각 5부

3.4 현장조사 공동구배관 사진첩(USB)                  센터별 각 5부

3.5 3.1~3.4 자료가 수록된 CD-ROM 및 USB                   각 5개

4. 작성기준

4.1 보고서에는 조사, 시험결과로 얻어진 각종자료를 수록하며, 비교 검토내용,

자문시 지적사항과 반영내용, 발주기관 지시·협의내용을 정리 수록한다.

부록에는 현장조사자료, 측정자료, 현황사진, 관련법령 및 참고자료 등 수록

4.2 전산설계도면 규격은 A1 SIZE 작성을 원칙으로 하며, 명칭, 축척, 북향표시, 범례등 기타 필요한 사항을 기재한다.

4.3 사용한 자료의 출처는 명백히 표시하도록 하며 설계체계나 표현방법은 감독원과 협의하여 수행한다.

4.4 주요도면 작성기준

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성하여야 하며, 도면내용이 이해하기 어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

2) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 조사내용, 유의사항 등 해당도면에 대한 특기사항을 수록한다.

4) 설계도면에는 관련도면란을 만들어 해당도면의 내용과 주요 관련 있는 도면의 번호 도면명을 표기한다.

5) 설계도면 작성시 도면을 CAD로 작성하되 백터방식으로 저장하여야 하며,  저장시 전산데이터간 호환 가능하여야 한다.

6) 설계도면은 KS 규정에 따라 작성한다.

7) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

제5장 과업수행 예정공정표

공정 구분	일 정									용 역 사 준비자료
	2개월			4개월		6개월		8개월
용 역 착 수 및 현황조사										현황조사결과제출
조사분석 및 도면화 작업										분석자료 및 현황 도면제출
타당성조사 및 기본계획										용역결과 초안제출
심의자료작성 및 자료보완										각종 심의자료 작성 제출
최종성과품사전검토										최종성과품 초안제출
성과품납품 용역준공										성과품 납 품