- 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 -

아리수로 교통소통대책(교통안전시설) 변경 추진현황

□ 공사개요

❍ 구    간 : 서울시 강동구 암사동 강동농협 선사지점 ~ 현대 홈타운 앞

❍ 공사규모 : L=1.184km, 정거장 1개소 (총연장 206m, 승강장 125m)

본선 개착BOX 978m, 모란차량기지 및 건축공사 각 1식

❍ 공사기간 : ‘17.08.23 ~ ’23.08.21(72개월)

(1차 ‘17.08.23 ~ ’19.06.30[22개월])

❍ 공 사 비 : 80,199백만원 (1차 15,843백만원)

□ 추진경위

❍ ‘17.11.26. : 교통소통대책 자문회의 최종결과 통보(서울시청 교통운영과-23007)

❍ ‘17.12.21. : 교통안전시설 개설설치 통보(서울특별시지방경찰청 교통관리과-36531)

❍ ‘18.02.20. : 교통안전시설 원인자부담공사 승인(동부도로사업소 도로보수과-1062)

❍ ‘18.07.13. : 교통소통대책 변경승인(공사기간) 요청 회신(서울시청 교통운영과-11634)

❍ ‘18.07.18. : 교통안전시설 개선(공사기간)설치 통보(서울특별시지방경찰청 교통관리과-36531)

-  아리수로 공사구간 복공완료 단계 : 총34단계

-  올림픽로 공사구간 복공완료 단계 : 총54단계

❍ ‘19.04.10. : 교통소통대책 변경(30단계) 사전 방문 협의(강동경찰서, 서울시청 교통운영과)

❍ ‘19.04.30. : 교통소통대책 변경(30단계) 보완 방문 협의(서울시청 교통운영과)

❍ ‘19.05.02. : 교통안전시설 변경(30단계) 사전 방문 협의(서울지방경찰청 교통관리과)

-  변경계획 설명자료  : 30단계(최초 63단계) 교통소통대책(교통안전시설) 변경

당 초	변 경	변경 사유
‘19.04.16~’21.12.31(33개월) 4차로 확보	‘19.04.16~’21.12.31(33개월) 3차로 확보	- 정거장 신설구간 정원빌라 등 복공판 소음 민원 해소 - 별내선 2공구 터널 시점부 작업구 필요에 따라 변경