동부간선도로 지하화 사업 추진현황

□ 사업개요

구 분	민간투자사업	재정사업
구 간	영동대로(경기고앞) ~ 동부간선도로(월릉교)	동부간선도로(송정동 ~ 당현4교) 영동대로(학여울역 ~ 경기고앞)
규 모	터널 4차로(병렬), 10.1km	터널 4~6차로(병렬), 11.3km 터널 4차로(병렬), 2.4km
추정사업비	9,261억원	19,840억원
개통예상년도	’27년	’28년

□ 주요 추진현황

【 민간투자사업 】

○ ’15.08.18.	: 민간투자사업 제안 (제안사 → 서울시)

○ ’18.07.~’19.07.	: 민자적격성조사 (한국개발연구원)

○ ’19.12.10.	: 민간투자사업심의위원회 심의(기획재정부)

○ ’19.12.20.	: 서울시의회 동의

○ ’19.12.26.	: 제3자 제안공고

○ ’20.07.31.	: 우선협상대상자 선정 (대우건설 컨소시엄)

○ ’20.09.09.	: 실시협약 협상 착수(한국교통연구원)

○ ’21.06.현재	: 사업시행자와 실시협약 협상 중

【 재정사업 】

○ ’14.06.29.	: 도로정비기본계획 수립

○ ’15.11.~’18.10.	: 타당성조사 및 기본계획용역 시행 (서울시)

○ ’18.08.~’19.12.	: 타당성조사 (한국지방행정연구원)

○ ’20.04.27.	: 투자심사 (서울시)

○ ’20.10.16 ~	: 기본설계 중

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2020년	2021년	2022년 이후
재정사업	계	1,983,947	625	2,950	10,000	1,970,372
	설계비	64,571	625	2,950	9,000	51,996
	공사비	1,896,859	0	0	0	1,896,859
	감리비	22,517	0	0	1,000	21,517

※ (재정사업) 시설비 및 감리비 2,553백만원 금회 추경 편성 요청 중
(민자사업) 현재 실시협약 협상 중으로 금년 예산투자 계획 없음

□ 향후 계획

【 민간투자사업 】

○ ’20.09.~’21.12.	: 설계VE, 실시협약 협상, 건설기술심의

○ ’22.01.~’22.12.	: 실시설계 및 각종 인·허가 절차 이행

○ ’23. 상반기	: 실시계획 승인 및 공사 착공

【 재정사업 】

○ ’20.10.~’21.12.	: 기본설계 시행

○ ’22.01~	: 실시설계 시행

※ 향후 계획은 여건 변화에 따라 변경될 수 있음.

□ 위치도