도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 마장동 7943번지∼행당동1210번지 외 2건 송배수관 정비공사 : 조건부 시행 (이동원 위원 지정검토)

- 교차로 공사단계와 가로를 횡단하는 공사단계의 경우, 장비 규모 축소 및 장비 배치, 복공 계획 등을 재검토하여 점용면적 축소, 차로 확보, 공사시간 변경 등 교통소통대책을 재수립하기 바람 (군자로 17, 18단계 등)

- 우기를 고려하여 공사기간에 대해 재검토하기 바라며, 전단계 횡단면도 및 최소 차로폭 확보에 대해 재검토하여 보완하기 바람

- 차로 및 보도 측으로 회전 적사가 발생하는 단계의 경우, 교통통제수 및 보행안전도우미 배치 등 안전대책을 보완하기 바람

- 공사장비 배치 등으로 도로점용구간이 구분되어 있는 경우, 반드시 교통통제수를 배치하기 바람

- 마조로 1단계 양방향 통행에 대한 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 마조로 2, 3단계 송배수관 위치 및 주변 여건(건물 등)을 재검토하여 시공 가능여부를 재검토하기 바라며, 주변 여건(건물 등)과의 이격거리를 보다 확보할 수 있도록 송배수관 위치에 대해 조정·검토하기 바람

- 마조로 2, 3단계 거주자우선주차에 대한 처리 계획 및 관계기관 협의 계획을 수립하여 제출하기 바람

- 마조로 6, 7단계 북→동 좌회전 차량의 안전을 확보하기 위해 동측 접근로 정지선 후퇴 등을 검토하기 바람

- 마조로 7, 8단계 공사장비 배치는 원안으로 재검토하기 바라며, 교차로 운영 계획에 따라 노면표시를 보완하기 바람

- 마조로 9, 10단계의 경우, 등·하교 통행 관련 불편 및 안전문제가 발생하지 않도록 공사기간 등을 재검토하기 바람

- 마조로 10단계 야간공사 시에 주변 건물(학교 등)의 진출입 통행이 발생하지 않을 경우, 교차로 도로점용구간을 통합하여 운영하기 바람

- 마조로 10, 11, 12단계 등 남→북 방향 접근로의 비보호 좌회전 운영체계에 대해 마조로 축 단위에서 재검토하기 바람

- 마조로 14, 16단계 등 비보호 좌회전 차량의 통행체계를 재검토하여 교통소통대책을 보완하기 바람

- 군자로 13, 14단계 장비 규격을 검토하여 점용면적을 제시하기 바라며, 횡단보도 반폭 점용 관련하여 장비배치 가능 여부를 재검토하기 바람

- 군자로 15단계 장비배치 관련하여 병렬 배치를 검토하고, 서비스 수준을 제시하기 바람

- 군자로 공사단계에서 교대통행이 발생하는 경우, 완화구간을 축소하여 차량 대기공간을 확보하기 바람

- 뚝섬로 접근로 완화구간 연장을 보다 확장하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람