예산서 P.

필동 배수분구 하수관로 종합정비공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2011.01 ~ 2017. 12
사업위치			중구 명동, 필동, 광희동, 을지로동 일대
총사업비			총34,400,000천원/[시비] /보조율 0 [%]
사업내용			하수관로 정비 D300mm~ ▣2.5×2.0m L=19.5km
사업형태			☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			서울특별시 중구청
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역		기술심사			민간보조심의	정보화심사			공유재산
□	☑				☑		□		☑			□	□			□
					‘96 조건부 (공사비 등 사업비의 적정성 확보)				‘12.04 조건부 (자재단가 및 할증 조정)
경상	투자
□	☑
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수			우수					보통			미흡				매우미흡
□			□					□			□				□
□ 사업 담당자
자치구명		부서명				과 장				팀장				주무관
중구		물재생계획과				하상문				최병철				정성오
						2133-3780				2133-3794				2133-3795

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄                                               (단위 : 천원)

구분	2015년 본예산	2016 본예산 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	4,500,000	5,000,000	13,980,000	8,980,000	179.60
시설비	4,200,000	4,670,000	13,650,000	8,980,000	192.29
감리비	300,000	330,000	330,000	0	0.00
시설부대비	-	-	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산
시설비	시설비 : 4,670,000천원 하수관로부설(야간) = 3,974,020천원 - D=300mm, L=149m x 950천원/m = 141,500천원 - D=350mm, L=65m x 990천원/m = 64,350천원 - D=450mm, L=811m x 1,020천원/m = 827,220천원 - D=500mm, L=77m x 1,100천원/m = 84,700천원 - D=600mm, L=610m x 1,250천원/m = 762,500천원 - D=800mm, L=15m x 1,450천원/m =21,750천원 - □1.5x1.5m, L=520m x 3,500천원/m =1,820,000천원 - □2.0x2.0m, L=60m x 4,200천원/m =252,000천원 이전비 ≒ 550,590천원 - 도시가스 : 170m x 800천원 = 136,000천원 - 통신 : 120m x 950천원 = 114,000천원 - 한전 : 110m x 950천원 = 104,500천원 - 상수도 : 281m x 700천원 = 196,700천원 폐기물처리비 5,191톤 X 28천원 ≒ 145,340천원 -운반비 5,191톤 X 12천원 ≒ 62,290천원 -처리비 5,191톤 X 16천원 ≒ 83,050천원
감리비	감리비(야간) : 330,000천원 책임감리원 1인 보조감리원 1인 (2인근무 기준 33,000 천원/월) - 10.0개월 x 33,000 천원/월 = 330,000천원

과목구분	2017년 예산(안)
시설비	['17년 사업비 ≒ 13,980백만원] 【필동 4·5구역】 ￭ 하수관로 공사비 : 2,266,000천원 ‧ 하수관로 부설 ≒ 1,324,000천원 - D=450㎜, L= 112m x 937천원/m = 104,944천원 - D=600㎜, L= 196m x 1,672천원/m = 327,712천원 - D=700㎜, L= 196m x 1,704천원/m = 333,984천원 - D=800㎜, L= 226m x 1,842천원/m = 416,292천원 - D=1,350㎜, L= 20m x 2,073천원/m = 41,460천원 - D=1,500㎜, L= 45m x 2,207천원/m = 99,315천원 ‧ 폐기물 처리비 ≒ 42,000천원 - 폐아스콘 861톤 x 30천원 = 25,830천원 - 폐콘크리트 606톤 x 28천원 = 16,968천원 ‧ 이 설 비 : 900,000천원 - 도시가스 : 500m x 900천원/m = 450,000천원 - 통신 : 500m x 900천원/m = 450,000천원 【필동6구역】 ￭ 하수관로 공사비 : 4,895,000천원 ‧ 하수관로 부설 ≒ 2,821,000천원 - D=300㎜, L= 71m x 808천원/m = 57,368천원 - D=450㎜, L= 1,752m x 937천원/m = 1,641,624천원 - D=500㎜, L= 348m x 1,263천원/m = 439,524천원 - D=600㎜, L= 268m x 1,672천원/m = 448,096천원 - D=800㎜, L= 90m x 1,842천원/m = 165,780천원 - 암거블록(1.0×1.0×1.0m) L= 24m x 2,900천원/m = 69,600천원 ‧ 폐기물 처리비 ≒ 154,000천원 - 폐아스콘 2,800톤 x 30천원 = 84,000천원 - 폐콘크리트 2,500톤 x 28천원 = 70,000천원 ‧ 이 설 비 : 1,920,000천원 - 도시가스 : 900m x 900천원/m = 810,000천원 - 통신 : 700m x 900천원/m = 630,000천원 - 상수도 : 600m x 800천원/m = 480,000천원 【필동7·8구역】 ￭ 하수암거 공사비 : 6,496,000천원 ‧ P.C암거부설 ≒ 3,003,000천원 - □1.0x1.0 , L=6m × 2,900천원/m = 17,400천원 - □2.0x1.5 , L=577m × 3,950천원/m = 2,279,150천원 - □2.0x2.0 , L=168m × 4,210천원/m = 707,280천원 ‧ 폐기물처리비 1,000톤 x 28천원 = 28,000천원 ‧ 이 설 비 : 3,465,000천원 - 도시가스 : 80m × 2,000천원/m = 160,000천원 - 상수도 : 150m × 7,200천원/m = 1,080,000천원 - 통신맨홀 : 10개소 × 50,000천원/개소 = 500,000천원 - 한전맨홀 : 8개소 × 150,000천원/개소 = 1,200,000천원 - 한전 : 100m × 5,250천원/m = 525,000천원
감리비	감리비(야간) : 330,000천원 책임감리원 1인 보조감리원 1인 (2인근무 기준 33,000 천원/월) - 10.0개월 x 33,000 천원/월 = 330,000천원

과목구분	증 감 사 유
시설비 및 감리비	계속사업

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계		34,400	15,420	5,000	13,980
시설비		32,970	14,650	4,670	13,650
	실시설계비	898	898
	공사비	32,072	13,752	4,670	13,650
감리비		1,430	770	330	330

3		사업설명

□  사업목적

○ 필동배수분구는 상류 남산에서 시작하여 명동, 필동, 광희동, 을지로동 일대를 거쳐 청계천 우수암거로 배수처리 되는 중구의 중요한 하수관로로 관 노후 및 파손, 경사불량, 역단차, 통수능 부족 등으로 정비공사가 필요하며 ,

○ 하수관거 종합정비사업은 계속사업으로 시행되고 있으며 기존 하수관거의 불량에 의한 관거기능 저하와 노후 관거를 개량하여 유하능력 향상과 통수능 확보 등 기능을 회복하여 시민의 안전과 도시침수를 예방하고자 함.

□  사업근거

○  법령상 근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치 단체의 책무)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- '95.06～'96.12: 서울시하수관거 조사 및 하수정비 기본설계(청계천 우안 하류 배수유역)

- '09.06	: 서울특별시 하수도정비 기본계획 (변경)

□  사업내용

○  위    치 : 중구 명동, 필동, 광희동, 을지로동 일대 (298.3㏊)

○  규    모 : D300mm~▣2.5m×2.0m, L= 19.5㎞

○  사업기간 : 2011. 1.  ~ 2017. 12.

○  사업내용 : 통수능 부족, 역경사, 역단차, 노후불량 하수관로 정비 및 확대 개량

○  총사업비 : 34,400백만원(설계비898, 시설비32,072, 감리비1,430)

□  2017년도 사업계획

○  위    치 : 충무로, 필동, 예장동, 남산동 일대,

○  사업규모 : 하수관로 정비

D300mm∼□2.0×2.0m, L=6.6km

○  사 업 비 : 13,980백만원(시비)

□  추진경위

○ '95.06 ~ '96.12 : 서울시 하수관로 조사 및 하수정비 기본설계(중랑천 우안 하류 배수유역)

○ '06.09.01       : 건설기술용역 타당성 심사

○ '11.04 ~ '12.02 : 실시설계용역 실시

○ '12.06 ~ '16.12 : 공사시행【1~3구역(완료), 4~5구역, 6구역, 7~8구역】

○ '17.12         : 필동배수분구 사업완료

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	2010년도에 침수지역으로 하수관로 노후 및 용량부족 등 하수관로 정비가 필요한 지역으로 우선적으로 사업추진이 요구됨

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 → 공사계약 → 공사시행 → 사업완료

○  계약체결

- 장기계속사업으로 2012. 6월 구역별 계약체결 시행

- 관리감독 : 책임감리

□  2017년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		13,980백만원
공사발주	2017.01~2	-	계약심사 및 공사계약
공사시행	2017.3~12	13,980백만원	공사착공 및 시행
공사준공	2017.12	-	공사준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧ 주민설명회 개최 ‧ 1~3구역(명동, 을지로동, 묵정동 일대),7·8구역(수표로) 하수관로 정비 시행(L=2.73km)
2015년도	‧ 주민설명회 개최 ‧ 3구역, 6구역, 7·8구역(오장동, 예관동, 필동, 수표로 일대) 하수관로 정비 시행(L=2.22km)
2016년도	‧ 주민설명회 개최 ‧ 4·5구역, 6구역, 7·8구역(예장동,필동,수표로, 충무로 일대) 하수관로 정비 시행(L=2.74km)

□   향후 기대효과

- 배수체계 개선, 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방

- 노후·불량 관로 개보수 등으로 시민안전 및 시설물 내구 연한 유지

- 하수누수 및 불명수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	불용
2014	4,500	-	-	4,500	4,400	-	-
2015	5,000	-	-	5,000	4,906	-	-
2016	5,000	-	-	5,000	-	-	-

□  위치도(필동배수분구)

□  필동배수분구 공사계획 위치도