사   업   실   적

2013. 9.

도시기반시설본부

목       차

시   설   국

< 건설총괄부 >

1. 남구로역 새벽일자리마당 편의시설 건립	9

2. 본부 소식지(함께해요~ 희망도시) 확대개편	10

3. 대금e바로 기능고도화	11

4. 건설알림이 및 건설정보관리시스템(One-PMIS) 유지관리 및 기능고도화	13

< 토  목  부 >

5. 월드컵대교 건설공사	14

6. 양화대교 구조개선공사	15

7. 강변북로(양화대교~원효대교간) 확장공사	16

8. 용마터널 민간투자사업 건설공사	17

9. 잠실역 지하광장 조성공사	18

10. 구리암사대교 건설공사	19

11. 구리암사대교 연결도로건설공사	20

12. 남부순환로(개봉역주변) 구조개선공사	21

13. 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사	22

14. 선사로~고덕지구간 도로확장공사	23

15. 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	24

16. 남부순환로~오정대로간 도로개설공사	25

17. 도림교 확장공사	26

18. 방화대교 남단 접속도로 건설공사	27

19. 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	28

20. 응봉교 확장 및 성능개선공사	29

21. 용비교~행당중간 도로개설공사	30

22. 우이천 하천정비공사	31

23. 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	32

24. 신상도 지하차도 확장공사	33

25. 동부간선도로(월계1교~의정부시계) 확장공사	34

26. 천호대로(광나루역) 확장공사	36

27. 신사사거리~고양시계간 도로개설공사	37

28. 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사	38

29. 남부순환로(개봉1동 사거리 주변) 평탄화 실시설계	39

30. 성암로 병목구간 확장 기본 및 실시설계	40

31. 위례지구 차집관거 증설사업 기본 및 실시설계	41

32. 월계2교외 1개소 확장공사 기본 및 실시설계	42

33. 잠실역 지하광장 조성(민자사업) 설계감리	43

34. 도시고속도로 연결램프(정릉길, 연희로) 설치 실시설계	44

35. 광복교~안양교주변 도로확장 기본 및 실시설계	45

36. 도시고속도로 연결램프(화랑로) 설치 실시설계	46

37. 탄천변 동측도로 확장공사 실시설계	47

38. 서초역~방배로간 도로개설 실시설계(보완)	48

39. 제물포터널(민자사업) 설계감리	49

40. 신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계	50

41. 사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장 기본 및 실시설계	51

42. 강남순환도시고속도로(민자구간) 건설공사	52

43. 신림~봉천터널 건설공사	54

44. 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사	55

45. 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사	57

46. 헌릉로 연결도로(강남순환접속)공사	58

47. 월계2교외 1개소 교량확장공사	59

48. 신촌로․마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사	60

49. 도봉산역 복합환승센터 건립공사	61

< 건  축  부 >

50. IT-COMPLEX 건립공사	62

51. 서울 재사용플라자 조성사업 설계용역	63

52. 장충체육관 리모델링공사	64

53. 행복플러스 작업장 건립공사	65

54. 운현궁 보수‧정비공사	66

55. 숭례문 방재관리시설 건립공사	67

56. 한양도성 탐방로(창의문~말바위안내소) 정비공사	68

57. 서남권 돔야구장 건립공사	69

58. 북한산성 4단계 1차 복원정비공사	71

59. 운현궁 보수공사	72

60. 돈화문로 전통공연장(국악예술당) 신축공사	73

61. 서울글로벌센터 건립공사	74

62. 서울시 근로자복지관 리모델링공사	75

63. 서울과학관 건립공사	76

64. 서남권 글로벌센터 개보수공사	77

65. 한강교량긴급복구 자재창고 건립공사	78

66. 장애인 행복서비스센터 건립공사	79

67. 시립노원시각장애인복지관 재건축공사	80

68. 구로구 다기능 복합 인생이모작 지원센터 건립공사	81

69. 도심권 인생이모작 지원센터 설치공사	82

70. 서울풍물시장 가설건축물 축조공사	83

71. 서울영어마을(풍납, 수유캠프) 기능보강공사	84

72. 강북시립미술관 건립공사	85

73. 서울시민 가족자연체험시설 조성공사	86

74. 서울시립영보자애원 시설보수공사	87

75. 양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사	88

76. 동대문디자인플라자&파크 건립	89

< 설  비  부 >

77. 탄천물재생센터 고도처리 설치사업	90

78. 암사대교 및 연결도로 개설 전기공사	91

79. 강남순환 8공구 건설 구룡지하차도 전기공사	92

80. 장충체육관 리모델링 기계, 전기, 통신 공사	93

81. 난지물재생센터 고도처리시설(분뇨탈취 포함) 사업	94

82. 서남분뇨처리시설 증대 및 현대화사업	95

83. 선사로~고덕구간 도로확장 전기공사	96

84. 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사	97

85. 송정사근 빗물펌프장 증설 기계‧전기공사	98

86. 신림2 빗물펌프장 건설 기계‧전기공사	99

87. 서울영어마을(수유, 풍납) 기능보강 통신공사	100

88. 도림교 확장 전기공사	101

89. 서울글로벌센터 건립 전기, 통신공사	102

90. 도봉산역 복합환승센터 건립 전기,통신공사	103

91. 강북시립미술관 건립 전기, 정보통신공사	104

92. 방화대교 남단 접속도로 전기공사	105

93. 헌릉로 연결도로 전기공사	106

94. 장애인 행복서비스센터 건립 전기, 통신공사	107

95. 서부트럭터미널 앞 지하차도 전기공사	108

96. 중동빗물펌프장 외 2개소 기계, 전기공사	109

< 방재안전시설부 >

97. 용두3 및 신이문 빗물펌프장 신‧증설공사	110

98. 위례신도시 차집관로 증설사업	111

99. 탄천물재생센터 복개공원화 4단계	112

100. 송정‧사근 빗물펌프장 증설공사	113

101. 신림2 빗물펌프장 설치공사	114

102. 공릉2 빗물펌프장 신설 및 면목4 배수관로 설치공사	115

103. 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사	116

104. 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	117

105. 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사	118

106. 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사	119

107. 용허리 빗물저류조 설치공사	120

108. 잠원2 빗물펌프장 신설공사	121

109. 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	122

110. 서남권물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	123

111. 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사	124

112. 중앙버스전용차로 승강장 녹음수 식재공사	125

113. 동대문 성곽공원 조성공사	126

114. 한글가온길 조성공사	128

115. 세종로 은행나무 이식공사	129

116. 노원시립장애인복지관 주변 환경개선사업	130

도 시 철 도 국

< 도시철도설계부 >

117. 도시철도 총사업비 관리 업무	131

118. 도시철도 예산 관리 업무	132

119. 지하철9호선 3단계 궤도실시설계용역	133

120. 우이~신설 경전철 민간투자사업 설계업무	134

121. 신림선 경전철 민간투자사업 실시설계	135

< 경전철추진반 >

122. 신림선 경전철 민간투자사업	136

123. 동북선 경전철 민간투자사업	137

124. 면목선 경전철 민간투자사업	138

125. 서부선 경전철 민간투자사업	139

< 도시철도공무부 >

126. 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사	140

127. 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사	141

128. 우이~신설 경전철 민간투자사업	142

< 도시철도토목부 >

129. 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사	143

130. 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사	144

131. 지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사	145

132. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사	146

133. 지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사	147

134. 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사	148

135. 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사	149

136. 지하철 9호선 2단계 궤도공사	150

< 도시철도건축부 >

137. 지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(건축분야)	151

138. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사(건축분야)	152

139. 지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사(건축분야)	153

140. 우이~신설 경전철 1공구 건설공사(건축분야)	154

141. 우이~신설 경전철 2공구 건설공사(건축분야)	155

142. 우이~신설 경전철 3공구 건설공사(건축분야)	156

143. 우이~신설 경전철 4공구 건설공사(건축분야)	157

144. 신림선 경전철 민간투자사업 설계업무	158

< 도시철도설비부 >

145. 지하철 9호선 연장건설(2단계) 송변전 공사	159

146. 지하철 9호선 연장건설(2단계) 전차선 공사	160

147. 지하철 9호선 연장건설(2단계) 시스템분야 전면책임감리용역	161

148. 지하철 9호선 915공구 건설공사(전기)	162

149. 지하철 9호선 916공구 건설공사(전기)	163

150. 지하철 9호선 917공구 건설공사(전기)	164

151. 지하철 9호선 915공구 건설공사(기계‧설비)	165

152. 지하철 9호선 916공구 건설공사(기계‧설비)	166

153. 지하철 9호선 917공구 건설공사(기계‧설비)	167

154. 노량진역 환승통로 기계‧설비공사	168

155. 지하철 9호선 연장건설 시스템분야 실시설계용역	169

156. 지하철 9호선 2단계 정보통신공사	170

157. 우이~신설 도시철도 민간투자사업(시스템 분야)	171

158. 9호선 2단계 신호보안설비공사	172

1. 남구로역 새벽일자리마당 편의시설 건립

담당부서	팀 장	이인수	3708-2340
건설총괄부	담당자	이우승	3708-2323

□ 사업개요

○ 목    적 : 대규모 인력이 집결하는 남구로역 새벽일자리마당에 13개 건설사, 구로구청, 서울시 간 공동협약(MOU)을 통해 부족한 화장실 등의 편의시설을 건설․기부함으로써 일용직근로자를 배려하는 나눔복지 실현

○ 위    치 : 구로구 구로동 803-5

○ 규    모 : 지하1/지상2, 연면적 107.85㎡, 공공화장실 등

○ 사업기간 : 2012.12 ～ 2013.12

○ 총사업비 : 480백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 미착공

□ 예산투자 현황 : 비예산사업

□ 추진실적

◦ '12.12.23 : 시장님 남구로역 방문 시 화장실 건립 지시

◦ '13.04.09 : 20대 건설사와 '13년 도기본 건설사업 추진기조 설명회 개최

◦ '13.04.15 : 편의시설 건축물 기부의사 표시 통보(건설사→시)

◦ '13.05.01 : 건설사(대표: 현대건설), 서울시, 구로구간 MOU협약 체결

◦ '13.07.26 : 건설사 기부액 배분방안 협의(13개사 균등배분)

◦ '13.07.31 : 설계도서 성과품 납품(설계자→서울시, 13개건설사)

◦ '13.08.14 : 건축허가(2013-구로구-증축허가-6)

◦ '13.08.30 : 착공신고

□ 향후 추진계획

◦ '13.11월 : 공사준공

◦ '13.12월 : 시설물 인계인수 및 기부채납(13개 건설사→구로구), 편의시설 개관

□ 특이사항

◦ 시설공사는 13개 건설사가 건축주로써 별도 시공사를 선정후 공사관리하고, 공사완료후 구로구청으로 시설물 인계 및 기부채납 예정

2. 본부 소식지(함께해요~희망도시) 확대개편

담당부서	팀 장	이현숙	3708-2350
건설총괄부	담당자	황덕연	3708-2352

□ 사업개요

○ 목    적 : 본부 주요사업에 대하여 지역여론 주도층을 대상으로 맞춤형으로 꾸준히 정보를 제공함으로써 시민들과 적극적으로 소통

○ 주요내용

- 국회·시·구의원 및 자치구 관련자 등(1,035명)에게 소식지 발송

- 본부 전 사업을 25개 자치구별로 분류, 사업추진현황 매월 업데이트 후 해당지역주민에게 제공 및 본부 홈페이지(infra.seoul.go.kr) 게재

○ 규    모 : 본부 주요사업(4개) 및 전체 사업현황을 월간으로 발행

※ 2013. 9월 통권 53호 발행

○ 사업기간 : 2009년 2월 ~ 현재

□ 예산투자 현황 : 비예산사업

□ 추진실적

○ 소식지 구독자 확대

․국회․시․구의원 및 자치구 관련자 등(1,035명)		․현장과 가장 가까운 자치구 전부서, 주민센터, 현장소장 및 감리단장 등(2,239명)

○ 정보제공 콘텐츠 확대 개편 : 주요공사내용 → 공사 주요내용 및 사업추진 현황을 매월 업데이트하여 사진과 함께 해당지역 주민에게 맞춤제공

○ 사업추진현황을 한눈에 볼 수 있도록 가독성을 고려한 디자인으로 개선

	<개편전>

	<개편후>

○『소식지 50호 기념』독자 만족도 조사 : 만족도(97.3%)

- ‘13. 5. 1 ∼ 16 (16일간) 본부 소식지 구독자 2,239명 대상으로 만족도 조사 실시

※ 정기적으로 편리하게 받아볼 수 있고 주민들에게 알릴 수 있는 홍보자료로 활용할 수 있어 소식지의 전반적인 만족도 매우 높음

□ 향후 추진계획

○ 소식지 구독자 확대 추진을 통하여 보다 많은 시민들에게 시정정보 제공

○ 소식지 구독자 만족도 조사 결과 반영으로 지속적인 피드백

3. 대금e바로시스템 기능고도화

담당부서	팀 장	최영미	3708-2360
건설총괄부	담당자	김경숙	3708-2364

□ 사업개요

○ 목    적 : 공정한 계약문화 정착과 하도급자,노무자 등 건설업계의 약자보호 및                   시스템 이용업체의 업무 편의 제고를 위한 ‘대금e바로시스템’ 고도화

○ 규    모 : 서울시 30일 이상 공사 업체(원․하도급사)

○ 사업기간 : 2013.11 ~ 2014.8

○ 총사업비 : 247백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : '13,10월 발주 예정

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	전용	지출액	현잔액	사고이월 예상액
42	20	20	0	0	0	38	0	0	0	209

※ 전용사유: 시스템이 기관위주로 개발되어 업체 불편 민원이 지속됨에 따라 시스템을 업체 위주의 맞춤  형으로 조기에 고도화하기 위해 본부 내 전산유지보수 예산 잔액을 전용하여 발주

□ 추진실적

○ '11. 10월 : 하도급 대금지급 확인시스템  1단계 구축완료(하도급대금 구분지급)

○ '12. 10월 : 2단계 구축 완료(노무비, 자재･장비대금 구분지급)

○ '13. 1월～: 시 본청, 산하기관, 자치구 적용 확대 (30일 이상 모든 공사 대상)

《개발업체 : 페이컴스, 제휴은행 : 국민, 농협, 우리, 기업, 구축예산 : 62백만원》

○ 대금e바로 적용기관 하도급 부조리 감소('13년 상반기)

- '13년 상반기 하도급부조리 신고건 전년대비 168건에서 106건으로 63% 감소

․ 대금e 시행기관(도기본,sh공사 등)이 미시행기관 (서울메트로 등)보다 신고 민원이 현저히 감소

○ 대금e바로 적용률 제고 : 20%(4.30일) → 36%(6.30일) → 43%(8.10일)

- 본청, 사업소, 25개 전 자치구에서 8.1일 부터 신규 계약시 대금e바로 적용 계약체결

․ '13.8.10 현재 696개(8,088억원) 사업장에서 적용중(적용대상의 43%)

- 투자기관 추진 현황 : SH공사 4월 기 시행, 시설관리공단, 농수산식품공사 : 8.1 시행

․ 도시철도, 서울메트로는 시스템 연계중으로 ‘13.11~12 시행예정

○ 대금e바로 자치구,투자기관 사용료 무료 확정 ('13. 6, 도기본↔구축사)

○ 대형건설사 시스템 가입 관련 타당성 법률검토, 간담회 개최(2회)

- 가입 : 롯데건설,두산건설,  가입예정 : 현대건설, GS건설

○ 대금e바로 조례개정안 상임위 통과('13.9.13)

- 본청,사업소,투자기관 30일 이상 공사 시스템 의무 적용

○ 은행 확대 추진 사항

- 농협, 국민은행은 노무자 등이 모든 은행 사용 가능 하도록 결정 후 전산 작업중

○ 대금e바로 시스템 업체 및 공무원 사용자 교육 실시

- 대금e 사용자 교육 : 25개 구청, 산하 24개 사업소, 투자기관 시스템 교육

※ 1,000여개 업체 교육 실시(매월 2회 집합교육 진행중)

○ 업체 및 공무원 등 시스템 사용자 교육 실시

- 대금e 사용자 교육 : 8회 (180개 업체, 25개 구청 및 산하 24개 사업소)

□ 향후 추진계획

○ 미가입 대형건설사 시스템 가입 추진

- 대형건설사 미가입 업체 인센티브 및 제재방안 마련으로 참여 독려

○ 투자기관(서울메트로,도시철도공사) 시스템 연계(9~11월)

○ ‘대금e바로시스템’ 사용업체 교육(지속)

○ 대금e바로 시스템 고도화 (용역기간 : '13.11 ~14. 8)

- 도급사별 맞춤관리 시스템, 모바일-대금e바로시스템 연계 등

□ 특이사항

○ 없음

4. 건설정보관리시스템(One-PMIS) 유지관리 및 기능고도화

담당부서	과 장	이 예 림	3708-2381
건설총괄부	담당자	지 명 희	3708-2383

□ 사업개요

○ 목    적

- 시민에게 서울시내 모든 시설공사의 생생한 현장정보 실시간 제공

- 건설행정 절차 간소화, 청렴 건설행정 구현

○ 사업개요

- 통합사업관리정보시스템(One-PMIS) 기능고도화 및 안정적 운영

· 공정진척현황 등록․전자보고(시공→감리→발주처) 및 도면․도서 통합관리

· 민․관간 문서유통을 위한 #메일 도입 등 6종 신규업무 고도화 추진

· 사용자 불편해소․기능개선 지원 및 건설알림이에 기초정보 제공

- 건설알림이 공개정보 확대

· GIS를 기반으로 공사현황(사업개요, 사업비, 공정현황, 현장사진, 참여자),

웹카메라를 통한 공사현장 실시간 동영상 공개

· 서울시 SNS를 통해 시민 의견제시 및 불편사항 간편개진

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
700	0	0	214	0	214	0	93	86	0	221

□ 추진실적

○ UN 공공행정상 우수상 수상(‘13.6)

- 지원분야 :「공공서비스 부패척결 방지」분야

○ One-PMIS 기능고도화 개발 및 서비스 실시 (‘13.3 ~ 7)

- 준공도서․도면 영구 보존을 위한 전산 통합관리시스템 구축

- 민․관간 공인전자주소(#mail) 유통으로 대면 건설행정 최소화

- 공사현장(100억 이상) 웹카메라 다중 실시간 화면의 대시민 공개

- 우리동네 건설소식지 제작․발송 및 대시민 공개

- 본부장에게바란다」게시판 개설로 건설현장 관계자 소통강화 및 청렴도 제고

- 모바일 건설알림이 구축을 통한 건설현장 관련 궁금증 바로 해소 (9월 서비스)

○ 시민․사용자 의견수렴을 위한 운영실무협의회, 시민합동회의 총 4회 개최

○ 찾아가는 사용자 교육 실시 : 990명 (‘13.3. ~ 8)

○ 사업 등록 : 총 2,296건(진행사업 466건, 8월말 기준)

□ 향후 추진계획

○ 설계․시공․감리사별 부실․우수사항 이력관리를 위한 사업단계 평가관리 구현

○ 발주처 공무원 업무역량 제고를 위한 건설분야 업무지침공유서비스 제공

5. 월드컵대교 건설공사

담당부서	과 장	김영수	3708-2541
토 목 부	담당자	김성권	3708-2547

□ 사업개요

○ 목    적 : 성산대교와 주변도로의 교통량분산, 서부지역 간선도로망 체계구축

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ～ 마포구 상암동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복6차로),  총연장 1,98km

○ 사업기간 : 2010. 3. ~ 2015. 8.

○ 총사업비 : 355,049백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 14.7%, 현재공정 14.7%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
26,717	15,000	15,000	10,000	0	10,000	0	2,980	7,020	-	30,000

□ 추진실적

○ ’97.09 ~ ’98.12 : 타당성 및 기본계획용역 시행

○ ’01.02.10        : 현상공모 당선작 선정

○ ’01.04 ~ ’06.12 : 기본 및 실시설계용역 시행

○ ’10.03.22        : 공사착공

○ ’11.01            : 북단IC 현장타설말뚝(29기/151기)완료

○ ’11.05.31        : 강교조립장 조성공사 완료

○ ’12.01            : 수상구간 우물통 가설(15기)

○ ’13.09 현재       : 수상구간 우물통 굴착, 벽체 및 속채움콘크리트 타설

교각 철근 가공 및 조립

□ 향후 추진계획

○ ‘13.09.30        : 우물통 시공 완료

○ ‘13.10.07        : 분류하수관 보호공 복합말뚝 공사착공

○ ’13.12.31        : 수상구간 교각 하부공 15기 시공

○ ’15.08.22        : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 재정악화로 인하여 전체 사업기간 조정필요(당초:2015년 8월, 변경:2017년 8월)

6. 양화대교 구조개선공사

담당부서	과 장	김영수	3708-2541
토 목 부	담당자	김성권	3708-2547

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 합정동～영등포구 당산동

○ 규    모 : 아치교량 신설(로제아치교), 우물통 기초보강 및 확대

- 교각간격 42m→112m, 아치구간 보도확폭 2m→5m(80m)

○ 사업기간 : 2010. 2. ～ 2012. 12.

○ 총사업비 : 49,684백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 준공완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
41,412	8,055	7,655	-							-

□ 추진실적

○ 2010. 02. 22 : 공사계약 및 착수

○ 2011. 05. 04 : 하류측 아치교량 개통

○ 2012. 06. 14 : 상류측 아치교량 설치

○ 2012. 09. 09 : 상류측 아치교량 개통

○ 2012. 12. 31 : 하류측 가설교량 철거

□ 향후 추진계획

○ 2013. 01. 20 : 하류측 가설교량 철거완료

○ 2013. 02. 28 : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

7. 강변북로(양화대교～원효대교간) 확장공사

담당부서	과 장	김영수	3708-2541
토 목 부	담당자	장수철	3708-2543

□ 사업개요

○ 목    적 : 수도권 북부지역의 택지개발과 용산국제업무지구등 대규모 개발로 극심한 정체가 예상되어 시민의 교통편의 제공 및 생활편익을 증진하기 위함

○ 위    치 : 강변북로 양화대교~원효대교간

○ 규    모 : 총연장 4.86km(폭 왕복4차로)

○ 사업기간 : 2011. 10 ~ 2017. 8

○ 총사업비 : 326,600백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 실시설계 착수 후 과업 중지 중

- 부진사유 : 용산국제업무지구 사업 방향이 결정되지 않아 사업추진 시기 지연

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

□ 추진실적

○ ‘09. 12. 31 : 입찰공고(조달청)

○ ‘10.  6. 18 : 기본설계 적격심의(실시설계 적격자 : 현대건설(주))

○ ‘10.  7. 20 : 실시설계 착수

○ ‘12.  2. 28 : 과업중지(’12.2.28~  )

□ 향후 추진계획

○ 용산국제업무지구 사업추진 결과에 따라 시기조정

□ 특이사항

○ 없음

8. 용마터널 민간투자사업 건설공사

담당부서	과 장	김영수	3708-2541
토 목 부	담당자	오열상	3708-2544

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역에서 구리암사대교를 연결하는 간선도로망을 구축함으로서 지형적인 제약으로 인해 장거리를 우회하여야 하는 지역주민들의 교통불편 해소 및 동북권 도시경쟁력 강화

○ 위    치 : 중랑구 면목동 ～ 구리시 아천동

○ 규    모 : 총연장 3.56km(폭 왕복4차로)

○ 사업기간 : 2009. 11. ~ 2014. 11.

○ 총사업비 : 117,200백만원(민자)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 81.9%, 현재공정 77.8%, 계획대비 실공정률 95%

□ 추진실적

○ ‘09. 10. 22 : 용마터널 민간투자사업 실시계획 승인 고시(고시 제2009-412호)

○ ‘09. 11. 12 : 용마터널 민간투자사업 변경실시협약 체결

○ ‘09. 11. 21 : 공사착공

○ ‘10. 11. 03 : 터널 굴착(굴진) 시공 시작

○ ‘13. 03. 25 : 터널 굴착완료(관통식)

○ ‘13. 09 현재 : 터널 라이닝 시공 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12.  : 지하차도 구조물 완료(BOX구간 250m, U-type 133m)

○ ‘14. 08.  : 터널 및 교량 포장공사, 전기ㆍ설비공사

○ ‘14. 10.  : 부대공사 및 시운전

○ ‘14. 11.  : 개통예정

□ 특이사항

○ 없음

9. 잠실역 지하광장 조성공사

담당부서	과 장	김영수	3708-2541
토 목 부	담당자	장수철	3708-2543

□ 사업개요

○ 목    적 : 제2롯데월드 건축허가 조건에 따라 잠실역 지하광장을 조성(확장) 하여 대중교통 이용자 및 롯데월드 이용자들의 보행 편의 향상

○ 위    치 : 송파구 잠실동 41번지 일대 (2호선 잠실역)

○ 규    모 : 지하광장 11,079㎡ (출입구, 지하광장 및 부속시설)

○ 사업기간 : 2011. 9. ~ 2013.12.

○ 총사업비 : 41,000백만원 (전액 민간사업자 부담)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 73.5%, 현재공정 71.6%, 계획대비 실공정률 97%

□ 추진실적

○ '11.09.22 : 도시계획사업 실시계획 인가(송파구)

- 서울특별시 송파구고시 제2011-48호

○ '12.01.06 : 도시계획시설사업(지하광장 조성) 착공

○ '12.01.25 : 설계․책임감리 시행 협약체결(도로계획과)

○ '12.05.07 : 책임감리용역 착수

○ '12.05.18 : 건설기술심의 (지적사항 보완후 재심의)

- 토피고(4.0m) 확보, 지반조사 추가 등

○ '12.12.24 : 건설기술심의(재심의) - 지하 공동구 설치 등 조건 부여

- 지적사항에 대한 조치계획 수립 중

○ '12.05.~ 현재 : 가시설 및 복공 완료, 지하구조물 공사중

□ 향후 추진계획

○ '13. 9 : 지하구조물 공사완료

○ '13.11 : 가시설 철거 완료

○ '14. 2 : 공사준공

□ 특이사항

○ 제2롯데월드 저층부의 백화점 개장 연기('14. 5월)로 인해 지하광장 조성공사 준공연기 예정('14. 2월)

10. 구리암사대교 건설공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	한수영	3708-2556

□ 사업개요

○ 목    적 : 강동구, 중랑구 및 구리시를 연결하는 한강횡단 도로망을 구축하여 서울 동부권에 급증하는 교통수요를 대처하고 강동구 및 구리시 지역의 교통소통개선 및 동북지역 발전 도모

○ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

○ 규    모 : 교량건설 폭 4~6차로 연장 1.13㎞

○ 사업기간 : 2006. 4. ~ 2014. 12.

※ 중앙부처 예산확보 지연으로 사업기간 조정  (당초 : 2001. 6 ～ 2014. 12)

○ 총사업비 : 348,592백만원 (시비 50%, 국비 50%)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정85%, 현재공정85%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
255,660	25,152	19,939	52,741	5,213	57,954	-	39,861	18,093	-	71,031

※ 사고이월 사유 : 보상 협의 지연

□ 추진실적

○ '06. 4. 5 : 공사 착공

○ '08. 5. 8 : 하천점용 허가(서울지방국토관리청)

○ '09. 2.19  : 실시계획인가

○ '10.12. 4 : 주교량(아치교)설치 완료

○ '11.12.20 : 램프 교량 제작 및 조립 착수

○ '12. 1.26 : 본선 교량(L=1,133m) 설치 완료

○ '13. 9현재

- 교각 구조물 시공 중 (총118개소 중 75개소 완료)

- 램프교량 상부 슬라브 시공 중

□ 향후 추진계획

○ '14. 7 : 교량 아스콘 포장

○ '14.12 : 공사 준공예정

□ 특이사항

○ 준공기한 연기 예정(‘13. 12 → ’14. 12)

11. 구리암사대교 연결도로건설공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	한수영	3708-2556

□ 사업개요

○ 목    적 : 구리암사대교와 아리수로를 연결하는 도로개설로 강동지역의 교통소통 개선 및 지역 균형 발전에 기여

○ 위    치 : 강동구 암사동 산20-1 ～ 암사동 414-22

○ 규    모 : 도로개설 폭6차로, 연장 1.61km

○ 사업기간 : 2012. 8. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 38,510백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 8%, 현재공정 8%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
8,710	1,000	300	8,050	700	13,200	-	860	12,340	4,300	20,750

※  2013년도 감추경 예정 : 4,300백만원

□ 추진실적

○ '09. 9.29 : 하남미사지구 관련 추가 확장(4차로→6차로) 지시 (국토교통부)

○ '10. 3. 2 : 도시계획시설(도로)변경 결정

○ '11. 1.30 : 추가 도로확장(4→6차로) 설계 완료

○ '12. 8. 2 : 공사착공

○ '13. 2.18 : 개발행위(변경)허가

○ '13. 4. 1 : 문화재 발굴조사 착수

○ '13. 9현재

- 보상 시행 중 (38필지 완료 / 전체42필지)

- 문화재발굴조사 및 토공작업 중

□ 향후 추진계획

○ '14. 9	: 도로포장 착수

○ '14.12	: 연결도로 개통

□ 특이사항

○ 준공기한 연기 예정(‘13. 12 → ’14. 12)

12. 남부순환로(개봉역주변) 구조개선공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	조양연	3708-2557

□ 사업개요

○ 목    적 : 남부순환로로 인해 단절된 개봉지역의 교통 불편사항을 해소하고, 남부순환로~부천시계간  광역도로 연결에 따른 원활한 교통소통을 위한 구조개선

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1번지 일원(남부순환로 개봉역앞)

○ 규    모 : 남부순환로 구조개선 폭 30m, 연장 1,160m(지하차도 736m 포함)

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2013. 12.

※ 사업계획(지하차도 연장) 변경 (당초 : 2007. 9 ～ 2010. 8)

○ 총사업비 : 58,597백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 89.1%, 현재공정 82.8%, 계획대비 실공정률 92.9%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2013							2014년 예산안
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
42,275	11,000	-	13,637	-	6,745	6,892	-	5,322

□ 추진실적

○ '07. 9.10 : 공사착공

○ '09. 8. 2 : 개봉역앞 굴다리 철거완료

○ '10. 5. 4 : 공동도급 주관사 남진건설(주) 법정관리

○ '10. 6.30 : (주)케이에스씨건설 보증시공 위탁계약체결

○ '12. 5.30 : 지하차도(구로IC방향) 임시개통

○ '13. 9.현재 : 지하차도(오류IC방향) 구조물 콘크리트 타설 완료

□ 향후 추진계획

○ '13.12 : 지하차도(오류IC 방향) 공사 시행 (목표공정률 89.09%:2013년 예산적용)

○ '14.06 : 공사 준공예정

□ 특이사항

○ 예산 미확보 준공기한 연기예정 (당초:`07.9 ~'13.12  변경:'07.9 ~ `14.6)

13. 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	박상철	3708-2559

□ 사업개요

○ 목    적 : 남부순환로상의 서부트럭터미널앞 교차로 교통정체 현상 해소 및 통행 차량의 증가 대비

○ 위    치 : 양천구 신정3동 735-5번지 일원(서부트럭터미널앞)

○ 규    모 : 지하차도 신설 폭 4차로, 연장 1,075m

○ 사업기간 : 2008. 3. ~ 2013. 10.

○ 총사업비 : 81,994백만원

- 재원분담내역 : 시비 27,994, SH공사 54,000(마곡지구개발사업)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 96.9%, 현재공정 84.6%, 계획대비 실공정률 87.3%

- 부진사유 : 지하차도 연장민원으로 인한 타당성 조사 용역 시행으로 공사 일지중지(‘13.1 ~ 13.6)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
50,816	24,280	14,080	6,898	10,200	17,098	-	2,495	14,603	3,000	-

□ 추진실적

○ '08.03.10 : 공사착수

○ '08.05.10 : 지하차도 연장요구 민원

○ '08.10. 2 : 집단민원으로 공사중지

○ '09. 2.10 : 지하차도 연장 시장방침

○ '10. 6.28 : 지하차도 연장 설계변경 완료

○ '12.11.21 : 지하차도 오류IC방향 임시개통

○ '13. 9. ~ : 지하차도 신월IC방향 공사 시행중

□ 향후 추진계획

○ '13.12 : 지하차도 개통 및 준공

□ 특이사항

○ 없음

14. 선사로～고덕지구간 도로확장공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	정문수	3708-2558

□ 사업개요

○ 목    적 : 강동지역 아파트 재건축, 강일 도시개발사업, 하남미사지구 보금자리주택건설 등 주변 개발에 따른 교통량 증가에 대비한 도로확장

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11 (아리수로)

○ 규    모 : 폭 8~10m(2차로) ⇒ 28.5~35m(4~6차로), 연장 3,720m

○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 115,048백만원 ( LH공사 57,800백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정41%, 현재공정41%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
55,811	36,678	15,021	14,335	21,657	35,992	-	14,706	21,286		12,524

※ 사고이월 사유 : 보상 협의 지연

□ 추진실적

○ '09. 1. 6 : 공사 착공

○ '09.06.02 : 문화재 발굴(시굴)조사 착수

○ '09. 9.29 : 하남미사지구 관련 추가확장 (4차로→6차로) 지시 (국토해양부)

○ '10. 6.30 : 문화재발굴 조사 완료 (산지측, 2차로, L=3,300m)

○ '11. 1.30 : 추가 도로확장(4→6차로) 설계 완료

○ '11. 8.30 : 분담금 협약 완료 (LH공사)

○ '12. 3.26 : 도로 우회(3.3km)구간 포장(산지측, 2차로) 완료

○ '12. 9.현재

- 기존 도로(주택가측, 2차로)구간 보도공사 시공 중

- 추가 도로확장(4→6차로) 보상 시행 중 (54필지 완료 / 전체 130필지)

□ 향후 추진계획

○ '13. 10  : 도로확장(2→3~4차로) 완료

○ '14. 12  : 도로확장(4→6차로) 완료

□ 특이사항

○ 없음

15. 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	조양연	3708-2557

□ 사업개요

○ 목    적

- 일제강점기에 단절된 종묘와 창경궁을 연결하여 민족자존심 회복

- 상습정체지역인 율곡로를 확장하여 교통체증 해소

○ 위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동사거리

○ 규    모 : 도로확장 4→6차로,  연장 800m(지하차도 300m포함)

○ 사업기간 : 2010. 10. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 85,370백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정38.0%, 현재공정34.8%, 계획대비 실공정률97.5%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
6,670	12,000	1,800	-	10,200	10,200	-	7,032	3,168	-	34,400

□ 추진실적

○ '10. 10 : 공사 착공

○ '11. 11 : 종묘문화재 담장유구 발굴

○ '12.  4 : 문화재청 현상변경 허가

○ '13.  3 : 문화재 원형복원방안 확정

○ '13.  6 : 지하차도(L=300m) 변경설계 착수

○ '13.  9 : 구조전문가 지하차도(파형강판) 자문 실시

□ 향후 추진계획

○ '13.  9 : 지하차도 변경설계 자문회의 및 건설기술심의

○ '13. 10 : 지하차도 내․외부디자인 지명공모  작품선정 (서울디자인재단)

○ '13. 11 : 지하차도 변경설계 준공

○ '14. 12 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

16. 남부순환로〜오정대로간 도로개설공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	박상철	3708-2559

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 서남권지역의 도시기반시설 확충으로 증가되는 수요에 대처       방화로와 오정대로간 직접연결을 통해 교통소통, 도로환경 개선 및

교통편의 제공으로 지역개발 촉진

○ 위    치 : 강서구 외발산동 남부순환로 〜 부천시 고강동 오정대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 폭40m, 연장1.23km(서울시 960m, 부천시 270m)

○ 사업기간 : 2010. 9. 〜 2014. 10.

○ 총공사비 : 16,563백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 27.9%, 현재공정 26.9%, 계획대비 실공정률 96.4%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
880	3,000	2,057	7,800	943	8,743	-	3,696	5,047	1,047	4,749

□ 추진실적

○ '10.09.29 : 공사 착공

○ '11.04.13 : 광명〜서울 민자고속도로 노선확정(국토해양부)

○ '11.12.17 : 상기 노선확정에 따른 보완설계 자문회의

○ '12.04.02 : 변경계약(보완설계 반영)

○ '12.11.29 : 도시계획시설(도로)사업 변경 실시계획인가(서울시구간)

○ '13.07.29 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(부천시구간)

○ '13.09.〜 : 군부대구간 차폐벽 및 유격시설물 공사 시행 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13.10 : 손실보상 실시(서울시구간)

○ ‘13.11 : 시설공사 시행(서울시구간)

○ ‘14.02 : 손실보상 실시(부천시구간)

○ ‘14.10 : 시설공사 준공예정

17. 도림교 확장공사

담당부서	과 장	최순철	3708-2555
토 목 부	담당자	정문수	3708-2558

□ 사업개요

○ 목    적 : 강동구, 중랑구 및 구리시를 연결하는 한강횡단 도로망을 구축하여 서울 동부권에 급증하는 교통수요를 대처하고 강동구 및 구리시 지역의 교통소통개선 및 동북지역 발전 도모

○ 위    치 : 구로구 신도림동 330-7번지~영등포구 문래동2가 71번지

○ 규    모 : 도로확장 폭30m(6차로) → 41.5m(9차로), 연장84m

○ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2013.11.

○ 총사업비 : 3,708백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 89%, 현재공정 91%, 계획대비 실공정률 102%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	3,708	1,057	-	2,651	2,651	-	1,867	784	-	-

※ 사고이월 사유 : 준공기한(‘13.11.30) 미도래

□ 추진실적

○ '12. 6. 8 : 공사 착공

○ '12.12.31 : 교량 기초 말뚝 시공 완료

○ '13. 6.10 : 교량 거더 설치 완료

○ '13. 8.28 : 교량 상부 아스콘포장 완료

○ '13. 9 현재

- 교통신호 규제 심의 및 지장물(맨홀) 이설 중

□ 향후 추진계획

○ '13.10	: 교통안전시설물 설치 및 보도포장

○ '13.11	: 도림교 확장 완료

□ 특이사항

○ 없음

18. 방화대교 남단 접속도로 건설공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	황윤기	3708-2569

□ 사업개요

○ 목    적 : 올림픽대로와 강서구 방화동을 연결하는 도로건설로 강서구  방화동 지역 교통난 해소

○ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽 대로

○ 규    모 : 도로개설 폭1~3차로, 연장 3,021m, 교량 756m, 터널949m

○ 사업기간 : 2005. 10. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 109,807백만원 (시비63,207, SH공사46,600)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정84%, 현재공정83%, 계획대비실공정률98%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
81,747	872	872	17,075	-	-	17,075	2,253	14,822	-	10,113

□ 추진실적

○ ’05. 10. : 시설공사 착공

○ ’08. 05. : 광명~서울 민자고속도로노선 변경에 따른 터널공사 중단

○ ’08. 10. : 광명~서울 고속도로노선 확정방침

○ ’09. 10. : 터널확장공사 재착수

○ ‘10. 09  : 방화동↔올림픽대로 터널관통

○ ‘13. 06  : 터널 내부 콘크리트 포장

○ ’13. 07. : 사고로 고용노동부 공사중지 명령

□ 향후 추진계획

○ ‘14.06  : 공사준공예정

□ 특이사항

○ 사고처리후 결과에 따른 추진계획 수립

19. 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	이석우	3708-2567

□ 사업개요

○ 목    적 : 지역발전을 도모하고 주민 숙원사업과 통학로를 확보하고  지역주민에게

교통편의를 제공 하고자 함

○ 위    치 : 동대문구 휘경동 ~ 중랑구 면목동

○ 규    모 : 본 교 량 B=15~20m, L=235m,(Extra Dosed교)

접속교 L=160m, 도로확장 B=20→30m, L=750m

○ 사업기간 : 2008. 10.  ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 113,582백만원 (2013년 : 4,000백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정60.2%, 현재공정56.8%, 계획대비실공정률94.4%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
49,243	13,000	9,185	4,000	3,814	-	7,814	2,490	5,324장기처	0	17,600

□ 추진실적

○ 2010.11.10	: 본교량 상부 슬라브 콘크리트 타설완료

○ 2011. 2.12	: 본교량 케이블 인장완료

○ 2012. 9.30	: 중랑구 도로 확장구간 건물보상 완료(23동 완료/23동)

○ 2013. 4.30	: 동대문구측 제방부 수목이식완료

○ 2013. 8	.30	: 보도데크 설치 완료

○ 2013. 9	.현재	: 동대문구측 확장구간 도로정비 중

중랑구측 건물철거(15동완료, 2동 철거중/23동) 등

□ 향후 추진계획

○ 2013.12	: 동대문구측 확장구간 도로정비, 램프공사

○ 2014.11	: 시종점부 접속교량 및 옹벽공사, 도로정비

○ 2014.12	: 공사준공예정

□ 특이사항

○ 민원에 의한 사업계획 변경으로 변경설계완료(동대문구측 램프신설등)

20. 응봉교 확장 및 성능개선공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	이석우	3708-2567

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역과 강남 주간선 도로인 언주로와 연결되는 성수대교축의 차로수 불균형으로 발생되는 응봉교 일대 교통 병목현상을 해결하고 노후된 응봉교의 성능을 개선하는 사업임

○ 위   치 : 성동구 응봉동 ~ 성동구 성수1가(응봉교)

○ 규   모 : 폭 4차로 → 6차로, 연장 625m

- 성능개선 : DB-18 (기존) → DB-24

○ 사업기간 : 2008. 10. ~ 2014. 7.

○ 총사업비 : 78,536백만원(’12년 10,000백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정93%, 현재공정88%, 계획대비실공정률95%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
39,672	15,000	15,000	10,000	6,278	-	16,278	8,497	7,781	-	13,864

□ 추진실적

○ 2011.12	: 중랑천 횡단 주경간 아치 설치

○ 2012. 4	: 왕십리측 시점부 기존교량 2차로 철거완료

○ 2012. 5～6	: 시장과의 주말데이트 및 주민설명회 (2회)

○ 2013. 7. 8	: 현장시장실 개최

○ 2013. 9월 현재: 3차가교 철도횡단구간 가설교량 설치중

□ 향후 추진계획

○ 2014. 6 : 시점부 주택지역 마무리

○ 2014.12 : 경원선 횡단등 전체구간(공사준공예정)

□ 특이사항

○ 현장시장실 방문시 지역주민 건의사항 및 시장 지시사항

- 응봉교 차량통행으로 인한 소음 최소화를 위해 터널형 방음벽 설치

- 공사로 인한 생활불편 사항이 없도록 공사 조기 마무리

21. 용비교～행당중간 도로개설공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	이석우	3708-2567

□ 사업개요

○ 목    적 : 동북지역의 보조간선도로망 구축으로 지역 균형발전을 도모하고 상습   정체지역인 성수대교 북단의 교통량 분산으로 원활한 교통처리

○ 위   치 : 성동구 금호4동 용비교북단 ~ 성동구 행당동 행당여중

○ 규   모 : 도로연장 : 1.85km (B=6.0m~16.3m)

○ 사업기간 : 2007. 3. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 64,504백만원('13년 3,000백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정71%, 현재공정68%, 계획대비실공정률96%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
17,367	3,900	3,869	3,000	-	-	3,000	1,622	1,378	-	9,970

□ 추진실적

○ ’07.03.22	: 공사계약 및 착수

○ ’07.09.06	: 노선변경 방침(2부시장 제311호)

○ ‘10. 02	: 노선변경 실시설계 및 변경계약

○ ’10. 12	: 용비교 확장부 공사착수(하천점용허가 승인)

○ ’12. 07	: 시점부(응봉산) 옹벽설치 및 교각설치(총9기중 7기완료)

○ ’13. 9월 현재	: 동부간선도로상 교각설치 및 강교제작중(3,4경간)

□ 향후 추진계획

○ 2014. 12 : 공사준공예정

□ 특이사항

○ 년차별 확보예산 부족으로 2014년 말로 공사기간 연기

(※ 2011년 0억원, 2012년 39억원, 2013년 30억원)

22. 우이천 하천정비공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	황윤기	3708-2569

□ 사업개요

○ 목   적

- 자연형 호안, 분수대, 여울, 징검다리 등 설치하여 친수공간 제공

- 하천유지용수공급(고도처리수 3만톤/일)으로 생태환경조성

- 우이천 상, 하류 자전거도로 추가설치로 한강까지 자전거도로망 연결

○ 위   치 : 우이천(근화교 ~ 중랑천 합류부)

○ 사업규모

- 하천복원 : 연장 7.05km, 가동보 2개소, 어도, 세굴보호공등

- 자전거도로 : 3,100m, 횡단교량 : 4개소(합성목재+강재)

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2013. 4.

○ 총사업비 : 29,851백만원(구비 3,382백만원 포함)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : (100%)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이,전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
17,153	12,698	6,958	-	5,740	-	5,740	3,544	2,196	-	-

□ 추진실적

○ 2006.09.26 : 생태하천복원계획 수립(시장방침 제396호)

○ 2010.01.18 : 우이천 하천정비공사 계약

○ 2010.02.05 : 하천점용허가(성북구청, 강북구청, 도봉구청, 노원구청)

○ 2011.12.    : 저수호안(조경석쌓기등) 시공

○ 2012.04.30 : 고수호안 및  유지용수관로 잔여분 시공완료

○ 2013.03.    : 호안 조경석 및 유지용수관로 시험운영

○ 2013.04.    : 공용개시

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공후 사용중

□ 특이사항

○ 없음

23. 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	황윤기	3708-2566

□ 사업개요

○ 목    적 : 서빙고고가를 연결로 기능에 맞게 축소 재설치하여 반포대교 북단 강변북로 일산방향의 상습정체 구간 해소 및 두무개길 도로효율 제고

○ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동

○ 규    모 : 고가교 축소 재가설 폭4차로→1∼2차로, 연장 753m

○ 사업기간 : 2010. 12. ∼ 2014. 12.

○ 총사업비 : 27,300백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 56%, 현재공정54%, 계획공정대비 실공정률 95%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,596	5,400	5,400	5,000	-	-	5,400	1,571	3,829	-	5,000

□ 추진실적

○ '09.03.∼‘10.09.  : 기본 및 실시설계

○ '10.12.         : 공사계약 및 착수

○ '11.02.         : ‘11년 예산 미확보로 공사 중지

○ '11.08.         : 공사중 교통소통대책 심의 완료

○ '13.05.         : 가교 설치완료 교통우회

○ '13.09.         : 본교량 철거중

□ 향후 추진계획

○ '13.12.           : 본교량 철거 완료

○ '14.12 : 신설교량 설치(공사준공예정)

□ 특이사항

○ 14년 소요예산(150억) 미확보시 공기지연 및 차량통행 불편

24. 신상도 지하차도 확장공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	이병환	3708-2569

□ 사업개요

○ 목    적 : 국사봉 터널에서 한강대교로 이어지는 양녕로를 4차로로 확장 통행 중에 있으나 왕복 2차로인 신상도 지하차도에서 병목현상 발생 4차로로 확장 상도동 일대 교통소통 기여

○ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5(양녕로~상도동길)

○ 규    모 : 도로확장  2차로 → 4~6차로, 324m

(지하차도 확장  2차로 → 4차로,  230m)

○ 사업기간 : 2007. 12. ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 23,609백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 공사중단(현재공정 26% )

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
14,777	-	-	2,200	-	-	2,200	2	2,198	-	-

□ 추진실적

○ 2003.03 ~ 2004.09 : 기본설계(동작구)

○ 2004.11 : 도시계획시설(도로,학교) 변경 결정

○ 2005.06 ~ 12 : 실시설계(도시기반시설본부)

○ 2007.12.31 : 계약 및 착공

○ 2009.10    : 초등학교측 옹벽 설치완료

○ 2010.11    : 보상토지 주차장 조성후 동작구청 관리이관

○ 2010.12    : 공사중단

□ 향후 추진계획

○ 상도7구역 재개발조합 해산으로 사업기간내 완료 곤란

※ 재개발 구역 해제후 민영개발(태려건설) 진행 (예상)

□ 특이사항

○ 재개발 추진시까지 사업 유보

25. 동부간선도로(월계1교～의정부시계) 확장공사

담당부서	과 장	이동훈	3708-2575
토 목 부	담당자	김동현	3708-2576

□ 사업개요

○ 목     적 : 4→6차로로 확장하여 병목으로 인한 상습정체를 해소하고, 서울 동북부지역 교통여건 개선

○ 위    치 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부시계

○ 규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 6.85km, 경원선이설 1.46km

○ 사업기간 : 2004. 4. ~ 2015. 12.

※ 사업기간 변경

- 당초 : '04. 4 ~ '12.12 → 변경 : '04. 4 ~ '15.12

- 변경사유

․ 국토관리청 하천점용허가 허가조건 이행(우기기간 6〜9월 중랑천변 공사중지)

․ 월계4구역 재개발사업 지연에 따른 경원선철도 이설공사 지연

․ 민원에 따른 도봉지하차도 연장 등 사업계획 변경

․ 도봉구 창동주공17〜18단지 통과구간 지하화 민원에 따른 착공지연

○ 총사업비 : 383,470백만원

- 재원분담내역 : 시비 276,342, 국비 62,128, LH교통개선분담금 45,000백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 42%, 현재공정 40%, 계획대비 실공정률 95.2%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
121,730	9,000	7,688	63,135	304	63,439	-	33,570	29,565	-	80,658

□ 추진실적

○ '04. 4 : 광역도로 지정

○ '04. 9 ~ '07. 8 : 기본 및 실시설계

○ '07.10 : 공사계약

○ '07.11 : 경원선(월계~녹천) 철도이설사업 위수탁 협약서 체결

○ '08. 7 : 하천점용허가 및 공사 착공

○ '13. 9 현재 : 공사중(공정률40%)

○ '13년 추진실적

- 1공구(공사중지시 24%) : 경원선 철도이설에 따른 공사 일시중지 (‘12. 1 ～ ‘14. 6)

※ 경원선 철도이설공사(한국철도시설공단에 위탁 시행)

- 2공구(현공정 34%)

․도봉지하차도 4단계(140m) 완료('13. 5)

․도봉지하차도 5단계(540m) 시공중

- 3공구(현공정 42%)

․중앙옹벽 440m 및 방음벽 270m 시공중

□ 향후 추진계획

○ '15.  6 : 도봉지하차도 공사 완료 예정

○ '15. 12 : 동부간선도로 전 구간 개통 예정

□ 특이사항

○ 도봉구 통과구간 전체 지하화 요구 민원

- 하나로마트앞 구간은 교통처리측면 등을 감안 지하차도 연장 요구를 수용(연장620m, 공사비 약800억원)하여 사업추진 중에 있으며,

- 창동 주공아파트(17단지〜19단지) 구간은 노원구 확장구간과의 형평성 문제 및 막대한 사업비[약1,300억원(공사비1,000억원, 기시공 매몰비용 등)] 추가소요로 수용 불가

- 최적의 방음벽 개선과 저소음재 포장, 과속감시카메라 설치 강화 등 종합적으로 소음저감대책을 강구하여 주민의견수렴후 공사추진 예정임

○ 노원구 공사구간 전체 방음시설 개량 요구 민원

- 도로확장구간(현대, 은빛아파트 등)은 기존의 노후된 방음벽 개선

(현재 : 수직 4m+꺽기0.5m → 개선 : 수직 6m+꺽기 5.5m)

- 미확장구간(상계주공1～3단지)도 현재보다 소음이 악화되지 않도록 장기 검토

○ 월계4구역 재개발에 따른 경원선 철도 이설공사 지연 우려

- 월계4구역 재개발 추진이 지연되지 않도록 노원구청과 지속적인 협의

- 경원선 이설 공기단축방안을 한국철도시설공단과 적극 협의 추진

26. 천호대로(광나루역) 확장공사

담당부서	과 장	이동훈	3708-2575
토 목 부	담당자	장종환	3708-2577

□ 사업개요

○ 목   적 : 중앙버스전용차로 단절구간이며, 천호․하남간 BRT구축과 연계되는 천호대로 광나루역~아차산역 구간중 미집행된 병목구간을  확장하여 강북지역의 교통편익 증진

○ 위    치 : 천호대로 광나루역~아차산역간

○ 규    모 : 도로확장6차로→10차로, 연장 900m(지하차도 580m)

○ 사업기간 : 2007. 3. ~ 2014. 2.

○ 총사업비 : 80,983백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정43.03%, 현재공정 43.28%, 계획대비 실공정률  100.58 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
21,023	6,500	6,446	10,000	-	-	10,000	6,752	3,248	-	8,000

□ 추진실적

○ ‘10. 10 : 공사계약 및 착공

○ ‘11. 10 : 매장문화재 발굴 완료

○ ‘12. 03 : 구의고가교 철거 및 가교설치

○ ‘12. 08 : 1단계 교통처리완료(구의야구장 측 차로변경)

○ ‘13. 09현재 : 상수도이설 및 구조물(BOX)시공중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12 : B라인(천호대로 횡단)상수도 이설

○ ‘14. 03. : 공사중 2단계교통처리(아차산배수지 측 차로변경)

□ 특이사항

○ ‘2014년 예산이 과소편성(80억)되어 손실보상(약 50억)을 제외하면 실제 공사비는 약 30억원으로 이로 인해 가시설 및 가설교량 공용기간 초과로 보강비용이 추가 발생

27. 신사사거리～고양시계간 도로개설공사

담당부서	과 장	이동훈	3708-2575
토 목 부	담당자	이상근	3708-2579

□ 사업개요

○ 목    적 : 은평구와 고양시 연결, 광역도로 개설로 수색로 교통량 분산 및

서북부지역 균형발전 도모

○ 위    치 : 은평구 신사동 신사사거리 ~ 고양시 시계

○ 규    모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,077m(터널구간 366m 포함)

- 신사사거리~덕산중학교 구간 : 711m('10.02.준공)

- 덕산중학교~시계(터널구간) : 366m(미개설)

※ 미개설 터널구간 총 867m(서울 366m, 고양시 501m 포함)

○ 사업기간 : 2004. ~ 2015.

○ 총사업비 : 46,971백만원(재원분담 : 시비 23,486백만원, 국비 23,485백만원)

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 5%, 현재공정 5%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
29,563	9,175	16	1,822	6,158	-	7,980	1,855	9,175		7,500

□ 추진실적

○ ‘10.02. 24 : 신사사거리~덕산중학교간 도로개설 완료(L=711m)

○ ‘12.06. 30 : 신사사거리~고양시계간 실시설계용역(보완) 완료

○ ‘12.09. 11 : 서울시 계약심사 완료

○ ‘12.12. 27 : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ ‘15.12.   : 공사 준공

□ 특이사항

○ 총사업비 조정과 관련하여 현재 기획재정부에 계류중

28. 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사

담당부서	과 장	이동훈	3708-2575
토 목 부	담당자	김동현	3708-2576

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서남권 돔야구장 건립에 따른 교통대책의 일환으로 관람객 등 대중교통이용 및 보행의 편의를 위함.

○ 위    치 : 구로구 고척동 63-6번지 일대(고척교, 안양천길 상부)

○ 규    모 : 보행광장(B=28.3m,L=150m), 경사로 및 연결로(N=5개소)

고척교(B=37.5→52.5m, L=203m)

○ 사업기간 :2011.10 ~ 2014.09.

○ 총사업비 : 58,989백만원(공사비 56,309백만원, 감리비 2,650백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 12%, 현재공정  8%, 계획대비 실공정율 67%

- 부진사유: 우기철 하천공사중지 및 유관기관(서울지방국토관리청, 서울지방경찰청)협의지연과 기초공법 변경 검토에 따른 공정지연

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
995	900	900	28,289	10,500	38,789		808	37,981	22,626	7,300

★ 공정지연에 따른 집행 및 차수발주 지연에 따른 이월

□ 추진실적

○ 2010.10.08 : 서남권 돔야구장 건립에 따른 주변 교통처리대책 추진계획(시장방침 제375호)

○ 2012.09.30 : 실시설계 완료(보행광장)

○ 2012.11.09 : 실시설계 완료(고척교)

○ 2012.12.10 : 공사발주(조달발주)

○ 2013.01.03 : 공사 입찰공고(조달청)

○ 2013.04.08. : 계약 및 착공

※ 공사기간 : 2013.04.08. ~2014.09. 29

□ 향후 추진계획

○ 2014.09.29 : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

29. 남부순환로(개봉1동 사거리 주변) 평탄화 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	임홍필	3708-2589

□ 사업개요

○ 목    적 : 개봉1동사거리 주변의 남부순환로 평탄화 사업을 통해 지역간의 단절 해소 및 개봉1동사거리 주변 교차로를 개선하여 서남권지역의 균형 발전에 기여

○ 위    치 : 남부순환로 개봉1동사거리 주변

○ 규    모 : 도로구조 개선 B=30m, L=1.1km

○ 설계기간 : 2011. 12 ~ 2013. 2.

○ 총사업비 : 31,000백만원(설계비:600백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 설계완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,050	-		-					29,950

□ 추진실적

○ '09.03. ~ ‘10.05 : 타당성조사 시행

○ '10.06.03 : 기본설계 착수

○ '11.10.31 : 기본설계 완료

○ '11.12.20 : 용역계약

○ '12. 4.13 : 설계자문회의(1차)

○ '12. 6.14 : 주민설명회 개최

○ '12. 8. 8 : 서울시민디자인위원회 심의

○ '13. 1.28 : 설계자문회의(2차)

○ '13. 2.15 : 실시설계 완료

□ 향후 추진계획

○ ´15년 이후 예산배정 및 공사 추진

□ 특이사항

○ 없음

30. 성암로 병목구간 확장 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	신복민	3708-2586

□ 사업개요

○ 목    적 : 현재 4차로로 운영되고 있는 성암로의 일부의 병목구간 (2차로)을 확장 및 개선하여 제2자유로 개통에따른 우회로 기능수행 및 상암 DMC 개발 등 장래수요 대비를 위한 사업임

○ 위    치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3

○ 규    모 : 도로확장 및 개선 연장 :400m

- 도로확장 : 폭 2차로→4차로(확장), 연장 200m

- 보도확장 및 개선 : 연장 200m

○ 설계기간 : 2012. 5. ~ 2013. 2.

○ 총사업비 : 5,650백만원(설계비:250백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 설계완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
250	1,000 (보상비)	-	1,000 (보상비)	-		1,000 (보상비)		4,400

□ 추진실적

○ ‘11. 02. 11 : 성암로 병목구간 개선계획수립(도로계획과)

○ ’11. 06. 21 : 투자심사(도로계획과)

○ ’12. 05. 14 : 설계용역 계약 및 착수

○ ’12. 09. 18 : 설계자문회의 개최예정

○ ‘13. 02. 20  : 설계용역 완료

□ 향후 추진계획

○ ‘14년 공사발주 예정

□ 특이사항

○ 없음

31. 위례지구 차집관거 증설사업 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	이석근	3708-2588

□ 사업개요

○ 목    적 : 위례지구 신도시건설에 따른 오수처리능력 증대

○ 위    치 : 송파구 탄천우안 (장지천초입∼탄천물재생센타)

○ 규    모 : 차집관거 설치 D=1,100mm, L=4,412m

○ 설계기간 : 2012. 5. ∼ 2013. 7.

○ 총사업비 : 15,289백만원 (설계비:838백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 설계완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
838	8,035		8,035		35	8,000		6,416

□ 추진실적

○ '07.01.~03 : 위례신도시 건설에 따른 서울,성남,하남시 기반시설배치협의

○ '08.04.      : 차집관로 공사시행에 따른 협의(서울시,LH공사)

○ '10.01.~11.  : 개발계획 변경(2차) 및 실시계획(1단계) 승인고시

○ '10.12.~'11.01.  : 탄천물재생센타 인입을 위한 차집관로 협의 (LH공사)

○ '12.02.17   : 공사시행 협약서 체결(서울시,SH공사)

○ '12.06.22   : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '12.09.14   : 설계자문회의(1차)

○ '13.06.17   : 공람공고 및 주민의견 청취

○ '13.07.31   : 설계 완료

□ 향후 추진계획

○ '13. 하반기 공사발주 및 착공 예정

□ 특이사항

○ 없음

32. 월계2교외 1개소 확장공사 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	신복민	3708-2586

□ 사업개요

○ 목    적 : 협소한 교량을 확장하여 교통정체를 해소하고 보행통로를 확보하여 통학생 및 통행주민의 안전확보

○ 위    치 : 월계2교 :노원구 월계동, 성산2교 : 마포구 성산동

○ 규    모 : 월계2교 및 성산2교 확장

- 월계2교확장 : 폭 25m →30m(5m확장), 연장 31m

- 성산2교확장 : 폭 30m →31m(1m확장), 연장 60m

○ 설계기간 : 2012. 6. ~ 2013. 2.

○ 총사업비 : 1,800백만원(설계비:100백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 설계완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
100	1,700 (공사비)		1,700 (공사비)		-	1,700 (공사비)		-

□ 추진실적

○ ‘10. 11. 15 : 성산2교 통학로개선 보도확장건의

○ ’11. 03. 22 : 월계2교 병목개선 정책제안 검토요구(노원구)

○ ’11. 05. 04 : 월계2교확장 민원발생(북부도로사업소)

○ ‘11. 11. 18 : 월계2교외1개소 확장 추진계획(도로계획과)

○ ‘12. 06. 20 : 설계용역 계약 및 착수

○ ‘12. 09. 18 : 설계자문회의 개최예정

□ 향후 추진계획

○ 2013.05.  :  공사 계약 및 착공

□ 특이사항

○ 없음

33. 잠실역 지하광장 조성(민자사업) 설계감리

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	강철규	3708-2587

□ 사업개요

○ 목    적 : 제2롯데월드 건축허가 조건에 따라 지하광장을 조성(확장)하여 잠실역 주변의 보행편의 향상

○ 위    치 : 송파구 잠실동 41번지 일대(2호선 잠실역)

○ 규    모 : 지하광장 11,079㎡(출입구, 지하광장 및 부속시설, 연결통로)

○ 사업기간 : 2011. 9 ∼ 2013. 9  (설계감리 : ´12. 2. ∼ ´13. 8)

○ 총사업비 : 40,987백만원(전액 도시계획사업시행자가 부담)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 토목분야 설계완료

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액

※ 사업비 전액 민자 사업시행자(롯데물산외 2개사) 부담으로 시행

□ 추진실적

○ ´11. 9.22 : 도시계획시설사업 실시계획인가(송파구)

○ ´12. 1.25 : 설계감리시행 협약체결(도로계획과, 도시계획사업시행자)

○ ´12. 2.16 : 설계감리 과업착수

○ ´12.12.24 : 건설기술심의

○ `13. 5.29 : 디자인 심의 (송파구에서 심의 의뢰)

- 노출천장으로 개방감 확보, 장애인 이동편의, 조경 식재계획 보완 등

○ `13. 6. 3 : 기술심의의결사항 조치계획서 제출(기술심사담당관)

○ `13. 8. 8 : 토목분야 설계감리 완료 (도로계획과, 송파구에 통보)

□ 향후 추진계획

○ 토목공사 시행중

□ 특이사항

○ 없음

34. 도시고속도로 연결램프(정릉길,연희로) 설치 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	이석근	3708-2588

□ 사업개요

○ 목    적 : 도시고속도로 하부도로의 진,출입구간의 상습지,정체 해소

○ 위    치 : 서대문구 홍은동(서대문구청앞 사거리), 성북구 정릉동(국민대 건너편)

○ 규    모 : 정릉길 진입램프 (B=5m, L=540m)

연희로 진입램프 (B=5m, L=620m)

○ 설계기간 : 2011. 8. ∼ 2013. 9.

○ 총사업비 : 21,671백만원 (설계비 : 490백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정  98%, 현재공정 98%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
660	2,241		2,241		41	2,200		18,770

□ 추진실적

○ '08.08~‘09.12: 타당성 조사 및 기본계획용역

○ '10.04~‘11.05 : 기본설계용역 시행

○ '11.08.05   : 실시설계용역계약 (착수 8. 8)

○ '11.10.18   : 설계자문회의(1차)

○ '11.12.~‘12.01: 주민설명회(성북구청, 서대문구청)

○ '12.02.17   : 설계자문회의(2차)

○ '12.02.~06  : 정릉길램프 기본계획안으로 변경검토

○ '12.07.11   : 성북구청 관련부서 설명회(기본계획안)

○ '12.08.17   : 성북구청 주민설명회

○ '12.08.24   : 설계자문회의(3차)

○ '13.06.19∼7.2  : 주민공람공고 (의견없음)

○ '13.09.30   : 설계 완료

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10월 공사 발주 예정

□ 특이사항

○ 연희로램프 : 지역주민 및 서대문구청장의 설치반대로 사업시행시기 협의

○ 정릉길램프 : 시,구의원 및 구청에서 설치요구(2013.10 공사발주 및 착공예정임)

35. 광복교～안양교주변 도로확장 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	신복민	3708-2586

□ 사업개요

○ 목    적 : 남부순환도로 구간중 협소한 광복교~안양교구간(4,5차로)을 6차로 확장 하여 차량 정체해소 및 교통체계개선을 위함

○ 위    치 : 광명시 철산동 ~ 구로동 구로IC앞

○ 규    모 : 도로확장 : 폭 4,5차로→6차로, 연장 :1,100m

- 광복교확장 : 폭 5차로→6차로(확장), 연장 67m

- 안양교확장 : 폭 4차로→6차로(확장), 연장 280m

○ 설계기간 : 2012. 6. ~ 2013. 10.

○ 총사업비 : 73,828백만원(설계비:800백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정90%, 현재공정90%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,600	1,000	231	1,231			1,231		71,228

□ 추진실적

○ ‘11. 06. 14 : 안양교확장 사업추진계획(도로계획과)

○ ’12. 06. 05 : 설계용역 계약 및 착수

○ ’12. 08. 24 : 설계자문회의 개최(1차)

○ ’12. 12. 27 : 설계자문회의 개최(2차)

○ ’13. 12. 27 : 설계자문회의 개최(2차)

○ ’13. 02. 22 : 안양천 하천횡단협의 -국토관리청 하천계획과

○ ’13. 09. 13 : 설계자문회의 개최(3차)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10. 30  : 설계용역 완료예정

□ 특이사항

○ 없음

36. 도시고속도로 연결램프(화랑로) 설치 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	이석근	3708-2588

□ 사업개요

○ 목    적 : 도시고속도로 하부도로의 진,출입 구간의 상습 지,정체 해소

○ 위    치 :

○ 규    모 : 진출램프 (B=5m, L=624m), 진입램프 (B=5m, L=584m)

○ 설계기간 : 2012. 12. ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 21,536백만원(설계비:578백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정60%, 현재공정60%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
301	-	578	-		173	405		20,657

□ 추진실적

○ '08. 8. ∼ '09.12. : 타당성조사 및 기본계획 용역

○ '10. 4. ∼ '11. 5. : 기본설계용역 시행

○ '12.10.25 : 사업계획 조정검토보고(도로계획과)

○ '12.10.29 : 램프추가설치 사업계획 조정통보

○ '12.11.26 : 건설기술심의

○ '13. 1. 9 : 실시설계용역 착수

○ '13. 7.17 : 설계자문회의

○ '13. 8.30 ∼ 9.12 : 기본설계(안) 공람공고

○ '13. 9. 9 : 노원구청장 면담

□ 향후 추진계획

○ '13. 9.30 : 합동 주민설명회(BRT사업 및 진출입램프)

○ '13.10.   : 주민설명회 결과에 따라 도로계획과 협의 검토

□ 특이사항

○ 기본설계(안)이 “경춘선 폐선부지 공원화사업” 및 버스전용차로 사업과 상충되어 노원구청장 및 지역주민의 반대민원 발생

○ 도로계획과와 협의하여 개선계획(안) 검토 예정

37. 탄천변 동측도로 확장공사 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	강철규	3708-2587

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동남부 지역의 개발에 따른 교통량증가에 대비 송파대로 교통량 분산 등을 위해 탄천변 동측도로를 확장

○ 위    치 : 송파구 올림픽경기장 ~ 송파구 문정동

○ 규    모 : 확장 폭 2차로→4차로, 연장 5,590m

○ 설계기간 : 2009. 3. ~ 2012. 10.

○ 총사업비 : 155,900백만원 (설계비 : 4,008백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 설계공정 42%(과업 일시중지 중)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	불용 예상액
2,097	-	1,124 (설계비)	1,124 (설계비)			1,124 (설계비)	1,124 (설계비)	153,803

□ 추진실적

○ `07.7 ~ `09.2 : 기본설계 시행(도로계획과)

○ `09.  3. 5   : 설계용역 착수(토목부)

○ `10.  8. 20  : 주민설명회 개최 : 4차로 전면지하화 요구

○ `11. 10. 15 : 투자심사 (접근성 결여, 예산과다 소요 등으로 부적정)

- 당초 2차로 지하차도(1,559억원) → 변경 4차로 터널 건설(3,840억원)

○ `12.  2.  9  : 공람공고(기존 2차로 제방도로 활용 + 2차로 지하도로 신설계획안)

○ `12.  6. 27 : 제238회 정례회 건설위원회 현장방문 업무보고

○ `12. 6.28 : 실시설계 과업 일시중지(노선계획안 확정시까지)

○ `13. 3. 4 : 노선계획(안) 검토보고서 제출 (토목부→도로계획과)

- 일방향(올림픽대로방향) 2차로 터널 신설 + 기존 2차로(제방도로) 활용

□ 향후 추진계획

○ 도로계획과에서 투자심사 등 절차를 거쳐 노선계획(안) 확정 후 실시설계 추진

38. 서초역～방배로간 도로개설 실시설계(보완)

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	임홍필	3708-2589

□ 사업개요

○ 목    적 : 군부대시설로 인하여 단절된 서초대로(서초역~방배로간)에 도로를  개설 하여 강남지역의 동․서축 연계도로망 형성과 주변 간선도로의 교통량 분산처리로 주변지역의 교통정체 해소

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1,280m(터널530m포함)

○ 설계기간 : 2012. 4. ~ 2013.12.

○ 총사업비 : 160,500백만원(설계비:500백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정70%, 현재공정70%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월예상액
66,050		285 (설계비)	285 (설계비)			285 (설계비)		94,080

□ 추진실적

○ ´00.11 ~ ´03.2 : 기본 및 실시설계 시행

○ ´12. 4.16   : 용역계약

○ ´12. 7.20   : 설계자문회의(1차)

○ ´12. 7.27   : 서초구청 사업설명회 개최

○ ´12. 9. 3   : 사업설명회 개최(서초구민회관)

○ ´13. 1.11   : 서초구청 사업설명회 개최

○ ´13. 5. 2   : 주민설명회(서초구)

○ ´13. 9. 4   : 서울시민디자인 위원회 심의

□ 향후 추진계획

○ ‘13.12    : 설계용역 완료예정

□ 특이사항

○ 없음

39. 제물포터널(민자사업) 설계감리

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	신복민	3708-2586

□ 사업개요

○ 목    적 : 지․정체구간인 제물포로의 교통환경 개선 및 통행시간 단축하고, 지상 교통량 저감으로 대기환경과 생활 환경의 개선

○ 위    치 : 양천구 신월동(신월IC) ∼ 영등포구 여의도동(여의대로)

○ 규    모 : 터널 폭 :4차로, 연장 : 7,53㎞

○ 사업기간 : '2010.  ∼ '2017. 12  (용역기간 : '13.2.1∼'13.12.31)

○ 총사업비 : 4,545백만원 (’13년 보상비 : 3,000백만원)

- 재원분담 : 시비 110,058백만원 (공사:83,696, 보상:26,362)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정30%, 현재공정30%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	3,000 (보상비)		3,000 (보상비)			3,000 (보상비)		107,058

※ 설계감리비 : 민간 사업시행자 부담 시행

□ 추진실적

○ '07.07. ~ '09.02. : 민간제안서에 대한 타당성조사 (KDI)

○ '10.05.26 : 재정계획심의(서울시) 및 시의회 동의('10.12.30)

○ '11.06.15 : 우선 협상대상자 선정

○ '12.12.24 : 실시협약(가협약) 체결에 따른 설계감리 추진 지시(도로계획과→토목부)

○ '13.04.25 : 설계감리용역 계약 체결(대콘, 다산)

○ '13.05.16 : 환경영향평가 항목 등의 결정내용 공개 공고

○ '13.6.11∼ 6.13 : 주민설명회 개최 (영등포, 양천, 강서)

□ 향후 추진계획

○ '13. 10. 28 : 공청회 개최 예정

○ '13. 12.    : 설계감리 완료 예정

□ 특이사항

○ 환경영향평가 주민설명회 개최결과 여의도지역주민 여의대로 진․출입부 설치반대

및 공청회 개최요구(약 2,600명)하여 공청회 개최후 주민의견 수렴 주관부서

(도로계획과) 협의

40. 신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	강철규	3708-2587

□ 사업개요

○ 목    적 : 신정3지구 국민임대주택 등 개발에 따른 교통량 증가에 대비,

교차로 구조 개선(지하차도 폐쇄 및 교차로 평면화)

○ 위    치 : 양천구 신월6동 신월지하차도(남부순환로 강월초교입구 교차로)

○ 규    모 : 도로 평면화 폭 30m, 연장 200m

○ 설계기간 : ´13. 2. 1 ∼ ´13.10.31

○ 총사업비 : 2,500백만원(설계비 : 97백만원)

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정65%, 현재공정65%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	2,500		2,500			2,500	2,388

□ 추진실적

○ '12.5.29 ∼ '12.11.30 : 타당성조사 및 기본계획 수립(도로계획과)

○ '13. 2. 7 : 설계용역 계약 및 착수

○ '13. 6.21 : 남부순환로 지하차도 연장 타당성 부족 통보(도로계획과→토목부)

○ '13. 8.16 : 기본설계(안) 공람공고

○ '13. 8.28 : 설계자문회의 (지하차도 구조물 활용방안 등 추가검토)

□ 향후 추진계획

○ 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴하여 `13.10월 설계완료 예정

□ 특이사항

○ 없음

41. 사가정길(장안삼거리～전농동사거리)확장 기본 및 실시설계

담당부서	과 장	나상호	3708-2585
토 목 부	담당자	임홍필	3708-2589

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동북부지역의 간선도로인 사가정길 미확장 구간의 교차로 확장으로 병목현상 개선 및 교통정체 해소

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리) ~ 전농동 32(전농사거리)

○ 규    모 : 도로 교차로구간 확장 (전체 미확장구간 L=1,200m 중 520m)

-  배봉사거리 구간 L=390m, B=24~25m(5차로) →  27.5~28.75m(6~7차로)

-  전농사거리 구간 L=130m, B=25m(5차로) → 27m(6차로)

○ 설계기간 : 2013. 2. ~ 2013.12.

○ 총사업비 : 7,964백만원(설계비:142백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정60%, 현재공정60%, 계획대비 실공정률100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

2012년 이전 기투자	2013							2014년 이후
	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
91	142		142			142		7,731

□ 추진실적

○ '10. 2.22∼'10.12.17 : 타당성조사 및 기본계획 용역

○ '12. 8. 3 : 투자심사

○ '13. 1.21 : 용역타당성 심사

○ '13. 1.24 : 입찰공고

○ '13. 2.18 : 설계용역 계약 및 과업착수

○ '13. 3.14 : 투자심사

○ '13. 8.28 : 설계자문회의

□ 향후 추진계획

○ ‘13.12    : 설계용역 완료예정

□ 특이사항

○ 없음

42. 강남순환도시고속도로(민자구간) 건설공사

담당부서	과 장	성선주	3708-8665
토 목 부	담당자	여용석	3708-8661

□ 사업개요

○ 목    적 : 올림픽대로 및 남부순환로의 교통량 분산으로 동서간 교통흐름 개선

○ 위    치 : 금천구 시흥동 ~ 서초구 우면동

○ 규    모 : 왕복 6~8차로, 연장 12.4km

○ 사업기간 : 2007. 11. ~ 2016. 5.

○ 총사업비 : 1,423,124백만원 (민간투자비 879,500 포함)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 61.4 %, 현재공정 60.4 %,  계획대비 실공정률 98.4%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

※ 민간투자사업으로 재배정 예산 없음.

□ 추진경위

○ 2002.06.05 : 도시계획시설 결정고시

○ 2002.06.27 : 사업시행자 지정 및 실시협약 체결(‘02.6.27)

○ 2002.09.28 : 실시설계 완료

○ 2007.02.15 : 실시계획 승인

○ 2007.11.20 : 공사착공

□ 추진실적

○ 터널 전구간(NATM) 10,326m 굴착완료

- 관악터널 4,796m 신림터널 2,590m 서초터널 2,940m

- 신림2터널 라이닝 콘크리트 70% 시공완료

○ 관악I.C 구간 도림천지하차도(T.R.c.M) 88% 시공완료

- 갤러리관 4본/슬래브관 57본 시공완료, 현재 벽체시공 중

○ 선암교 교각시공 및 강교제작

- 강교제작 완료(7,400ton), 교각 21개소 중 15개소 완료

□ 향후 추진계획

○ 터널 라이닝 시공(관악, 신림, 서초터널)

○ 도림천횡단 지하차도(T.R.c.M) 완료('13. 11)

○ 선암교 강박스 가조립 및 도장 완료('13. 12)

□ 특이사항

○ 민자구간 : 민간투자협약 변경 추진

- 사업시행자가 공기연장을 금융약정 상 채무불이행 사유로 간주

→ 작년 하반기부터 민간투자비 조달에 의한 공사기성 지급 유보.

→ 공사기성 유보 현황

․'13년말 협약체결 기준 가정시 1,112억원 기성 미지급 발생

(3차로 712억원, 4차로 440억원)

․시공사 자금사정 악화 ⇒ 실시협약 조속 체결 필요

○ 강호빌라 사면안전성 검토

- 시장 현장방문('12. 7. 14) 시 사면안정성 검토 재시행 지시

- 안전성검토 용역 시행자 선정('13. 6. 17) (한국지반공학회)

․ 용역기간 : '13. 8. 7 ~ 10. 25

․ 지반조사를 위한 경사시추 및 시험발파 완료

․ 현장시험과 물리탐사 진행 중

43. 신림～봉천터널 건설공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	황윤기	3708-2566

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 남부지역 동․서간 간선도로 확충으로 극심한 정체를 일으키고 있는 남부순환로의 교통량 분산으로 관악구, 금천구, 구로구, 영등포구 지역주민 통행불편 해소 및 지역균형발전 촉진

○ 위    치 : 남부순환로 시흥IC ~ 낙성대JCT

○ 규    모 : 왕복4차로, 연장 5.58km

○ 사업기간 : 2010. 10. ~ 2017. 12.

○ 총사업비 : 550,700백만원(2013년 현재)

(보상비 139,700백만원, 공사비 397,274백만원 감리비 13,726백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정  8.3%, 현재공정 7.5%, 계획대비 실공정률 90.3%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재(※ 재배정예산 기준)                (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
30,300	9,976	2,314	4,200	7,662	11,862	-	4,308	7,554	-	13,918

□ 추진실적

○ 2010. 10. 08 : 공사계약 및 공사착수

○ 2012. 05. 15 : 행정1,2부시장 연석회의(2회)

○ 2012. 06. 29 : 사업추진방향 관련 숙의

○ 2012. 09. 07 : 긴급공사(강남순환도로 하부통과 터널굴착) 착수

○ 2013. 08. 30 : 1차 협의보상 완료

○ 2013. 09. 현재 : 1차 보상 재결 및 긴급공사 구간 터널굴착 공사 중

□ 향후 추진계획

○ 2013. 12. 31 : 긴급공사구간(강남순환도로 하부통과구간) 터널굴진 완료

난곡사거리 1단계 보상 완료

○ 2014. 02. 28 : 강남순환도로 접속부 개착박스공사 착수 및 2단계 보상추진

○ 2017. 12. 31 : 공사완료예정

□ 특이사항

○ 연차별 부족예산 편성에 따른 민원발생

- 난곡사거리 보상비 및 터널구간(호림박물관) 지하보상비 부족

44. 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

담당부서	과 장	성선주	3708-8665
토 목 부	담당자	시희식	3708-8662

□ 사업개요

○ 목    적 : 내부순환형 도시교통망 건설로 교통량분산 동서간 교통환경 개선을 통한 지역간 균형발전에 기여

○ 위    치 : 금천구 독산동～광명시 소하동～금천구 시흥동

○ 규    모 : 연장 2.48km, 폭 왕복 4~8차로,

(지하차도 760m, 본선교량 820m, 성토구간 900m)

○ 사업기간 : 2001. 12. ~ 2016. 5.

○ 총사업비 : 324,760백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 21.0%, 현재공정 20.1%, 계획대비 실공정률 95.7%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012년		2013년							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
167,113	6,904	6,904	-	-	55,198	-	12,434	42,764	-	50,200

□ 추진실적

○ ‘01.12. : 공사계약

○ ‘07.11. : 수원~광명간 민자사업 강남순환 접속(시장방침 제590호)

○ ‘08.09. : 도시계획시설 결정(광명시 구간)

○ ‘09.04. : 도시계획계획 결정(금천구 구간)

○ ‘09.05. : 안양천 점용허가 승인(서울지방국토관리청)

○ ’09.07 : 기아대교 개수공사 완료

○ ’09.08 : 소하JCT 설계변경 완료

○ ‘10.12 : 우물통 기초 및 교각 기초 완료(P4,P5,P7,P8)

○ ‘11.12 : 소하 JCT Up Ramp 교각 P1~P8 코핑 시공완료

본선교 - 교각 P2~4, P6 기둥 시공완료

○ ‘12.12 : 기아천교 시공완료

본선교각(P2.P3.P4.P6.P8) 시공 완료

○ ‘13.9 현재 : 교각41기중 27기 시공완료, 14기 시공

교량 강제제작(14,000톤)

종점부 시흥UP-Ramp 보상절차 추진

□ 향후 추진계획

○ 2013년 : 본선교 교각시공 완료

○ 2014년 : 소하JCT 교량완료

○ 2015년 : 지하차도 시공완료

□ 특이사항

○ 강남순환4공구 종점부 진성연립 등 주택이주 대책

⇒ 남부도로사업소청사 이전(부시장 방침 ‘12.4.13)을 추진하였으나, 일부주민 극렬 반대로 별도대책 검토 중(도로관리과)

45. 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

담당부서	과 장	성 선 주	3708-8665
토 목 부	담당자	양 준 식	3708-8666

□ 사업개요

○ 목    적 : 주간선도로인 양재대로의 교통량 분산 및 체계적인 도로망 구축하여 양재 IC, 염곡 교차로의 도로기능 및 교통환경 개선

○ 위    치 : 서울 서초구 우면동 ∼ 과천시 주암동 ∼ 강남구 수서동

○ 규    모 : 폭 4∼10차로, 연장 7.96km(교량 0.52km, 지하차도 4개소 2.79km)

○ 사업기간 : 2002. 7. ～ 2014. 5.

○ 총사업비 : 367,299백만원(공사비 287,367  보상비 54,000  기타 25,932)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 19.50%, 현재공정 19.31%, 계획대비 실공정률 99.03%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
55,635	16,954	16,741	58,861	213	59,074		15,049	43,765	260	37,581

※ 사고이월 사유 : 사용시기(준공기한) 미도래

□ 추진실적

○ 2013.05 : 장기계속공사(7차) 착수

○ 2013.06 : 주암교(과천방향) 및 본선고가교 교각(P1~P4) 시공완료

○ 2013.08 : 구룡지하차도 구조물공사 완료

○ 2013.09 : 광역상수도 이설(염곡지하차도 주변) 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10 : 제2염곡지하차도 공사 착수

○ 2013. 12 : 구룡지하차도 개통예정

○ 2014.  2 : 과천시 구간 보상 및 철거 착수

○ 2014.  3 : 주암교(수서방향) 및 본선고가교 구조물 공사 착수

○ 2016.  5 : 강남순환도로(민자) 선암로(재정) 연결(Landing) 예정

□ 특이사항

○ 과천시 통과구간 도시계획시설 결정지연으로 당초 공정계획 차질 우려

46. 헌릉로 연결도로(강남순환접속)공사

담당부서	과 장	성 선 주	3708-8665
토 목 부	담당자	양 준 식	3708-8666

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남순환도시고속도로 건설로 양재대로에 집중되는 교통량 분산 및 양재 I.C 및 염곡교차로의 교통환경 개선

○ 위    치 : 서초구 원지동(화물터미널 ~ 염곡동)

○ 규    모 : 도로개설 폭 5~12차로, 연장 1.69km

○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2013. 6.

○ 총사업비 : 213,311백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 현재공정 100%, (2013.6.30 준공)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                 (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
154,390	39,478	37,188	19,443	2,290	-	21,733	15,425	6,308	-	-

□ 추진실적

○ '02.06∼'06.02 : 기본설계 및 실시설계

○ '07. 01 : 공사계약 및 착공

○ '07. 12 : 사업시행계획 변경(교량→지하차도) 방침

○ '08. 09 : 경부고속도로 접속(헌릉로 유출) 승인(국토해양부)

○ '11. 08 : 경부고속도로 통과 지하차도 시공완료

○ '11. 12 : 서울추모공원 진입도로구간 일부 확장

○ '13. 06 : 전구간 공사완료

□ 향후 추진계획

○ '13. 06 : 전구간 공사완료

○ '13. 07 : 개통(7.15)

□ 특이사항

○ 없음

47. 월계2교외 1개소 교량확장공사

담당부서	과 장	성선주	3708-8665
토 목 부	담당자	장영준	3708-8664

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 협소한 교량구간을 확장하여 차량정체 및 교통불편 해소

○ 위    치 : 노원구 월계로 월계2교, 마포구 월드컵북로 성산2교

○ 규    모 :

(월계2교) · 확장(차도, 보도) 폭 25m → 29m, 연장 39m

(성산2교) · 확장(보도) 폭 30m → 32~33m, 연장 33.4m )

○ 사업기간 : 2013. 5. 27 ~ 2014. 5. 26

○ 총사업비 : 1,800백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 10.0%, 현재공정 10.0%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	1,700	-	1,700	-	-	1,700	0	100

□ 추진실적

○ 2011. 11. 18 : 월계2교외 1개소 확장계획 수립(도로계획과)

○ 2013.  3. 13 : 계약심사 의뢰

○ 2013.  4. 15 : 공사발주

○ 2013.  5. 27 : 착공

○ 2013.  7. 30 : 브라켓 제작 완료

○ 2013.  7. 30 : 정밀안전진단 용역 착수(9. 15 용역 완료 예정)

○ 2014.  5. 26 : 준공

□ 향후 추진계획

○ 2013.  9. 25 : 가시설 착수

○ 2013.  5. 26 : 공사 준공

48. 신촌로 마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사

담당부서	과 장	명경출	3708-2565
토 목 부	담당자	이석우	3708-2567

□ 사업개요

○ 목    적 : 교통기능저하 및 도시경관과 지역발전을 저해하는 고가차도를 철거하여 도시미관을 제고하고 원활한 교통흐름을 위한 버스 중앙차로 설치 및 교차로 교통체계 개선

○ 위   치 : 마포구 아현동 267 ~ 중구 중림동 754

○ 규   모 : 고가철거 폭15m, 연장 939m, 중앙차로설치 연장 2.2km, 중앙정류소 6개소

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 15,411백만원('13년 5,000백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정0.6%, 현재공정0.6%, 계획대비실공정률100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                   (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
185	-	-	5,000	-	-	5,000	100	4,900	-	10,226

□ 추진실적

○ '09.12.14	: 고가차도 세부철거계획 수립(행정2부시장방침 : 제667호)

○ '11.04.20	: 기술용역타당성 심사(조건부)

○ '11.05.02	: 건설기술심의(용역발주심의)

○ '12.02.23	: 실시설계용역 완료

○ '13.06.18	: 공사계약 체결

○ '13.9월 현재	: 공사중교통처리계획 및 지장물 이설협의중

□ 향후 추진계획

○ '13.10.	: 아현역일대 보도후퇴 공사

○ '13.11.	: 고가차도 철거

○ '14.06.	: 중앙차로 공용개시

□ 특이사항

○ 교통운영과에서 추진중인 경찰청 규제심의 지연시 전체공기 지연우려

49. 도봉산역 복합환승센터 건립공사

담당부서	과 장	이동훈	3708-2575
토 목 부	담당자	장종환	3708-2577

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 본 사업 환승시설과 만남의 장소를 갖춘 복합한승센터를 확충하여 시내버스 운행환경 조성 및 대중교통 서비스 수준향상을 목적으로 함.

○ 위    치 : 도봉구 도봉동 288-19번지 일원

○ 규    모 : 도봉로 횡단 연결통로 설치 (폭7.6m×연장82.5m)

지하2층/지상4층, 총면적 17,278.97㎡

(주차대수 364대, 자전거 285대)

○ 사업기간 : 2007. 3. ~ 2013. 05.

○ 총사업비 : 36,846백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 공사준공

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
34,446	13,162	10,259	5,879	2,452	8,331	-	6,382		-	-

□ 추진실적

○  2012.01.31    : 연결통로 1∼10단계 가시설 완료

○  2012.05.31    : 환승센터 철근콘크리트 완료

○  2012.09.30    : 연결통로 구조물 시공

○  2013.05.31    : 공사준공

○  2013.07.01    : 환승주차장 공용개시

□ 특이사항

○  없음

50. IT-COMPLEX 건립공사

담당부서	과 장	강성욱	3708-2601
건 축 부	담당자	장충근	3708-2608

□ 사업개요

○ 목    적 : DMC 단지내 서울의 우수한 IT기술과 문화콘텐츠․디지털                 미디어 산업 역량을 집약한 국제적인 랜드마크 건립

○ 위    치 : 마포구 상암동 DMC 단지내 E3-3구역(1648번지)

○ 규    모 : 지하7층, 지상21층, 연면적 81,969㎡

○ 사업기간 : `08. 7 ~ `15. 3

○ 총사업비 : 209,519백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 53.3%, 현재공정 53.3%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
76,695	6,000	6,000	30,000	19	-	30,019	11,632	18,387	-	89,204

□ 추진실적

○ `08.06.18 : IT-COMPLEX 건립공사 추진계획 수립(시장방침 제318호)

○ `09.04.03 : 우선시공분(Fast Track) 계약 및 착공

○ `09.08.31 : IT-COMPLEX 건립계획 변경(시장방침 제401호)

○ `10.01.01 : 본공사 착공

○ `11.02.28 : 지하층 골조공사 완료

○ `12.02.28 : 지상층 골조공사 완료

○ `12.09.19 : IT-COMPLEX 건립 변경계획 수립(행정1부시장방침

제475호)

○ `13.07.31 : 외부 커튼월 및 판넬 설치 완료

○ `13.08.31 : e-sports 경기장 등 대공간 내부 마감공사 중

□ 향후 추진계획

○ `13.12.   : 건립계획 변경에 따른 수요부서 입주공간 설계변경 완료

○ `14.10.   : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

51. 서울 재사용플라자 조성사업 설계용역

담당부서	과 장	강성욱	3708-2601
건 축 부	담당자	장윤수	3708-2605

□ 사업개요

○ 목    적 : 자원 재활용 및 재사용 문화 확산과 관련, 산업 육성의 구심점으로써 재활용 과정을 보고 체험할 수 있는 세계적인 관광명소 조성

○ 위    치 : 성동구 용답동 250-1 일원

○ 규    모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 16,000㎡ 규모

○ 사업기간 : `12. 4 ~ `15. 12

○ 총사업비 : 37,300백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 73%, 현재공정 47%, 계획대비 실공정율 64%

- 부진사유 : 사용자 요구사항, 건축정책위원회 자문의견 반영 및 도시계획시설사업으로 변경 추진에 따른 추가 용역기간 소요

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	4,800	0	-	4,800	566	4,234	-	28,800

□ 추진실적

○ ‘12.4.5, 4.13 : 재활용도시 만들기 보고시 시장 지시사항(기후본)

○ '12.08.30 : 서울 재사용 플라자 조성계획 시장 방침(기후본,제276호)

○ '12.12.17 : 설계용역 시행 계획 방침(본부장)

○ '13.03.07 : 설계공모 작품심사 실시(당선작 : 삼우종합건축사사무소)

○ '13.04.07 : 설계용역 착수

○ '13.09.03 : 기본계획(계획설계) 중간보고회 개최

□ 향후 추진계획

○ `13.11.08 : 설계용역 완료

○ `13.12.   : 공사 착수(예정) - (~ 2015.12)

□ 특이사항

○ 없음

52. 장충체육관 리모델링공사

담당부서	과 장	차재옥	3708-2615
건 축 부	담당자	신현성	3708-2618

□ 사업개요

○ 목    적 : 노후된 시설의 역사성을 보전하면서 스포츠와 문화가 함께하는 문화복합공간으로 리모델링하여 시민들이 도심에서도 고품격의 문화와 체육활동을 즐길 수 있도록 함

○ 위    치 : 서울시 중구 장충동2가 200-102

○ 규    모 : 지하2층, 지상3층, 연면적 11,429㎡(리모델링 8,384㎡, 증축 3,045㎡)

○ 사업기간 : `10. 8. ~ `13.12.

○ 총사업비 : 29,880백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 68.5%, 현재공정 53.4%, 계획대비 실공정율 78%

- 부진사유 : 지붕디자인 및 시설물 개선에 따른 사업계획 변경

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,454	15,100	15,100	13,326	10,175	-	23,501	2,242	21,259	-	-

□ 추진실적

○ `10.08.19 : 장충체육관 리모델링 추진계획 방침(시장방침 제308호)

○ `10.08.31 : 기술용역타당성 심사 완료

○ `10.09.20 : 건설기술심의(용역발주전 심의)완료

○ `10.10.07 : 설계공모 시행 및 공고

○ `10.12.07 : 설계공모작품 심사 및 당선작 선정(유선엔지니어링건축)

○ `10.12.25 : 설계용역 계약 및 용역 착수(‘11.01.03)

○ `11.12.21 : 설계용역 준공

○ `12.05.30 : 공사 착공

○ `13.08.31 : 토공사 완료, 골조공사 및 보수보강 공사 중

□ 향후 추진계획

○ `13.12.   : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

53. 행복플러스 작업장 건립공사

담당부서	과 장	차재옥	3708-2615
건 축 부	담당자	이광백	3708-2619

□ 사업개요

○ 목    적 : 중증장애우의 일자리를 확대하고, 경쟁력 있는 제품 생산   으로 장애우 근로자의 안정된 소득을 통한 지역사회 자립   기반 강화 및 삶의 질 향상에 기여

○ 위    치 : 성북구 하월곡동 2-2호 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 3,690.62㎡

(별동증축 지하1층/지상3층, 연면적 1,407.38㎡)

○ 사업기간 : `12. 06.  ~ `14. 09.

○ 총사업비 : 3,868백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정율 0%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	2,268	2,268	1,600	2,067	-	3,667	5	3,662	-	-

□ 추진실적

○ `12. 04. 09 : 행복플러스작업장 건립 계획방침(장애인복지과)

○ `12. 05. 07 : 행복플러스작업장 건립 투자심사(재정담당관)

○ `12. 06. 19 : 행복플러스작업장 건립공사 의뢰(장애인복지과→본부)

○ ‘12. 09. 07 : 설계용역 계약 및 착수

○ ‘13. 03. 26 : 설계용역 준공

○ ‘13. 07. 02 : 공사 계약 및 착수(‘13.07.22)

○ '13. 08. 31 : KIST 부지 내 공사차량 진입을 위한 게이트설치

□ 향후 추진계획

○ `14.09.   : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

54. 운현궁 보수·정비공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 시민들의 문화시설 이용·편의를 위해 운형궁 회랑(기획전시실) 보수 (지붕교체,창호개선) 및 배수관로 정비를 통해 문화재 보호와 시설관리

○ 위    치 : 종로구 운니동 114-10

○ 규    모 : 회랑(기획전시실) 처마 누수부분 교체 및 창호개선

노락당 대문체 밖 집수정 교체 및 우수관로 정비

운현궁 마당 마사토 정비(구배정돈 작업)

○ 사업기간 : 2012.11. ~ 2013. 03

○ 총사업비 : 70백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	61.3	-	-	61.3	-	61.3	60.3	1	-	-

□ 추진실적

○ ‘12. 04. 08 : 2013 운현궁 문화재 시설보수 공사계획(문화재과-6776)
○ ‘12. 09. 14 : 설계용역 완료

○ ‘12. 11. 26 : 공사 착공

○ ‘13. 03. 30 : 공사 완료

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

55. 숭례문 방재관리시설 건립공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 숭례문 화재사고를 통하여 문화재에 대한 가치를 재인식하고 안전관리를 위한 방재관리시설 설치공사

○ 위    치 : 중구 남대문로 5가 29-1외5필지(숭례문 광장내)

○ 규    모 : 지하1층 연면적 273㎡

○ 사업기간 : `11. 06 ~ `13. 04

○ 총사업비 : 1,740백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
45	1,695	-	-	1,695	-	-	1,534	161	-	-

□ 추진실적

○ `10.08.17 : 숭례문 전시관 건립기본계획 수립(문화국장-100615호)

○ `11.06.20 : 기술용역 타당성 심사완료

○ `11.12.29 : 사업계획 변경추진(교육전시,방재시설→방재관리시설)

○ `12.06.26 : 설계용역 완료

○ `12.08.24 : 공사 착공

○ `13.04.30 : 공사 완료

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

56. 한양도성 탐방로(창의문~말바위안내소)정비공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 한양도성(사적제10호)의 2012년 복원정비계획에 의한 공사로 탐방로를 정비, 문화재 관람객의 안전확보 및 편의시설 제공

○ 위    치 : 종로구 삼청동 산2-1번지

○ 규    모 : 말바위 안내소 화장실증축, 숙정문 바닥 및 협문보수

토사유지구간 보수(청운대~청풍암문구간, 소나무군락지)

○ 사업기간 : `12. 05 ~ `13. 07

○ 총사업비 : 502.5백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	502.5	487.9	-	475.4	-	-	450.8	24.6	-	-

□ 추진실적

○ `12.05.02 : 2012년 복원정비 추진계획(문화재과-7838)

○ `12.06.04 : 기술용역 타당성 심사

○ `12.06.28 : 설계용역 계약

○ `12.09.06 : 문화재 자문실시

○ `12.11.30 : 설계용역 완료

○ `13.02.25 : 공사 착공

○ `13.07.10 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

57. 서남권 돔야구장 건립공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	차무흥	3708-2628

□ 사업개요

○ 목    적 : 문화체육시설이 부족한 서남권 지역의 문화체육인프라 확충을 통한 서남권 지역의 랜드마크 조성 및 동대문운동장 공원화 사업에 따른 대체구장 조성

○ 위    치 : 구로구 고척동 63-6번지 일대

○ 규    모 : 지하2층/ 지상4층, 연면적 80,541㎡

○ 사업기간 : `07. 7 ~ `15. 2

○ 총사업비 : 158,371백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 76%, 현재공정 72%, 계획대비 실공정율 94%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
76,079	62,135	36,437	32,222	15,198	-	47,420	4,351	43,069	15,891	66,674

★ 사고이월 사유 : 사업계획 변경에 따른 및 설계변경 등 추진(돔 구장시설개선 등)

※ 보행자 전용도로 예산 미 포함

□ 추진실적

○ `07.07.26 : 서남권 문화체육컴플렉스 건립계획(시장방침 제409호)

○ `08.09.16 : 공사 발주(조달청의뢰)

○ `09.02.04 : 우선 시공분(토목) 계약 및 착공(Fast-track)

○ `09.04.16 : 기공식

○ `09.08.13 : 서남권 돔 야구장 건립계획(시장방침 제376호)

○ `10.10.08 : 서남권 돔야구장 주변교통처리대책 수립(시장방침 제375호)

○ `10.11.11 : 건축계획(변경)심의 및 교통영향분석․개선대책 심의

○ `11.06.28 : 공유재산관리계획 통과(수익시설 및 친환경건축물 추진)

○ `12.08.21 : 돔 야구장 활용관련 자문회의 개최

○ `13.08.16 : 돔 야구장 활용방안 숙의

○ `13.08.25 : 서남권 돔야구장 건립사업계획 변경 방침수립(시장방침 제233호)

- 준공기한 조정 : 당초 `13.12월 → `15.2월

- 시설개선 : 공연적합시설, 관람객 편의증진 야구장 기능개선, 교통개선 대책

□ 향후 추진계획

○ `13.12.   : 수익시설 및 시설개선 사항 반영 설계 및 변경 추진

○ `14.02.   : 설계변경 등 추진(예정)

○ `15.02.   : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

58. 북한산성 4단계 1차 복원정비공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 사적제162호 북한산성(4단계) 복원․정비사업을 완료 전통문화유적의 보존․전승 및 관광자원으로 활용

○ 위    치 : 강북구와 고양시 경계 북한산(대남문~청수동암문 구간)

○ 규    모 : 산성길이 12.7㎞(서울5.5㎞, 경기2.9㎞,자연지세4.3㎞)

성문 14개소(서울10개소, 경기4개소),장대3, 행궁지,유영지 등

○ 사업기간 : 1990년 이후 계속사업

○ 총사업비 : 1,481백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정율 0%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
53	-	-	1,428	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ `02.03.26 : 복원정비 시장방침(제364호)

○ `02.06.01~11.27 : 설계완료

○ `03.01.06 : 문화재청 현상변경 승인

○ `03.02.18 : 투자심사 실시

○ `03.08~`12.01 : 3단계 7차까지 완료

○ `03.08~`12.01 : 3단계 7차까지 완료

○ `11.08.30 : 4단계 1차 복원정비 설계발주

○ `12.01.23 : 4단계 1차 설계용역 완료

□ 향후 추진계획

○ 주관부서 사업발주 계획에 따라 추진 예정

□ 특이사항

○ 없음

59. 운현궁 보수공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 운현궁 노락당, 북행각 및 회랑(기획전시실) 등의 누수로 부식되고 노후화된 부분을 수리□보수하여 문화재를 보호하고 운현궁 관람객의 안전을 도모하고자 함

○ 위    치 : 종로구 운니동 114-10

○ 규    모 : 북행각 지붕보수, 노락당 북측 굴뚝보수, 회랑 및 주변행각 회벽보수, 회랑 좌측 사고석 담장보수 및 지반보강 등

○ 사업기간 : 2013.04. ~ 2014. 01

○ 총사업비 : 100백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정율 0%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	100	-	-	100	11	89	-	-

□ 추진실적

○ ‘13.04.02 : 2013 운현궁 문화재 시설보수 공사계획(문화재과-6776)
○ ‘13.04.04 : 운현궁 보수공사 의뢰 및 예산재배정 통보(문화재과→건축부)
○ ‘13.04.19 : 기술용역타당성 심사완료 - 심사결과 : 적정(조건부)
○ ‘13.05.06 : 설계용역 착수
○ ‘13.05.23 : 문화재 자문회의 실시(금회 보수범위 결정)
○ ‘13.07.11 : 문화재청 설계승인 통보

○ ‘13.08.01 : 설계용역 준공

□ 향후 추진계획

○ '13.  9월     : 공사 발주

○ '13. 10월   :  시공사 선정 및 공사 착수

○ '14.  1월    :  공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

60. 돈화문로 전통공연장(국악예술당) 신축공사

담당부서	과 장	정진수	3708-2625
건 축 부	담당자	이진원	3708-2629

□ 사업개요

○ 목    적 : 세계문화유산인 창덕궁과 어울리지 않는 주유소를 매입하여 전통문화를 0상징할 수 있는 문화시설 건립

○ 위    치 : 종로구 와룡동 5-9 외 8

○ 규    모 : 디지털전시관(지하2층, 지상1층, 연면적 1,503㎡)

국악예술당(지하3층, 지상1층, 연면적 1,800㎡)

○ 사업기간 : 2008.11. ~ 2015. 5

○ 총사업비 : 45,686백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정율 0%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
16,346	7,138	7,101	7,676	3,071	-	10,747	98	10,649	5,340	4,455

★ 사고이월 사유 : 사업계획 변경(디지털전시관 및 국악예술당 중 국악예술당 우선시행)

□ 추진실적

○ `08.11.23 : 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획 방침(시장방침 제647호)

○ `09.05.24 : 돈화문로 문화시설 건립계획 수립

○ `11.03.30 : 기술용역 타당성심사 완료(조건부 적정)

○ `11.05.27 : 설계공모 공고

○ `11.08.19 : 설계공모작품 심사 및 당선자 선정(금성종합건축사사무소)

○ `11.09.21 : 설계용역 계약

○ `12.08.10 : 설계용역 준공

○ ‘13.08.07 : 돈화문 국악예술당 건립 추진계획(문화관광디자인본부장방침)

□ 향후 추진계획

○ '13.  9월     : 국악예술당 공사 발주

○ '13. 10월   :  시공사 선정 및 공사 착수

○ '15.  5월    :  공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

61. 서울글로벌센터 건립공사

담당부서	과 장	정창구	3708-2645
건 축 부	담당자	윤용훈	3708-2648

□ 사업개요

○ 목   적 : 서울에서 활동하는 외국인 투자기업과 외국인을 지원하기 위한 업무 및 편의시설, 문화시설을 갖춘 글로벌도시 상징 건축물 건립.

○ 위   치 : 종로구 서린동 64-1번지 외 10필지

○ 규    모 : 지하 4층, 지상 15층, 연면적 11,762㎡

○ 사업기간 : `10. 6. ~ `13. 1.

○ 총사업비 : 32,967백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
16,399	16,568	16,568	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ `08.05.02 : 건립 및 사업추진계획수립(시장방침 제221호)

○ `09.12.24 : 설계용역 준공

○ `10.06.23 : 문화재 발굴착수(‘10.12.31완료)

○ `10.06.25 : 공사 착공

○ `10.07.15 : 감리용역 착수

○ `12.07.31  : 골조공사 완료

○ `13.01.24 : 공사완료

□ 특이사항

○ 없음

62. 서울시 근로자복지관 리모델링공사

담당부서	과 장	정창구	3708-2645
건 축 부	담당자	박경호	3708-2649

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울시 근로자복지관의 노후된 시설물의 보수 및 일부 기능을 개선하여 쾌적한 공간을 조성하고 근로자의 이용편의를 증진

○ 위    치 : 영등포구 영등포동 7가 57번지

○ 규    모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 3,321.6㎡

○ 사업기간 : `13. 2 ~ `13. 12

○ 총사업비 : 670백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 5%, 현재공정 5%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-		670		-	670	22	648	-	-

□ 추진실적

○ `13.01.31 : 2013년 근로자복지관 사업계획 수립(정책관방침제318호)

○ `13.02.22 : 서울시 근로자복지관 보수공사의뢰

○ `13.04.22 : 공공건축가 선정

○ `13.05.07 : 설계용역 계약

○ `13.07.15 : 설계용역 준공

○ `13.07.24 : 공사계약 의뢰

○ `12.08.26 : 공사계약 및 착공

○ `13.08.31 : 공사 준비중(가설비계 설치)

□ 향후 추진계획

○ `13.12.23  : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

63. 서울과학관 건립공사

담당부서	과 장	정창구	3708-2645
건 축 부	담당자	윤용훈	3708-2648

□ 사업개요

○ 목    적 : 철거 예정인 「국립서울과학관」을 대체할 신규과학관을 건립하여 이용객들에게 수준 높은 전시공간 등을 제공

○ 위    치 : 노원구 하계동 산11번지 일대

○ 규    모 : 지하 1층, 지상 3층, 연면적 12,330.81㎡

○ 사업기간 : `11. 7 ~ `15.12

○ 총사업비 :  47,676백만원

○ 공정율('13. 9월 현재) : 미착공(설계내역 보완중)

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
994	4,500 (1,500)	1959	12,858 (3,858)	2,541	-	15,399 (3,858)	-	15,399 (3,858)	-	5,714 (1,714)

※ (    )안은 시비예산임. (사업비 투자비율 : 국비 70%, 시비 30%)

□ 추진실적

○ `10. 3.    : 서울과학관 본관을 문광부 청사로 사용결정 (전시공간 축소)

○ `11. 7. 22 : 서울시․교과부․기재부 협약체결

○ `11.11. 2  : 행정안전부 중앙투자심사 완료(조건부)

○ `12. 10.16 : 시도시공원위원회 심의(조건부)

○ `12. 12.13 : 전시기본설계용역 준공(교과부)

○ `12. 12.22 : 건축설계용역 준공(교과부)

○ `13. 05 ~  : 설계내역 보완 및 건축공사비 증액(54억원) 협의중

□ 향후 추진계획

○ `13.09.     : 설계내역 보완하여 도서인수 (미래창조과학부 ⇒ 서울시)

○ `13.10~12 : 공사발주 및 책임감리자 선정 추진 (공사기간 24개월)

□ 특이사항

○ 설계내역 보완(공사비 증액 54억원)에 따른 예산확보에 대하여 정부(기재부, 미래부)와 협의

64. 서남권 글로벌센터 개보수공사

담당부서	과 장	정창구	3708-2645
건 축 부	담당자	유우린	3708-2647

□ 사업개요

○ 목    적 : 서남권 거주 외국인에 대한 One-Stop 종합서비스 제공 및 한국인과 외국인 간 문화교류, 화합의 장으로 운영

○ 위    치 : 영등포구 대림동 604-3

○ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 934.74㎡

○ 사업기간 : `12. 12 ~ `14. 12.

○ 총사업비 : 약 16억원

○ 공정율('13. 9월 현재 ) : 미착공(2013년 예산 미확보)

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	1,600

□ 추진실적

○ `12.12.06 : 시설기능보강공사시행의뢰(외국인문화담당관→건축부)

○ `12.12.28 : 설계용역 계약

○ `13.01.14 : 센터 운영계획수립 등에 따른 설계중단 요청(주관부서)

○ `13.02.25 : 설계용역 재개요청 및 설치·운영 추진계획 통보(주관부서)

○ `13.04.15 : 서남권글로벌센터 개보수공사 건축심의 의뢰(영등포구)

○ `13.04.30 : 영등포구 건축위원회 심의결과 알림

○ `13.05.29 : 공용건축물 협의(영등포구)

○ `13.06.10 : 설계용역 준공

□ 향후 추진계획

○ `13.11.   : 공사예산 확보

○ `14.01.   : 공사 계약

□ 특이사항

○ 없음

65. 한강교량긴급복구 자재창고 건립공사

담당부서	과 장	김중겸	3708-2650
건 축 부	담당자	정호기	3708-2657

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강교량 긴급복구 자재의 보관과 관련, 자재반출을 용이하게 하고, 자재의 보관상태를 개선하여 품질을 확보코자 함.

○ 위    치 : 강서구 마곡동 67-1(강서도로사업소 내)

○ 규    모 : 지상 1층, 연면적 264.44㎡(가설창고)

○ 사업기간 :  `12. 06.  ~ `13. 03.

○ 총사업비 : 170백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	155	8	-	147	-		147		-	-

□ 추진실적

○ `12.06.26 : 한강교량 긴급복구 자재창고 건립계획 수립(강서도로사업소)

○ `12.06.28 : 시행 의뢰 (강서도로사업소 ⇒ 건축부)

○ `12.08.08 : 기술용역 타당성 심사 결과 알림(기술심사담당관)

○ `12.09.03 : 용역 계약(설계,감리)

○ `12.11.15 : 설계 완료

○ `12.12.13 : 공사 착공

○ `13.03.04 : 공사 준공

○ `13.03.08 : 인수인계 완료

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

66. 장애인 행복서비스센터 건립공사

담당부서	과 장	김중겸	3708-2650
건 축 부	담당자	정재흥	3708-2652

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울지역 장애인 생산품을 전시․판매함으로서 장애인 생산품을 일반 시민에게 홍보하고 인식을 개선하여 생산품 판매를 확대하고, 장애인 직업 상담, 알선 및 직업 체험 등 종합적인 서비스를 제공할 수 있는 공간 제공

○ 위    치 : 강남구 대치동 1024-3번지

○ 규    모 : 지하1층, 지상6층, 연면적 1,669.48㎡

○ 사업기간 : `09.12 ~ `13. 8

○ 총사업비 : 5,077백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
110	1,805	1,805	-	3,162	-	3,162	2,561	601	-	-

□ 추진실적

○ `09.12.11 : 『제2시립 장애인생산품판매시설 건립계획』수립

○ `09.12.28 : 설계용역 계약

○ `11.11.29 : 계용역 준공

○ `11.12.27 : 공사 계약

○ `12.01.26 : 공사 착공

○ `12.12.31 : 지상층 골조공사 완료

○ `13.08.07 : 공사 준공

○ `13.08.26 : 인수인계 완료

□ 향후 추진계획

○ `13.10.   : 개관예정

□ 특이사항

○ 없음

67. 시립노원시각장애인복지관 재건축공사

담당부서	과 장	김중겸	3708-2650
건 축 부	담당자	정재흥	3708-2652

□ 사업개요

○ 목    적 : 기존 장애인복지관 정밀안전진단 결과 “E등급” 위험시설물로 판정된 시립노원복지관 재건축을 통해 이용 장애인들에게 안전성을 확보하고 쾌적한 환경을 제공하기 위함

○ 위    치 : 노원구 상계동 771번지

○ 규    모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 2,752.84㎡

○ 사업기간 : `12. 4 ~ `14. 7

○ 총사업비 : 8,328백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 26%, 현재공정 24%, 계획대비 실공정율 92%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	343	343	5,428	-	-	5,428	548	4,880	-	2,557

□ 추진실적

○ `12.02.12 : 시립노원시각장애인복지관 재건축 계획 수립(장애인복지과-3261호)

○ `12.05.11 : 설계공모 공고

○ `12.07.17 : 설계용역 계약

○ `12.11.07 : 설계용역 준공

○ `13.01.02 : 공사 및 감리용역 착수

○ `13.05.20 : 지하층 터파기 완료

○ `13.08.31 : 지하층 콘트리트 타설 완료

□ 향후 추진계획

○ `13.11.   : 지상층 골조공사 완료

○ `14.07.   : 내외부 마감공사 완료 및 공사준공(예정)

□ 특이사항

○ 없음

68. 구로구 다기능 복합 인생이모작 지원센터 건립공사

담당부서	과 장	김중겸	3708-2650
건 축 부	담당자	이형재	3708-2651

□ 사업개요

○ 목    적 : 신노년층을 위한 교육기능 및 일자리, 사회공헌 등 적극적, 생산적 여가활동을 동일공간에서 제공하는 센터 건립

○ 위    치 : 구로구 오류동 156-194외 2

○ 규    모 : 지하 1층/지상 4층, 연면적 5,000㎡

○ 사업기간 :`13. 09 ~ `16. 6

○ 총사업비 : 14,109백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 설계 발주 준비중

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	800	-	800	-	-	800	-

□ 추진실적

○ `13.07.12 : 시의회 공유재산관리계획 변경계획(안) 통과(건립규모 축소)

○ `13.09.04 : 구로구 어르신 복합 인생이모작 지원센터 건립공사 의뢰

(어르신복지과 → 건축부)

○ ‘13.09.10 : 기술용역타당성 심사 및 용역발주심의 요청

□ 향후 추진계획

○ `13. 09.      :  설계용역공모 공고

○ `13. 10～11 :  설계공모 시행

○ `13. 12      :  설계공모 심사 및 설계용역 계약

□ 특이사항

○ 없음

69. 도심권 인생이모작 지원센터 설치공사

담당부서	과 장	김중겸	3708-2650
건 축 부	담당자	권기용	3708-2654

□ 사업개요

○ 목    적 : 신노년층 급증 및 종묘․탑골공원 일대를 무료한 어르신들에 대한 건강한 문화공간 조성을 위하여 도심권 인생 이모작 지원센터를 설치

○ 위    치 : 종로구 돈의동 68(동의빌딩), 96(초동교회 별관)

○ 규    모 : 동의빌딩(지하1층/지상8층)중 5개층 1,047㎡ 리모델링

초동교회(지하1층/지상3층) 총면적 267㎡ 리모델링

○ 사업기간 : `13. 8 ~ `14. 4

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 공정율('13. 9월 현재) : 설계 발주 준비 중

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	1,000	0	-	1,000	0	1,000	946	0

□ 추진실적

○ `13.07.31 : 도심권 인생이모작 지원센터 설치(복지건강실장방침)

○ `13.08.06 : 공사 의뢰(어르신복지과 → 건축부)

○ `13.08.26 : 기술용역타당성 심사

○ `13.09.06 : 설계용역 공고

□ 향후 추진계획

○ `13.10.   : 구조안전진단 용역 완료

○ `13.11.   : 설계용역 완료

○ `14.01.   : 공사 착공

○ `14.04.   : 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

70. 서울풍물시장 가설건축물 축조공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	김광열	3708-2658

□ 사업개요

○ 목    적 : 풍물시장 상인들을 위한 공간제공으로 지역문화 안정화와 활성화 및 임대절감 등에 기여하고자 함

○ 위    치 : 동대문구 신설동 114-29외 3필지

○ 규    모 : 지하0층/지상2층, 연면적 : 252㎡

○ 사업기간 : `12. 03 ~ `13. 03

○ 총사업비 : 439백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	439	-	-	439	-	439	411	28	-	-

□ 추진실적

○ `12.02.29 : 서울풍물시장 가설건축물 축조의뢰(도로행정과)

○ `12.05.17 : 설계용역 발주

○ `12.08.04 : 설계용역 완료

○ `12.09.20 : 공사 착공

○ `13.03.20 : 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

71. 서울영어마을(풍납,수유캠프) 기능보강공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	김정수	3708-2635

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울영어마을의 노후시설 및 이용불편 시설에 대한 기능보강 ·보수공사를 시행하여 이용학생들에게 쾌적하고 안전한 교육환경 제공

○ 위    치 : 송파구 풍납동 281-1, 강북구 수유동 522

○ 규    모

[풍납캠프] : 송파구 풍납동 281-1

- 건물규모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 13,260㎡

- 공사내용 : 지붕기와 교체 및 옥상방수, 체험실 보수공사(9실), 강당 및

식당 정비, 방범용 CCTV 설치 등

[수유캠프] : 강북구 수유동 522

- 건물규모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 12,431㎡

- 공사내용 : 계단창호 설치, 옥상조경부분 방수, 캐노피 설치, 건물벽면 보수

○ 사업기간 : `12. 06 ~ `13. 04

○ 총사업비 : 691백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	691	-	-	557	-	557	548	9	-	-

□ 추진실적

○ `12.06.01 : 시설기능 보강공사 시행 의뢰(평생교육과)

○ `12.07.19 : 설계 및 감리용역 계약

○ `12.09.21 : 설계용역 완료

○ `12.12.17 : 공사 착공

○ `13.04.15 : 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

72. 강북시립미술관 건립공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	박근우	3708-2656

□ 사업개요

○ 목    적 : 문화시설이 취약하고 낙후된 서울동북지역에 시립미술관 본관의 부족한 전시공간과 수장고 시설의 확충 및 창의문화도시 균형발전 도모

○ 위    치 : 노원구 중계동 508(등나무공원 내)

○ 규    모 : 지하3층, 지상3층, 연면적 17,113㎡

○ 사업기간 : `09. 01 ~ `13. 07

○ 총사업비 : 43,844백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
14,276	17,366	16,175	12,202	1,191	-	13,393	12,818	575	-	-

□ 추진실적

○ '08.09.08 : 건립계획 방침(시장방침 제483호)

○ '09.08.14 : 설계용역 착수

○ '10.11.11 : 공사발주

○ '10.11.15 : 설계용역 준공

○ '11.02.18 : 공사 착공

○ '11.04.15 : 지장수목 이식 및 지장물 철거ㆍ이설 완료

○ '13.05.10 : 내부 마무리 공사, 외부조경 및 보도블럭포장 공사

○ '13.05.31 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

○ '13. 09. 24 : 개관식

□ 특이사항

○ 없음

73. 서울시민 가족자연체험시설 조성공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	김정수	3708-2635

□ 사업개요

○ 목    적 : 강원도 지역 폐교를 활용한 서울시민 가족자연체험시설 조성공사를 추진하여 도농협력 및 서울시민 복지를 위한 환경을 제공

○ 위    치 : 강원도 횡성군 강림면 월현리 1316-1

○ 규    모 : 월현분교(부지 : 7,500㎡, 건물 : 730㎡)

- 공사내용 : 야영텐트 데크(20개동), 화장실보수, 취사장 증축

○ 사업기간 : `12. 11 ~ `13. 07

○ 총사업비 : 203백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	-	-	-	203	199	4	-	-

□ 추진실적

○ `13.04.24 : 서울시민 가족자연체험시설 조성공사 발주 의뢰(학교지원과)

○ `13.04.16 : 서울시민 가족자연체험시설 조성공사 발주

○ `13.05.16 : 공사 착공

○ `13.07.14 : 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

74. 서울시립영보자애원 시설보수공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	전혜령	3708-2658

□ 사업개요

○ 목    적 : 노숙인 복지시설의 안정성 확보와 시설생활인들의 삶의 질 제고 및 편익 증진

○ 위    치 : 경기 용인시 처인구 이동면 묵리 464외 8필지

○ 규    모 : 대지 29,584㎡, 건물 14,404㎡ 중 생활관 5,176㎡

○ 사업기간 : `13. 06 ~ `14. 01

○ 총사업비 : 1,900백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 21%, 현재공정 21%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	1,209	-	-	1,209	115	1,094	-	-

□ 추진실적

○ `13.04.18 : 서울시립영보자애원 보수공사계획수립(여성가족정책담당관)

○ `13.07.04 : 서울시립영보자애원 보수공사 계약

○ `13.07.08 : 공사 착공

○ `13.07.31 : 철거공사 완료

○ `13.08.31 : 엘리베이터 피트 터파기 및 내부 조적작업 진행중

□ 향후 추진계획

○ `13.12.    : 공사 완료(예정)

□ 특이사항

○ 없음

75. 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사

담당부서	과 장	박하규	3708-2655
건 축 부	담당자	김정수	3708-2635

□ 사업개요

○ 목    적 : 구조·기능·안전 등 종합적으로 검토하여 기존의 주민편익 시설 공간을 증축 및 리모델링하여 지역주민에게 복지향상과 공공복리 증진에 기여

○ 위    치 : 양천구 목동 900번지 일대(양천자원회수시설 부지내)

○ 건축규모 : 지하3층, 지상3층, 연면적 5,668㎡

➀ 기존건물 증축 및 대수선 부분 : 지상2층～지상3층 1,763㎡

➁ 주차장 상부 다목적체육관 550㎡(± 5%범위 이내) 증축

➂ 리모델링 : 지하3층～지상1층 3,355㎡

○ 사업기간 : `13. 01 ~ `15. 12

○ 총사업비 : 10,058백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 설계용역 발주 준비중

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	-	-	-	415	-	415	-	4,815

□ 추진실적

○ `13.01.18 : 양천주민편익시설 증축사업 건립 의뢰(자원순환과)

○ `13.02.28 : 기술용역타당성 심사 및 용역발주전 심의(기술심사담당관)

○ `13.04.18 : 공공건축물 발주제도 개선에 따른 용역추진변경(가격입찰→설계공모)

○ `13.07.12 : 건축정책 자문회의(건축기획과)

○ `13.09.03 : 설계공모 시행 및 공고

□ 향후 추진계획

○ `13. 11. : 설계공모작품 심사 및 설계용역 착수

○ `14. 05. : 설계용역 준공

○ `14. 07. : 공사 착공

○ `15. 12. : 공사 준공(예정)

□ 특이사항

○ 없음

76. 동대문디자인플라자&파크 건립

담당부서	과 장	신추교	3708-2655
건 축 부	담당자	안 근	3708-2423

□ 사업개요

○ 목    적 : 역사와 첨단․녹지 등이 어우러진 역사문화공원 조성 및 신성장 동력 산업인 디자인산업을 선도할 디자인플라자를 건립하여 서울의 랜드마크로서 세계적인 관광 명소화 및 지역경제 활성화 도모

○ 위    치 : 중구 을지로7가 2-1일대

○ 건축규모 : 지하3층, 지상4층, 연면적 85,320㎡

- 주요시설 : 아트홀, 디자인뮤지엄, 비즈센터, 지하연결광장

○ 사업기간 : `06. 09 ~ `13. 11

○ 총사업비 : 422,562백만원

○ 누계 공정율(9월현재) : 계획공정 98%, 현재공정 98%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
280,564	94,490	81,694	69,798	12,489	-	82,287	20,176	62,111	-

□ 추진실적

○ 디자인플라자 : 98.1%

- 건설(간축, 토목, 조경, 설비) 및 전기․통신공사

○ 지하연결광장(내부마감) :100%

○ 가로환경정비 : 100%

○ 인테리어 추가공사 등 : 30%

- 인테리어 개요 : 1,417㎡(종합안내소, VIP실, 전시휴게라운지 등)

□ 향후 추진계획

○ `13. 09 ~ 11 : 인테리어 및 주방시설 확충공사 등

○ `13. 11. : 공사 완료

○ `14. 03. : 개관 예정

□ 특이사항

○ 없음

77. 탄천물재생센터 고도처리 설치사업

담당부서	과 장	권오식	3708-8601
설 비 부	담당자	추한영	3708-8610

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 물재생센터의 방류수 수질을 개선하여 하천의 수질환경 개선

○ 위    치 : 강남구 일원동 580번지 일대(탄천물재생센터 내)

○ 규    모 : 고도처리 90만톤/일, 3차처리시설 신설 90만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2013. 5

○ 총사업비 : 93,377백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 100%(공사준공)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
76,131	17,247	10,675	-	6,571	6,571	-	5,017	1,554	-	-

□ 추진실적

○ 2012. 5 : 5차공사 착공

○ 2013. 5. 31 : 공사 준공

○ 2013. 8 : 시설물 인수·인계

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

78. 암사대교 및 연결도로 개설 전기공사

담당부서	과 장	권오식	3708-8601
설 비 부	담당자	김은덕	3708-8602

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강동구와 구리시를 직결하는 한강횡단 도로망을 구축하여 천호대교,

올림픽대교, 강변북로 등과 연계하여 동북지역의 교통정체 해소

○ 위    치 : 구리시 아천동(용마터널 종점) ~ 강동구 암사동

○ 규    모 : 폭 4~6차로, 연장 2.74km(교량 1.13km, 연결도로 1.61km)

가로등 604본, 경관조명등 1,650등

○ 사업기간 : 2010.07~2013.11

○ 총사업비 : 6,950백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,019	904	904	2,500	-	2,500	-	281	2,219	-	2,527

□ 추진실적

○ 2010.07 : 전기공사 착공

○ 2012.02 : 전기공사 1차분 준공(990백만원)

○ 2013.02 : 전기공사 2차분 준공(855백만원)

○ 2013.02 : 전기공사 3차분 계약 및 진행 중(1,371백만원)

□ 향후 추진계획

○ 2013.10 : 올림픽대로 구간 가로등 설치

○ 2013.11 : 경관조명 등기구 설치

□ 특이사항

○ 없음

79. 강남순환 8공구 건설 구룡지하차도 전기공사

담당부서	과 장	권오식	3708-8601
설 비 부	담당자	곽용길	3708-8604

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강남지역의 외곽으로 건설되는 도시고속화 도로에 조명등을 설치하는 사업으로 야간 도로 운전자들의 편의제공하기 위함

○ 위    치 : 양재대로 구룡지하차도(능인선원 앞)

○ 규    모 : 수전설비 TR 350kVA×2, 터널등 968등, 가로등 85본 설치 등

○ 사업기간 : 2012.08.02 ~ 2013.12.31

○ 총사업비 : 2,315백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정  60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	78	78	2,237	-	2,237	-	923	1,314	419

□ 추진실적

○ 지하차도 조명등기구 968개 설치

○ 지하차도 U-type 구간 가로등 전선관 배관

○ 지하차도 조명등 케이블 및 트레이 설치

□ 향후 추진계획

○ 전기실 수배전설비 및 지하라디오재방송설비 설치

○ 가로등 설치 공사 및 시선유도등 설치

□ 특이사항

○ 없음

80. 장충체육관 리모델링 기계, 전기, 통신 공사

담당부서	과 장	권오식	3708-8601
설 비 부	담당자	김은덕	3708-8602
		이종근	3708-8603

□ 사업개요

○ 목    적 : 스포츠와 문화가 함께하는 복합문화공간으로 새롭게 조성하여 시민의문화․체육 생활 활성화

○ 위    치 : 서울시 중구 장충동 2가 200-102

○ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 11,660㎡

○ 공사기간 : 2012.07 〜 2013.12

○ 총사업비 : 11,563백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 33%, 현재공정 30%, 계획대비 실공정률 91%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	4,442	600	7,121	3,842	10,963	-	527	10,436	-	-

□ 추진실적

○ 2012. 6     : 공사발주

○ 2012. 7    : 공사 계약 및 착공

○ 2012. 9 〜 : 관급자재 발주

○ 2013. 8 : 기성검사 시행

□ 향후 추진계획

○ 2013. 12   : 공사 준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

81. 난지물재생센터 고도처리시설(분뇨찰취 포함) 사업

담당부서	과 장	이달영	3708-8615
설 비 부	담당자	이호기	3708-8617

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강수질을 개선하고 물순환 기반을 조성하여 사람과 물, 도시가 공생하는 친수도시 구현을 위한 하수 고도처리 및 분뇨처리장 탈취 시설 개선

○ 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 현천동 673-2번지 일원

○ 규    모 : 고도처리시설 86만톤/일, 분뇨 4,500㎘/일

○ 사업기간 : 2009.07.30 ~ 2013.04.30

○ 총사업비 : 56,614백만원(시설비 53,187백만원, 감리비 3,316백만원, 기타 111백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
39,358	9,558	8,058	7,698	1,500	9,198	-	254	-

□ 추진실적

○ 2012.02.22 : 5차공사 계약

○ 2013.02.28 : 종합시운전 완료

○ 2013.04.30 : 공사 준공

○ 2013.06.04 : 시설물 인수인계 완료

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

82. 서남분뇨처리시설 증대 및 현대화사업

담당부서	과 장	이달영	3708-8615
설 비 부	담당자	이호기	3708-8619

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 수질환경을 보전하고 수질오염을 방지하여 지역 주민의 공중보건 향상과 주거환경 개선에 기여하며, 시설현대화 사업으로 물재생시설 상부 부지 공원화로 친환경적인 하수처리시설 건설

○ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(서남불재생센터 내)

○ 규    모 : 분뇨처리시설용량 4,000톤/일, 신설(지하화 및 상부 공원화)

기존시설 2,000톤/일 철거

○ 사업기간 : 2009.06 ~ 2015.02

○ 총사업비 : 73,200백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 12.8%, 현재공정 10.8%, 계획대비 실공정률 85%)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
5,000	3,648		14,686	837	15,523	-	3,383	-	-	22,120

□ 추진실적

○ 2012.07.20 : 실시설계 적격심의

○ 2012.11.15 : 1차공사 계약착공

○ 2013.04.19 : 2차공사 계약착공

□ 향후 추진계획

○ 2014.02 : 3차공사 발주

○ 2014.10 : 구조물 골조공사 완료

○ 2015.02 : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

83. 선사로～고덕구간 도로확장 전기공사

담당부서	과 장	이달영	3708-8615
설비부	담당자	박시현	3708-8618

□ 사업개요

○ 목    적 : 건설중인 암사대교와 연계도로의 기능수행과 강동지역 아파트재건축등 주변개발에 따른 교통량 증가에 대비 지역 교통여건 개선

○ 위    치 : 서울시 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11간

○ 규    모 : 도로확장 (B = 10→25m, 5m, L = 3,720m)

○ 사업기간 : 2009.02.03 ~ 2013.12.31

- 변경사유 : 하남미사지구 지정에 따른 추가 확장(4차선→6차선)

○ 총사업비 : 2,056백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 39.4%, 현재공정 35.7%, 계획대비 실공정률 90.6%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
70	400	329	585	178	763	-	120	643	-	894

□ 추진실적

○ 2011. 2. 20 : 전기공사 1차 준공(70,000천원)

○ 2012. 2. 20 : 전기공사 2차 준공(30,000천원)

○ 2012. 2. 23 : 전기공사 3차 계약(680,000천원)

○ 2012. 6. 26 : 설계변경 시행(706,744천원 증가)

○ 2013. 6. 27 : 전기공사 4차 계약(594,000천원)

○ 2013. 6. 30 : 전기공사 3차 준공(331,892천원)

□ 향후 추진계획

○ 2013. 12  : 4차공사 준공

□ 특이사항

○ 6차로 추가 확장에 따른 토지보상 및 문화재 발굴로 공사 지연

84. 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사

담당부서	과 장	이달영	3708-8615
설 비 부	담당자	김두환	3708-8621

□ 사업개요

○ 목    적 : 동대문구 휘경동과 중랑구 면목동을 연결하는 교량건설 및 도로를 확장, 망우로, 동2로 한천로등의 급격한 교통량 변화에 대처하고 지역발전 및 주민 숙원사업 해결

○ 위    치 : 동대문구 휘경동 ~ 중랑구 면목동 동2로

○ 규    모 : 본교량 B=20m, L=235m, 접속교량 B=15m, L=160m

도로확장 B=20→30m, L=750m

○ 사업기간 : 2010.02.05 ~ 2013.12.31

○ 총사업비 : 1,349백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 21%, 현재공정 17%, 계획대비 실공정률 80%

- 부진사유:선행 공정인 토목공사 지연에 따른 해당 공정 미도래

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2013년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	47	47	200	-	200	-	196	4	-	593

□ 추진실적

○ 2010. 02. 04 : 전기공사 총차, 1차 계약(금501,650천원)

○ 2012. 01. 20 : 전기공사 2차 계약(금30,000천원)

○ 2012. 01. 26 : 전기공사 1차 준공(금26,000천원)

○ 2013. 02. 19 : 전기공사 2차 준공(금30,000천원)

○ 2013. 01. 27 : 전기공사 3차 계약(금127,790천원)

□ 향후 추진계획

○ 2013. 12. 30 : 전기공사 3차 준공

□ 특이사항

○ 접속교량 등 해당 공사구간 민원발생에 따른 주민요구사항 협의 검토 중

85. 송정사근 빗물펌프장 증설 기계▪전기공사

담당부서	과 장	조예환	3708-8625
설 비 부	전기담당	배수웅	3708-8626
설 비 부	기계담당	김경남	3708-8629

□ 사업개요

○ 목    적 : 수방능력을 100mm/hr로 향상시켜 저지대 침수예방 및 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하기 위한 공사임.

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 사근동 198-5

○ 규    모 : - 기계설비 : 배수펌프 308㎥/분×  670kW×2대,

510㎥/분×1,200kW×2대

- 전기설비 : 송정 10,000KVA×2대, 사근 12,500KVA×1대

- 통신설비 : 원격제어설비 1식, 영상감시설비 1식

○ 사업기간 : 2013. 03. ~ 2014.07.(17개월)

○ 총사업비 : 6,806백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획 6%, 현재공정 6%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 -'13. 9월 현재                                  (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	3,677	-	3,677	-	-	3,677	-	3,129

□ 추진실적

○ 2013. 04. : 전기 및 기계공사 발주

○ 2013. 05. : 전기 및 기계공사 계약 및 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10. : 수방기간 종료 후 공사 진행

○ 2014. 07. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

86. 신림2 빗물펌프장 건설 기계▪전기공사

담당부서	과 장	조예환	3708-8625
설 비 부	담당자	김경남	3708-8629
설 비 부	담당자	이동기	3708-8630

□ 사업개요

○ 목    적 : 수방능력을 100mm/hr로 향상시켜 저지대 침수예방 및 시민의 소중한 생명 과 재산을 보호하기 위한 공사임.

○ 위    치 : 서울시 관악구 신사동 496번지

○ 규    모 : - 기계설비 : 배수펌프 184㎥/분×310kW×4대,                                                          65㎥/분×130kW×1대

- 전기설비 : 변압기 2,500kVA×2대, 150kVA×1대

- 통신설비 : 원격제어설비 1식, 영상감시설비 1식

○ 사업기간 : 2013. 03. ~ 2014.06.(16개월)

○ 총사업비 : 3,570백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황                                                (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	700	-	700	-	-	700	-	2,870

□ 추진실적

○ 2013. 04. : 전기 및 기계공사 발주

○ 2013. 05. : 전기 및 기계공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 11. : 수방기간 종료 후 공사 진행

○ 2014. 06. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

87. 서울영어마을(수유,풍납) 기능보강 통신공사

담당부서	팀 장	조예환	3708-8625
설 비 부	담당자	이동기	3708-8630

□ 사업개요

○ 목   적 : 서울영어마을의 노후시설 및 이용불편 시설에 대한 기능보강 공사를    행하여 이용학생들에게 쾌적하고 안전한 교육환경을 제공하고자 함.

○ 위    치 : 서울시 강북구 수유동 522 외 1개소

○ 규    모 : 영상감시장비 1식 보강

○ 사업기간 : 2012. 07.  ∼ 2013. 03. 20

○ 총사업비 : 70백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황                                     (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	70	-	-	70	70	-	67	3	-	-

□ 추진실적

○ 2012. 11. 10 : 통신공사 발주

○ 2012. 12. 17 : 통신공사 착공 및 계약

○ 2013. 03. 21 : 통신공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

88. 도림교 확장 전기공사

담당부서	팀 장	조예환	3708-8625
설 비 부	담당자	이동기	3708-8630

□ 사업개요

○ 목    적 : 신도림 역세권 개발에 따른 교통개선대책의 일환으로 도림교를 확장하여 경인로 교통정체를 완화하고자 함.

○ 위    치 : 구로구 신도림동 330-7 (도림교)

○ 규    모 : 가로등 7등, 공원등 1등

○ 사업기간 : 2012. 06 .08 ∼ 2013. 09. 10

○ 총사업비 : 33백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획 95%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정률 95%

□ 예산투자 현황                               (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	33		-	33	33	-	-	33	-	-

□ 추진실적

○ 2012. 10. 10 : 전기공사 발주

○ 2012. 11. 21 : 전기공사 계약 및 착공

□ 향후 추진계획

○ 선행공정인 토목공사가 2013. 11. 30.으로 공기 연장됨에 따라 순연.

□ 특이사항

○ 없음.

89. 서울글로벌센터 건립 전기, 통신공사

담당부서	과 장	김창균	3708-8635
설 비 부	담당자	최주용	3708-8636

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울글로벌센터(프레스센터 3층) 기능을 확대 이전하고, 문화교류 및 외국인 편의시설 등이 집약된 글로벌도시 상징 인프라 시설로 조성하여 활용하기 위함

○ 위    치 : 종로구 서린동 64-1등 11필지

○ 규    모 : 지상15층, 지하4층(연면적 11,751㎡)

○ 공사기간 : 2010. 8. 23 ～ 2013. 1. 24

○ 총공사비 : 5,194백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 100%

□ 예산투자 현황                                                          (단위 :백만원)

기투자	2011		2012							2013년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
300	742	0	4,584	742	5,326	-	5,194	132	-	-

※ 불용액(132백만원) : 낙찰차액 및 설계변경

□ 추진실적

○ 2009. 12.  : 실시설계 용역 완료

○ 2010. 08.  : 전기 및 정보통신공사 (1차) 계약 및 착공

○ 2012. 02.  : 전기 및 정보통신공사 (1차) 준공

○ 2012. 02.  : 전기 및 정보통신공사 (2차) 계약 및 착공

○ 2013. 01.  : 전기 및 정보통신공사 (2차) 준공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 1. 24.  : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

90. 도봉산역 복합환승센터 건립 전기, 통신공사

담당부서	과 장	김창균	3708-8635
설 비 부	담당자	김재웅	3708-8640

□ 사업개요

○ 목    적 : 기존 도봉산역 환승주차장을 보다 강화된 환승시설과 만남의 장소를 갖춘 복합 환승센터로 확충하고자 함.

○ 위    치 : 도봉구 도봉동 288-19

○ 규    모 : 지상4층, 지하2층(연면적 15,730㎡)

○ 공사기간 : 2010. 7 ～ 2013. 04

○ 총공사비 : 4,430백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
590	4,376	3,983	500	2,350	2,850	-	2,488	362	-	-

□ 추진실적

○ 2010. 07.   : 전기 및 통신공사 착공

○ 2012. 01.   : 전기 및 통신공사(각 1차분) 준공

○ 2013. 04.   : 전기 및 통신공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 해당사항 없음

□ 특이사항

○ 없음

91. 강북시립미술관건립 전기, 정보통신공사

담당부서	과 장	김창균	3708-8635
설 비 부	담당자	이용수	3708-8638

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울시립미술관 본관의 부족한 전시공간과 수장고 시설의 확충 및 상대적으로 문화시설이 취약하고 낙후된 서울 동북부지역에 시립미술관 강북분관을 건립하여 창의 문화도시 균형발전 도모.

○ 위    치 : 노원구 중계동 508번지(등나무 근린공원)

○ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 13,630㎡

○ 공사기간 : 2010. 12. ∼ 2013. 05.

○ 총공사비 : 8,233백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
345	3,753	3,753	3,546	589	4,135	0	4,132	3	0	0

□ 추진실적

○ 2009. 08.  : 설계용역 착수

○ 2010. 07.  : 설계용역기간 연장

○ 2010. 11.  : 설계용역 완료

○ 2010. 12.  : 전기․정보통신공사 착공

○ 2013.05.31: 전기․정보통신공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 09. : 시설물 인계

□ 특이사항

○ 없음

92. 방화대교 남단 접속도로 전기공사

담당부서	과 장	김창균	3708-8635
설 비 부	담당자	김재웅	3708-8640

□ 사업개요

○ 목    적 : 올림픽대로와 방화동을 연결하는 도로를 건설하여 강서지역의 교통소통 증진과 도시의 균형적 발전 도모를 위한 공사임.

○ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로간

○ 규    모 : B=6.65～19.3m, L=3021m(터널등기구 1101등, 가로등 95본)

○ 공사기간 : 2007. 12 ～ 2014. 06

○ 총공사비 : 2,921백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 89%, 현재공정 89%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
384	-	-	2,536	0	2,536	-	663	1,873	200	-

□ 추진실적

○ 2007. 12.   : 전기공사 착공

○ 2012. 02.   : 전기공사(3차분) 준공

○ 2013. 02.   : 전기공사(4차분) 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 12.   : 임시개통(예정)

○ 2014. 06.   : 공사 준공

□ 특이사항

○ ‘13.7.30일 발생한 안전사고로 선행공종인 건설공사 중지중

93. 헌릉로 연결도로 전기공사

담당부서	과 장	이흥복	3708-8635
설 비 부	담당자	김홍석	3708-8646

□ 사업개요

○  목    적 : 강남순환도시고속도로 건설시 양재대로 가로체계에 미칠 교통영향을  최소화하고 교통혼잡이 심화되고 있는 양재 I C 및 염곡교차로에 집중된 교통량 분산으로 교통환경 개선

○ 위    치 : 서초구 원지동 화물터미널 ～ 염곡동 헌릉로

○ 규    모 : 연장 1.69 km(5～12차로), 특고압수전설비 1개소, 저압수전설비 2개소, 가로등 225본, 터널등 1,650등

○ 사업기간 : 2011. 08. 05. ～ 2013. 06. 30.

○ 총사업비 : 4,373백만원(도급 2,162백만원, 관급 2,211백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 100 %, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,522	404	2,675	714	3,389	-	3,275	114	-	-

□ 추진실적

○ 2011.08.         : 전기공사 계약 및 착공

○ 2011.11.～ 12. : 추모공원 진입도로 연결지점 가로등 및 신호등 설치

○ 2012.11.        : 전기 1차공사 준공

○ 2013.06. 30.   : 전기 2차 및 총차 준공

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

94. 장애인행복서비스센터 건립 전기,통신공사

담당부서	과 장	이흥복	3708-8635
설 비 부	담당자	유영선	3708-8650

□ 사업개요

○ 목    적 : 장애인 생산품 전문 전시․판매 및 장애인 취업 지원등 종합적 업무처리  센터를 건립하여 장애인이 자립할 수 있는 생활기반 조성

○ 위    치 : 강남구 대치동 1024-3번지

○ 규    모 : 지하1층 지상6층, 연면적 1,669.48㎡

○ 사업기간 : 2012. 03. 16. ～ 2013. 08. 09.

○ 총사업비 : 837백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	837	151	-	686		-	557	129	-	-

□ 추진실적

○ 2009.12.  : 건립계획 방침(행정1부시장 방침 제621호)

○ 2011.11. : 실시설계 용역 준공

○ 2012.03. : 공사 착공

○ 2012.08. : 공사 기간 연장(당초’13.04.30 → 변경’13.08.14)

○ 2012.11. : 민원사항 반영 재설계 용역 준공

○ 2013.07. : 주요자재 공사(수변전설비, 전등․전열설비 )

○ 2013.08. : 시운전 및 공사 준공

○ 2013.08. : 시설물 인계인수

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 특이사항

○ 없음

95. 서부트럭터미널 앞 지하차도 전기공사

담당부서	팀 장	이흥복	3708-8635
설 비 부	담당자	김홍석	3708-8646

□ 사업개요

○ 목    적 : 남부순환도로상의 서부트럭터미널 앞 교차로의 교통 정체해소 및 향후

지역개발에 따른 통행차량의 증가에 대비하기 위함

○ 위    치 : 양천구 신정3동 남부순환도로상 서부트럭터미널 앞 교차로

○ 규    모 : 본선 L=1.2km, 지하차도(박스구간) 740m

특고압수전 1개소, 가로등 100본, 터널등 1,088등

○ 공사기간 : 2010. 12. 15. ∼ 2013. 10. 15.

○ 총사업비 : 4,063백만원 (도급비 2,820백만원, 관급비 1,243백만원)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 77 %, 현재공정 77%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                               (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	3,033	1,228	-	1,805	1,805	-	498	1,307	-	-

□ 추진실적

○ 2010. 12. : 전기공사 계약 및 착공

○ 2012. 09. : 오류방향 터널조명등기구, CCTV, 라디오재방송 설비 설치

○ 2012. 11. : 오류방향 개통

○ 2013. 09. : 신월방향 터널조명등기구, CCTV, 라디오재방송 설비 설치

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10. : 공사기간 연기 예정(당초 10.15. → 변경 12.15.)

- 지하차도 연장공사 타당성 조사용역 시행에 따른 공사중단(2개월)으로 연기 불가피

○ 2013. 11. : 상부도로 가로등 설비 설치

○ 2013. 12. : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

96. 중동빗물펌프장 외 2개소 기계, 전기 공사

담당부서	팀 장	이흥복	3708-8645)
설 비 부	담당자	김원태	3708-8648
		조기성	3708-8651

□ 사업개요

○ 목    적 : 수방능력을 향상시켜 저지대 침수예방과 시민의 생명과 재산을 보호하고 집중호우로 인한 만성적 침수를 예방

○ 위    치 : 서울시 마포구 성산동 99-5 외 2개소(합정, 용두3)

○ 규    모 : 배수펌프(260kW 외), 수전설비(1,500kVA 외)

○ 사업기간 : 2013. 05. 01. ～ 2014. 09. 30.

○ 총사업비 : 7,812백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정  2%, 현재공정  2%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			4,304		4,304		336	3,968	3,968	3,508

□ 추진실적

○ 2013. 03.        : 공사발주

○ 2013. 04.        : 공사계약 및 착공

○ 2013. 05.~ 08. : 관급자재 발주 및 계약

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10. : 선행공정(토목공사)에 맞춰 공사진행

○ 2014. 09. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

97. 용두3 및 신이문 빗물펌프장 신,증설공사

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	김 상 용	3708-8763

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 정릉천변에 용두3 빗물펌프장을 신설하고, 기존 신이문 빗물펌프장을 증설 하여 수방능력을 100mm/hr 강우강도로 증대하고 집중호우시 발생할 수 있는 저지대의 침수피해 예방.

○ 위    치 : □ 용두 3 : 동대문구 제기동 1158-75

□ 신이문 : 동대문구 이문동 58-3

○ 규    모 : □ 용두 3 : 펌프장신설 토출용량 Q=240㎥/분

□ 신이문 : 펌프장증설 토출용량 Q=350㎥/분

○ 사업기간 : 2013. 1. ∼ 2014. 7.

○ 총사업비 : 10,321백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 20%, 현재공정 5%, 계획대비 실공정율 25 %

- 부진사유 : 펌프장 유입관로가 역구배로 자연유하 불가하여 재설계(2~3개월 소요)시행중(하천관리과)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-			2,600	664	3,264	-	499	2,765	-	2,713

□ 추진실적

○ 2013. 01 : 공사착공

○ 2013. 04 : 가설건축물축조 허가(동대문구청)

○ 2013. 06 : 유입관로 자연유하 불가에 따른 보완설계 실시

○ 2013. 08 : 유입관로 규격변경 등 대안검토 (하천관리과)

□ 향후 추진계획

○ 2013. 09 : 보완설계 완료 후 공사착공

○ 2014. 10 : 신이문 공사착공

○ 2014. 07 : 시운전 후 준공

□ 특이사항

○ 없음

98. 위례신도시 차집관거  증설사업

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	김 상 용	3708-8763

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 위례지구 신도시 건설에 따른 발생하수량 증가로 탄천 차집관로를 추가

증설함으로서 원활한 오수처리능력 증대 및 생활기반시설을 확충

○ 위    치 : 탄천우안(장지천 입구 ∼ 탄천물재생센타)

○ 규    모 : 관거설치 D=  700mm  L=  40m

D=1,000mm  L=  103m

D=1,100mm  L=4,269m

○ 사업기간 : 2013. 10. ∼ 2014. 10

○ 총사업비 : 15,289백만원 (※ 사업비 전액 SH공사 부담)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 공정 0% (발주 준비중)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	838	-	8,035		8,035		35	8,000		6,416

□ 추진실적

○ 2013. 07 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2013. 08 : 계약심사 의뢰

○ 2013. 09 : 기술용역타당성심사 의뢰

○ 2013. 09 : 공사 및 감리발주

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10 : 공사착공

○ 2014. 06 : 관로부설완료

□ 특이사항

○ 없음

99. 탄천물재생센터 복개공원화 4단계

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	임 병 길	3708-8762

□ 사업개요

○ 목     적 : 탄천물재생센터 제2처리장(수처리구조물)을 (33,978㎡) 복개하여 주거

환경개선과 주민친화시설로 전환하고자 함

○ 위    치 : 강남구 일원동 580일원(탄천물재생센터 내)

○ 규    모

- 수처리구조물 상부 복개구조물 설치     A = 33,978㎡

- 복개 상부 공원화 및 주민친화시설 조성 A = 36,920㎡

: 도시텃밭 300 구획(1구획=16.5㎡), 배드민턴장 3면, 풋살구장 1개소 등

- 보도육교(B=4.5m, L=16.0m) 1개소

- 관리동(230.40㎡) 1개소, 화장실(128.75㎡) 1개소

○ 사업기간 : 2013. 10. ~ 2016. 9.

○ 총사업비 : 45,000백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정률 0%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                    (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	3,000			2,980				2,980	-	13,520

□ 추진실적

○  2008. 10 : 탄천복개공원화 4단계 시행 방침 수립

○  2010. 12 ~ 2012. 2 : 탄천복개공원화 기본 및 실시설계

○  2012. 12 : 감리계약

○  2013. 4  : 공사계약

○  2013. 9  : 복개구조물(Pc)공장제작 준비

□ 향후 추진계획

○ '13. 10 : 공사착공

○ '16. 09 : 공사완료

□ 특이사항

○ 없음

100. 송정·사근 빗물펌프장 증설공사

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	임 병 길	3708-8762

□ 사업개요

○ 목    적 : 기상 이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비 수방능력을 향상시켜 저지대

침수예방과 시민의 생명과 재산보호

○ 위    치 : 성동구 송정동81-5(송정빗물펌프장), 성동구 사근동198-1(사근빗물펌프장)

○ 규    모 : 유역면적 : 송정 95.6ha/0.956㎢, 사근 146.1ha/1.461㎢

펌프증설 : 송정(Q=616㎥/min, 2대), 사근(Q=1,020㎥/min, 2대)

토출관로 : 송정 D2,600mm 2열 확장, 사근 D2,800mm 신설

○ 사업기간 : 2012. 12.  ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 19,173백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정38.1%, 현재공정24.0%, 계획대비 실공정률62.8%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                              (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	2,584	644	9,335	1,940	-	11,275	2,244	9,031	0	7,898

□ 추진실적

○ '11. 3.~'12.12 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2012.12.27	: 공사계약 및 착공

○ 2013. 8.27	: 사근빗물펌프장 살곶이길 도로하부 선단조정굴착(TPS)공법 추진완료

○ 2013. 9.10     : 사근빗물펌프장 증설구간 터파기 및 가시설 설치 중

□ 향후 추진계획

○ 2013.11 : 사근빗물펌프장 토출관로(PC박스) 설치완료

송정빗물펌프장 추진기지 설치 등 착수

○ 2014.06 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

101. 신림2 빗물펌프장 설치공사

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	이 정 국	3708-8764

□ 사업개요

○ 목    적 : 기상이변에 따른 집중호우에 대비코져 신림동일대 수방능력을 100mm/hr

강우강도로 향상하여 저지대 침수예방과 재산을 보호하기 위함.

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 496번지 일대

○ 규    모

토목	건축	기계
집수정 구조물 V=5,300㎥ 흡수정 W25.0 * L80.6 * H7.1 토출조 , 유입 방류수문	연면적 : 700㎡철골조2층 - 1층 : 펌프실,전기실 - 2층 : 관리실	총토출량:800 ㎥/min D1200mm×4대, D700mm×1대 크레인 20ton ,제진기 1식

○ 사업기간 : 2013.01.04 ~ 2014.06.27

○ 총사업비 : 13,768백만원

○ 누계 공정율 : 계획공정 35.78%, 현재공정 34.01%, 계획대비 실공정율  95.05%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                          (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
638	2,002	638	4,543	1,364	5,907	-	1,794	4,113	-	7,223

□ 추진실적

○ 2013. 02 ~ 2013. 03 : 지장물 이설 및 각종 인허가

○ 2013. 04    : 교통시설물 이설 승인

○ 2013. 05    : 우회도로 설치

○ 2013. 06 ～ : 1차분 가시설 및 구조물설치공사 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10 : 1차분 구조물 설치완료

○ 2013. 11 : 우회도로 철거 및 포장복구

○ 2013. 11 ~ 2013. 12 : 2차분 가시설(시트파일)설치 및 토공사

○ 2014. 01 ~ 04 : 구조물 공사완료

○ 2014. 06. 27  : 준공예정

□ 특이사항

○ 없음

102. 공릉2 빗물펌프장 신설 및 면목4 배수관로 설치공사

담당부서	과 장	홍 석 환	3708-8761
방재안전시설부	담당자	김 학 지	3708-8765

□ 사업개요

○ 목    적 : 수방시설물 설계빈도를 초과하는 기상이면이 발생하고 있으므로 빗물펌프 등

치수시설물을 수방능력을 30년 빈도로 향상시켜 시민의 재산과 생명을보호하고자 함

○ 위    치 : 노원구 공릉동 406-1번지 및 중랑구 면목4동 727-421번지 일원

○ 규    모

- 공릉2펌프장 신설 : 펌프장 신설 : 520㎥/min (260㎥/min×2대), 건축연면적 337.7㎡

- 면목4배수관로 설치 : 고지배수로 설치 (D600㎜, 44.4m, BOX설치 16.8m)

○ 사업기간 : 2012. 12. ~ 2014. 7.

○ 총사업비 : 14,522백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 5%, 현재공정 5%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,256	563	3,363	693	4,056	-	10	4,046	-	5,368

※ 수방기간 공사중지에 따른 ‘13년 9월부터 본공사 착수

□ 추진실적

○  ‘10. 12 : 2010년 풍수해 대책 종합보고 (시장방침 477호 : 2010. 12. 14)

○  ‘11. 02 : 지역별 방재성능목표 설정․운영 지침(소방방재청 : 2011. 2)

○ ‘12. 12 : 실시설계 완료

○ '03. 01 : 공사착공

○ '13. 08 : 지장물 이설 등 유관기관 협의

□ 향후 추진계획

○ '13. 10. 15 : 공사착공 (현재 펌프장 가동중이므로 수방기간 이후 착수예정)

○ '14. 06. 30 : 공사완료

□ 특이사항

○ 없음

103. 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	류 용 열	3708-8773

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 :  상습침수 지역인 강서․양천 가로공원길 일대의 수해피해 최소화를 위해

빗물저류 배수시설 등 방재시설을 효과적이고 경제적으로 확충

○ 위    치 : 양천구 신월1동 234-11 ~ 양천구 목동빗물펌프장(본선부)

○ 규    모 : 빗물저류배수시설(L=3.6㎞, 내경 7.5m)

유도터널(N=2개소, L=1.97km. 내경 4.0m)

수직구(N=6개소, 유입 3, 기타 3)

빗물펌프장(Q=4,500㎥/min) 등

○ 사업기간 : 2011. 10 ~ 2016. 5.

○ 총사업비 : 138,001(공사비 127,018백만원, 감리비 5,369, 기타 5,617)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 8%, 현재공정 8%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
4,819	3157	-	22,443	3,157	25,600				16,385	21,346

★ 실시설계 진행 및 차수(2차) 발주에 따른 이월

□ 추진실적

○ ‘12. 5.23 : 사업추진계획 방침 수립(시장)

○ ‘12. 7.19 : 시설공사 발주(도시기반시설본부 → 조달청)

○ ‘12. 8.17 : 입찰공고(조달청)

○ ‘13. 1.10 ~ ’13.3.11 : 기본설계 적격심의(서울시 기술심의위원회)

○ ‘13. 3. 15 : 실시설계적격자 선정《현대건설(주)》

○ ‘13. 5. 27 : 우선시공분 계약 및 착공(’13.11.22)

□ 향후 추진계획

○ 2014. 1. : 총괄계약

○ 2016.5.25 : 공사준공

104. 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	조 동 협	3708-8774

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 집중호수시 홍수 부담 경감을 위해 도림천 상류부에 우수 저감시설인 저류조를

설치하여 하류저지대 지역인 서림동 지구의 침수피해 예방

○ 위    치 : 서울대학교 내 ․ 외 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 설치 65,000㎥

○ 사업기간 : 2012. 1. 3 ~ 2014. 6. 30 (변경전 2013. 3.30)

- 사   유 : 도림천 홍수량 증가와 서울대학교의 사업반대로 사업계획 변경

(정문 앞 60,000㎥ → 정문 앞 40,000㎥, 서울대 내 25,000㎥)

○ 총사업비 : 240억원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 사업계획 변경으로 인한 실시설계 진행중으로 공정율 산정 불가

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
2,369	3,000	407	16,663	2,593	19,256		7,370	11,886	-	22,600

□ 추진실적

○ '12. 1 : 공사착공

○ '12. 6 : '12년 수방대책으로 강남순환6-1공구 임시저류조(6.2만㎥ )설치

○ '12.12 : 서울대내 및 정문 앞 공사 착공

○ '13. 5 : '13년 수방대책으로 임시저류조(14.5만㎥)보완공사 완료

- 도림천내 월류턱 설치완료(높이 1.2m, 연장 17m)

- 강남순환 6-1공구 내 차수벽 설치완료(높이 5m, 연장 22m)

- 서울대내 노천강당 유입관로 설치완료(지름 2,000㎜, 연장 216m)

□ 향후 추진계획

○ '13.12 : 서울대 내 저류조 영구시설 설치완료

○ '14. 6 : 서울대 정문 앞 저류조 영구시설 설치완료

105. 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	조 동 협	3708-8774

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 돌발 집중호우로 인한 피해를 사전에 대비하기 위해 염창2, 방화 빗물펌프장의

시설능력을 종합적으로 고려하여 수방능력을 30년 빈도의 강우강도에 대비할 수 있는 시설로 향상시키고자 함.

○ 위    치

○ 규    모

구 분	염창2	방화
규 모	펌프장 증설 330㎥/min×2대 증설 펌프실 증설	펌프장 증설 190㎥/min×2대 증설 펌프실 증설

○ 사업기간 : 2013. 1. 6 ~ 2014. 7. 2

○ 총사업비 : 119억원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정33.6%, 현재공정 33.4%, 계획대비 99.4%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	499	-	2,974	499	3,473		1,100	2,373	-	5,803

□ 추진실적

○ 2011.10 : 2011년 풍수해 대책 종합결과 보고(빗물펌프장 47개소 신․증설)

○ 2012. 9 : 빗물펌프장 신․증설공사 사업의뢰(하천관리과→도기본)

○ 2013. 1 : 공사착공

○ 2013. 2 : 하천점용허가 신청(염창2 펌프장)

○ 2013. 9 : 방화 빗물펌프장 지하층 구조물 공사 완료

□ 향후 추진계획

○ '13.12 : 방화 빗물펌프장 증설공사 완료

○ '14. 6 : 염창2 빗물펌프장 증설공사 완료

106. 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	한 종 수	3708-8772

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 빗물펌프장의 시설능력을 향상시켜 자연재해로부터 시민의 생명과 재산보호

○ 위    치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산2동 99-5 일원

○ 규    모 :

(합정) · 펌프장 증설(218 → 378 ㎥/min), 집수정증설(V=1,410㎥ → 2,438㎥)

(중동) · 펌프장 증설(330 → 540 ㎥/min), 집수정증설(V=1,650㎥ → 3,300㎥)

○ 사업기간 : 2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3

○ 총사업비 : 14,053백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 5.0%, 현재공정 3.2%, 계획대비 실공정율 64%

- 부진사유 : 수목 보상 지연 및 수방기간 공사 중지

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,006	0	4,566	1,006	5,572	-	-	5,572	0	3,300

□ 추진실적

○ 2013.  1.  4 : 공사 착공

○ 2013.  5. 13 : 지장수목 이식

○ 2013.  5. 23 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시(합정펌프장)

○ 2013.  8. 27 : 가시설(Sheet Pile) 착수

□ 향후 추진계획

○ 2014.  4 : 합정펌프장 지장건출물 철거

○ 2014.  4 : 중동펌프장 완료

○ 2014.  5 : 가시설 착수(합정)

○ 2014.  9 : 공사 준공(합정)

□ 특이사항

○ 없음

107. 용허리 빗물저류조 설치공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	류 용 열	3708-8773

□ 사업개요

○ 목    적 : 용허리공원 내부에 빗물저류조를 신설하여 지역 주민의 재산 및 인명 피해

예방에 만전을 기하고자 함.

○ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

○ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥ , L=237.8m(2.0×1.5@1)

○ 사업기간 : 2012. 12. 21 ~ 2013. 12. 20

○ 총사업비 : 9,500백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 83.0%, 현재공정 81.0%, 계획대비 실공정률 97.6%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	2,794	-	6,706	2,794	9,500	-	4,691	4,809	-	-

□ 추진실적

○ ‘12.10.31 : 기본 및 실시설계

○ ‘12.12.18 : 공사발주 및 계약

○ ‘13. 1. 17 : 사업설명회개최(서초구관계자,주민대표)

○ ‘13. 1. 31 : 도로점용허가 및 공사중 교통소통대책 심의

○ ‘13. 2. 28 : 공원내 지장수목 이식 및 체육시설 이설

○ ‘13. 3. 09 : 지장물 확인을 위한 시험굴착(서초대로)

○ ‘13. 9.현재 : 저류조 벽체 2단(2.4m)콘크리트 타설 준비중

□ 향후 추진계획

○ '13. 10. 20 : 저류조 벽체 3단(2.4)콘크리트 타설

○ '13. 10. 30 : 저류조 상부슬래브 시공

○ '13. 11. 30 : 전기,기계,설비,공원복구

○ '13. 12. 30 : 공사준공

□ 특이사항

○ 예상치 못한 지장물 출현으로 인한 유입관로 시점부 지장물 통과방안 검토중(하천관리과)

108. 잠원2 빗물펌프장 신설공사

담당부서	과 장	서 관 석	3708-8771
방재안전시설부	담당자	류 용 열	3708-8773

□ 사업개요

○ 목    적 : 잠원2(신사)펌프장 신설로 한남IC 일대 및 광림교회 주변 상습 침수피해

해결

○ 위    치 : 강남구 압구정동 422번지 신사공원 일원

○ 규    모 : 펌프장(1,400톤/분), 집수조 15,500㎥

○ 사업기간 :  '13. 1. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 30,165백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 36%, 현재공정  2%, 계획대비 실공정율  %

- 부진사유 : 도시계획시설(중복)결정 지연('13. 8. 21)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	2,433	1,890	6,727	1146	7,873	-	475	7,398	3,873	9,500

□ 추진실적

◦ '12. 11       : 계약심의위원회 심의

◦ '13.  1       : 공사착수

◦ '13. 8. 21   : 도시계획시설(중복)결정

◦ '13. 9월 현재 : 수목이식 준비중

□ 향후 추진계획

○ '13. 9.  : 수목이식

○ '13. 12. : 올림픽대로 강관추진

□ 특이사항 : 없음

109. 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

담당부서	과 장	박 희 천	3708-8781
방재안전시설부	담당자	오 수 양	3708-8782

□ 사업개요

○ 목    적 : 물재생센터 방류수 수질을 개선하고, 시설현대화 구조물을 지하화 및 상부 부지를 공원으로 조성하여 친환경·주민 친화적 시설로 전환하는데 그 목적이 있음.

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 송정동 73일대(중랑물재생센터 내)

○ 규    모 : 고도처리시설 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일, 용수공급시설 20만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 2. 13 ~ 2014. 1. 18

○ 총사업비 : 327,220백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 54.2%, 현재공정 55.0%, 계획대비 실공정률 101%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
157,605	36,000	35,936	36,983 (채5,000)	-	36,983 (채5,000)	-	13,316	18,671	-	57,000 (2013년 채무상환 5,000)

★ 집행 저조 사유 : 고도처리 총인사업 잠정중단에 따른 공사비 시설현대화로 사용 방침에 따라 예산투입 지연

□ 추진실적

○  2009.  2. 13 : 공사 착공

○  2011. 12. 31 : 중랑천 용수공급 시설공사 완료

○  2012.  6. 30 : 시설현대화 유량조정조, 기계실 구조물공사 완료

○ 2012. 12. 31 : 고도처리 시설 개량 완료(3,4처리장)

○ 2013.  4.  1 ~ 6. 10 : 중랑천 용수공급시설 종합시운전 완료

○  2013.  5.  3 : 시설현대화 생물여과(L) 질산화/탈질조 구조물공사 완료

□ 향후 추진계획

○ 2013. 01 ~  : 시설현대화 사업 계속

□ 특이사항

○ 년도별 긴축예산 편성으로 시설현대화 사업 공정 지연

○ 사업예산 부족에 따른 공정지연으로 공사기간 연기 예정(약 30개월)

110. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

담당부서	과 장	박 희 천	3708-8781
방재안전시설부	담당자	송 민 영	3708-8783

□ 사업개요

○ 목    적 : 물재생센터 방류수 수질을 개선하고, 시설현대화 구조물을 지하화 및 상부 부지를 공원으로 조성하여 친환경·주민 친화적 시설로 전환하는데 그 목적이 있음.

○ 위    치 : 강서구 방화동 91번지(서남물재생센터 내)

○ 규    모 : 고도처리개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 상부공원 및 홍보관

○ 사업기간 : 2009. 11. 9 ~ 2015. 8. 9

○ 총사업비 : 302,400백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 22.0%, 현재공정 22.0%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
41,467	27,985	15,729	20,864	12,256	33,120	-	6	33,114	-	22,800

★ 집행실적 저조사유 : ‘13년 시비(185억원) 및 국비(90억원) 미배정, 현장 실 집행은 58억원이며 계약상대자 기성 미 청구

□ 추진실적

○  2009. 11.  9 : 공사 착공

○  2012. 12. 30 : 고도처리 개량공사(1, 2처리장) 완료

○  2013. 09. 30 : 제1처리장 1계열 구조물 철거 완료

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10. 30 : 제1처리장 2계열 구조물 철거

○ 2013. 11 ~ 2014. 2 : 가시설(쉬트파일) 공사

○ 2014. 03. : 시설현대화 구조물 공사 착공

□ 특이사항

○ 년도별 긴축예산 편성으로 시설현대화 사업 공정 지연

○ 사업예산 부족에 따른 공정 지연으로 공사기간 연기 예정(약 36개월)

111. 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

담당부서	과 장	박 희 천	3708-8781
방재안전시설부	담당자	송 민 영	3708-8783

□ 사업 개요

○ 목    적 : 물 재이용 활성화 및 한강 수질오염 부하량을 최소화하고자 서남물재생센터

재생수를 마곡지구 화장실 세정수, 조경용수, 도로청소 용수 공급

○ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

○ 규    모 : 재생수공급 20,000㎥/일

○ 사업기간 : 2011. 11 ~ 2014. 10

○ 총사업비 : 18,302백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 56.0%, 현재공정 45.0%, 계획대비 실공정률 80.4%

- 부진사유 : 마곡택지지구 도시계획 변경으로 마곡단지 입주일정 지연 등 사업여건 변화로  마곡지구 내 재생수 공급 일정이 2016.12월로 연기예정으로 기계 및 전기 설비는 노후화를 고려하여 공사 시기 조정(물관리정책관 검토 중)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
401	3,599	3,062	10,500	537	11,037	-	2,128	8,909	-	3,802

★ 집행실적 저조사유 : 마곡지구 도시계획 변경으로 공급시기 미확정에 따라 설비공사 미집행

□ 추진실적

○  2011. 9. 28 : 공사발주

○  2011. 5. 31 : 가시설 및 토공사 완료

○  2013. 9현재 : 구조물 공사 중

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10 : 마곡지구내 재생수 처리시설 구조물공사 완료

□ 특이사항

○ 마곡지구 도시계획 변경 등 마곡도시개발 지연에 따른 마곡지구 재생수 공급시기 연기

검토 중(물관리정책관)

112. 중앙버스전용차로 승강장 녹음수 식재공사

담당부서	과 장	신 용 우	3708-8791
방재안전시설부	담당자	최 형 순	3708-8794

□ 사업개요

○ 목    적 : 중앙버스전용차로에 녹음수 식재로 이용시민에게 그늘 제공 및 가로변 녹지량 확충으로 친환경적 가로경관 향상 도모

○ 위    치 : 강남대로 등 13개노선(승강장 192개소)

○ 규    모 : 녹음수식재 1,100주, 롤잔디포장 3,300㎡

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 2,000백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
870	200	200	211		211		209	2		719

□ 추진실적

○ ’06.10 ~ ’07.12 : 도봉로~미아로 등 8개노선 107주 시범식재(3~8주/개소당)

○ ’06.10.30 ~ 11.8 : 시범식재 여론조사(인터넷 및 현장조사 372명 중 296명 (80%) 찬성)

○ ’08. 6 ~ ’08. 9  : 승강장 시범식재 녹음수 모니터링 추진(상․하반기 2회)

○ ’09.  1 ~ ’09.12 : 공항로 등 4개노선 추진공사에 녹음수 163주 식재(3~6주/개소당)

○ ’10. 1 ~ ’10.10  : 시흥대로외 6개노선 녹음수식재 387주, 롤잔디포장 1,250㎡

○ ’11. 4 ~ ’11. 7 : 도봉미아로외 1개노선 녹음수식재 127주, 롤잔디포장 280㎡

○ ’12. 3 ~ ’12. 7 : 송파대로 녹음수식재 114주, 롤잔디포장 363㎡

○ ’13. 2. 25 : 2013년 공사 착공

○ ’13. 6. 24 : 2013년 공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 2014.   2 : 2014년 공사 착공

○ 2014. 12 : 2014년 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

113. 동대문 성곽공원 조성공사

담당부서	과 장	신 용 우	3708-8791
방재안전시설부	담당자	최 형 순	3708-8794

□ 사업개요

○ 목    적 : 문화유산인 흥인지문과 서울성곽 문화재와 조화되는 공원조성하여 낙산공원

에서 동대문을 잇는 서울성곽 옛 풍광 재현하고 도심 녹지공간 확충 및 보행

환경을 향상시켜 관광자원으로 활용

○ 위    치 : 종로구 종로6가 70번지

○ 규    모 : 건물 철거 3동, 공원조성 2,571㎡

○ 사업기간 : 2011. 12. ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 1,173백만원

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 30%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정률 0%

- 부진사유: 교회이전 지연에 따른 공사 실착공 어려움

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,173	-	-	1,173	1,173	-	0	1,173	-	-

□ 추진실적

○ ’08. 10. 28 : 도시계획시설(공원) 결정 고시(공원 14,742.8㎡)

○ ’10.  5.   4 : 이대 동대문병원부지 공원 준공 및 일부 개장(인접부지)

○ ’11. 12. 16 : 중앙토지수용위원회 재결(수용)

○ ’11. 12. 20 : 공사계약

○ ’12.  2. 24 : 소유권 이전(교회 → 서울시)

○ ’12.  5.  9 : 행정대집행 계고 1차(동대문교회, 유지재단)

○ ’12.  6. 11 : 행정대집행 계고 2차(동대문교회, 유지재단)

○ ’12.  6. 13 : 중앙토지수용위원회 재결처분 취소 행정소송접수(유지재단→서울시)

○ ’12.  7.  9 : 행정대집행 계고 3차(동대문교회, 유지재단)

○ ’12.  7. 20 : 수용재결처분취소 행정소송제기에 따른 변론(서울시→유지재단)

○ ’12.  9. 27 : 동대문교회 이전관련 유사사례 검토회의

○ ’13.  3      : 건물명도 및 부당이득금 반환 소송 추진

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9  : 교회 이전 및 문화재위원 자문(교회터)

○ ’13. 10 : 교회건물(3동) 철거

○ ’13. 12 : 공원조성(2,571㎡)

□ 특이사항

○ 교회이전 지연에 따른 공사 실착공 지연

○ 동대문교회와 유지재단간 보상문제로 현재 소송진행 중(사인간)

○ 수용재결처분취소 행정소송 진행(시 균형발전과)

○ 교회 및 재단을 상대로 건물명도 및 부당이득금 반환 소송 진행중(시 균형발전과)

○ 교회 미이전에 따른 행정대집행 불가(대법원 판례)

114. 한글가온길 조성공사

담당부서	과 장	신 용 우	3708-8791
방재안전시설부	담당자	최 형 순	3708-8794

□ 사업개요

○ 목    적 : 한글마루지 사업의 일환으로 광화문광장, 한글학회, 주시경집터 등 한글자원들과 연계하여 한글을 배우고 역사를 체험할 수 있는 한글로 특화된 중심공간을 조성

○ 위    치 : 경복궁역~구세군회관(새문안로3길, 세종대로23길)

○ 규    모 : 도렴2녹지 정비 2,562㎡, 교통안전지대 정비, 안내판 설치 등

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2013. 10.

○ 총사업비 : 490백만원

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 20%, 현재공정 20%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	490	-	490	-	0	490	-	-

□ 추진실적

○ ’12.  8.     : 한글가온길 조성 기본설계 시행

○ ’13.  6.   3 : 한글가온길 조성 실시설계 및 공사시행계획 방침

○ ’13.  6. 12 : 기술용역타당성 심사

○ ’13.  6. 25 : 한글가온길 조성공사 실시설계용역 시행

○ ’12.  7. 26 : 공사 계약심사

○ ’12.  8. 22 : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9  : 조경 식재 및 시설물 설치

○ ’13. 10 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

115. 세종로 은행나무 이식공사

담당부서	과 장	신 용 우	3708-8791
방재안전시설부	담당자	최 형 순	3708-8794

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 세종대로 은행나무 가로수 생육상태 부진에 따른 전문가 자문회의 및 형성층 활력도 조사결과에 따라 세종로 은행나무 이식공사를 시행하여 수목생육을 향상

○ 위    치 : 세종로 시민열린마당앞 및 세종문화회관앞

○ 규    모 : 수목 이식 및 생육환경개선

○ 사업기간 : 2012. 12. ~ 2013. 4.

○ 총사업비 : 249백만원

○ 누계공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	249	65	-	181	181	-	168	13	-	-

□ 추진실적

○ ’07. 4 ~ ’08. 12 : 세종로 중앙녹지대 은행나무 29주 이식

○ ’09. 5 ~ ’12. 10 : 생육환경개선 유지관리 시행

○ ’12. 9 ~ ’12. 10 : 생육상태 자문회의 및 활력도 조사

○ ’12. 12. 17       : 공사 착공

○ ’12. 12            : 시민열린마당앞 은행나무 2주 생육환경개선 완료

○ ’13.  4. 25       : 공사 준공

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9이후  : 이식수목 유지관리(중부공원녹지사업소)

□ 특이사항

○ 없음

116. 노원시립장애인복지관 주변 환경개선사업

담당부서	과 장	신 용 우	3708-8791
방재안전시설부	담당자	송 석 범	3708-8796

□ 사업개요

○ 목    적 : 노원시립장애인복지관 등을 이용하는 장애인들에게 이동편의를 제공하고

쾌적한 환경조성으로 낙후된 장애인시설의 인식개선으로 장애인의 삶의 질

향상 기여하고자 함.

○ 위    치 : 노원구 상계동 771번지일대(서울시립북부장애인복지관 등 4개 복지관)

○ 규    모 :

- 식재기반조성 528㎡, 휴게쉼터 조성 4개소

- 데크포장 276㎡, 관수설치 5개소

- 수목이식 및 식재, 초화류식재 1식

- 안내판 설치 2개소 등

○ 사업기간 : 2013. 5. ～ 2013. 11. 30

○ 총사업비 : 500백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정  5%, 현재공정   5 %, 계획대비 실공정율   100%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	-	-	500	-	500		19	481	-	-

□ 추진실적

○ 2013. 6. 04 : 노원시립장애인복지관 주변 환경개선 방침수립

○ 2013. 6. 07 : 실시설계용역 시행

○ 2013. 8. 16 : 설계용역 최종보고회 개최

○ 2013. 8. 21 : 실시설계용역 준공

○ 2013. 9. 03 : 공사발주

□ 향후 추진계획

○ 2013.  9. 17 : 공사계약

○ 2013.  9. 26 : 공사착공

○ 2013. 11. 25 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

117. 도시철도 총사업비 관리 업무

담당부서	팀 장	권영찬	772-7021
도시철도설계부	담당자	최경준	772-7131

□ 과업개요

○ 목    적 :  도시철도 건설사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정 · 관리하여 도시철도 사업비 운영의 효율성을 제고

○ 현    황

- 추진절차 : 국고지원사업을 대상으로 국가 부담분을 포함한 도시철도 총사업비의 증가요인 발생으로 인한 조정 필요시 국토해양부(광역철도과)에서 검토하여 기획재정부 승인을 받아 총사업비 조정

- 도시철도 총사업비 현황

· 9호선 2단계 :   4,909억원	· 9호선 3단계 : 12,449억원

□ 추진실적

【 9호선 2단계 】

○ '13. 05. 7    : 9호선 2단계 총사업비 10차 조정 완료(기획재정부)

- 사업기간 연장 : '07~'13년  →  '07~'14년

○ '13. 09 현재  : 9호선 2단계 총사업비 11차 조정 국토교통부 협의중

- 내용 : 토목분야 물가변동 및 전기, 통신, 신호분야 낙찰차액 발생

【 9호선 3단계 】

○ '12. 02. 05  : 9호선 3단계 총사업비 6차 조정 완료(기획재정부)

- 당초 : 11,784억원  →  변경 : 12,449억원

○ '13. 09 현재  : 9호선 3단계 총사업비 7차 조정 국토교통부 협의중

- 내용 : 예비타당성조사 초기투입 차량비 전량 반영 요청 등

□ 향후 추진계획

○ 9호선 2,3단계 총사업비 조정(11차, 7차)을 위해 국토해양부, 기획재정부와 긴밀한 협조를 통해 적정 조정토록 조속추진

□ 특이사항

○ 없음

118. 도시철도 예산 관리 업무

담당부서	팀 장	권영찬	772-7021
도시철도설계부	담당자	진재섭	772-7131

□ 과업개요

○ 목    적 :  도시철도 건설사업비 특별회계 예산의 관리를 일원화하여 사업운영의 효율성을 제고

○ 현    황

- '14년도 도시철도 국비지원 사업비 예산 편성안은 '13.5월 국토교통부에 반영 요청하였으며, '13.9월 현재 기획재정부에서 조정 검토중임

- '14년도 도시철도 시비 예산 편성안은 '13.8월 시 예산부서에 반영 요청

□ 추진실적

【 국 비 】

○ '13. 5. 24  : '14년도 도시철도 국비예산 반영요청 (본부 → 국토부)

- 신청액 : 1,856억원  → 국토부 조정액 : 961억원(52%)

○ '13. 6~9   : 국비예산 확보를 위한 중앙부처 방문협의 및 건의

- 초기투입 차량비 국비 반영요청 등 협의

○ '13. 9 현재 :  기획재정부에서 정부예산편성(안) 보완 중

【 시 비 】

○ '13. 8. 21  : 도시철도 '14년도 예산편성 요구(본부 → 시)

- 신청액 : 3,241억원

□ 향후 추진계획

○ '13.  9	: 예산편성 조정협의(본부 ↔ 시)

○ '13. 11	: 시의회 예산 편성안 제출(시 →시의회)

○ '13. 12     : 예산안 의결 (시의회)

□ 특이사항

○ 세수 부족으로 인한 '14년 사업비 감 조정시 공정 지연 불가피

119. 지하철9호선 3단계 궤도실시설계용역

담당부서	팀 장	김배식	772-7022
도시철도설계부	담당자	박창복	772-7143

□ 사업개요

○ 목    적 :  운행중인 서울지하철 9호선(개화∼신논현)과 공사중인 2단계(신논현~
종합운동장) 구간을 강동구 둔촌동까지 연장하는 건설공사 궤도 실시설계
용역으로 안전하고 쾌적한 지하철 궤도설계

○ 위    치 : 송파구 잠실동 ~ 강동구 둔촌동

○ 규    모 : 본선 9.2km, 분기기 23틀

○ 사업기간 : 2013. 9. ∼2014. 9.

○ 총사업비 : 612백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 용역계약 추진 중

□ 예산투자 현황

○ 궤도 실시설계 용역비 : 612백만원('13년 예산)

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	612	0	612	0	-	612	300	-

□ 추진실적

○ '13. 9.	: 용역계약 및 착수

□ 향후 추진계획

○ '13.10~'14.8 : 용역시행

○ '14. 9.	: 용역준공

□ 특이사항

○ 없음

120. 우이～신설 경전철 민간투자사업 설계업무

담당부서	과 장	이 철	772-7023
도시철도설계부	담당자	이상석	772-7147

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 남부지역의 대중교통 이용편의 제고 및 친환경적인 신교통

시스템 도입

○ 위    치 : 우이동 ~ 수유동 ~ 정릉동 ~ 성신여대입구 ~ 보문역 ~ 신설동

○ 규    모 : 총연장 11.4㎞, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 착공후 60개월

○ 총사업비 : 6,465억원

○ 공정률(설계공정) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황

○ 설계비 12,000백만원중 10,800백만원(90%) 지출

□ 추진실적

○ 2003. 06. 30 : 우이~신설 도시철도 민간 사업제안서 제출

○ 2005. 10. 20 : 도시철도 기본계획 승인

○ 2006. 12. 29 : 우이~신설 민간투자사업 제3자 제안공고

○ 2007. 05. 28 : 우선협상대상자 지정

○ 2009. 09. 03 : 우이~신설 실시계획 승인

○ 2009. 09. 15 : 공사 착공

○ 2011. 06. 01 : 우이~신설 실시계획(변경) 승인

○ 2013. 09현재 : 사업추진중

□ 향후 추진계획

○ 2014. 09 : 공사 준공예정

□ 특이사항

○ 없음

121. 신림선 경전철 민간투자사업 설계업무

담당부서	과 장	이 철	772-7023
도시철도설계부	담당자	김형건	772-7146

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 남부지역의 대중교통 이용편의 제고 및 친환경적인 신교통 시스템 도입

○ 위    치 : 여의도 ～ 대방 ～ 보라매 ～ 신림 ～ 서울대

○ 규    모 : 연장 7.8km, 정거장 10개소(기본계획)

○ 사업기간 : 착공후 60개월

○ 총사업비 : 4,306억원

○ 누계 공정률(9월30일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황

○ 설계비 14,960백만원(조사비 2,075백만원 포함) 중 7,215백만원 지출

□ 추진실적

○ '06.  3.10	: 여의도-신림 경전철 민간투자사업 사업제안서 제출

○ '09.  9.  8	: 민간투자사업 추진에 대한 시의회 동의

○ '09. 11.13	: 제3자 제안공고

○ '10.  3.  3	: 협상대상자 지정

○ '10.  4.	: 민자협상

○ '11.7 ~'12.11	: 실시설계 추진

○ '13.  7.  24	: 서울시 도시철도기본계획 종합발전방안 발표

○ '13.  9월 현재	: 실시설계 중단 (종합발전방안에 따른 재협상 준비)

□ 향후 추진계획

○「서울시 10개년 도시철도기본계획에 대한 종합발전방안 연구용역」(서울연구원 수행)
성과를 반영하여 사업 추진

□ 특이사항

○ 없음

122. 신림선 경전철 민간투자사업

담당부서	과 장	김회중	772-7051
경전철추진반	담당자	이희권	772-7151

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 남부지역 대중교통 이용편의 제고를 위한 친환경적인 신교통

시스템 도입

○ 위    치 : 여의도샛강(9호선)~대방(국철)~보라매(7)~신림(2)~서울대

○ 규    모 : 연장 7.8km, 정거장 10개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2009. 11. ~ 2016. 12.

○ 총사업비 : 7,422백만원(기본계획)

○ 누계 공정률 ('13. 9월 현재) : 협상 진행 중

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
393	40	0	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0	9,600

□ 추진실적

○ ‘06. 3.10 : 사업제안서 제출

※제안자 : 가칭)남서울경전철주식회사(주간사:고려개발)

○ ‘08.11.26 : 서울특별시 10개년 도시철도 기본계획승인

○ ‘09.11.13 : 제3자 제안공고

○ ‘10. 2.11 : 사업제안서 접수(3개 컨소시엄)

○ ‘10. 3. 3 : 우선협상대상자 지정

○ ‘10. 4.29~’11.10.27 : 민자협상

○ ‘11.12. 1 : 주간사(고려개발) 워크아웃 신청

○ ‘12. 3.20 : 대림산업 신규출자 및 주간사 참여 승인

※도시철도 종합발전방안 용역 추진으로 협상 잠정 보류(‘12.1~’13.7)

□ 향후 추진계획

○ 도시철도 기본계획 종합발전방안(‘13.7.24)을 반영하여 민자 재협상 추진

□ 특이사항

○ 없음

123. 동북선 경전철 민간투자사업

담당부서	과 장	최병훈	772-7052
경전철추진반	담당자	성원배	772-7156

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동북부지역 대중교통 이용편의 제고를 위한 친환경적인 신교통

시스템 도입

○ 위    치 : 왕십리(2,5호선,국철)~고려대(6)~미아삼거리(4)~하계(7)~은행사거리

○ 규    모 : 연장 12.3km, 정거장 14개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2010. 5. ~ 2017. 12.

○ 총사업비 : 1,144,657백만원(기본계획)

○ 누계 공정률 ('13. 9월 현재) : 협상 중

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
467	-	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0	50

□ 추진실적

○ ‘07. 3.23 : 사업제안서 제출

※제안자 : 가칭)동북뉴타운신교통주식회사(주간사:경남기업)

○ ‘08.11.26 : 서울특별시 10개년 도시철도 기본계획승인

○ ‘10. 5.20 : 제3자 제안공고

○ ‘10. 9.17 : 사업제안서 접수(3개 컨소시엄)

○ ‘10.10. 7 : 우선협상대상자 지정

○ ‘10.11.29 : 민자협상

※도시철도 종합발전방안 용역 추진으로 협상 잠정 보류(‘12.1~’13.7)

□ 향후 추진계획

○도시철도 기본계획 종합발전방안(‘13.7.24)을 반영하여 민자 협상 추진

□ 특이사항

○ 없음

124. 면목선 경전철 민간투자사업

담당부서	과 장	최병훈	772-7052
경전철추진반	담당자	오석관	772-7157

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 동북부지역 대중교통난 완화 및 도심 접근성 향상

○ 위    치 : 청량리(1) ~ 면목(7) ~ 신내(6,경춘선)

○ 규    모 : 연장 9.1km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2011. ~ 2018.

○ 총사업비 : 8,599억원(기본계획)

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 제3자 제안공고

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
13	102	77	422	0	422	0	-	422	0	345

□ 추진실적

○ ’07.12.21 : 최초 사업제안서 접수(주간사 포스코건설)

○ ’08.11.26 : 서울시 10개년 도시철도기본계획 확정고시(국토부)

○ ’10.07.06 : 제3자 제안공고(안) 검토 완료(PIMAC)

○ ’11.07.08 : 시의회 동의

○ ’11.07.18 : 민간투자사업심의위원회 심의(기재부)

○ ’11.07.28 : 제3자 제안공고

○ ’11.12.15 : 사업제안서 평가

- 공고 기준에 미달되어 협상대상자 미지정

□ 향후 추진계획

○ 도시철도 기본계획 종합발전방안(‘13.7.24)에 따라 사업 절차 이행

□ 특이사항

○ 차량기지 예정부지와 양원보금자리주택지구 중복

- 보금자리주택사업(LH공사)의 “14년 보상착수를 위해 차량기지 제척 윛 및 규모 결정 필요

125. 서부선 경전철 민간투자사업

담당부서	과 장	김회중	772-7051
경전철추진반	담당자	장운선	772-7152

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울 서북부지역 대중교통 취약지구에 대한 교통버스 확대와 서북부와 서남부간 대중교통 네트워크 구축

○ 위    치 : 새절(6)~신촌(2)~광흥창(6)~여의도~노량진(9,국철)~장승배기(7)

○ 규    모 : 연장 12.1km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2013. ~ 2019.

○ 총사업비 : 1,077,421백만원(기본계획)

○ 누계 공정률 ('13. 9월 현재) : 제 3자 제안공고 검토 중

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	8	8	141	-	141	-	8	133	0	0

□ 추진실적

○ ‘08. 8. 1 : 사업제안서 제출

※제안자 : 가칭)서부경전철주식회사(주간사 : 두산건설)

○ ‘08.11.26 : 서울특별시 10개년 도시철도 기본계획 승인고시(국토해양부)

○ ‘09. 8.  4 : 민자사업 적격성조사 검토보고서 접수(공공투자관리센터→시)

○ ‘11. 9.  9 : 제3자 제안공고(안) 검토의견 접수(공공투자관리센터→시)

□ 향후 추진계획

○ 도시철도 기본계획 종합발전방안(‘13.7.24)에 따라 사업 절차 이행

□ 특이사항

○ 없음

126. 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

담당부서	과 장	한동근	772-7031
도시철도공무부	담당자	박용택	772-7161

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 혼잡완화 및 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 송파구 방이동(올림픽공원역)~강동구 둔촌동 산 29번지 일원

○ 규    모 :  총연장 1,470m(정거장1개소 165m, 본선 1,305m)

○ 사업기간 : 2010. 9. ~ 2016. 3.

○ 총사업비 : 138,286백만원

○ 누계 공정률('13. 9월 현재) : 계획공정 29.1%, 현재공정 29.2%, 계획대비 100.3%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
9,844	9,756	9,756	28,118	-	28,118	-	18,627	9,491	-	43,923

□ 추진실적

○ '10.09. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ '11.07. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ '11.09. : 가시설 및 복공작업

○ '11~'12. : 정거장 및 본선 공사

○ '13.09. 현재  : 정거장 굴착공사 및 본선 터널굴착 공사

□ 향후 추진계획

○ '13.12. : 정거장 토공․가시설 및 터널굴착 공사

○ ‘14.01~’15.12 : 정거장 건축, 설비, 부대시설 및 도로복구

○ '16.03. : 공사완료

□ 특이사항

○ 없음

127. 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

담당부서	과 장	김두주	772-7032
도시철도공무부	담당자	윤인식	772-7171

□ 사업개요

○ 목    적 : 보훈병원 및 배후지역의 교통약자를 위한 철도서비스 제공

○ 위    치 : 강동구 둔촌동 산29번지 일원∼보훈병원

○ 규    모 : 지하철 1,728m 개설, 정거장 1개소 설치

○ 사업기간 : 2010. 9. ∼ 2016. 3

○ 총사업비 : 105,994백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 23.5%, 현재공정 25.8%, 계획대비 109%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
8,052	7,308	7,308	21,470	139	21,609	-	11,004	10,605	-	31,169

□ 추진실적

○ '10.09. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ '11.07. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ '11.10. : 가시설 및 복공작업

○ '11~'12. : 정거장 및 본선 공사

○ '13.09. 현재  : 정거장 굴착공사 및 터널 작업구 공사

□ 향후 추진계획

○ '13.12. : 정거장 구조물 및 터널굴착 공사

○ '14.01~'15.12 : 정거장 건축, 설비, 부대시설 및 도로복구

○ '16.03. : 공사완료

□ 특이사항

○ 없음

128. 우이∼신설 경전철 민간투자사업

담당부서	과 장	박동룡	772-7033
도시철도공무부	담당자	안규홍	772-7179

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울의 대표적 대중교통 취약지역에 신교통 수단을 도입하여 서울 동북부 지역 대중교통 체계개선 및 지역 균형발전에 기여

○ 위    치 : 강북구 우이동 ~ 정릉 ~ 성신여대역 ~ 신설동역

○ 규    모 : 연장 11.4㎞, 정거장 13개소(환승 3개소), 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2009.09.15 ~ 2014.09.14

○ 총사업비 : 9,012억원(국비 1,098, 시비 3,156, 민간자본 4,758)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 87.5%, 현재공정 39.9%, 계획대비 46.5%

- 부진사유

․ 공사착공 이후 사업시행자가 중량전철 기준으로 설계된 정거장을 경량전철 시설기준에 의거 재설계함에 따라 설계, 인허가(도시계획, 실시계획승인) 및 보상기간이 추가 소요되었고, 보상완료된 이후 건물주 및 영업장 미이주 등 영업피해 보상요구 민원으로 공사지연

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
145,026	119,956	59,909	72,200	34,200	106,400	-	21,405	84,995	-	61,073

□ 추진실적

○ 2009.02.05 : 도시관리계획 시설결정 및 지형도면 고시

○ 2009.04.09 : 실시협약 체결

○ 2009.09.03 : 실시계획 승인

○ 2009.09.15 : 공사착수

○ 2011.12.29 : 도시관리계획 변경 결정 지형도면고시

○ 2013.06.20 : 분쟁처리에 대한 합의서 체결(서울시, 사업시행자, 출자자)

○ 2013.09.03 : 타인자본(334억원) 투입

□ 향후 추진계획

○ 더 이상 공사지연이 되지 않도록 공정관리 철저 수행

□ 특이사항

○ 사업시행자와 공기연장(26.5개월) 요구 분쟁제기 적극 대응

129. 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

담당부서	과 장	김진팔	772-7041
도시철도토목부	담당자	윤방식	772-7210

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 혼잡완화 및 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 송파구 잠실동(아시아선수촌 아파트)～삼전동 (구)잠실병원 앞

○ 규    모 : 1,290m(본선 1,125m, 정거장 1개소 165m)

○ 사업기간 : 2010. 2. ～ 2016. 2.

○ 계약금액 : 137,677백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 29.2%, 실적 29.6%, 계획대비 97.9 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
27,820	10,390	10,390	22,818			22,818	11,983	10,835		30,000

□ 추진실적

○ ’10.02. : 실시설계적격자 선정 및 공사계약

○ ’10.11. : 교통처리 및 지장물 이설 협의

○ ’10.12. : 실시설계 완료

○ ’11.12. : 본선개착 1, 2구간 복공완료

○ ’13.04. : 본선터널 굴착 시작

○ ’13.09. 현재 : 정거장 및 본선 토공․가시설공 작업 및 본선터널 굴진 중

□ 향후 추진계획

○ ’15.03. : 정거장 출입구 및 환기구 구조물 완료

○ ’15.07. : 시스템 분야(송변전, 전차선, 통신, 신호) 완료

○ ’16.02. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

130. 지하철 9호선 2단계 920공구 건설공사

담당부서	과 장	김진팔	772-7041
도시철도토목부	담당자	김찬오	772-7211

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 혼잡완화 및 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 송파구 석촌동 석촌역 ～ 방이동 올림픽공원 남4문

○ 규    모 : 연장 1,390.5m(본선 1,203m, 정거장 1개소 187.5m)

○ 사업기간 : 2009. 12. ~ 2015. 12.

○ 계약금액 : 153,218백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 30.6%, 실적 31.2%, 계획대비 102.0%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
34,291	15,291	15,291	22,454	0		22,454	11,323	11,131		33,987

□ 추진실적

○ ’09.12. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’10.11. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.12. : 실시설계 완료

○ ’12.05. : 복공완료

○ ’12.08. : 쉴드터널 굴진 시작

○ ’13.09. 현재 : 정거장 토공․가시설 작업 및 본선 쉴드터널 굴진 중

□ 향후 추진계획

○ ’15.03. : 정거장 출입구 및 환기구 구조물 완료

○ ’15.07. : 시스템 분야(송변전, 전차선, 통신, 신호) 완료

○ ’15.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

131. 지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사

담당부서	과 장	김영흠	772-7042
도시철도토목부	담당자	김현근	772-7221

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 강남구 역삼동 차병원사거리 ～ 삼성동 힐스테이트APT

○ 규    모 : 연장 1,770m(본선 1,440m, 정거장 2개소 330m)

○ 사업기간 : 2008. 6. ~ 2014. 12.

○ 계약금액 : 99,630백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 80.9%, 실적 80.0%, 계획대비 98.9 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
70,711	17,496	17,496	21,000	0		21,000	9,666	11,334		7,919

□ 추진실적

○ ’08.05. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’08.12. : 실시설계 완료

○ ’09.04. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.06. : 복공완료

○ ’12.02. : 토공완료(환기구 출입구 제외)

○ ’13.09. 현재 : 출입구, 환기구 등 부대시설 및 정거장 건축, 전기, 설비 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

○ ’13.12. : 정거장 출입구, 환기구 구조물 완료

○ ’14.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

132. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사

담당부서	과 장	김영흠	772-7042
도시철도토목부	담당자	김영호	772-7222

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 강남구 삼성동 힐스테이트APT ～ 삼성동 광동한방병원

○ 규    모 : 연장 1,140m(본선 810m, 정거장 2개소 330m)

○ 사업기간 : 2008. 6. ~ 2014. 12.

○ 계약금액 : 150,554백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 77.8%, 실적 77.1%, 계획대비 99.1 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
100,038	26,357	26,357	39,970	0		39,970	9,951	30,019		12,595

□ 추진실적

○ ’08.05. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’08.12. : 실시설계 완료

○ ’09.03. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.05. : 복공완료

○ ’12.05. : 토공완료(환기구 출입구 제외)

○ ’13.09. 현재 : 출입구, 환기구 등 부대시설 및 정거장 건축, 전기, 설비 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

○ ’13.12. : 정거장 출입구, 환기구 구조물 완료

○ ’14.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

133. 지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사

담당부서	과 장	김성호	772-7043
도시철도토목부	담당자	황왕연	772-7230

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원 ～ 송파구 잠실동 아시아선수촌APT

○ 규    모 : 연장 1,590m(본선 1,425m, 정거장 1개소 165m)

○ 사업기간 : 2008. 6. ~ 2014. 12.

○ 계약금액 : 113,194백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 83.6%, 실적 81.6%, 계획대비 97.6 %

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
74,062	21,436	21,436	31,700	0		31,700	7,560	24,140		7,432

□ 추진실적

○ ’08.05. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’08.12. : 실시설계 완료

○ ’09.04. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.10. : 복공완료

○ ’12.07. : 토공완료(환기구 출입구 제외)

○ ’13.09. 현재 : 출입구, 환기구 등 부대시설 및 정거장 건축, 전기, 설비 공사 추진 중

□ 향후 추진계획

○ ’13.12. : 정거장 출입구, 환기구 구조물 완료

○ ’14.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

134. 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

담당부서	과 장	권일순	772-7044
도시철도토목부	담당자	문병종	772-7236

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 혼잡완화 및 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 송파구 방이동(올림픽공원 남4문)～올림픽공원 한국체대앞

○ 규    모 : 연장 1,742m(본선 1,408m, 정거장 2개소 304m)

○ 사업기간 : 2009. 12. ~ 2015. 12.

○ 계약금액 : 170,748백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 27.1%, 실적 28.8%, 계획대비 106.3%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
33,036	10,136	10,136	25,800	0		25,800	12,699	13,101		40,414

□ 추진실적

○ ’09.12. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’10.07. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.12. : 실시설계 완료

○ ’11.12. : 도로부 복공완료(공원부 ’13.04 완료)

○ ’12.12. : 쉴드터널 굴진 시작

○ ’13.09. 현재 : 정거장 토공․구조물공 작업 및 본선 쉴드터널 굴진 중

□ 향후 추진계획

○ ’15.03. : 정거장 출입구 및 환기구 구조물 완료

○ ’15.07. : 시스템 분야(송변전, 전차선, 통신, 신호) 완료

○ ’15.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

135. 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

담당부서	과 장	박용우	772-7045
도시철도토목부	담당자	김용선	772-7242

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강 이남지역을 동서로 연결하여 지역간 접근성 개선, 대중교통 혼잡완화 및 편의제공, 지역간 균형발전 도모

○ 위    치 : 송파구 삼전동(구 잠실병원) ～ 석촌동(석촌역)

○ 규    모 : 연장 1,560m(본선 1,230m, 정거장 2개소 330m)

○ 사업기간 : 2009. 12. ~ 2015. 12.

○ 계약금액 : 204,114백만원

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 28.5%, 실적 28.2%, 계획대비 98.9%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
41,550	16,750	12,800	28,900	3,950		32,850	3,950	28,900		42,000

□ 추진실적

○ ’09.12. : 실시설계 적격자 선정 및 공사계약

○ ’10.12. : 교통처리 및 지장물 이설협의

○ ’10.12. : 실시설계 완료

○ ’12.07. : 복공완료

○ ’12.12. : 쉴드터널 굴진 시작

○ ’13.09. 현재 : 정거장 토공․구조물공 작업 및 본선 쉴드터널 굴진중

□ 향후 추진계획

○ ’15.03. : 정거장 출입구 및 환기구 구조물 완료

○ ’15.07. : 시스템 분야(송변전, 전차선, 통신, 신호) 완료

○ ’15.12. : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

136. 지하철 9호선 2단계 궤도공사

담당부서	과 장	박용우	772-7045
도시철도토목부	담당자	홍숭희	772-7241

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남 동서를 연결하여 2호선의 극심한 혼잡률 완화 및 도시철도 네트워크 확충으로 교통편익 증대

○ 위    치 : 논현동 (차병원 앞) ~ 삼성동 (COEX) ~ 잠실동 (종합운동장)

○ 규    모 : 궤도부설 4.5km(복선), 분기기 7조 등

○ 사업기간 : 2012.12.18. ~ 2014.03.12.

○ 계약금액 : 10,055백만원(도급공사비 7,755백만원, 관급비 2,300백만원)

○ 공정률('13. 9월 현재) : 계획 75.9%, 실적 87.0%, 계획대비 114.6%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자 (’12년까지)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	이․전용 (예비비)	예산현액	지출액	현잔액	사고이월 예상액
2,800	2,800	2,515	7,255	285		7,540	3,744	3,806	-	-

□ 추진실적

○ ’12.09. : 9호선 2단계 궤도공사 실시설계 완료

○ ’12.12. : 9호선 2단계 궤도공사 계약 및 착공

○ ’13.09. : 궤광조립 및 도상콘크리트타설

※ 단선기준 총 9km 중 7.2km(80%) 도상타설 완료

□ 향후 추진계획

○ ’13.12. : 궤도부설 완료(목표공정 95%)

○ ’14.03. : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

137. 지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	김영신	772-7072
도시철도건축부	담당자	정현배	772-7341
		이병희	772-7340

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남동서간의 중추적 기능을 담당하는 도시철도 네트워크 확충으로 지하철 이용률 제고

○ 위    치 : 강남구 역삼동 차병원사거리 ~ 삼성동 힐스테이트APT

○ 규    모 : 총연장 1.77km, 정거장 2개소(환승역 1개소)

- 926정거장 : 상대식, 지하5층, 연면적 11,569.61㎡

- 927정거장 : 상대식, 지하3층, 연면적 9,197.94㎡

○ 사업기간 : ’08. 06. ~ ’14. 12. (건축공사 착수 : 2012. 11)

○ 총사업비 : 996억원 (건축공사비 : 56억원)

○ 공정율 ('13. 9월 현재)  : 계획 26.65%, 실적 25.18%, 계획대비 94.48%

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도토목부)

□ 추진실적

○ ’07. 12  : 설계 ․ 공사 일괄(턴키) 입찰공고

○ ’08. 12  : 실시설계 완료 및 계약

○ ’11.  6  : 서울디자인위원회 심의

○ ’12. 11  : 927정거장 건축공사 착수

○ ’13.  3  : 926정거장 건축공사 착수

○ ’13.  7  : 미술장식품 일반공모

□ 향후 추진계획

○ ’13. 10  : 미술장식품 선정

○ ’14. 12  : 정거장 건축공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

138. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	박범규	772-7071
도시철도건축부	담당자	안종연	772-7331
		이준석	772-7332

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남동서간의 중추적 기능을 담당하는 도시철도 네트워크 확충으로 지하철 이용률 제고

○ 위    치 : 강남구 삼성동 힐스테이트APT ～ 삼성동 광동한방병원

○ 규    모 : 총연장 1.14km, 정거장 2개소

- 928정거장 : 상대식, 지하2층, 연면적 8,016.19㎡

- 929정거장 : 상대식, 지하2층, 연면적 9,841.18㎡

○ 사업기간 : ’08. 06. ~ ’14. 12. (건축공사 착수 : 2013. 3)

○ 총사업비 : 1,526억원 (건축공사비 : 104억원)

○ 공정율 ('13. 9월 현재)  : 계획 18.96%, 실적 18%, 계획대비 94.94%

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도토목부)

□ 추진실적

○ ’07. 12  : 설계 ․ 공사 일괄(턴키) 입찰공고

○ ’08. 12  : 실시설계 완료 및 계약

○ ’11.  6  : 서울디자인위원회 심의

○ ’13.  3  : 916공구 건축공사 착수

○ ’13.  7  : 미술장식품 일반공모

□ 향후 추진계획

○ ’13. 10  : 미술장식품 선정

○ ’14. 12  : 정거장 건축공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

139. 지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	김창기	772-7073
도시철도건축부	담당자	조중원	772-7350

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남동서간의 중추적 기능을 담당하는 도시철도 네트워크 확충으로 지하철 이용률 제고

○ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원 ～ 송파구 잠실동 아시아선수촌APT

○ 규    모 : 총연장 1.59km, 정거장 1개소(환승역)

- 930정거장 : 상대식, 지하4층, 연면적 13,391.91㎡

○ 사업기간 : ’08. 06. ~ ’14. 12. (건축공사 착수 : 2013. 3)

○ 총사업비 : 1,131억원 (건축공사비 : 59억원)

○ 공정율 ('13. 9월 현재) : 계획 19.7%, 실적 18%, 계획대비 94.4%

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도토목부)

□ 추진실적

○ ’07. 12  : 설계 ․ 공사 일괄(턴키) 입찰공고

○ ’08. 12  : 실시설계 완료 및 계약

○ ’11.  6  : 서울디자인위원회 심의

○ ’13.  3  : 930정거장 건축공사 착수

○ ’13.  7  : 미술장식품 일반공모

□ 향후 추진계획

○ ’13. 10  : 미술장식품 선정

○ ’14. 12  : 정거장 건축공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

140. 우이~신설 경전철 1공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	김창기	772-7073
도시철도건축부	담당자	박병만	772-7349

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전에 기여

○ 위    치 : 강북구 우이동 일대

○ 규    모 : 차량기지 1개소, 정거장 3개소

- 차량기지  : 지하2층 지상 3층, 연면적 8,812㎡

- L01정거장 : 지하1층, 연면적 1,736㎡

- L02정거장 : 지하1층 지상4층, 연면적 2,451㎡

- L03정거장 : 지하1층 지상3층, 연면적 1,653㎡

○ 사업기간 : 2009. 09 ~ 2014. 09

○ 총사업비 : 9,299억원(건축공사비 79억)

○ 누계 공정율  : 현재 토목공사중으로 건축공사 시기 미도래

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도공무부)

□ 추진실적

○ ‘09.  4 : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘09.  9 : 민간투자사업 실시계획승인 및 공사착공

○ ‘10.  3 : 서울시 디자인 심의(노선색 결정)

○ ‘11. 12 : 서울디자인위원회 심의 완료(차량기지)

○ ‘12. 11 : 차량기지 건축허가 완료

○ ‘13.  3 : 정거장 외부돌출물 디자인 심의 완료(서울시민디자인위원회)

○ ‘13.  7 : 기능동 3개소 중 2개소 허가 완료

○ ‘13.  9 : 정거장 내부디자인 계획 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10 : 기능동 1개소(L03 정거장) 건축허가 진행

○ ‘13. 12 : 정거장 내부 디자인 자문 추진(외부전문가)

□ 특이사항

○ 없음

141. 우이~신설 경전철 2공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	김창기	772-7073
도시철도건축부	담당자	공경배	772-7351

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전에 기여

○ 위    치 : 강북구 수유동 ~ 미아동

○ 규    모 : 정거장 4개소

- L04정거장 : 지하1층 지상 4층, 연면적 1,743㎡

- L05정거장 : 지하1층 지상 4층, 연면적 1,956㎡

- L06정거장 : 지하3층, 연면적 2,107㎡

- L07정거장 : 지하3층 지상4층, 연면적 3,031㎡

○ 사업기간 : 2009. 09 ~ 2014. 09

○ 총사업비 : 9,299억원(건축공사비 54억)

○ 누계 공정율  : 현재 토목공사 중으로 건축공사 시기 미도래

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도공무부)

□ 추진실적

○ ‘09.  4 : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘09.  9 : 민간투자사업 실시계획승인 및 공사착공

○ ‘10.  3 : 서울시 디자인 심의(노선색 결정)

○ ‘12. 12 : 정거장(지상 기능동) 서울디자인위원회 심의완료

○ ‘13.  3 : 정거장 외부돌출물 디자인 심의 완료(서울시민디자인위원회)

○ ‘13.  7 : 기능동 3개소 중 2개소 허가 완료

○ ‘13.  9 : 정거장 내부디자인 계획 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10 : 기능동 1개소(L04 정거장) 건축허가 진행

○ ‘13. 12 : 정거장 내부 디자인 자문 추진(외부전문가)

□ 특이사항

○ 없음

142. 우이~신설 경전철 3공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	박범규	772-7071
도시철도건축부	담당자	노장훈	772-7333

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전에 기여

○ 위    치 : 강북구 미아동 ~ 정릉동

○ 규    모 : 정거장 3개소

L08 : 지하4층, 2,654.27㎡

L09 : 지하2층, 1,849.78㎡

L10 : 지하3층, 2,737.84㎡

○ 사업기간 : 2009. 09 ~ 2014. 09

○ 총사업비 : 9,299억원(건축공사비 37억)

○ 누계 공정율 :  현재 토목공사중으로 건축공사 시기 미도래

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도공무부)

□ 추진실적

○ ‘09. 4 : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘09. 9 : 민간투자사업 실시계획승인 및 공사착공

○ ‘10. 3 : 서울시 디자인 심의(노선색 결정)

○ ‘13. 3 : 정거장 외부돌출물 디자인 심의 완료(서울시민디자인위원회)

○ ‘13. 9 : 정거장 내부 디자인 계획중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12 : 정정거장 내부 디자인 자문 추진(외부전문가)

□ 특이사항

○ 없음

143. 우이~신설 경전철 4공구 건설공사(건축분야)

담당부서	과 장	김영신	772-7072
도시철도건축부	담당자	정현배	772-7341
		이병희	772-7340
		박노수	772-7343

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동북부 지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전에 기여

○ 위    치 : 성북구 동선동 ~ 동대문구 신설동

○ 규    모 : 정거장 3개소(환승역)

L11(4호선 환승) : 지하4층, 3,043.78㎡

L12(6호선 환승) : 지하4층, 2,384.21㎡

L13(1호선,2호선 지선 환승) : 지하2층, 2,484.69㎡

○ 사업기간 : 2009. 09 ~ 2014. 09

○ 총사업비 : 9,299억원(건축공사비 37억)

○ 누계 공정율 :  현재 토목공사중으로 건축공사 시기 미도래

□ 예산투자 현황

※ 주관부서에서 통합관리(도시철도공무부)

□ 추진실적

○ ‘09. 4 : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘09. 9 : 민간투자사업 실시계획승인 및 공사착공

○ ‘10. 3 : 서울시 디자인 심의(노선색 결정)

○ ‘13. 3 : 정거장 외부돌출물 디자인 심의 완료(서울시민디자인위원회)

○ ‘13. 9 : 정거장 내부 디자인 계획중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12 : 정거장 내부 디자인 자문 추진(외부전문가)

□ 특이사항

○ 없음

144. 신림선 경전철 민간투자사업 설계업무

담당부서	과 장	김창기	772-7073
공사지원과	담당자	조중원	772-7348

□ 사업개요

○ 목    적

- 서울 남부 교통혼잡지역의 대중교통서비스 개선

- 서울 동․서․남․북측의 연계 교통망 형성 및 지역균형 발전

- 도시철도 2호선(신림~사당구간) 혼잡도 완화

○ 위    치 : 여의도~대방동~보라매~신림동~서울대입구

○ 규    모 : 연장 7.82㎞, 차량기지, 정거장 10개소

○ 사업기간 : ‘09. 11~ ’17.02

○ 총사업비 : 6,104억원(건축 136억원-협상예정가)

○ 누계 공정율  : 계획공정 30%, 현재공정 30%

□ 예산투자 현황

※주관부서에서 통합관리(경전철 추진반)

□ 추진실적

○ '06.  3.10	: 여의도-신림 경전철 민간투자사업 사업제안서 제출

○ '09.  9.  8	: 민간투자사업 추진에 대한 시의회 동의

○ '09. 11.13	: 제3자 제안공고

○ '10.  3.  3	: 협상대상자 지정

○ '10.  4. ～	: 민자협상 중

○ '11.7 ~현재	: 실시설계 추진

□ 향후 추진계획

○ 『서울시 10개년 도시철도 기본계획에 대한 종합발전방안』연구용역 결과              반영하여 추진일정 조정 예정

□ 특이사항

○ 없음

145. 지하철 9호선연장건설(2단계) 송변전공사

담당부서	과 장	김 형 기	772-7061
도시철도설비부	담당자	이 재 영	772-7271

□ 사업개요

○ 목    적 : 지하철 9호선연장건설(2단계) 열차운행 및 5개정거장 전력공급

○ 위    치 : 신논현(925정거장)~잠실운동장(930정거장)

○ 규    모 :

- 수전선로 1.14km : 수전케이블(400㎟) 3,813m, FEP전선관(￠175) 708m

- 연락송배전선로 L=4.5km

- 변전소 1개소(929 신설): 수배전반 23면, DC배전반 15면, ESS 1set, 원방제어 1식

○ 사업기간 : 2013.01.15~2014.09.11

○ 총사업비 : 3,315백만원

○ 누계 공정율 : 계획공정    70%, 현재공정   72%, 계획대비 실공정율  100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	708	2,607	3,315	-	1,453	1,862	-	330

★ 종합시운전 유보금 10% 사고이월 예정

□ 추진실적

○ 2012. 11. 20 : 공사발주(조달계약 의뢰)

○ 2013. 08. 12 : 송변전공사 기성검사(1차1회) 및 기성금 지급(774백만원)

○ 2013. 08. 10 : 연락송배전공사 트라프 포설

○ 2013. 01. 15 : 공사계약 및 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 11. 10 : 변전장비 반입설치

○ 2013. 12. 15 : 케이블포설 및 접속

○ 2013. 12. 20 : 전기사용전검사 및 929변전소 전력수전

○ 2014. 03. 30 : 각 역사전기실 전기공급 및 전차선 가압시험

○ 2014. 04~   : 9호선 2단계 종합시운전

□ 특이사항

○ 없음

146. 지하철9호선 연장건설(2단계) 전차선 공사

담당부서	과 장	김 형 기	772-7061
도시철도설비부	담당자	전 계 목	772-7272

□ 사업개요

○ 목    적 : 한강이남 동서간을 연결하는 도시철도 체계 확충으로 기존 2호선 교통혼잡 완화와 9호선 1단계 구간의 운영 효율을 극대화 하고, 대중교통 이용 편의 증진을 위한 서울지하철9호선 연장건설 2단계 구간에 대한 전차선 공사임.

○ 위    치 : 강남구 논현동 ~ 삼성동 코엑스 ~ 송파구 종합운동장

○ 규    모 : 강체전차선로 9km

○ 사업기간 : 2012. 12. 27 ~ 014. 9. 14

○ 총사업비 : 3,230백만원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 55%, 현재공정 57%, 계획대비 실공정율 104%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-			1,162	1,738	2,899		681	2,218		330

□ 추진실적

○ `12. 2. 15       : 9호선 2단계 시스템분야 실시설계 완료

○ `12. 3월 ~10월  : 총사업비 조정(국토해양부, 기획재정부)

○ `12. 11. 20       : 공사발주(조달청)

○ `12. 12. 27       : 공사계약(`13.1.15 - 공사착공)

○ `13. 1월~ 3월    : 전차선 매입전 설치 검측시행

○ `13. 4월~9월 현재 : 전차선 지지철물 설치 및 Al T-Bar 설치작업중

□ 향후 추진계획

○ `13. 12월  :  전차선로 Al T-Bar 용접, Trolley Wire설치 완료

○ `14.   2월  :  정□부급전선로 포설, 높이 및 편위조정 완료

○ `14. 3월 ~ :  시운전(기술종합, 영업)

□ 특이사항

○ 없음

147. 지하철 9호선 연장건설(2단계) 시스템분야 전면책임감리용역

담당부서	과 장	김 형 기	772-7061
도시철도설비부	담당자	고 명 규	772-7274

□ 사업개요

○ 과업대상 : 9호선2단계 시스템분야(송변전, 전차선, 정보통신, 신호공사) 건설공사

○ 과업위치 : 서울특별시 강남구 논현동 ~ 송파구 종합운동장

○ 과업범위 : 시스템분야 시설공사 책임감리

- 대  상 : 본선 4.5km,  정거장 5개소(926 ~ 930정거장)

① 송변전 : 변전소 1개소, 수전선로 1.14km, 연락배전선로 4.5km

② 전차선 : 강체전차선로(AL T-Bar) 10.145km, 급전케이블 1.233km

③ 정보통신 : 본선 광케이블 7.4km, 통신기계실 6개소, 자동요금징수설비 1식,

열차무선설비 1식, 화상 및 광전송설비 1식

④ 신  호 : 신호기계실 2개소, 본선 신호설비, 종합관제설비 개수

○ 용역기간 : 2012.11.20 ~ 2015.01.08

○ 총용역비 : 1,712백만원

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	300	1,079	1,412	-	766	646	-	330

□ 추진실적

○ 2012.04.26 : 기술용역타당성심사

○ 2012.09.28 : 책임감리용역시행 본부장 방침

○ 2012.11.20 : 책임감리용역 계약 및 착수

○ 2013.03.06 : 상주감리(책임감리원 및 보조감리원 6명) 및 기술지원감리(3명) 배치

□ 향후 추진계획

○ 2014.10월 : 9호선 2단계구간 개통

○ 2015.01월 : 책임감리용역 준공

□ 특이사항

○ 없음

148. 지하철 9호선 915공구 건설공사(전기)

담당부서	과 장	박성우	772-7062
도시철도설비부	담당자	이성택	772-7280

□ 사업개요

○ 목    적 : 1단계사업과 연계되는 노선으로 서울시 도시교통 혼잡을 완화하고 균형

있는 도시발전을 도모하며, 강남지역을 동서로 연결하는 도시철도망 구축

○ 규    모 : 연장 1,770m, 정거장 2개소

○ 사업기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 02. 01

○ 총사업비 : 99,630백만원(전기 3,725백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정  24.2%, 현재공정  25.2%, 계획대비 실공정율  104.1%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					2,053		640	1,413		1,672

□ 추진실적

○ 정거장 전기실 간선 및 접지설비 공사

○ 정거장 대합실 및 승강장 전력간선 및 전등, 전열 배관 및 배선공사

○ 주요자재(수배전반, MCC반 등) 발주

□ 향후 추진계획

○ '14. 02 : 수배전반, MCC반 설치공사 및 정거장 수전

○ '14. 04 : 정거장 조명등 및 동력 설치공사

○ '14. 05 : 터널 조명등 및 본선환기실 설치공사

□ 특이사항

○ 없음

149. 지하철 9호선 916공구 건설공사(전기)

담당부서	과 장	박성우	772-7062
도시철도설비부	담당자	김현철	772-7281

□ 사업개요

○ 목    적 : 1단계사업과 연계되는 노선으로 서울시 도시교통 혼잡을 완화하고 균형

있는 도시발전을 도모하며, 강남지역을 동서로 연결하는 도시철도망 구축

○ 위    치 : 삼성동 힐스테이트 ～ 삼성동 관동한방병원

○ 규    모 : 연장 1,140m, 정거장 2개소

○ 사업기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 02. 01

○ 총사업비 : 152,603백만원(전기 5,184백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정  20.0%, 현재공정  20.0%, 계획대비 실공정율 100.0%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
42					4,637					505

□ 추진실적

○ 정거장 전기실 간선 및 접지설비 공사

○ 정거장 대합실 및 승강장 전력간선 및 전등, 전열 배관 및 배선공사

○ 주요자재(수배전반, MCC반 등) 발주

□ 향후 추진계획

○ '14. 02 : 수배전반, MCC반 설치공사 및 정거장 수전

○ '14. 04 : 정거장 조명등 및 동력 설치공사

○ '14. 05 : 터널 조명등 및 본선환기실 설치공사

□ 특이사항

○ 없음

150. 지하철 9호선 917공구 건설공사(전기)

담당부서	과 장	박성우	772-7062
도시철도설비부	담당자	황영필	772-7282

□ 사업개요

○ 목    적 : 1단계사업과 연계되는 노선으로 서울시 도시교통 혼잡을 완화하고 균형

있는 도시발전을 도모하며, 강남지역을 동서로 연결하는 도시철도망 구축

○ 위    치 : 삼성동 관동한방병원 ～ 잠실종합운동장

○ 규    모 : 연장 1,590m, 정거장 1개소(2호선 환승)

○ 사업기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 02. 01

○ 총사업비 : 113,194백만원(전기 3,498백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정  17,8%, 현재공정  6.6%, 계획대비 실공정율  37.3%

- 부진사유: 선행공정(토목)의 공정지연에 따른 후속공정 전기공사 공정 지연

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					2,527					949

□ 추진실적

○ 정거장 전기실 간선 및 접지설비 공사

○ 정거장 대합실 및 승강장 전력간선 및 전등, 전열 배관 및 배선공사

○ 주요자재(수배전반, MCC반 등) 발주

□ 향후 추진계획

○ '14. 02 : 수배전반, MCC반 설치공사 및 정거장 수전

○ '14. 04 : 정거장 조명등 및 동력 설치공사

○ '14. 05 : 터널 조명등 및 본선환기실 설치공사

□ 특이사항

○ 없음

151. 지하철 9호선 2단계 915공구 기계설비공사

담당부서	팀 장	황철호	772-7064
도시철도설비부	담당자	이재구,최경수	772-7294

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남 동․서간의 도시철도 네트워크 확충으로 지하철 이용율 제고

지하철 2호선 교통혼잡 완화

○ 위    치 : 논현동 차병원사거리 ~ 삼성동 힐스테이트 아파트

○ 규    모 : 연장 1,770m(본선 1,440m. 정거장 2개소 330m, 환기구 6개소)

○ 사업기간 : 2008. 6. 2. ~ 2014. 2. 1.

○ 총사업비 : 99,630백만원(기계 : 13,263백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재)

- 기계분야 : 계획공정 14%, 현재공정 14%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			9,492	0	9,492	-	2,388	7,104	0	3,772

□ 추진실적

○ ‘08.11~’08.12 실시설계 도서 검토․보완

○ ‘08.12.  토목, 기계, 전기공사 총괄계약

○ ‘12.12.  기계분야 공사 착수

○ ‘13. 9.  공조용 배관 및 덕트, 위생, 소화설비 설치 진행중

스크린도어(PSD) 골조 설치중

□ 향후 추진계획

○ 냉동기, 에스컬레이터, 엘리베이터, 송풍기, 자동제어, 스크린도어(PSD) 설치

○ ‘13.12 냉동기, 에스컬레이터, 엘리베이터, 송풍기, 자동제어, 스크린도어 등 시운전

○ ‘14. 2. 9호선 2단계 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

152. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사 기계설비분야

담당부서	과 장	김호성	772-7065
도시철도설비부	담당자	송영무	772-7315

□ 사업개요

○ 목    적 : 동․서 도시철도망 구축으로 교통수요 분산 및 주민 교통편익 제공

○ 위    치 : 강남구 삼성동 차관아파트 ~ 삼성동 광동한방병원

○ 규    모 : 총연장 1.14km, 정거장 2개소, 본선 0.81km, 환기구 5개소

○ 사업기간 : 총괄 2008.6.2~2014.2.1 (기계분야 2013.2.25 ~ 2014.2.1)

○ 총사업비 : 총괄 148,685,428백만원 (기계분야 20,393백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재, 기계분야) : 계획공정 9.4%, 현재공정 8.9%, 계획대비 실공정율 95%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					16,750	-		16,750	-	3,643

□ 추진실적

○ 공조덕트공사 87.1%, 공조배관공사 82.2% 완료

○ 소화배관공사 48.9%, 위생배관공사 25.5% 완료

○ 926정거장 대합실(B1)↔승강장(B2)용 에스컬레이터 4대 반입․설치

□ 향후 추진계획

○ 2013.10  자동제어공사 착수

○ 2013. 11 본선송풍기 및 연결송수관 설치공사

□ 특이사항

○ 928정거장 이마트 앞 엘리베이터 당초 15인승→ 24인승으로 변경

(구경2200×2열 대형상수관 지장물로 출입구 설치 어려움에 따라 변경)

153. 지하철 9호선 2단계 917공구 기계설비공사

담당부서	과 장	황철호	772-7064
도시철도설비부	담당자	장병선	772-7295

□ 사업개요

○ 목    적 : 강남 동․서간의 도시철도 네트워크 확충으로 지하철 이용율 제고

지하철 2호선 교통혼잡 완화

○ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원~송파구 잠실동 아시아선수촌APT

○ 규    모 : 본선터널 1,425m. 정거장 1개소, 환기구 3개소)

○ 사업기간 : 2008. 6. 2. ~ 2014. 2. 1.

○ 총사업비 : 113,194백만원(기계 : 15,443백만원)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재)

- 기계분야 : 계획공정 10%, 현재공정 10%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			13,203	0	13,203	-	0	13,203	-	2,240

□ 추진실적

○ ‘08.11~’08.12 실시설계 도서 검토․보완

○ ‘08.12.  토목, 기계, 전기공사 총괄계약

○ ‘12.12.  기계분야 공사 착수

○ ‘13. 9.  공조용 배관 및 덕트, 위생, 소화설비 설치 진행중

□ 향후 추진계획

○ 냉동기, 에스컬레이터, 엘리베이터, 송풍기, 자동제어 설치

○ ‘13.12 냉동기, 에스컬레이터, 엘리베이터, 송풍기, 자동제어, 스크린도어 등 시운전

○ ‘14. 2. 9호선 2단계 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

154. 노량진역 환승통로 기계설비공사

담당부서	과 장	황철호	772-7064
도시철도설비부	담당자	이재구	772-7292

□ 사업개요

○ 목    적 : 노량진역 1호선과 9호선 환승편의 제공

○ 위    치 : 노량진역 1호선~9호선

○ 규    모 : E/S=4대, E/V=4대, 소방설비

○ 사업기간 : 2009. 12. 1 ~ 2014. 2. 28.(토목공사)

- 설비분야 실시설계 : ‘11.10.24~’13.12.31(설계완료 후 공사 예정)

○ 총사업비 : 21억원(토목공사 162억원 별도)

○ 누계 공정율('13. 9월 현재)

- 설비분야 : 실시설계중

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ ‘09.12.29  노량진역 환승통로 설비공사 위․수탁 협약체결(서울시↔한국철도시설공단)

○ ‘10. 1.14   설비공사 위탁사업비 21억원 납부(서울시→한국철도시설공단)

○ ‘11.10.24~’13.12.31 설비공사 실시설계 용역

○ ‘13. 4~6.25  환승통로 운영회사 결정협의(1호선 한국철도공사에서 운영 결정)

□ 향후 추진계획

○ 실시설계 완료 후 설비공사

□ 특이사항

○ 토목공사중 지장물로 인하여 공사지연→2014.5.31.까지 공사기간 연장 예상

155. 지하철 9호선 연장건설 시스템분야 실시설계용역

담당부서	과 장	이용기	772-7066
도시철도설비부	담당자	박규영	772-7318

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울지하철 9호선연장선에 전력, 통신, 신호 등 시스템분야 최적의 실시 설계를 완료하여 안전하고 편리한 도시철도 건설업무를 추진하고자 함

○ 과업범위 : 연장13.64km / 정거장 13개소

구 분		구 간	연 장(km)	정거장(개소)
계		논현동 ~ 보훈병원	13.64	13
2단계		논현동 ~ 종합운동장	4.5	5
3단계	1구간	종합운동장 ~ 올림픽공원	5.94	6
	2구간	올림픽공원 ~ 보훈병원	3.2	2

○ 사업기간 :`11. 01. 01 ~ `13.12.31

○ 계 약 자 : 동산엔지니어링(주)외 2개사

○ 총사업비 : 15.56억원

○ 공정율(계획/현재) :  49%/49%(계획대비 100%)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                      (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
412	356	356	521	-	521	-	255	266	-	-

□ 추진실적

○ `10.12.31 : 실시설계용역 계약(총차,1차)

○ `12. 2.08 : 실시설계 2차 계약

○ `12. 2.15 : 실시설계 1차 준공

○ `12. 2.16 : 실시설계 2차 계약

○ `13.02.15 : 시스템분야 2차준공 및 3차 발주

○ `13.02.16 : 실시설계 3차 계약 체결

□ 향후 추진계획

○ `13. 10월 : 3단계 실시설계용역 건설기술심의

○ `13. 12월 : 실시설계용역 총차 준공(9호선 3단계 성과품 납품)

□ 특이사항

○ 없음

156. 지하철 9호선 2단계 정보통신공사

담당부서	과 장	이용기	772-7066
도시철도설비부	담당자	배종수	772-7320

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울지하철 9호선 연장노선(2단계) 5개정거장 건설을 위해 안전한 열차운행 및 편리하고 쾌적한 도시철도 건설에 필수적인 각종 정보통신시스템을 구축하기 위함

○ 규    모 : 본선 4.5km 및 5개정거장 신설(926~930)

- 본선터널 4.5km구간 광케이블 및 누설동축케이블 공사

- 5개정거장 통신 배관/배선공사

○ 사업기간 : ‘13. 01. 15 ~ ’14. 09. 11

○ 계 약 자 : 대선이엔씨(주) 최승재

○ 총사업비 : 4,224백만원

○ 공정율(계획/현재) : 53.09%/53.62%(계획대비 101 %)

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재                                          (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	3,500	525	565	2,975	3,540	-	1,712	1,828	0	159

□ 추진실적

○ `12.12.26 : 시설공사 계약

○ `13.01.15 : 시설공사 착공

○ `13.02.01 : 현장사무소 개설

○ `13.02.15 : 현장점검 및 공사개시

○ `13.07.30 : 정거장 5개소 통신배관배선 공사 시행

○ `13.09.30 : 본선 케이블트레이 설치, 누설동축케이블 포설

□ 향후 추진계획

○ `13. 12 : 본선 광케이블 11.8km 포설

○ `14. 01 : 광전송망 개통

○ `14. 03 : 각종 기기 취부공사

□ 특이사항

○ 없음

157. 우이~신설 도시철도 민간투자사업(시스템분야)

담당부서	과 장	김영하	772-7067
도시철도설비부	담당자	안종필	772-7327

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울의 대표적 대중교통 취약지역에 신교통 수단(경전철)을 도입하여                   서울 동북부 지역 교통체계 개선 및 지역 균형 발전에 기여

○ 위    치 : 강북구 우이동 ~ 삼양로 ~ 정릉 ~ 성신여대 ~ 신설동

○ 규    모 : 연장 11.4㎞ , 정거장 13개소(환승 3개소), 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2009.9.15 ~ 2014.9.14

○ 총사업비 : 9,012억원(국비 1,098, 시비 3,156, 민간 4,758 ; 시스템분야 1,141)

○ 누계 공정율 ('13. 9월 현재 ; 시스템분야) : 계획공정 73.32%, 현재공정 10.47%, 계획대비 실공정율 14.28%

- 부진사유 : 공사착공 이후 선행공정(토목구조물) 지연으로 시스템분야 공정 순연

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재, 총사업비 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013					2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	지출액	현잔액
145,026	119,956	59,909	72,200	34,200	106,400	21,405	84,995	61,073

※ 시스템분야(‘12년) 8,424.2백만원 지급(계약금)

□ 추진실적

○ 2009.04.09 : 실시협약 체결

○ 2009.09.15 : 민간투자사업 공사착수

- 시스템분야 (송변전/전차선 ‘12.4월, 통신/AFC '12.3월, 신호 ’11.8월)

○ 2013.06.20 : 분쟁처리에 대한 합의서 체결(서울시, 사업시행자, 출자자)

○ 2013.09.03 : 타인자본(334억원) 최초 투입

□ 향후 추진계획

○ 더 이상 공사지연이 되지 않도록 공정관리 철저 수행

□ 특이사항

○ 사업시행자의 공기연장(26.5개월) 요구 분쟁 적극 대응

158. 9호선 2단계 신호보안설비공사

도시철도설비부	과 장	김영하	772-7067
도시철도설비부	담당자	김창환	772-7326

□ 사업개요

○ 목    적 : 9호선 1단계 연장사업으로 도시철도 네트워크망 구축을 통한 도로혼잡 및 교통분담 완화하는 등 서울시 도시 교통난 해소

○ 위    치 : 서울시 강남구 논현동 차병원사거리 ~ 잠실운동장

○ 규    모 : 본선 4.5km, 5개 정거장 신호보안설비공사

○ 사업기간 : 2013.1.24 ~ 2014.9.20

○ 총사업비 : 3,314,962천원

○ 누계 공정율('13. 9월 현재) : 계획공정 51.73%, 현재공정 51.73%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - '13. 9월 현재

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,852	-	1,163	1,852	3,015	-	1,414	1,601		300

□ 추진실적

○ ‘12.11 : 공사 발주

○ ‘13.01 : 공사계약 및 착공

○ ‘13.09 : 2차 공사 계약

□ 향후 추진계획

○ ‘13.12 : 1차 공사 준공

○ ‘14.01 : 기기설치 및 공사완료

○ ‘14.02 : 개별 연동 시험

□ 특이사항

○ 없음