누수복구 훈련 상황별  조치사항

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
현장출동 상황파악 (14:00~14:10)	○ 상수도관 피해조사 후 긴급복구 지시 ○ 상황전달 : 소장, 과장, 직반장, 본부, 유관기관	시설관리과장 누수복구 담당
상황실 설치 (14:15~14:30)	○ 현장도착 및 안전시설 설치(라바콘 및 휀스)	복구업체
	○ 현장 상황실 설치	복구업체
누수상황파악 주민홍보 (14:35~15:00)	○ 누수관경, 주민피해, 교통, 단수 등을 확인하여 상황전파 ○ 상수도홈페이지 단수홍보 및 통합메세지 발송 메가폰 및 단수홍보지를 이용한 주민 단수홍보 - 수계전환 후 공항동, 방화동 일부지역 소출수 예상 - 수계전환 전 대형 건물 저수조 수위 확보 요청 - 급수차 및 아리수 물병지원 - 지원이 필요한 경우 관련부서 지원요청 ○ 누수복구업체 터파기 시행	<상황처리> 이연창,손현정 <급수운영> 문병희,정수용, 박성자,이동섭, 오장록,김동복
제수변 조절 (15:00~15:30)	○ 제수변 조절 - 수계전환 (누수복구 완료후 환원) · 가양동 1459번지앞 : 1,650*600mm 경계밸브 1개소 (폐→개) - 밸브조절 (누수복구 단수시) · 염창동 305번지앞 : 700mm 중간밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) 700/400mm 분기밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) · 염창동 241-31호앞 : 700/400mm 분기밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) · 등촌동 631-7호앞 : 700mm 중간밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) 700/600mm 분기밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) ○ 적수유입 방지 700/300mm 분기밸브 1개소 ( 개 → 폐 ) - 염창동244~280번지일대 다량급수처 ○ 수계전환 – 단수최소화 - 일부지역 소출수 발생예상	<수계전환> 이상엽, 강병길
긴급복구 시행 (15:30~16:30)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : (합)우림산업개발 대표 김효용 ○ 장비 : 양수펌프(80, 100㎜), 굴삭기, 용접기 등 ※ 겨울철 혹한기 도로결빙 대비 염화 칼슘등 비치	시설관리과장 누수복구담당 복구업체
제수변 조절 (환원 시행) (16:30~17:00)	○ 단수시 조절밸브는 통수시 환원조치(점진적 개방) - 위치별 담당자를 지정하여 밸브조절 및 확인 - 중간2개소, 분기밸브 4개소 ) - 퇴수밸브 1개소 개→폐 (정상수질까지) - 인입밸브(2개소) 폐→개 (수질확인 후) ○ 되메우기 완료 및 ASP 포장복구 시행	이상엽, 강병길 강태수 (수질검사)
강 평	훈련사항 강평 실시	사업소장 시설관리과장