서울형품셈(폐지)과 표준품셈(개정) 상세 비교표

보도블록 포장

서울형품셈(폐지)

표준품셈(21년 개정)

보도용 블록포장(토목NO-22)

(일당)

구 분	단위	수량	시 공 량(㎡)
포 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인인인	2 2 4	250
굴삭기(0.6㎥) 플레이트콤펙터(1.5톤)	대대	1 1
① 본 품은 모래포설 및 다짐, 블록설치 기준이다 ② 본 품은 주택가 도로 및 차도에 한정하여 적용한다 (공원, 단지내 도로 제외) ③ 본 품은 지장물에 의한 작업능율저하(40%) 및 할증(주택가 및 지세별)이 포함되어 있다 ④ 본 품 외에 보도블록 줄눈 모래 채움 및 포장면 다짐품은 추가 반영한다 ⑤ 모래 등 자재 소운반비를 별도 계상한다 ⑥ 작업준비 등을 위해 작업 차량비를 2회/일 계상 할 수 있다

가. 보도용 블록 설치(품셈토목1-7-1)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

포   장  공

특 별 인 부

보 통 인 부

인인인

3

2

2

A형 : 300

B형 : 240

굴삭기(0.6㎥)

플레이트콤펙터(1.5톤)

대대

1

1

유도•,점자블록 설치 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다

블록 정밀절단(전동절단기) 시공이 아닌 경우 특별인부 1인을 감한다

① 본 품은 규격 0.1㎡이하, 두께 8cm이하 보도용 블록 설치 기준이다

② 본 품은 모래부설, 모래층 다짐 및 고르기, 블록 절단 및 설치, 줄눈채움, 블록설치 후 다짐 작업을 포함한다

③ 현장 여건별 적용기준은 다음과 같다

구분	적용기준
A형	공원, 단지∙택지조성공사의 보도 등 장비이동 및 적재가 용이한 구간
B형	차도인접, 주택가 보도 등 장비이동 및 적재 공간이 협소한 구간

④ 기층에 콘크리트나 아스팔트 등의 안정처리기층을 사용하거나 지반침하방지가 필요한 경우 별도 계상한다

⑤ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비 및 잡재료는 인력품의 5%, 블록 정밀절단(전동절단기)에 의한 시공이 아닌 경우 2%로 계상한다

나. 보도용 블록 설치 재설치(품셈토목1-10-23)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

포   장  공

특 별 인 부

보 통 인 부

인인인

3

2

2

A형 : 260

B형 : 220

굴삭기(0.4㎥)

플레이트콤펙터(1.5톤)

트    럭(2.5ton)

대대대

1

1

1

유도•,점자블록 설치 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다

블록 정밀절단(전동절단기) 시공이 아닌 경우 특별인부 1인을 감한다

① 본 품은 기존에 설치된 블록이 철거된 상태에서 신규블록(규격 0.1㎡이하, 두께 8cm이하)을 재설치 하는 기준이다

② 본 품은 모래보강, 모래층 다짐 및 고르기, 블록 절단 및 설치, 줄눈채움 및 다짐 작업을 포함한다

③ 현장 여건별 적용기준은 다음과 같다

구분	적용기준
A형	공원, 단지∙택지조성공사의 보도 등 장비이동 및 적재가 용이한 구간
B형	차도인접, 주택가 보도 등 장비이둉 및 적재 공간이 협소한 구간

④ 기층에 콘크리트나 아스팔트 등의 안정처리기층을 사용하거나 지반침하방지가 필요한 경우 별도 계상한다

⑤ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비 및 잡재료는 인력품의 5%, 블록 정밀절단(전동절단기)에 의한 시공이 아닌 경우 2%로 계상한다

다. 보도용 블록 소규모 보수(품셈토목1-10-24)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

포   장  공

특 별 인 부

보 통 인 부

인인인

2

1

1

110

굴삭기(0.4㎥)

플레이트콤펙터(1.5톤)

트    럭(2.5ton)

대대대

1

1

1

유도•,점자블록 설치 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다

① 본 품은 보도용 블록포장의 손상으로 인해 소규모 블록을 보수하는 기준이다

② 블록의 규격은 0.1㎡이하, 두께는 8cm이하 기준이다

③ 본 품은 블록 철거, 모래보강, 모래층 다짐 및 고르기, 블록 절단 및 설치, 줄눈채움, 및 다짐 작업을 포함한다

④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다

⑤ 보수 블록의 작업구간이 산재하여 발생하는 경우 할증은 다음표을 참고하여 적용한다

구분	구간별 평균 시공면적
	10㎡ 이하	30㎡ 이하	60㎡ 이하	110㎡ 이하	110㎡ 초과
시공량 할증계수	0.65	0.85	0.95	1.0	1.05

2. 보도용 블록포장 철거

서울형품셈(폐지)

표준품셈(21년 개정)

가. 보도용 블록포장 인력철거(토목NO-6)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

특 별 인 부

보 통 인 부

인인

1

2

A형 300

B형 270

C형 370

① 본 품은 보도용 블록포장 철거품에 적용한다

② 현장 여건별 적용기준은 다음과 같다

구분	적용기준
A형	소형고압블록포장 철거 (t=6~8cm)
B형	대형블록포장 철거 (50×50×4.5cm)
C형	보도용콘크리트블록포장 철거 (30×30×6cm)

가. 보도용 블록 인력철거(품셈토목1-10-21)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

포  장  공

보 통 인 부

인인

2

2

A형 : 360

B형 : 300

트럭(2.5ton)

대

1

① 본 품은 유용할 목적으로 철거하거나 또는 장비를 사용하지 못하는 구간의 철거 작업 기준이다

② 본 품은 블록철거, 현장정리를 포함한다

③ 현장 여건별 적용기준은 다음과 같다

구분	적용기준
A형	공원, 단지∙택지조성공사의 보도 등 장비이동 및 적재가 용이한 구간
B형	차도인접, 주택가 보도 등 장비이둉 및 적재 공간이 협소한 구간

④ 폐기물 처리는 별도 계상한다

나. 보도용 블록포장(장비사용) 철거(토목NO-6)

구 분	시공량(㎥)
굴 삭 기 (0.2~0.4㎥)	피쇄물 절취 및 집적	k=0.55 f=0.71 E=0.45 cm=15초(90°)
① 본 품은 장비를 사용하여 보도블록를 철거하는 기준이다 ② 원가산출식은 표준품셈(공통8-2-3)를 적용한다

나. 보도용 블록 장비사용 철거(품셈토목1-10-22)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(㎡)

포   장  공

보 통 인 부

인인

1

1

A형 : 600

B형 : 500

트   럭(2.5ton)

대

1

① 본 품은 장비를 사용하여 보도용 블록을 철거하는 기준이다

② 본 품은 블록철거, 현장정리를 포함한다

③ 현장 여건별 적용기준은 다음과 같다

구분	적용기준
A형	공원, 단지∙택지조성공사의 보도 등 장비이동 및 적재가 용이한 구간
B형	차도인접, 주택가 보도 등 장비이둉 및 적재 공간이 협소한 구간

④ 폐기물 처리는 별도 계상한다

3. 하수관로 세정

서울형품셈(폐지)

표준품셈(21년 개정)

하수관로 세정(토목NO-28)

(m당)

구 분	단위	수량	비 고
특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.0029 0.0002	일 시공량 : 350m
고압세정차(11톤,4㎥) 물탱크(살수차1600L)	hr hr	0.023 0.023
① 본 품은 하수도 D600mm 이하에 적용한다 ② 고압세정은 3회 범위내에서 탄력적으로 적용한다 ③ 맨홀깊이 2m이하 기준으로 한다 ④ 하수관내 슬러지 높이는 현장 여건에 따라 10cm까지 적용한다 ⑤ 고압세정차 토출량은 평균 150L/min 기준으로 한다 ⑥ 고압세정차 세정수 급수 이동거리는 500m이내에서 적용한다 ⑦ 세정수는 m당 47L 소요되며, 용수비는 별도 계산한다 ⑧ 교통정리원은 별도 계상한다

하수관 세정(품셈토목6-9-2)

(일당)

구     분

단위

수량

시 공 량(m)

배관공(수도)

보 통 인 부

인인

1

3

A형 : 400

B형 : 310

진공흡입준설차

물탱크(살수차)

대

1

1

1

① 본 품은 하수관 내부를 고압으로 세정하는 기준이다

② 본 품은 장비 셋팅, 하수관 내부 세정, 정리 및 이동 작업을 포함한다

③ 본 품은 세정을 기준으로 하며, 하수관내 슬러지의 준설이 필요한 경우에는 하수도 준설항목을 적용한다

④ 현장 여건별 적용기준은 다음표를 기준한다

구분	적용기준
A형	작업위치(맨홀)가 대로 등 넓고, 작업공간이 확보되어 장비의 이동이 원활한 경우
B형	작업위치(맨홀)가 주택가 도로 등 좁고 협소하여 장비의 이동이 원활하지 못하는 경우

⑤ 장비의 규격은 다음을 기준하나, 작업여건을 고려하여 적합한 규격을 선정하여 계상한다

구분	진공흡입준설차	물탱크(살수차)
A형	25톤(7.64㎥적)	16,000L
B형	13톤(3.00㎥적)	5,500L