도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (16차)

◉ 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사(변경) : 조건부 시행

- 지하차도 점용단계 관련하여 양방향 지체도 분석에 대해 재검토하기 바라며, 석촌역교차로→종합운동장 방향 하위차로를 우회전전용 또는 지하차도 상부 진입전용 차로로 이용하기 바람

- 지하차도 중앙부 점용단계의 공사내용을 교각으로 변경하고, 6단계 지하차도 상부에 확보하는 보행공간에 대해 보행 안전을 확보할 수 있도록 안전휀스 등 추가 설치하기 바람

- 구조물 설치 후 상부 크래인 작업 단계에 대해 운영계획을 수립하기 바람