	문서번호 : 서영 건설관리 제 2018 – 774호 시행일자 : 2018년 12월 17일 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장 참 조 : 도시철도토목부장, 도시철도건축부장, 도시철도설비부장

제    목 : 총괄(8회), 10차(1회) 설계변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』관련 9호선 2단계 기본계획 변경으로 공사기간 연장에 따라 직접공사비 및 물가변동(1회~6회) 반영, 발주처 요청사항 및 현장여건 변동사항 반영, 보험료 정산 등에 따른 총괄(8회), 10차(1회) 설계변경을 붙임과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총괄 (8회)	도급금액	143,297,192,700	145,140,000,000	1,842,807,300
	공사기간	2010.02.19.~ 2018.12.31.	2010.02.19.~ 2018.12.31.	-
10차 (1회)	도급금액	6,243,192,700	8,086,000,000	1,842,807,300
	공사기간	2018.05.11.~ 2018.12.31.	2018.05.11.~ 2018.12.31.	-

붙 임 : 총괄(8회), 10차(1회)설계변경 검토서 1부. “끝”

|주| 서영엔지니어링 대표이사 김 종 흔

주 소: 13595 경기도 성남시 분당구 황새울로 246 (수내동 9-3) 도담빌딩
담당자: 건설관리팀 채종근 상무 전 화: 02-413-2962/4 팩 스: 02-413-2965 이메일: khan640@naver.com

검 토 의 견 서

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

공  사   명

서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사

검 토 기 간

2018.12.17. ~ 12.23

관 련 문 서

SK건설지제2018-670호(2018.12.17)

작  성  자

보조감리원  김 기 호 (인)

확인자

책임감리원  채 종 근  (인)

Ⅰ				검토목적

서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사와 관련 도급사인 에스케이건설(주)로부터 9호선 2단계 기본계획 변경으로 공사기간 연장에 따른 직접공사비 및 물가변동(6회) 반영, 발주처 요청사항 및 현장여건 변동 반영, 보험료 정산 등에 따라 총괄(8회) 및 10차(1회) 설계변경 요청이 있어 이에 대한 적정성 여부를 검토코자 함.

Ⅱ				검토내용

◦ 공사개요.

∘ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

∘ 공사금액 : ￦143,297,192,700원(일천사백삼십이억구천칠백일십구만이천칠백원정)

∘ 공사기간 : 2010. 02. 19 ~ 2018. 12. 31

∘ 공사위치 : 서울시 송파구 잠실동 아시아선수촌 앞 ~ 삼전동 잠실병원 앞

∘ 총 연 장 : L=1,290.7m(본선개착 L=627.2m 본선터널 L=498.5m,  정거장 L=165m)

∘ 규    모 : 정거장 1개소, 본선환기구 3개소, 집수정 1개소

∘ 시공회사 : SK건설 외 4개사

∘ 감 리 사 : (주)서영엔지니어링 외 3개사

◦ 설계변경 사유

∘ 9호선 2단계 기본계획 변경으로 공사기간 연장에 따른 직접비 반영

∘ 물가변동(1회~6회) 반영

∘ 발주처 요청사항 및 분야별 현장여건 변동에 따른 변경사항 반영

∘ 보험료 정산 등

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

◦ 계약현황

구분	도급금액(백만원)	공사기간	비고
총괄	143,297	2010.02.19.~2018.12.31.
1~9차	137,054	2010.02.19.~2017.12.31.
10차	6,243	2018.05.11.~2018.12.31.

◦ 공사비 조정내역

- 총괄(8회)

(단위 : 백만원)

공 종	단위	당초	변경	증·감			비고
				계약조정	계약내조정	소계
토목	식	74,852	77,434	2,582	778	3,360
2. 건축	식	4,043	4,023	-20	-49	-69
3. 기계	식	11,832	11,302	-530	-510	-1,040
4. 전기	식	3,401	3,401	-	42	42
직접공사비 계	식	94,128	96,160	2,032	261	2,293
제경비	식	24,480	24,391	-89	90	1
물가변동(1~6회)	식	13,927	14,068	141	-250	-109
폐기물처리용역비	식	250	-371	-621	-	-621
기타	식	10,512	10,892	380	-	380
도급공사비	식	143,297	145,140	1,843	101	1,944

- 10차(1회)

(단위 : 백만원)

공 종	단위	당초	변경	증·감	비고
1. 토목	식	1,978	4,560	2,582
2. 건축	식	444	424	-20
3. 기계	식	1,153	623	-530
4. 전기	식	321	321	-
직접공사비계	식	3,896	5,928	2,032
제경비	식	1,421	1,332	-89
물가변동(1~6회)	식	671	812	141
폐기물처리용역비	식	250	-371	-621
기타	식	5	385	380
도급공사비	식	6,243	8,086	1,843

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

◦ 주요 변경내용

(단위 : 백만원)

구분	공 종	금 액			비고
		당초	변경	증·감
계약 금액 조정	토목	18,693	22,339	3,646
	건축	6,784	6,765	-19
	기계	2,875	2,228	-647
	전기	-	-	-
	기타	16,545	15,408	-1,137	폐기물 등
	계	44,897	46,740	1,843
계약 금액 내 조정	토목	20,449	21,335	886
	건축	79	-	-79
	기계	715	-	-715
	전기	5,687	5,696	9
	계	26,930	27,031	101

∙ 토목

(단위 : 백만원)

구분	변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약 금액 조정	차수벽 해체	-	130	130	917공구 차수벽 해체
	돌출구조물 개선	-	111	111	서울시 보도환경개선사항 반영
	가로등 변경	48	337	289	좋은빛 심의결과 반영
	보도복구 변경	203	603	400	보도포장 변경 반영
	차도복구 변경	156	530	374	아스팔트 재질변경 및 추가포장 반영
	교통신호기 변경	53	505	452	교통신호기 신설 반영
	(직접비)강재손료	16,428	17,501	1,073	사업계획 변경에 따른 직접비 반영
	(직접비)공사용조명	251	297	46	“
	(직접비)물푸기	197	337	140	“
	(직접비)계측비	343	479	136	“
	(직접비)현장사무실	1,014	1,363	349	“
	연도변 건물조사	-	76	76	연도변 건물조사 추가 시행
	교통영향분석 용역	-	24	24	교통영향분석 및 개선대책용역
	폭염경보	-	8	8	폭염경보 발효시 노무비 보존
	주차구역 삭선	-	3	3	송파구청 주차구역 삭선 요구
	정거장 출입구 난간대	-	5	5	BF인증을 위한 난간대 요구
	상수도D900 전기방식	-	30	30	강동수도사업소 전기방식 요구
계		18,693	22,339	3,646

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

구분	변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약 금액 내 조정	강재매립	8,683	9,215	532	민원,지장물근접 등에 의한 매립
	하수박스 하부채움 변경	3	52	49	토사→EPS블럭 하부 채움재 변경
	지장물 이설	1,453	1,229	-224	지중매설물과 구조물간섭
	자재투입구 신설	1	27	26	변전실 자재투입구 신설
	보호벽 변경	225	172	-53	보호벽 콘크리트 높이 조정
	지수재 변경	4	85	81	연직시공이음부 지수재 변경
	자전거주차장(토목)	227	58	-169	자전거주차장 공법 변경
	930S1 비상대피로 통합	2,031	1,741	-290	환기구 점검통로와 비상대피로 통합
	계측기 추가	366	546	180	개착 및 터널 계측기 추가
	암판정	2,149	2,676	527	터널굴착시 지질상태 변화
	터널공법변경	5,307	5,534	227	터널자문회의 결과 반영
계		20,449	21,335	886

∙ 건축

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용					변 경 사 유	비고
	공 종		금액
			당초	변경	증·감
계약 금액 조정	출입통제시설		6,048	6,080	32	도기본 출입통제시설 설치 지시
	양방향도어 설치		-	5	5	피난동선 계획의 적정성 자문
	기능실 평면		696	680	-16	도기본 기능실 개선방침 반영
	선로부 마감삭제		40	-	-40	도기본 선로부 마감삭제 지시
계			6,784	6,765	-19
계약금액 내 조정		자전거주차장	79	-	-79	자전거주차장 변경
계			79	-	-79

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

∙ 기계

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용					변 경 사 유	비고
	공 종		금액
			당초	변경	증·감
계약 금액 조정	PSD 축소구간		1,843	1,396	-447	감사원 지적사항
	지하수 재활용 펌프		7	20	13	안정적인 성능, 유지관리 편리성
	변전실 냉방기		142	154	12	설계온도 35℃에서 40℃로 변경
	공조배관 연결방식		23	48	25	9호선 2단계 기준 적용
	냉각탑 균압관		7	25	18	냉각수 배관 연통관 등 추가
	기능실		-	27	27	통합사무실→전기사무실 변경
	PSD 장애물센서		-	51	51	안정적인 성능, 유지관리 편리성
	공기여과장치		754	431	-323	안정적인 성능, 유지관리 편리성
	승강설비 소공간 소화기		-	6	6	승강설비 제어반 화재시 소화
	본선 연결송수관		99	70	-29	본선 연결송수관 동파 방지
계			2,875	2,228	-647
계약금액내 조정		자전거주차장	715	-	-715	자전거주차장 변경
계			715	-	-715

∙ 전기

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약금액내 조정	터널콘센트	63	57	-6	터널콘센트 단상 220V 적용
	BUS DUCT	85	90	5	TR 2차 케이블 BUS DUCT
	승강장 조명 축소	570	562	-8	조명기구 "C", “D” 축소
	UPS 용량 축소	1,503	1,468	-35	L-U분전반 신설(C회로용)
	By-Pass 기동장치	65	108	43	환기휀 배관 및 배선 추가
	수익시설 설치	444	454	10	수익시설 등기구 추가
	터널 시선유도등	108	75	-33	터널내 시선유도등 삭제
	이동통신 설비증설	949	954	5	이동통신 용량 증설
	930S1 전등설비	108	102	-6	930S1 비상대피로 통합
	930S1 소방설비	13	11	-2	930S1 비상대피로 통합
	승강장축소구간 소방전기	315	306	-9	승강장축소구간 소방시설 삭제
	풀박스 용융아연도금	4	12	8	풀박스 용융도금 적용
	수배전반 내진설비	-	34	34	수배전반 38면 내진 제품 적용
	외부출입구 조명기구	14	48	34	외부출입구 조명설비 양쪽 추가
	터널구간 조명기구	6	28	22	터널구간 조명구가 18EA 추가
	자전거주차장	1,440	1,387	-53	자전거주차장 변경
계		5,687	5,696	9

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

∙ 건강보험료, 연금보험료, 건설근로자퇴직공제부금비, 건설하도급대금지급보증서발급수수료, 환경보전비 정산

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약 금액 조정	건강보험료	528	571	43	건산법시행령 83조에 따른 정산
	연금보험료	861	588	-273	“
	노인장기요양보험료	25	27	2	“
	건설하도급대금수수료	49	35	-14	“
	퇴직공제부금비	815	595	-220	“
	기타분야환경보전비	90	-104	-194	-
계		2,368	1,712	-656

∙ 폐기물처리비

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약 금액 조정	폐기물 처리	250	-371	-621	준공정산에 따른 수량증가	총괄
	폐기물처리	250	-371	-621	준공정산에 따른 수량증가	10차

∙ 물가변동

(단위 : 백만원)

구분	주 요 변 경 내 용				변 경 사 유	비고
	공 종	금액
		당초	변경	증·감
계약 금액 조정	물가변동1회	3,369	3,359	-10	설계변경 및 PS항목 정산 반영
	물가변동2회	3,639	3,636	-3	“
	물가변동3회	3,348	3,347	-1	“
	물가변동4회	2,712	2,710	-2	“
	물가변동5회	859	858	-1	“
	물가변동6회	-	158	158	6차 ESC 조달청승인(3.05%)	11월
	계	13,927	14,068	141

기술검토건명

(총괄8회, 10차1회) 설계변경도서 검토

Ⅲ				검토결과

◦ 상기 검토내용과 같이 9호선2단계 기본계획 변경으로 인하여 공사기간 연장에 따른 직접공사비 및 물가변동(1회~6회), 발주처 요청사항 및 현장여건 변동, 보험료 정산 등을 반영한 설계변경 사항으로써,

◦ 공사계약일반조건[제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정), 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)], 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조(설계변경 등)에 의거 설계변경을 검토한 바, 단가 및 수량을 산출하고 본부 설계변경자문위원회 개최 및 본부 지침을 적용하여 반영하였기 적정하게 설계변경된 것으로 판단됨.

구분	도급금액(백만원)			공사기간	비고
	당초	변경	증·감
총괄8회	143,297	145,140	1,843	2010.02.19.~ 2018.12.31.
10차1회	6,243	8,086	1,843	2018.05.11.~ 2018.12.31.

기  타

붙임 : 1. 총괄(8회), 10차(1회) 변경설계서 각 1부.

2. 시공사 공문사본 1부.  “끝”