설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부		요청일			2017년 06월 일
공 사 명	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
공사개요	공사규모		재생수공급시설 Q=20,000㎥/일
	공사기간		2011. 11. 01 ~ 2017. 06. 30
	감 리 사		(주)도화엔지니어링외 1개사
	설 계 사		(주)동명기술공단종합건축사무소외 1개사
	시 공 사		유호산업개발(주)
자문 안건명			종합시운전 기간 연장				요청금액			224,620천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 운영자(서남환경)와 합동으로 근무하는 신뢰성 운전기간을 1개월에서 3개월로 연장
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 종합시운전 기간 연장(60일) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 1식(4개월) - 변 경 : 1식(6개월)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 334,708천원 - 변 경 : 559,328천원 - 증 감 : 224,620천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 공통
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부. 2. 실정보고 사본 1부.							▪ 공사예정시기 - 2017.05 ~ ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
계약금액	8,605,633천원	계약일	2011.10.24	시공사	유호산업개발(주)
공사기간	2011.11.01 ~ 2017.06.30	낙찰율	87.172%	설계자	(주)동명기술공단종합 건축사무소외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)도화엔지니어링외 1개사
공사규모	□ 재생수처리시설 : 공급량 20,000㎥/일 □ 관로공사 : 연장L=1,181M(DCIP200mm~600mm) □ 기계공사 : 1식 □ 조경공사 : 1식			※ 작성자 : 업무당당 김 소 연 (☎02-3708-8782)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	종합시운전 기간(4개월)		종합시운전 기간(6개월)	종합시운전 기간(2개월)
공 사 비	334,708천원		559,328천원	224,620천원
적 용 요 율	-		계약단가	계약단가
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	- 실정보고 승인(방재시설부-6753 (2017.04.20.))
	관련규정	공사계약일반조건 제20조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 종합시운전 기간 연장(4개월→6개월)
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 물순환정책과-4515(2017.03.09.) 재처리시설 종합시운전 협조 요청

- 도화(서남마곡)2017-13호(2017.03.22.) 종합시운전 공기연장 및 재생수공급 추가공사 검토 지시

- 방재시설부-6753(2017.04.20.) 실정보고 승인 통보