□ 강북정수장 사전 시뮬레이션 및 연결공사 추진일정표

일 자 구 분	10.6(월)	10.7(화)	10.8(수)	10.10(금)	10.13(월) 10.20(월)	10.14(화) 10.21(화)	10.15(수) 10.22(수)	10.16(목) ~10.19(일)	10.23(목)
추진사항	연결공사 준비	시뮬레이션 추진 10.7 14:00 ~ 10.8 10:00 (18시간)		시뮬레이션 결과분석	연결공사 준비	1, 2차 연결공사 추진 - 1차 : 10.14 14:00 ~ 15 08:00 - 2차 : 10.21 14:00 ~ 22 08:00 (18시간)		2차 연결공사 준비	수계환원
강북	정상 운영	생산량 감소 -31만톤/일 (50만톤/일)	시뮬레이션 종료 후 생산량 환원	정상 운영		생산량 감소 -31만톤/일 (50만톤/일)	연결공사 종료 후 생산량 환원	정상 운영	정상 운영
구의	정상 운영				수계전환 관련 강북지원 3만톤/일 증량(계속)				정상 운영
암사	정상 운영				수계전환 관련 강북(구의)지원 4만톤/일 증량(계속)				정상 운영
강북 관련 배수지 (6개소)	최대수위 확보 준비	최대수위 확보 및 시뮬레이션 기간 중 유입량 조절		정상 운영	최대수위 확보 준비	최대수위 확보 및 연결공사 중 유입량 조절		정상운영	정상운영
타 정수장 배수지 (구의, 암사 계통)	최대수위 확보 준비	최대수위 확보	시뮬레이션 종료 후 환원조치	정상 운영	최대수위 확보 준비	최대수위 확보	연결공사 종료 후 환원조치	정상운영	정상운영

□ 강북 및 타 정수장 관련 배수지 현황

① 강북정수장 수계 배수지(6개소) : 공릉, 월계, 월곡, 북악터널, 불광터널, 백련

② 강북을 지원하는 他 정수장 수계 배수지

∙ 암사수계 : 반포, 방배배수지 및 암사고양정 직송계통(청담동 등)

∙ 구의수계 : 아차산, 용마

③ 관련 수계 소배수지도 만수위 확보 : 개운산, 홍은 등