설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			경계석 및 측구 형식 변경				요청금액		증)84,510천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 업무지시(보도공사 시공철저)에 의한 「보도공사 설계시공매뉴얼 Ver1.0(2013)」을 적용한 보차도 경계석 변경[250*300*1000→(175+25)*250*1000] 및 L형측구 품질향상 방침에 의한 시공변경을 반영함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초: 경계석 및 측구 - 변경: 경계석 및 측구 형식 변경 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 보차도경계석(250x300x1000외) : 3,227m - 도로경계석(150x150x1000) : 6,704m ○변경물량 - 보차도경계석((175+25)x250x1000외): 3,367m - 도로경계석(150x150x1000) : 6,713m - 미끄럼방지시공(150x150x1000) : 5,199m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 521,760천원 - 변 경 : 606,270천원 - 증 감 : 증)84,510천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 포장공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 -보차도경계석, 레미콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	보차도경계석 (250x300x1000외): 3,227m 도로경계석 (150x150x1000): 6,704m		보차도경계석 ((175+25)x250x1000외): 3,367m 도로경계석 (150x150x1000): 6,713m 미끄럼방지시공 (150x150x1000) : 5,199m
공 사 비	521,760천원		606,270천원	증84,510천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 도시기반시설본부-14-42195호 (2014. 10.24)- 실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 4) (그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 업무지시(보도공사 시공철저)에 의한 「보도공사 설계시공매뉴얼 Ver1.0(2013)」을 적용한 보차도경계석 변경[250*300*1000→ (175+25)*250*1000] 및 L형측구 품질향상 방침에 의한 시공변경을 반영함
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전-SMIH-14-31228호 (2014. 07.04)- 보도공사 시공철저(보도시공지침적용) 요청

· 현장실정보고(경계석 및 측구 형식 변경 실정보고)제출 – 오정 제2014-221호(2014.10.13)

· 업무연락전 도시기반시설본부-14-42195호 (2014. 10.24)- 실정보고 승인알림