1		아동‧청소년 예술교육센터 조성

붙임 3

성장하는 아동․청소년 누구나 양질의 예술교육이 보편적으로 제공될 수 있도록 지역을 기반으로 한 예술교육센터를 조성하고자 함

Ⅰ		사업개요

❍ 사업내용

- 대상부지 : 김포가압장(양천구 남부순환로 64길 서서울호수공원 내)

- 규    모 : 부지 11,027㎡, 건물 연면적 3,404㎡(수조 2,688㎡ 포함)

- 공간활용 : 교육공간, 가변형 공연장, 썬큰가든(체험‧놀이공간), 연구‧지원공간 등

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2015.12.(’16. 1월 개관 예정)

❍ ’14년 예산액 : 2,000백만원

※ 총사업비 : 2,911백만원 (’14년 :  2,000백만원 , ’15년 이후 : 911백만원)

(단위:백만원)

구 분		2014예산	2013예산	증 감	산 출 내 역
계		2,000	-	2,000
	시설비	1,969	-	1,969	·1,969백만원 × 1개소
	감리비	24	-	24	· 24백만원 × 1개소
	시설부대비	7	-	7	· 7백만원 × 1개소

❍ 추진방식 : 직접사업 수행

-

Ⅱ		2014년 추진현황

□ 그간 추진실적

❍ 2013.11.  김포가압장 활용을 위한 실·본부·국장 회의 개최(2회)

- 참석 : 시장, 문화관광디자인본부장, 행정국장, 푸른도시국장, 도시기반시설본부장 등

- 내용 : 김포가압장 리모델링, 활용방안 등 논의

❍ 2014. 1. ~ 5. 전문가 자문회의 실시(7회)

-「아동·청소년 예술교육센터」조성을 위한 자문위원회 구성·운영(4회)

- 건축, 문화예술교육 분야별 전문가 자문회의 개최(3회)

❍ 2014. 2. ~ 4. 김포가압장 시설물 정밀안전진단 용역

- 용역 수행기관 : ㈜석산구조안전기술사사무소

- 종합평가 등급 : D등급

➡ 환경개선 사업으로 생애주기와 잔존수명 등 개선, 내구성 회복 가능 : B등급 확보

※ 시설물 안전등급(시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제11조의 5, 별표3의2)

- B등급(양호) : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태

- D등급(미흡) : 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태

❍ 2014. 3. ~ 5. 기본계획수립 용역

- 용역 수행기관 : 성균건축도시설계원

- 용역 내용 : 김포가압장 현황분석, 기본계획(안) 등

❍ 2014. 7. 아동·청소년 예술교육센터 조성·운영 기본계획 수립(문화정책과)

설계 의뢰(→ 도시기반시설본부)

❍ 2014. 8. 설계용역 기술심사 타당성 심사

❍ 최근 3년간 예산집행 실적(’14.9월 현재 기준)

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2012	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	2,000	-	-	2,000	38	-	1,962	1.9%

□ 향후계획

❍ 2014. 9. ~ (개관시까지)   프로그램 기획 및 구체화(서울문화재단)

❍ 2014. 9. ~ 11.         설계공모 및 선정

❍ 2014.12. ~ 2015. 4.   기본 및 실시설계 용역

❍ 2015. 5. ~ 12.         리모델링 공사

❍ 2016. 1. ~              개관 및 운영(서울문화재단)

Ⅲ		성과분석

❍ 잘된 점

- 2003년 용도폐쇄된 이래 장기간 방치되어 안전, 도시미관 등 지역의 골칫거리로 전락했던 김포가압장의 활용방안을 모색하여 예술교육센터로 조성

- 폐산업시설의 장소성‧역사성을 보존하면서 문화예술로 살려낸다는 점에서 도시재생의 효과 기대

❍ 보완할 점

- 아동‧청소년 누구나 양질의 예술교육을 받을 수 있는 보편적 예술교육 제공 및 공간 활용도를 높이기 위해서 학교 교육과정과의 연계가 필요

□ 정규 교육과정(창의적 체험활동, 자유학기제, 방과후 학교 등)과 연계하여 주변 학교들이 적극 참여할 수 있도록 학교 현장의 수요를 반영한 프로그램 개발‧운영 등 교육청과 협력 추진

□ 향후 학교, 학년 단위 참여를 독려하기 위하여 학교와 지역예술교육센터 등을 순회하는 문화버스(셔틀버스) 추진 검토