<아차산 문화벨트 사업>

1. 사업개요

◦ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2017. 12.

◦ 사 업 비 : 3,791백만원(국비 2,654백만원, 시도비 341백만원, 구비 796백만원)

◦ 사업주체 : (주관) 광진구/ (참여) 중랑구, 구리시

◦ 주요 사업내용

- 아차산성 복원정비 : 망대지 보수정비(발굴조사, 실시설계, 보수공사)

- 역사생태 학습장(역사‧생태학습장, 숲 체험장) 및 힐링공간 조성

- 아차산 통합관리 및 홍보사업 강화

2. 추진실적(사업진척률 : 5%)

◦ 2015. 6.19 : 농림축산식품부 사업 기본 계획 승인

◦ 2015. 9. 1. : 역사‧생태 학습장 조성 기본계획 용역 발주(구리시)

◦ 2015. 9.   : 숲 체험장 조성 기본계획 수립 및 실시설계 용역 발주(중랑구)

◦ 2015. 9.22 : 아차산 망대지 보수정비 계약심사 완료(광진구)

◦ 2015.10.12 : 아차산성 망대지 발굴조사 계획수립, 업체선정(광진구)

◦ 2015.10.29 : 발굴조사 용역 계약(광진구)

3. 향후계획

◦ 2015. 11. : 문화재청 현상변경 및 발굴조사 허가(광진구)

◦ 2015. 12. : 역사‧생태 학습장 기본 및 실시설계(구리시)

◦ 2016. 2.  : 청소년 모험의 숲 조성공사 발주(중랑구)

◦ 2016. 3.  : 역사‧생태 학습장 조성사업 공사 발주(구리시)

◦ 2016. 6.  : 아차산성 망대지 발굴조사 준공(광진구)

◦ 2016. 6.  : 아차산성 망대지 보수공사 실시설계 발주(광진구)

◦ 2016. 8.  : 청소년 모험의 숲 조성공사 준공(중랑구)

◦ 2016.10.  : 아차산성 망대지 보수공사 착공(광진구)

◦ 2016.11. : 역사‧생태학습장 조성사업 공사 준공(구리시)

◦ 2017. 2. : 녹색 복지 숲 조성 및 등산로 정비 공사 발주(중랑구)

◦ 2017. 3. : 아차산 종합안내시스템 개발

◦ 2017. 5. : 망대지 주변 정비 및 사계절 힐링공간 조성 공사 착공(광진구)

◦ 2017.12. : 녹색 복지 숲 조성 및 등산로 정비 공사 준공(중랑구)

4. 사업비 집행내역

(단위 : 백만원)

시군	총사업비				집행액				집행율(%)
	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
계	3,791	2,654	1,137	0	0	0	0	0
광진구	1,600	1,120	480	0	0	0	0	0	0
중랑구	1,021	715	306	0	0	0	0	0	0
구리시	1,170	819	351	0	0	0	0	0	0

* 집행액은 실제 예산이 집행된 금액을 기재(사업단 등에 교부한 금액이 아님)

5. 집행부진 사유 및 대책

◦ 사업계획 및 예산변경이 잦아 사업추진 방향과 일정 차질

→ 구체적 기본계획 수립 후 2016년 실시설계 및 공사착공 추진

◦ 국가지정문화재(사적 제234호 아차산성) 보수정비 공사와 연계된 사업이므로 문화재청과 사전 협의 기간 필요

→ 전체 사업기간에 맞추기 위하여 협의와 허가 절차 이행에 만전을 기함

6. 애로 및 건의사항

◦ 문화재청의 현상변경 허가, 발굴조사 허가 및 공사에 따른 설계승인 등의 협의 과정을 진행하는 과정에서 일정에 변수가 발생할 수 있음.

◦ 사업대상지 대부분 국유지 또는 문화재보호구역으로 협의절차 필요

→ 산림청 및 문화재청에 행복생활권사업 협의절차 간소화 협조 요청