설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제6차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 6 월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 06. 15.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		작업자 추락방지용 안전발판 설치			요청금액		증) 100,640천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - Plate Girder 상부 작업시 작업자 추락방지 및 안전성 확보를 위해 안전발판 설치
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 적용단가는 설계도서 누락 등에 의한 변경으로 낙찰율 적용

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제6차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 6 월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 06. 15.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		가림막 디자인(시안) 변경 설치			요청금액		증) 136,792천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		제도, 기준변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 도시미관 및 홍보 효과를 극대화 하기 위해서 디자인 가림막(시안) 변경 및 추가 설치 - 시인성 확보 및 장기간 품질유지를 위하여 디자인 가림막의 재질 3M시트로 변경 - 디자인 가림막의 작업시간을 주간에서 야간으로 변경
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 가림막 시공 등 기 계약된 단가가 있으면 계약단가 적용하고 단가적용이 곤란한 실사출력, 출력지 변경, UV코팅 등에 대하여 견적단가 적용 ○ P4, P7공사기간이 서로 상이하니 확인 후 반영 ○ P26 단가 변경현황 중 가림막 설치장비 당초477,849원에서 695,048원으로 변경된 증가 원인 작성 ○ P33 견적대비표 가림막설치장비가 도로, 철도구간의 단위(㎡→ 댓수)를 수정하고 설치장비비 표기에서 계림과 극동이 서로 바뀌었으므로 수정