준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명: 2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사

나. 계약업체: 물춤워터아트㈜ 대표 신건수

다. 계약금액: 금339,867,000원

라. 계약일자: 2018. 4. 6.

마. 착수일자: 2018. 4. 9.

바. 준공일자: 2018. 8. 30.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한: (당초) 2018. 4. 6. ~ 2018. 8. 30

(변경) 2018. 4. 6. ~ 2018. 9. 21

나. 연기사유 귀책소재: 한강사업본부

다. 지체상금 부과여부: 미부과

라. 연기사유: 야외수영장 운영기간 중 시설물 파손에 대한 응급복구

2018년  8월 20일

기반시설과장  나철흠  (인)

한강사업본부(분임)경리관 귀하