준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명: 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사

나. 계약업체

- 주계약자 : 이화종합건설(주) 대표 우경식

- 부계약자 : (주)신 영 토 건 대표 이용완

다. 계약금액 : 금1,831,862,000원(1차 금1,588,334,000원)

라. 계약기간

- 총  차 : 2018. 12. 20. ~ 2019. 12. 25.

- 1   차 : 2018. 12. 20. ~ 2019.  6. 30.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

- 총  차 : 변경없음

- 1   차 : 당초 2019.  6. 30 → 변경 2019. 9. 30

나. 연기사유 귀책소재: 한강사업본부

다. 지체상금 부과여부: 미부과

라. 연기사유: 설계 오류 정정에 따른 절대공기 부족

2019년  6월 13일

기반시설과장  라철흠  (인)

한강사업본부(분임)경리관 귀하