준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공  사  명 : 양평교 보수공사

나. 계 약 업 체 : ㈜씨에스에이코스믹

다. 계 약  금 액 : 금341,280,500원(금삼억사천일백이십팔만오백원)

라. 계약년월일 : 2019.   3.  28.

마. 착수년월일 : 2019.   4.  10.

바. 준공예정일 : 2019.   8.  24.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다

가. 연기기한 : 2019. 11. 8.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 관급자재(아스콘) 계약 지연에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기 필요

2019. 8. 16.

교량안전과장      김 종 호  (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하