겨울철 추위·난방비·미세먼지 잡는

사회복지시설 등 친환경콘덴싱보일러 지원계획

따뜻한 겨울나기 및 미세먼지 저감을 위해 에너지빈곤층 등의 노후보일러를 친환경콘덴싱보일러 교체·지원하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 에너지빈곤층 및 사회복지시설 친환경콘덴싱보일러 교체

○ 추진기간 : '18.12.1. ~ '19.2.28.

- (1차 접수 마감) '18.11.26.~12.10. / 175개소 270여대 접수

- (2차 접수 중) '18.12.27.~'19.1.31. / 선착순 진행

○ 지원대상 : 8년 이상 된 노후보일러를 보유한 사회복지시설 등

- 도시재생지역 내 사회복지시설 우선 지원 (노원구 중계·상계동 등)

- 임차가구의 경우 임차료 상향금지 등 ‘임대인 동의서’를 받은 가구에 한해 교체

- 5만kcal/h 이하의 가정용 보일러 지원 (중대형 보일러 제외)

○ 추진기관 : 서울특별시사회복지협의회 (서울에너지복지시민기금 운영기관)

- 서울시사회복지협의회에서 배정된 물량에 대한 전자수의계약 체결

○ 교체기준

- 환경부 환경마크 인증을 받은 친환경콘덴싱보일러

- 다만, 설치공간 협소, 배수관 미설치 등으로 친환경콘덴싱보일러 설치가    불가능한 시설 및 가정에 한해서만 NOx(질소산화물 배출농도) 1등급    일반보일러로 대체하여 시공

○ 사업예산 : 526백만원 (서울에너지복지시민기금 / 580여대)

- 신한희망재단 500백만원, SK E&S 26백만원 지정기부

○ 추진방법

- 사회복지시설을 관리·지원하는 서울시 및 자치구 복지부서, 서울시사회    복지관협회, 서울시아동복지협회 등을 대상으로 신청공문 발송

- 구별 신청수량에 따라 6개 보일러 제조사별로 물량 배분

□ 보일러제조사별 배정현황

(단위 : 대 / 접수 건 중 가정용보일러만 적용)

연번	보일러사	자치구	시공수량	비고
계	6개사	22개 구	243	시설 194 가구 49
1	경동나비엔	강동, 동작, 서대문, 성동, 송파	44	시설 38 가구 6
2	귀뚜라미	영등포, 강서, 관악	39	시설 34 가구 5
3	대성셀틱에너시스	은평, 중랑, 성북, 도봉	40	시설 28 가구 12
4	롯데이엔엠	강북, 노원, 동대문, 종로, 중구 중랑	39	시설 29 가구 10
5	린나이	강남, 구로, 금천, 양천	43	시설 36 가구 7
6	알토엔대우	강북, 도봉, 용산	38	시설 29 가구 9

※ 25개 구 중 마포, 광진, 서초구는 없음

□ 추진과정

친환경콘덴싱보일러 설치가능여부 및 견적 확인을 위한 현장방문	➩	친환경콘덴싱보일러 설치 가능한 시설(가구)에 대한 견적가로 계약 체결	➩	친환경콘덴싱보일러 시공 및 대금 지급	➩
보일러 업체별		서울시사회복지협의회		보일러 업체별

2차 신청·접수분에 대한 설치 가능여부 및 견적 확인	➩	친환경콘덴싱보일러 시공	➩	견적 수시 확인 후 계약, 대금 집행
서울시사회복지협의회 보일러 업체별		보일러 업체별		서울시사회복지협의회

※ 현장방문 후 친환경콘덴싱보일러 설치가 불가능한 시설(가구)에 취합·정리 후 별도 Nox1등급 일반보일러로 교체

□ 향후추진일정

○ '18.12.27.(목) ~ '19.1.31.(목) : 2차 신청 접수

○ 1.10.(목) 限 : 친환경콘덴싱 보일러 1차 신청분 현장결과 확인

○ 1.16.(수) 限 : 계약체결

○ 1.28.(월) 限 : 보일러 시공 및 대금결제

○ 2.14.(목) 限 : 친환경콘덴싱 보일러 2차 신청분 현장결과 확인

○ 2.19.(화) 限 : 계약체결

○ 2.28.(목) 限 : 보일러 시공 및 대금결제

□ 행정사항

○ 1차 접수분 시공 후 보일러업체의 기한 내 업무처리 결과 등 성과, 사업 추진의 적극성 등을 토대로 2차 계약 추진

○ 1.31.접수 후 사업비 잔액에 대해서는 '19.10월부터 사업 재추진