현  장  설  명  서

1. 공 사 명 : 가산동 319-7번지간 송배수관정비공사(압입공사 포함)

2. 공사목적 : 본 공사는 하수도 박스 압입을 통하여 단절되어 있는 상수도관을 연결하여 기존 급수지역을 순환관망 형성 안정적으로 수돗물을 공급하는데 목적이 있음.

3. 공사위치 : 금천구 가산동 319-7번지간

4. 공사개요 : (구경) 400~600㎜. (연장) 150m 《압입공사 : (구경) 600㎜, (연장) 30m》

5. 총사업비 : 543,845천원

(도급비 426,195천원. 관급비 64,650천원. 복구비 및 기타 53,000천원)

6. 관급자재 : 에폭시수지분체도장닥타일주철직관 및 이형관등 (총 41종)

- 수도자재관리센터(노량진)출고 → 현장반입(가산동 319-7번지), 강관은 현장도착도

7. 골재원 현황 : 환토용모래(쇄사 : 부순모래) 사급 구매하여 현장 반입

8. 공사기간 : 착공일로부터 120일간 (공휴일 및 휴지일수 포함)

9. 설계서 열람장소 : 남부수도사업소 3층 사무실 (급수운영과 ☎ 3146-4556)

10. 하자보수 기간

- 하자보수 기간은 준공검사일로부터 3년간으로 한다.

11. 입찰참가자격 : 상 · 하수도설비공사업 면허소지자

12. 공사예정공정표

공 종	공 정 표
	5월			6월			7월			8월				9월
1.토 공
2.가시설공
3.부 설 공
4.부 대 공

13. 부지임대료 : 산출금액 범위에서 사후정산 항목임

14. 설계변경 사항은 물가변동, 물량증감등 계약내용의 변경사항이 발생할 경우 관련규정에 의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

- 공사계약 일반조건 제19조

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조