협의율 적용 요청서

당 현장의 배수지 현장사무실 원상복구 및 부대시설 추가 설치공사 변경은 당초 설계 수량 누락 부분 및 현장 여건 변화에 따라 발주처의 지시로 준공 후 시설물 유지관리 및 배수지의 사용성을 향상 하고자, 설계변경 예정사항으로 신규 단가에 대하여 도급 낙찰율을 적용시 공사 실투입 비용의 증가로 인한 공사 진행이 곤란하므로 공사계약 일반조건에 근거하여,

발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함)로서 증가된 물량이나 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자간에 단가 근거자료를 제시하여 협의 결정한 단가를 적용하며,

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 단가를 결정하도록 규정하고 있으므로 협의율의 적용을 요청함.

2 0 1 9.  10.    .

수 급 인    국 사 봉 배 수 지   건 설 공 사

상  호 : 청광종합건설(주)

현장대리인 : 임  재  현 (인)