마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

인계・인수서

2014년 7월

서울특별시 도시기반시설본부

- 인 계 인 수 목 록 표 -

1. 사업 개요

1-1) 사업개요

1-2) 사업내용

2. 인계인수 시설물 현황

2-1) 토목분야

2-2) 조경분야

3. 예비품 및 공구류

3-1) 토목분야 - 없음.

3-2) 조경분야 - 없음.

4. 인계인수 도서

4-1) 준공도서 - 준공내역서, 준공도면, 수량산출서 - 별첨

4-2) 최종 감리 결과보고서 - 해당없음.

4-3) 종합시운전 결과보고서 - 해당없음.

4-4) 유지관리지침서 - 해당없음.

4-5) 인수인계도서 CD - 별첨

1. 사업개요

1-1 사업개요

1. 사 업 명 : 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

2. 위    치 : 서울특별시 강서구 마곡동 91번지 (서남물재생센터 내)

3. 조성면적 : 서남물재생센터 - 890,000m2, 마곡재생수공급시설  - 12,000m2

4. 사업목적 : 서남물재생센터의 양질의 처리수를 재이용하여 안정적, 경제적인 수자원확보

마곡 택지지구에 생활용수, 조경용수 공급으로 방류수역인 한강의 수질오염 부하량

최소화

5. 시설용량 : 재생수 생산시설 Q = 20,000m3/일

6. 주요시설 :  - 생물여과지 : 6.0m x 8.0m x 3.5m, 6지 (질소, 인제거)

- 오존  설비 : 4.15Kg/HR @10.0wt% (색도 및 탁도제거, 소독)

7. 공사금액 및 공사기간: 전체 6,803,140,000원 (2011.10.24 ~ 2016.07.31)

- 1차공사 996,000,000원 (2011.10.24 ~ 2012.05.31)

- 2차공사 1,589,843,510원 (2012.03.15 ~ 2013.05.31)

- 3차공사 2,799,000,000원 (2013.03.25 ~ 2014.06.16)

8. 시 공 사 : 유호산업개발(주)

9. 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

1-2 사업내용

재생수공급시설

역세척수이송관로

유입관로

-. 재생수처리시설 구조물공사 [W=29.0m×L=67.5m×H=17.7m] : 유입수조, 생물여과지, 유출수로,

오존발생기실, 섬유여과기실, 역세척수 저류조, 방류수조, 펌프실, 공기압축기실, 오존발생기실,

오존제어실, 약품저장실, TMS실, 역세송풍기실, 전기실, 공구실

-. 유입관로(D500) L=734m, 유출관로(D600) L=24m, 역세척수 이송관로(D200) L=394m

-. 포장공사(관로 및 진입도로포장) A=31.5a

-. 조경공사(수목이식 및 식재공사) 1식

2. 인계인수 시설물현황

2-1) 토목분야

1. 토목공사

시설내용	규 격	단 위	수 량	업체명	대표자	전화번호	비 고
구조물공사	W 29m X L 67.5m X H 17.7m	EA	1	청미건설	양국진외 1명	02-419-1956	구조물
	일체형시트 (외벽) 일체형시트 (방근+방수)	M2 M2	2723 1677	화인건영	최동현	02-796-1996	외부방수
	방수[내벽]-기계실 방수[내벽]-수조 방수[내벽]-오존	M2 M2 M2	5231 5518 416	고산건업	권민설	02-877-0882	내부방수
관로공	DCIP D600 (역세척수이송관로) DCIP D500 (유입관로) DCIP D200 (유출관로)	M M M	734 24 394	엄다종합 건설	심영숙	02-3395-5540
포장공	관로, 진입도로	a	31.5	엄다종합 건설	심영숙	02-3395-5540
우수공,기타	흄관부설 D300 기타공사	M 식	63 1	유호산업 개발	유정환	02-556-8411

※ NOTE : 1). 재생수 처리시설 구조물은 공사정지 기간에 대한 인수.인계임.

- 구조물 출입구 및 자재반입구 통제를 위한 인수.인계(시건장치)

2). 2015년 잔여공사 시행시 시공사에서 재인수 하여 기계공사 완료 후 인수.인계 예정임.

2-2) 조경분야

1. 수목이식

시설내용	규 격	단 위	수 량	업체명	대표자	전화번호	비고
구상나무(이식)	R5	주	1	유호산업개발	유정환	02-556-8411
구상나무(이식)	R8	주	1
둥근소나무(이식)	R23	주	1
둥근소나무(이식)	R19	주	1
둥근소나무(이식)	R14	주	1
소나무(이식)	R10	주	5
소나무(이식)	R15	주	14
소나무(이식)	R20	주	15
소나무(이식)	R25	주	17
소나무(이식)	R28	주	3
소나무(이식)	R30	주	6
소나무(이식)	R36	주	3
스트로브 잣나무(이식)	R10	주	4
잣나무(이식)	R12	주	7
잣나무(이식)	R15	주	6
잣나무(이식)	R18	주	2
스트로브 잣나무(이식)	R20	주	15
잣나무(이식)	R25	주	18
스트로브 잣나무(이식)	R30	주	3
느티나무(이식)	R30	주	2
느티나무(이식)	R34	주	1
느티나무(이식)	R35	주	1
느티나무(이식)	R39	주	1
느티나무(이식)	R41	주	1
느티나무(이식)	R46	주	1
느티나무(이식)	R50	주	1
느티나무(이식)	R52	주	1
모과나무(이식)	R15	주	2
모과나무(이식)	R20	주	3
대추나무(이식)	R14	주	1
대추나무(이식)	R12	주	1
대추나무(이식)	R10	주	1
등나무(이식)	R19	주	1
등나무(이식)	R10	주	2
때죽나무(이식)	R19	주	1
때죽나무(이식)	R17	주	2
때죽나무(이식)	R15	주	1
목련(이식)	R20	주	1
목련(이식)	R10	주	5
목련(이식)	R12	주	2
살구나무(이식)	R8	주	3
살구나무(이식)	R12	주	2
살구나무(이식)	R20	주	1
은행나무(이식)	B19	주	1
은행나무(이식)	R20	주	9
은행나무(이식)	B21	주	2
은행나무(이식)	B23	주	1
은행나무(이식)	R25	주	1
은행나무(이식)	R30	주	1
자작나무(이식)	B7	주	2
자작나무(이식)	B10	주	2
자작나무(이식)	B12	주	2
자작나무(이식)	B15	주	1
자작나무(이식)	B18	주	2
철쭉(이식)	H1.2	주	100

2.식재공사

시설내용	규 격	단 위	수 량	업체명	대표자	전화번호	비고
스트로브잣나무	H2.0xW1.0	주	99	수정조경개발	심재형	02-832-2646
꽃사과	H2.5xR6	주	20
마가목	H2.5xR6	주	16
산수유	H2.5xR6	주	25
이팝나무	H2.5xR6	주	16
매화나무	H2.5xR6	주	26
왕벗나무	H2.5xR6	주	25
청단풍	H2.5xR8	주	28
개나리	H1.0x3가지	주	500
백철쭉	H0.4xW0.4	주	500
자산홍	H0.4xW0.4	주	963
조팝나무	H0.8xW0.4	주	550
맥문동	8cm	본	1,300
부용	10~15분얼	본	250
흰줄무늬사사	10cm	본	600
회양목	H0.4xW0.5	주	262
라일락	H1.2xW0.4	주	40
잔디(평떼)	0.3x0.3x0.03	㎡	4,542.28

※ NOTE : 1). 금회 준공수량 외 차폐용으로 추가 식재사항 (추후 실정보고 예정)

- 자산홍(H0.4*W0.4) 750주

- 회양목(H0.4*W0.5) 300주

2). 부지 외 가설사무실 식재사항 (추후 실정보고 예정)

- 잔디(0.3*0.3*0.03) 500M2

3. 예비품 및 공구류

- 해 당 없 음 -

4. 인수인계 도서

4-1) 준공도서 - 준공내역서, 준공도면, 수량산출서 - 별첨

4-2) 최종 감리 결과보고서 - 해당없음

4-3) 종합시운전 결과보고서 - 해당없음

4-4) 유지관리지침서 - 해당없음

4-5) 인수인계도서 CD (별첨)

시설공사 인계 ․ 인수서

□ 공 사 명 : 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

□ 위    치 : 서울 강서구 마곡동 91번지 일원

□ 공사내역

- 마곡재생수공급시설  - 12,000m2

- 토목공사, 조경공사

□ 공사기간 : 2011. 10.24 ~ 2014. 06.16 (1~3차공사)

□ 도 급 비 : 5,384,843,510원 (1~3차공사)

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 도 급 자 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

- 서울특별시 강남구 테헤란로 19길70(역삼동)

□ 연대보증 : 없음.

□ 하자담보책임기간 : 지방계약법, 시행규칙 제68조에 의함

□ 감 리 자 : (주)도화엔지니어링 대표이사 노진명외1

□ 인계 ․ 인수도서 목록 : 별 첨

위 시설물을 인계 ․ 인수함

2014.    .    .

인계자 :  서울특별시 도시기반시설본부장 (인)

(점검자)     방재안전시설부      지방시설사무관    박희천  (인)

지방시설사무관  신용우  (인)

지방시설주사  김상용  (인)

지방녹지주사  임성은  (인)

인수자 :  서   울   특   별   시   장 (인)

(점검자)     물재생시설과     지방시설사무관           (인)

지방시설주사보           (인)

지방시설주사보           (인)

인계 ․ 인수 도서 및 자료목록

□ 공사명 : 서남물재생센터 고도처리개량공사

구 분	자 료 내 역	수 량	비 고
인계인수도서	ㅇ 인계 ․ 인수서	3부
	ㅇ 준공내역서	3부
	ㅇ 준공도면	3부
	ㅇ 수량산출서	3부
	ㅇ 최종 감리 결과보고서	해당없음
	ㅇ 종합시운전 결과보고서	해당없음
	ㅇ 유지관리지침서	해당없음
	ㅇ 인수인계도서 CD	3부

위 관련 도서를 인계 ․ 인수함

2014.    .    .

인계자  :  서울특별시 도시기반시설본부장 (인)

(점검자)     방재안전시설부      지방시설사무관    박희천  (인)

지방시설사무관  신용우  (인)

지방시설주사  김상용  (인)

지방녹지주사  임성은  (인)

인수자  :  서   울   특   별   시   장 (인)

(점검자)     물재생시설과     지방시설사무관           (인)

지방시설주사보           (인)

지방시설주사보           (인)