보도블록10계명 백서 제작

(보도환경개선과)

□ 백서 제작 개요

◦계약기간 : 2014.2.3.~2015.3.31

◦계약내용 : 백서 원고작성, 편집, 디자인, 인쇄, 제본 등 일체

- 서울시 보도의 역사, 보도블록10계명 추진내용 및 성과

- 해외도시 보도환경, 향후 서울시 정책 발전방향

◦계약금액 : 19,388,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물 관리(도시개발), 걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		156,000,000	20,000,000	19,388,000	0	19,388,000	136,612,000
일반운영비		156,000,000	20,000,000	19,388,000	0	19,388,000	136,612,000
	사무관리비	156,000,000	20,000,000	19,388,000	0	19,388,000	136,612,000

◦이월사유

- 서울시 보도블록의 역사와 보도블록10계명의 추진과정을 기록으로 남기고 향후 서울시 보도정책의 길잡이로 삼고자 제작중인 백서의 다양한 내용 수록 및 자료의 정확성 확보를 위한 사실 확인이 필요하여 이월함

화양동 대학 문화의 거리 조성

(보도환경개선과 / 광진구청 도로과)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 광진구 자양4동 및 화양동 일대

◦ 규    모 : A=88,300㎡

◦ 기    간 : 2014. 7. 8 ~ 2015. 6. 30

◦ 총사업비 : 250,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도로시설물 관리(도시개발), 화양동 대학 문화의 거리 조성                   시설비 및 부대비, 시설비(205-401-01)

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		250,000,000	182,700,000	164,300,000	98,580,000	65,720,000 ( 0)	85,700,000
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
설 계 비		250,000,000	182,700,000	164,300,000	98,580,000	65,720,000 ( 0)	85,700,000
이전비․기타						( )

◦ 이월사유

- 화양동 대학 문화의 거리 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진과업에 대한

- 문화적인 측면 추가 검토와 외부 전문가 의견 수렴 등을 위하여 용역 준공기한         연기에 따른 사고이월