서울시 도로시설물 C등급 이하 현황

(2020. 12. 31일 기준)

연번	안전 등급	시설명	종별	준공 년도	보수ㆍ보강 현황	진단ㆍ점검 현황	등급상향 계획	관리부서 (주관부서)
1	C급	성산대교	1종	‘80	-성산대교 성능개선 공사 중 (‘17년 ~ ‘25년)	-‘16년 정밀안전진단 완료 -‘20년 정밀안전점검 완료	-성능개선 사업완료(‘25년 예정) 후 재평가	교량안전과
2	C급	장월교	3종	‘91	-장월교 개축공사 시행 (‘20년 ~ ‘23년)	-‘19년 정밀안전진단 완료 (등급하향 B→C)	-개축공사 완료(‘20년~23년 예정) 후 재평가	북부 (시설)
3	C급	중랑교	2종	‘71	-‘18년 일상유지보수 완료	-‘19년 정밀안전점검 완료 (등급하향 B→C)	-‘20년 일상유지보수 실시 -‘21년 정밀안전점검 시행 후 재평가	성동 (시설)
4	C급	동진교	법정외	‘71	-‘18년 내진성능개선 공사 완료	-‘19년 정밀안전점검 완료 (등급하향 B→C)	-‘20년 일상유지보수 실시 -‘21년 정밀안전점검 시행 후 재평가	성동 (시설)
5	C급	목동교	2종	‘68	-‘20~21년 보수공사 시행 중	-’19년 정밀안전점검 완료	-‘20년~‘21년 보수공사 시행 -‘21년 정밀안전점검 시행 후 재평가	강서 (시설)
6	C급	홍제천고가교	1종	‘95	-‘19년 내진성능개선 공사 중 -‘20년 내진성능개선 공사 중 (장기계속)	-‘20년 정밀안전진단 완료 (등급하향 B→C)	-‘20년~‘21년 보수공사 시행 (교각 단면, 균열보수, 신축이음장치 보수) -‘21년 정밀안전점검 시행 후 재평가	공단 (시설)
7	C급	남산육교	법정외	‘61	-‘17년 보수공사 완료	-‘20년 정밀안전점검 완료 (안전성평가 : C등급)	-‘21년 공사시행 후 ‘22년 재평가 (교면방수 및 포장 등)	서부 (시설)
8	D급	서소문고가	2종	‘66	-‘19년 보수공사 실시 (교면포장 및 단면보수 등)	-‘19년 정밀안전진단 완료 (안전성평가 : D등급)	-‘20년~‘21년 개축 기본설계 실시 (기본설계 결과 개축 불가 판정 시 교각 단면보강 후 재평가)	서부 (시설)
9	C급	현저고가	2종	‘79	-‘16년 보수공사 완료	-‘19년 정밀안전점검 완료 (안전성평가 : C등급)	-‘20년 공사시행 후 ‘21년 재평가 (교면방수 및 포장 등)	서부 (시설)
10	C급	삼각지고가	2종	‘81	-‘16년 보수공사 완료	-‘20년 정밀안전점검 완료 (안전성평가 : C등급)	-‘21년 공사시행 후 ‘22년 재평가 (교면방수 및 포장 등)	서부 (시설)
11	D급	개봉철도고가	2종	‘77	-‘19~‘21년 성능개선 공사 중	-‘17년 정밀안전진단 완료 (안전성평가 : D등급) -‘20년 정밀안전점검 완료 (안전성평가 : D등급)	-‘18년 실시설계, ‘19~’21년 공사시행 (고가 바닥판 교체 추진) -‘22년 정밀안전점검 시행 후 재평가	강서 (시설)

※ C, D등급 시설물 증․감 : ‛17년 20개소(증 7개소) ⇒ ‛18년 16개소(감 4개소) ⇒ ‛19년 13개소(감 3개소) ⇒ ‛20년 9개소(감 4개소) ⇒ ‛21년 11개소(증 2개소)

- 보수공사 후 점검시기 미도래 등에 따른 평가등급 미반영