2017 회계년도 사고이월 사업설명서

(지하철 9호선 3단계)

2017. 12

도시기반시설본부

서울지하철 9호선3단계 918공구 건설공사 (9차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 잠실동아시아선수촌아파트앞 ~삼전동 한샘인테리어앞

◦규모 : L=1,290m, (정거장 165m, 본선 1,125m)

◦기간 :  2010. 02. 19 ~ 2018. 12. 31 (95.6%)

- 2017. 03. 23 ~ 2017. 12. 31 (100%)

◦총사업비 : 143,297백만원 (9차 : 23,008백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		23,008,000,000	23,008,000,000	23,008,000,000	14,309,520,000	8,698,480,000
시 설 비		23,008,000,000	23,008,000,000	23,008,000,000	14,309,520,000	8,698,480,000
	공 사 비	23,008,000,000	23,008,000,000	23,008,000,000	14,309,520,000	8,698,480,000

◦이월사유

- 공동도급사(삼환기업㈜)의 회생절차 시행 및 계약해지 통보에 따른 계약변경 절차 이행으로 공동도급사간 계약변경 합의 후 준공금 집행

서울지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 폐기물처리용역(6차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦ 위  치: 서울시 송파구 석촌동 석촌역 ~ 송파구 방이동 올림픽공원 남4문

◦ 공사규모 : 총연장 1,390.5m

- 본선(개착) : 118.9m, 본선(터널) : 934.5m

- 정거장(개착) : 187.5m, 환기구 4개소(개착): 149.6m

◦기간 : 총괄 - 2010.08.27 ～  2018.12.31. (71.4%)

6차 - 2017.01.04 ～  2018.06.31. (0%)

◦총사업비 : 709백만원 (6차 : 50백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계 건설, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
시 설 비		50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
	용 역 비	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0

◦이월사유

-『서울지하철9호선3단계 920공구 건설공사』건설폐기물발생시기 미도래

※ 계약기간 : 2017.01.04 ~ 2018.06.31.

서울지하철9호선 3단계 921공구 건설공사 폐기물처리용역(7차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 송파구 방이동 올림픽공원 남4문 ~ 5호선 올림픽공원역

◦규모 : 총 연장 1,742m(정거장 2개소, 본선터널 1,360M, 본선환기구 3개소)

총괄) 폐아스콘 6,334톤, 폐콘크리트 29,531톤

7차)  폐아스콘 1,174톤, 폐콘크리트  2,276톤

◦기간 : 총괄) 2010.08.27. ~ 2018.12.31.

7차) 2017.09.06. ~ 2018.05.31.

◦총사업비 : 634,605천원 (7차 :60,000천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계 건설, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		60,000,000	60,000,000	60,000,000	48,000,000	12,000,000	0
시 설 비		60,000,000	60,000,000	60,000,000	48,000,000	12,000,000	0
	용 역 비	60,000,000	60,000,000	60,000,000	48,000,000	12,000,000	0

◦이월사유

-『서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사』건설폐기물발생시기 미도래

※ 계약기간 : 2017. 9. 6 ~ 2018. 5. 31

서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사 폐기물처리용역(7차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 송파구 오륜동 및 강동구 둔촌동 일원

◦규모 : 폐콘크리트(4,538ton), 폐아스콘(10,291ton)

◦기간 : 2010.11.10 ～ 2018.12.31.(94.9%)

- 2017.02.01 ～ 2018.12.31.(70.2%)

◦총사업비 : 244백만원 (7차 : 41백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		40,725,000	40,725,000	40,725,000	28,585,000	12,140,000	0
시 설 비		40,725,000	40,725,000	40,725,000	28,585,000	12,140,000	0
	용 역 비	40,725,000	40,725,000	40,725,000	28,585,000	12,140,000	0

◦이월사유

-『서울지하철9호선3단계 922공구 건설공사』건설폐기물발생시기 미도래  ※ 계약기간 : 2017. 2. 1 ~ 2018. 12. 31

도시철도 9호선 전동차 70량 구매

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 건    명 : 도시철도 9호선 전동차 70량 구매

◦ 사업근거 : 행정1부시장 방침 제88호

※ 지하철 9호선 혼잡도 개선 및 증차계획【교통정책과-4810(`15. 3. 10)】

◦ 구매수량 : 70량(Tc: 18량, M1: 18량, M2: 17량, T: 17량)

※ 144량(4량 36편성) ⇒ 214량(6량 17편성, 4량 28편성)

◦ 기  간 : 2016. 12. 12 ~ 2018. 12. 31(0%)

◦ 총사업비 : 131,600,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		17,397,495,280	17,397,495,280	17,397,495,280	6,486,679,000	10,910,816,280	0
시 설 비		17,397,495,280	17,397,495,280	17,397,495,280	6,486,679,000	10,910,816,280	0
	차 량 비	17,397,495,280	17,397,495,280	17,397,495,280	6,486,679,000	10,910,816,280	0

◦ 이월사유

-  차량 시운전 시행 중으로 시운전 미완료에 따른 차량유보금 이월

도시철도 9호선 전동차 24량 구매

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 건    명: 도시철도 9호선 전동차 24량 구매

◦ 사업근거:

- 행정1부시장 방침 제88호

※ 지하철 9호선 혼잡도 개선 및 증차계획【교통정책과-4810(’15. 3. 10)】

- 행정1부시장 방침 제377호

※ 인천공항철도 직결 대응방안 마련 및 9호선 증차 추진방안【교통정책과-29348(’16. 12. 27.)】

◦ 구매수량: 24량(M2: 12량, T: 12량)

※ 246량(6량 33편성, 4량 12편성) ⇒ 270량(6량 45편성)

◦ 기  간 : 2017. 11. 28. ~ 2018. 12. 31(0%)

◦ 총사업비 : 40,392,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위: 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000	0	17,000,000,000	0
시 설 비		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000	0	17,000,000,000	0
	차 량 비	17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000	0	17,000,000,000	0

◦ 이월사유

- ’17. 11. 28. 계약 체결되어 연도내 선금 미집행에 따른 이월

지하철9호선 연장건설 3단계 2구간 송변전공사

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 공 사 명: 서울지하철 9호선연장건설(3단계) 2구간 송변전공사

◦ 위    치: 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

◦ 공사규모: 변전소(938)1개소, 수전선로 11Km, 연락송배전선로 40Km

◦ 공사기간: `15. 9. 2.~`18. 2.17. (2차; ‘16. 9. 1~`17.12.31)

◦ 총사업비: 총 4,703,036,098원 (2차: 3,232,736,098원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,732,736,098	2,732,736,098	2,732,736,098	2,092,000,000	640,736,000	98
시 설 비		2,732,736,098	2,732,736,098	2,732,736,098	2,092,000,000	640,736,000	98
	공 사 비	2,732,736,098	2,732,736,098	2,732,736,098	2,092,000,000	640,736,000	98

◦ 이월사유

- 9호선 3단계 시기 미도래 공정 추진을 위한 준공기한 연기에 따른 공사비 집행 잔액 이월

※ 준공기한 연기 : `17.12.31. → `18.2.17.

지하철9호선 연장건설(3단계) 자동요금징수설비 제작구매

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 사업명 : 서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 자동요금징수설비 제작구매

◦ 위  치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

◦ 규  모 : 본선 9.14km, 정거장 8개소(931 ~ 938정거장)

- 승차권자동개집표기 1식

◦ 기  간 : 2013. 06. 20. ~ 2018. 12. 31.

◦ 총사업비 : 1,975,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,349,000,000	1,349,000,000	1,349,000,000	0	1,349,000,000	0
시 설 비		1,349,000,000	1,349,000,000	1,349,000,000	0	1,349,000,000	0
	자 재 비	1,349,000,000	1,349,000,000	1,349,000,000	0	1,349,000,000	0

◦ 이월사유

- 3단계 정거장 정보통신공사에 필요한 장비의 납품기한 미도래

※ 납품기한 : 2018. 12. 31.

지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비 물품 구매 설치

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 사업명 : 서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품구매설치

◦ 위  치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

◦ 규  모 : 본선 9.14km, 정거장 8개소(931 ~ 938정거장)

- 광송신기 또는 수신기 1식

◦ 기  간 : 2013. 03. 20. ~ 2018. 12. 31.

◦ 총사업비 : 8,586,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		7,084,000,000	7,084,000,000	7,084,000,000	3,263,000,000	3,821,000,000	0
시 설 비		7,084,000,000	7,084,000,000	7,084,000,000	3,263,000,000	3,821,000,000	0
	자 재 비	7,084,000,000	7,084,000,000	7,084,000,000	3,263,000,000	3,821,000,000	0

◦ 이월사유

- 3단계 정거장 정보통신공사에 필요한 장비의 납품기한 미도래

※ 납품기한 : 2018. 12. 31.

서울지하철 9호선3단계 918공구 건설공사 전면책임감리용역(8차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 잠실동아시아선수촌아파트앞 ~삼전동 한샘인테리어앞

◦규모 : L=1,290m, (정거장 165m, 본선 1,125m)

◦기간 :  2009. 11. 18 ~ 2018. 12. 31 (86.92%)

-  2017. 01. 02 ~ 2018. 08. 30 (61.87%)

◦총사업비 : 5,293백만원 (8차 : 1,358백만원)

(‘17년 예산 : 1,358백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,358,000,000	1,358,000,000	1,358,000,000	840,205,000	517,795,000	0
감 리 비		1,358,000,000	1,358,000,000	1,358,000,000	840,205,000	517,795,000	0
	용 역 비	1,358,000,000	1,358,000,000	1,358,000,000	840,205,000	517,795,000	0

◦이월사유

- 918공구전면책임감리용역(8차) 계약 준공기한 미도래에 따른 이월

※ 용역계약기간 : 2017.01.02 ~ 2018.08.30.

서울지하철 9호선3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역(8차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 송파구 삼전동(구 잠실병원) ~ 석촌동(8호선 석촌역)

◦규모 : 연장 1,560m (터널 : 1230m, 정거장 2개소)

◦기간 :  2009. 11. 18 ~ 2018. 12. 31 (84.51%)

- 2017. 01. 01 ~ 2018. 12. 14 (55.33%)

◦총사업비 : 6,843백만원 (8차 : 2,244백만원)

(‘17년 예산 : 2,244백만원 )

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,244,228,000	2,244,228,000	2,244,228,000	1,241,788,350	1,002,439,650	0
감 리 비		2,244,228,000	2,244,228,000	2,244,228,000	1,241,788,350	1,002,439,650	0
	용 역 비	2,244,228,000	2,244,228,000	2,244,228,000	1,241,788,350	1,002,439,650	0

◦이월사유

- 919공구전면책임감리용역(8차) 계약 준공기한 미도래에 따른 이월

※ 용역계약기간 : 2017.01.01. ~ 2018. 12.31

서울지하철 9호선3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역(8차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦ 위  치: 서울시 송파구 석촌동 석촌역 ~ 송파구 방이동 올림픽공원 남4문

◦ 공사규모 : 총연장 1,390.5m

⁃ 본선(개착) : 118.9m, 본선(터널) : 934.5m

⁃ 정거장(개착) : 187.5m, 환기구 4개소(개착): 149.6m

◦기간 : 총괄 2009. 11. 18 ~ 2018. 12. 31 (84.1%)

8차 2017. 01. 02 ~ 2018. 12. 31 (54.9%)

◦총사업비 : 5,282백만원 (8차 : 1,717백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,716,557,000	1,716,557,000	1,716,557,000	942,987,000	773,570,000	0
감 리 비		1,716,557,000	1,716,557,000	1,716,557,000	942,987,000	773,570,000	0
	용 역 비	1,716,557,000	1,716,557,000	1,716,557,000	942,987,000	773,570,000	0

◦이월사유

- 920공구전면책임감리용역(8차) 계약 준공기한 미도래에 따른 이월

※ 용역계약기간 : 2017.01.02 ~ 2018.12.31.

서울지하철 9호선3단계 923공구 건설공사 전면책임감리용역(8차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 둔촌동 산29번지 ~ 보훈병원 일원

◦규모 : 총연장 1,782m(개착1,168, 터널 410, 정거장 204)

◦기간 : ‘10.08.05~18.12.31 (43.1%)

- ‘17.08.26~18.12.31 (52.5%)

◦총사업비 : 4,979백만원 (941백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		940,560,000	940,560,000	940,560,000	323,000,000	617,560,000	0
감 리 비		940,560,000	940,560,000	940,560,000	323,000,000	617,560,000	0
	용 역 비	940,560,000	940,560,000	940,560,000	323,000,000	617,560,000	0

◦이월사유

- 923공구 전면책임감리용역(8차) 계약 준공기한 미도래에 따른 이월

※ 용역계약기간 : 2017.08. 26 ~ 2018. 12. 31

서울지하철 9호선3단계 궤도공사(1공구)

감독권한대행 등 건설사업관리용역(2차)

(건설총괄부/도시철도토목부)

□ 사업개요

◦위    치 : 잠실운동장~방이동 올림픽공원 남4문

◦규    모 : 궤도부설 9.482km

◦기    간 : ‘16.9.1 ～’18.1.31(공정율: 82.7%)

◦총사업비 : 933,972천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		773,972,000	773,972,000	773,972,000	640,380,000	133,592,000	0
감 리 비		773,972,000	773,972,000	773,972,000	640,380,000	133,592,000	0
	용 역 비	773,972,000	773,972,000	773,972,000	640,380,000	133,592,000	0

◦이월사유

- 9호선 3단계 궤도공사 1공구 전면책임감리용역(2차) 준공기한 미도래

※ 용역계약기간 : 2017.01. 01 ~ 2018. 01. 31.