1		사업명 : 생활권 공원녹지 조성사업(000구)

(내용은 예시입니다)

□  사업목적

○  (신명태명조 14)

□  사업개요

○  위    치 : 중구 신당동 산 844번지 일대(토지소유 : 시소유)

○  규    모 :

○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 400백만원(설계비 10백만원, 공사비 390백만원)

□  대상지 주변현황

○ 대상지 반경 500m이내에 안양천이 있으나 서부간선도로로 단절되어 대상지 주민은 안양천 접근이 어려운 실정임

○ 대상지는 아파트 및 주택 밀집지역이고, 인근에 초, 중, 고교가 위치하고 있으며, 반경 500m이내에 조성된 공원이 없어 공원서비스가 전무한 지역임

□  추진일정

○ 2018. 1       : 서울시 기술용역타당성 심사

○ 2018. 2 ~ 3 : 설계 용역

○ 2018. 3      : 설계 심의

○ 2018. 4      : 공사 발주

○ 2018. 5 ~10 : 공사 시행

□  사업효과

○

□  사업비 산출내역

구 분	공 종	규 격	단위	수량	단 가	금액(천원)	비 고
계						280,000
1. 만수천, 독산자연공원 일대
	진입로 정비	5m×50m	식	1	3,000	3,000	만수천공원
	차량 출입문	H4.0×L4.0×2개	조	1	500	500
	마사토포장(광장)	4.0m×40m×20T	㎡	360	10	3,600
	마사토포장(만수천)	“	㎡	500	10	5,000
	마사토포장(상록)	“	㎡	300	10	3,000
	기 타		식	1	4,900	4,900
	공원등	H5.0	조	3	1,600	4,800	독산자연공원
	분전함	H1.2×L0.8	조	1	1,500	1,500
2. 신흥초교 뒤편
	생태연못	진흙방수	㎡	65	50	3,250	생태연못
	배관설치		m	200	10	2,000
	수생식물		본	1,500	2	3,000
	관목		주	3,000	3	9,000
	교목		주	150	150	22,500
	평의자		조	10	350	3,500
	사각정자	4.0×4.0×3.3	조	1	8,000	8,000
	안내판		조	1	5,000	5,000
	자연석쌓기	H1000	m	10	700	7,000	순흥약수터
	자연석쌓기	H300	m	20	300	6,000
	판석깔기		㎡	45	200	9,000
	절개지 자연석쌓기	H6.0×L10m	m	10	1,000	10,000
	원주목 박기	H1.2×L70	m	70	15	1,050
	배관설치		식	1	1,500	1,500
	철거비		식	1	2,500	2,500
	비가림막		조	1	8,000	8,000
	컵걸이		조	1	500	500
	체육시설 이설		조	5	200	1,000
3. 둘레길 주변
	사각정자	4.8×4.8×3.3	조	1	10,000	10,000	호암체련장
	체육시설 이설		조	5	200	1,000
	절개지 자연석쌓기	H6.0×L10m	m	10	1,000	10,000	흥산배드민턴장
	자연석쌓기	H1000	m	10	700	7,000	옹달샘약수터
	자연석쌓기	H300	m	20	300	6,000
	판석깔기		m	30	200	6,000
	배관정비		식	1	1,000	1,000
	비가림막		조	1	7,000	7,000
	컵걸이		조	1	500	500
4. 금천체육공원
	체육시설		조	10	2,150	21,500
제 경 비	35%					69,500
설 계 비						11,400

□  위치도

500m

□  현황사진(전경 및 근경)

전  경(원경)

- 사업대상구역 : 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기

- 전경사진은 사업대상지 전체가 보이는 현황사진

근  경

- 사업대상구역 : 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기