월간 진척보고서(7월)				시스템명		하수도관리전산시스템
문서번호	R190799	작성자	신형일	작성일	2019/7/31	버 전	1.0

프로젝트명	2019년 하수도관리전산시스템 유지관리 · 기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선
프로젝트책임자	총괄 : 신형일 부분 : 이충헌, 조현태	진척율 (계획/실적)	기능개선	유지보수	DB구축	전체
			14.0/14.0	15.0/15.0	15.0/15.0	14.9/14.9
실적	기간	2019년 7월 1일 ~ 2019년 7월 31일
	사업관리 및 시스템 유지보수
	1. 하수도관리전산시스템 운영 지원 및 유지보수 - 대상(5개) : 조회, 편집, 현장운영, 수위정보관리시스템, 문서관리시스템 - 구청별 시스템 운영 지원 - 자치구 시스템 설치, 기술지원 및 교육 2. 시스템 유지보수 및 업무 지원 - 수위정보관리시스템 공공데이터 개방관련 룰 등록 및 데이터 작성 - 수위계측 데이터 통계 작업 - CCTV 이상항목 개별 업로드 오류 데이터 수정 - NAS장비 이전관련 업무협의 및 문서 작성 - 타기관 데이터 오류 수정 및 로딩완료 - 데이터센터 DB작업 관련 서버 점검 및 테스트 실시 - 정보공개요청관련 하수시설물 데이터 추출 및 세부내역 작성 - 서울시 보고 환경부 시설물 통계 작업 3. 도봉구 맨홀 라이다 측량 현장 방문 및 향후 진행 관련 업무협의 - 현장방문 일시 및 장소 : 2019년 7월 5일 (도봉구청 앞 빅마켓 측량 현장) - 현장 방문자 : 물재생계획과 과장님 외 5인 4. 보안교육 실시 - 7월 17일, 3개사 자체 보안교육 5. 산업안전교육 실시 - 7월 17일, 한국지중정보, 네이버시스템
	시스템 개선
	1. 신규 시스템 분석 및 설계 - DB 구축 업무 프로세스 분석 및 시스템 개발 방안 업무협의 2. 신규 하수도조회웹시스템 테스트 및 교육준비 - 하수도관리전산시스템 로그인 페이지 구성 및 디자인 변경 - 시스템관리 기능 추가 및 적용 - 프로그램 오류 수정 및 기능 테스트 실시
	DB구축
	1. 관로현황 조사편집(맨홀조사) : 조사 30.0km (누적 50.0km/ 92.43km) - 대상 구청 : 중구(완료), 서대문구, 용산구 2. 원형관 위치 측량 작업 : 측량 5km (누적 8.0km/ 22.55km) - 대상 구청 : 광진구잔여분(완료), 성동구(완료), 중구 3. 사각형거 라이다 측량 작업 : 라이다 측량 38.2km (누적 38.2km/ 150km) - 대상 구청 : 광진구잔여분, 성동구, 중구, 서대문구, 용산구 4. 타 DB 구축 사업 산출물 검수 - 전체 27건중 - 신규 인수 : 0건, 자료 검토 중 : 0건, 검토의견 제출 : 24건, 탑재완료 : 1건, 로딩 준비 : 2건, 기타 : 0건
계획	기간	2019년 8월 1일 ~ 2019년 8월 31일
	유지보수 및 사용자 교육
	1. 하수도 시스템 운영 지원 및 유지보수 2. 장애접수 처리 대장 점검 및 시스템 적용
	시스템 개선
	1. 신규 시스템 분석 및 설계 - 공정별 데이터 취합 및 원시 데이터 검토 2. 신규 하수도조회웹시스템 테스트 및 교육 - 추가 요구사항 분석 및 적용 - 프로그램 오류 수정 및 기능 테스트 실시 - 담당자 교육자료 작성 및 교육
	DB구축
	1. 관로현황조사편집(맨홀조사) : - 대상 구청 : 서대문구, 용산구 2. 원형관 위치 측량 작업 - 대상 구청 : 중구, 서대문구 3. 사각형거 라이다 측량 : - 대상 구청 : 서대문구, 용산구 (중구 및 성동구는 일부 보완작업 실시예정) 4. 타 DB 구축 사업 산출물 검수
미결업무 및 대책
협의사항
산출물/ 별첨사항	1. 2019년 7월 하수도관리전산시스템 유지보수 리포트