제230회 시의회 임시회

건  설  위  원  회

2011. 4. 26.(화)

2011 주요 현안업무보고

2011. 4. 26.

	도시안전본부

보고순서

	Ⅰ.	일 반 현 황	1
	Ⅱ.	정책 추진 목표와 방향	5
	Ⅲ.	주요 추진업무	6
	Ⅳ.	2011 주요사업 추진현황	14
	Ⅴ.	시의회 주요 지적사항 조치결과 및 추진현황 - 제229회 시의회 임시회 업무보고('11.2.22) -	26

	Ⅰ. 일 반 현 황

1	조직 및 인력

조  직 : 2기획관 10과 59개팀 8개사업소

																도시안전본부
							시설안전기획관																							물관리기획관
도 시 안전과					도 로 계획과				도 로 행정과					도 로 관리과					도로시설 관리과				교 량 관리과				물관리 정책과					물재생 계획과				물재생 시설과					하 천 관리과
<6팀>						<5팀>			<5팀>					<7팀>					<8팀>				<7팀>				<4팀>					<5팀>				<5팀>					<7팀>
동 부 도 로 사업소						서 부 도 로 사업소				남 부 도 로 사업소				북 부 도 로 사업소					성 동 도 로 사업소				강 서 도 로 사업소									중 랑 물재생센 터				난 지 물재생 센 터

인    력  : 1,022명 / 1,141명 (정원 / 현원)

업무기능

○ 안전관리계획 수립 ․ 조정

○ 풍수해 ․ 설해 대책 수립 ․ 시행

○ 도로건설 계획 및 도로 ․ 교량 등 시설물 관리

○ 하수도 및 하수처리 관련 업무

○ 하천 및 빗물펌프장 등 유수지 관리

시설안전기획관

부 서 명	주 요 업 무
도시안전과	○ 안전관리계획 등 도시안전관리업무 총괄 조정 ○ 재난정보 수집･보고･전파 등 전달체계 운영 ○ 재난 및 안전 관련 교육･훈련･홍보에 관한 사항 ○ 재난안전대책본부 등 재난대응체계 구성･운영
도로계획과	○ 도로계획의 수립ㆍ조정 ○ 수도권 광역․도시고속도로 및 간선도로망 확충 ○ 민자․유료도로 계획 수립․조정, 지하도로 건설사업 추진
도로행정과	○ 지하도상가 관리 및 시설관리공단 지도ㆍ감독 ○ 도로재산 관리, 도로점용 관리, 건설업 관리 ○ 노점․노상적치물 단속 및 정비, 보도상 영업시설물 관리 ○ 풍물시장 활성화, 과적차량 관리
도로관리과	○ 도로관리 종합계획 수립․조정, 도로제설 설해대책 ○ 도로 보‧차도 포장 및 도로부속물 관리 ○ 도로기전시설물 및 도로정보화 관리
도로시설관리과	○ 도로시설관리계획의 수립․조정 ○ 터널, 지하차도, 복개구조물, 공동구 및 기전시설물 관리
교량관리과	○ 교량 및 고가차도 안전진단ㆍ유지 관리 ○ 제한차량 운행체계 및 허가

물관리기획관

부 서 명	주 요 업 무	비 고
물관리정책과	○ 물환경관련 정책 및 종합계획의 수립ㆍ조정 총괄 ○ 빗물 및 지하수관리계획 수립ㆍ조정 ○ 한강, 지천의 수질관리 및 개선대책 ○ 토양환경보전, 토양오염 관리 등에 관한 사항	환경수자원 위 원 회 소 관
물재생계획과	○ 하수도시설종합계획 수립ㆍ조정 ○ 하수악취저감에 관한 사항 ○ 하수도시설 개량 및 배수불량지역 대책 수립ㆍ조정 ○ 하수도사용료 징수에 관한 사항
물재생시설과	○ 물재생시설 운영계획 수립 및 현대화, 하수고도처리 ○ 물재생센터 지도ㆍ감독 및 민간위탁 ○ 신ㆍ재생에너지, 차집관거 신․증설 및 유지관리
하천관리과	○ 홍수ㆍ수해예방 및 대처(상황실 설치ㆍ운영 등) ○ 생태하천 복원사업, 하천관리계획의 수립ㆍ조정 ○ 청계천 유지관리에 관한 사항

2	주요시설 현황

□ 도  로

구분	계	광 로	대 로	중 로	소 로	광장
		(40m이상)	(25~40m미만)	(12~25m미만)	(12m미만)
연장(㎞)	8,142.1	234.4	711.8	857.7	6,338.2	88
면적(㎢)	82.474	10.571	20.851	14.291	34.151	2.61

※ 시도 연장 : 1,344.2km / 구도 연장 : 6,797.9km

□ 도로시설물

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하 차도	지하 보도	보도 육교	공동구	기타
계	1,068	20	410	99	27	35	128	87	180	6	76
서울시	531	20	214	88	27	31	91	-	-	6	54
자치구	537	-	196	11	-	4	37	87	180	-	22

□ 지하도 상가

(단위 : 개, ㎡)

상가	총 점포	규 모
		계	상가	보도	부대시설
29	2,738	148,978 (100%)	51,196 (34.4%)	75,614 (50.8%)	22,168 (14.8%)

□ 가로등 시설

설치연장(km)	등 주(본)	등 수(등)	분 전 함(면)	비 고
2,101	116,931	240,691	6,504	설치율 100%

□ 하천 및 수문

종 류	하 천		수 문		비 고
	개소	㎞	개소	문
계	60	275.4	296	696
국가하천	3	74.6	135	370	한강, 중랑천, 안양천
지방하천	33	165.6	81	209	청계천, 도림천, 홍제천 등
소하천 등	24	35.2	80	117	구기천, 우면천, 장지천 등

□ 빗물펌프장

구 분	개소	유역면적 (㎢)	수혜면적 (㎢)	펌프규모		배수량 (㎥/분)	저수용량 (㎥)	유수지면적 (㎡)
				대	HP
계	111	261.34	57.36	686	433,434	161,279	5,190,767	1,333,268

□ 하수관거

(단위 : ㎞)

계	합류관거	분 류 관 거			차집관거
		소 계	우수관	오수관
10,291	8,820	1,022	575	447	449

□ 물재생센터

(단위 : 천㎥/일)

계	중 랑	탄 천	서 남	난 지
5,810	1,710	1,100	2,000	1,000

	Ⅱ. 정책 추진 목표와 방향

365일 24시간 안전하고 쾌적한 서울

서울형 도시어메니티 모델 정립

도시안전시스템 마련		도시인프라 확충		도시의 지속가능성 증진
•예방적 도시안전 시스템 구축 •수방능력을 높이고 신속한 제설 추진 •도시시설물 철저하게 관리		•도시고속도로 등 간선도로망 지속 확충 •U-Smartway 단계적 추진으로 지상환경 개선 •도로구조 개선으로 문화와 생태 복원 •도로관리방법 개선으로 최상의 도로수준 유지		•지속가능한 물순환 체계 조성 •하천과 유수지를 지역 문화공간으로 환원 •물재생센터 고도화 및 에너지 절감 •도로포장을 친환경 공법으로 개선
창 의		소 통		청 렴

	Ⅲ. 주요 추진업무

1

여름철 풍수해 대비 준비상황

7

2

지진에 강한 서울 만들기 종합대책 추진

9

3

해빙기 특별 안전점검 결과 조치

11

4

2011 재난대응 안전한국 훈련 준비

12

5

'10/'11년 겨울철 제설대책 종료

13

1		여름철 풍수해 대비 준비상황

우기전 주요 취약시설물을 점검하고 현장중심 재난대응시스템을 강화하는 등 풍수해를 철저히 대비하여 이상 강우에도 침수피해를 최소화하고자 함

□ 추진방향

❍ 주요 수방 및 취약 시설 사전 점검․정비로 피해 최소화

❍ 침수취약지역 피해 최소화 및 재난대응능력 향상 대책 중점 추진

□ 추진상황

❍ 주요 수방시설 및 취약시설 점검(3.23~5.6)

- 하천(36개소) 및 하천내 공사장(45개소) 점검

- 빗물펌프장(111개소, 16개 공사장 포함), 수문(23개소) 등 점검

- 공사장, 사면 등 풍수해 취약지역․시설 점검

❍ 침수취약지역 피해 최소화 대책 시행

- 저지대 하수관거․빗물받이 집중준설, 주요 침수지역 빗물받이 개선

- 지하차도․지하철 차수시설 및 펌프시설 보강

- 지하주택 침수방지시설 점검 및 물막이판(772개), 수중자동펌프(3,402개) 추가지원

- 「침수취약주택 공무원 케어(돌봄)서비스」 시행

▷ 침수취약지역 주민과 돌봄공무원을 1대1로 연결하여 현장 행정지원

- 광화문광장 30년 빈도 대응능력 우선확보(~6.30)

▷ 광화문네거리 하수암거 신설 및 세종로주차장 저류조 설치

▷ 지선하수관거 개선 및 우수배제시설 확충

- 「'07년 수방능력향상사업」 추진

▷ 빗물펌프장 시설능력 향상 '11년 계획사업(19개소) 5월까지 완료

구 분	대 상	'08 ~ '11		'12	비 고
		완 료	시공중
빗물펌프장(개소)	41	12	16	13
수전설비 이중화시설(개소)	111	99	5	7
제방보강 사업(km)	28	24	4	-
유수장애교량(개소)	12	9	3
하수관정비(km)	741	606	110	25

❍ 재난대응능력 향상을 위한 개선방안 마련

- 실시간 수방관리시스템 구축('11.5월)

▷ 모바일, CCTV를 활용한 재난현장 영상 실시간 전송 및 모니터링

▷ 침수취약지역 주민 및 돌봄공무원 재난상황 자동통보시스템 마련

▷ 자치구 수방현황 실시간 수집 및 공유를 통한 상호지원 강화

- 홍수예경보시스템 구축('11.6월) - 11개 하천

▷ 강우량, 수위 변동을 자동분석하여 신속한 대피 유도

※ 대상 : 불광, 우이, 대동, 묵동, 성북, 정릉, 홍제, 목감, 도림, 창릉, 진관

- '소방 및 구조구급인력'을 재난초기 '재난복구인력'으로 신속 전환

- 민․관․군 유기적인 협력체계 구축 및 풍수해 모의훈련 시행(5.2)

❍ 「기후변화대응 방재시설물 확충사업」 추진('11.2.8. 발표)

- 재해위험지구 지정

▷ 고시완료         : 서초구 사당역(2.17), 용산구 한강로(3.8)

▷ 고시예정('11. 4월) : 양천구 가로공원, 강서구 화곡동

- 주요 침수취약지역 설계 완료 및 공사 시행

▷ 공사발주('11.12월) : 가로공원길, 구의․자양동, 강남역 일대

▷ 공사발주('12. 3월) : 한강로, 화곡동, 사당역, 대림동 일대

※ 기후변화대응 방재시설물 확충사업

구 분	계	빗물펌프장(개소)		관거개량 (㎞)	빗물저류조 신설(개소)	유역분할 (개소)	하천정비 (m)	기 타 사방침사지
		신설	증설
사업내용	-	1	40	81	22	3	670	2식
사업비(억원)	6,693	115	2,500	2,281	1,140	543	87	27

❍ 서울시 방재성능목표 강우량 공표('11.6월)

- 소방방재청 협의 후, 시(市) 홈페이지에 공표

□ 향후계획

❍ '11.5.15 ~ 10.15 : 시 및 자치구 풍수해 재난안전대책본부 운영

2		지진에 강한 서울 만들기 종합대책 추진

일본 대지진을 계기로 주요 시설물의 내진 대책을 마련하여 시민의 생명과 재산을 보호하고, 지진 발생시 피해를 최소화할 수 있는 효율적인 대응․복구시스템을 구축하여 지진에 강한 서울을 만들고자 함

□ 추진배경

❍ 주변 국가의 대지진 발생으로 지진에 대한 도시관리능력 제고 필요

- '11.3.11 일본 동북부 대지진 (규모 9.0) : 사망․실종 28천명(4.12. 현재)
- '11.2.11 뉴질랜드 크라이스트처치시 지진 (규모 6.3) : 사망 166명

- '08.5.12 중국 쓰촨성 대지진 (규모 7.9) : 사망․실종 87천명, 이재민 500만명

❍ '78년 지진관측 이후 서울 주변에서도 70회 지진 발생 (규모 2~3, 14회)

- 지진전문가, 규모 6.0~6.5 지진 발생 가능성 전망

❍ 서울도 지진 안전지대가 아니므로 종합대책 수립․시행 필요

□ 추진계획

【평시 예방․대비 대책】

❍ 중약 강도(규모 5.5~6.5) 지진 대비, 정부지침과 연계한 시설물 내진대책 추진

- 신규 건립 시설물은 내진성능 100% 확보

- 기존 시설물은 내진 보강 중장기 계획 수립하여 연차별 추진

- 재난대응기관(소방서 등) 등 공공청사 '16년까지 내진보강 완료

▷ 민방위경보통제소․소방청사 등 97동 우선 시행

- 도시철도(1~4호선) : '14년까지 1,754억원 투자, 100% 완료 목표

- 도로시설물 : 한강교량 등 '14년까지 85.6% 확보 예정

❍ 위험 시설물 정기 안전점검 강화

- 특정 관리대상 및 시특법상 관리대상 시설물 매월 1회 이상 정기점검

- 공공시설물, 다중이용시설 등 내진 미확보 시설 집중점검

❍ 지진방재 교육․훈련․홍보 실시

- 지진방재훈련 실시, 안전점검의 날(매월 4일) 안전문화운동 추진, 지진대응 시민 행동요령 홍보 등

❍ 이재민 수용소 사전지정 관리

- 이재민 수용시설 사전지정․관리 : 총 757개소 725천명 수용

▷ 학교 473, 교회 85, 관공서 44, 기타 155(자치구별 평균 30개소)

❍ 지진재난 위기관리매뉴얼 업그레이드

- 일본 대지진 발생 상황분석 ⇒ 위기대응 실무 매뉴얼 보완

❍ 유관기관 협조체계 구축

- 안전관리위원회 실무협의회 구성․운영

- 인명 긴급구조를 위한 군․경․유관기관과 비상통신망 구축

【지진발생시 대응․복구 대책】

❍ 재난안전대책본부 즉시 가동(본부장 : 시장)

- 규모 5.0 이상 다수 인명피해가 있거나 예상될 때

- 상황파악, 피해복구, 응급대책 지휘 및 현장관리

❍ 신속한 상황전파 및 구조․구급활동 전개

- 긴급구조 통제단 설치, 인명구조 활동

❍ 시민 대피안내 및 이재민 수용

- 피해지역 공무원, 통장, 민방위 대원, 재난안전네트워크 회원이 대피안내

❍ 식용수 및 생필품의 원활한 공급

- 아리수, 구호물품, 양곡 등 비축물품 공급

❍ 기반시설(Life line) 긴급 복구

- 긴급 수송로, 통신․전기․가스시설 등 복구시스템 가동

□ 향후계획

❍ 시설물 관리주체별 내진 보강 세부 추진계획 수립․시행

❍ 자치구 및 유관기관 현장조치 매뉴얼 정비

3		해빙기 특별 안전점검 결과 조치

공사장․옹벽․축대․건축물 등 해빙기 재난위험시설에 대한 특별 안전점검 및 정비를 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기함

□ 추진배경

❍ 기록적인 한파의 영향으로 해빙기 시설물 재난위험성 증가

❍ 지반․구조물 동결상태 장기화로 침하․균열․파손 등 취약성 노출

□ 점검개요

❍ 점검기간 : '11. 2. 10 ～ 3. 31

❍ 점검내용

- 동절기 공사지침 준수여부, 공사장 침하 ․ 균열 ․ 변형 상태

- 시설물 ․ 건축물의 균열 ․ 누수 ․ 파손 ․ 배부름 현상 등

❍ 점검대상	(단위:개소)

구 분	계	공사장		건축물	터널	하천	기타
		토목	건축
총 계	9,130	52	333	5,934	83	44	2,683
서울시	232	26	35	63	67	23	17
자치구	8,898	26	298	5,871	16	21	2,666

□ 점검결과 : 7,124개소 점검완료(78%), 260개소 지적(2.8%)	(단위:개소)

구 분	점검대상	점검완료	지적사항
			계	조치완료	진행중
총 계	9,130	7,124	260	107	143
서울시	232	232	85	76	9
자치구	8,898	6,892	175	31	134

□ 향후계획

❍ 정비 진행중인 지적사항은 수방기간 이전 조치 완료

❍ 미점검 자치구 관리 시설물(2,006개소, 22%) 점검 독려 및 지적사항은 수방기간 이전 정비 완료 될 수 있도록 조치

4		2011 재난대응 안전한국 훈련 준비

정부 및 전국 지자체 합동으로 매년 실시하는 재난대응 훈련을 실시하여 재난발생시 대응능력을 높이고, 유관기관과의 협조체계를 점검코자 함

□ 훈련개요

❍ 훈련기간 : '11. 5. 2(월) ~ 5. 4(수) (2박 3일)

❍ 훈련대상 : 市 및 25개 자치구

❍ 훈련주관 : 시(도시안전본부) ․ 자치구

- 市종합상황실 설치운영 : 1일 28명 3교대 24시간 근무(상황실장 : 과장급)

- 정부(소방방재청 주관)․지자체 연계 합동훈련(전국 400개 기관 참여) 실시

❍ 통합 현장 대응훈련 : 4개구(행정안전부 지정훈련)

일 시	훈련분야	시 설 명	훈련내용
1 일차 '11.5.2	풍수해	동작구 흑석빗물펌프장	펌프장 용량 초과 저지대 침수대비
		성북구 석관동 레포츠타운	집중호우에 따른 지하시설 침수대비
2 일차 '11.5.3	지진, 대테러, 화재	서초구 LG전자 R&D센타	고층건물 지진대피, 테러, 화재 진압
3 일차 '11.5.4	지진 및 화재	은평구 은평뉴타운 및 구파발역(3호선 )	지진발생에 따른 시설물 붕괴 및 화재발생 대응

❍ 자체 현장훈련   : 16개 자치구 (풍수해 12, 대테러 및 화재 3, 지진 1)

❍ 도상훈련(NDMS) :  5개 자치구 (풍수해 2, 대테러 및 화재 1, 지진 2)

□ 추진현황

❍ 재난대응 안전훈련 T/F팀 구성․운영 : '11. 2월 ~ 4월

❍ 2011 재난대응 안전한국 훈련계획 수립 및 관계자 교육 : '11.4.12

□ 향후계획

❍ 훈련기간 중 시 ․ 자치구 종합상황실 24시간 상황유지

❍ 각종 매체(신문, 방송, 인터넷, 주민 소식지 등)에 훈련계획 홍보

5		'10/'11년 겨울철 제설대책 종료

강설예보 3시간전 비상발령, 휴일 사전 예보제 시행, 제설 노선 재정비 및 실시간 제설현장관리시스템을 구축하여 운영함으로서 교통대란 없이 제설대책 업무를 원활하게 마무리 함

□ 추진개요

❍ 추진기간 : '10. 11. 15 ～ '11. 3. 15(4개월)

❍ 제설대책본부 운영 : 33개기관 (서울시, 도로사업소, 시설관리공단, 자치구)

❍ 강설횟수 : 15회 (총 강설량 38.2cm - 비상근무 : 29회)

※ 최근 10년간 평균 강설량(27.1cm)보다  11.1cm 많은 수준임

❍ 인력, 장비, 자재 투입현황

인 력	장 비	자 재
연 인원 : 267,726명	7종/ 13,838대	34,511톤

□ 개선사항

❍ 비상발령시간 조정 : 강설예보 1시간전→ 3시간전,  휴일은 1일전 사전예고

❍ 자치구 추진 주요 간선도로 제설을 시에서 직접 실시(16개 노선 224km)

❍ 실시간 제설현장관리시스템 구축 운영(제설차량에 GPS장착 상황 관리)

❍ 자동염수살포장치 설치운영 : 3개소(남산1호터널 남측, 동작대교 북측 2개소)

❍ 재난동보시스템 개선(제설 작업에 참여하지 않는 시직원, 자치구 제설 작업배치)

❍ 제설대책 홍보 (내집 앞 눈치우기 UCC 제작 홍보 등)

□ 향후 개선과제

❍ 제설작업 시간단축 및 서비스 수준향상 방안 마련

❍ 제설제 안정적 확보 대책 및 제설 사각지대 발굴․개선

	Ⅳ. 2011 주요사업 추진현황

주요사업 추진현황

(2011.4.15. 현재)

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

1. 도시인프라 안전관리

① 예방적 도시안전

시스템 구축

∘ 내용

- 재난종합상황실 상시운영

- 재난안전대책본부 구성

- 재난예방 및 대응시스템

▷ 재난위험도평가 및

안전지수 개발

▷ 도시안전가이드라인 마련

▷ 위기관리 표준매뉴얼

개발․활용

∘ 기간 : '11.1~12

∘ 재난종합상황실 상시운영

-'10.12월 설치(24시간 근무)

- 재난정보 상시모니터링 및 보고 전파

∘ 도시안전가이드라인 용역수행중(시정연 정책과제)

- 기간 : '11.1~10

∘ 위기관리 표준매뉴얼

- 개발 및 활용 : 완료(2월)

∘ 안전관리기본조례 제정(안)마련

∘'11.6 : 도시안전 가이드라인 마련

∘'11.4 : 위기관리 매뉴얼 점검 실시

- 협조부서/유관기관의 협조체계 및 책임과 역할부여 적합성 등

∘'11.10 : 재난위험도 평가 및 안전지수 개발용역 완료

② 재난취약가구

안전점검

∘ 대상 : 기초생활수급자, 독거 노인 등 재난취약계층

∘ 사업비 : 307,490천원

(국비50%, 시비50%)

∘ 기간 : '11.1~12

∘ 내용 : 전기,가스,설비,소방 등 재난 발생 가능성이 있는 노후 시설 정비

∘ '11년 계획 : 16,000가구

∘'11.1.10 : 국고보조금신청

∘'11.2.14 : 재난취약가구 안전점검 지침 통보

∘'11.2~3 : 자치구별 사업대상자 선정

∘'11.3 : 자치구별 안전복지컨설팅단 구성(자치구별 약 20명)

∘'11.3.23 : 자치구 담당자 및  점검자 교육실시

∘'11.4 : 각 자치구별 점검 및 정비 실시 중

∘'11.4~5 : 자치구별 사업진행 점검 실시

∘'11.4~8 : 대상 가구 점검  및 정비 실시(자치구별) (만족도 설문조사 병행)

∘'11.9~12 : 무상점검 계속 실시 및 설문조사 분석

③ 도시(공공․민간)

시설물 안전관리

∘ 대상시설 : 34,725개소

- 중점관리시설(A～C급) : 34,297

▷ 비교적 안전한 상태의 시설

- 재난위험시설(D∼E급) : 428

▷ 재난발생 위험이 높은 시설

∘ 안전점검

- A․B․C급 6개월 1회 이상

- D급 월1회, E급 월2회 이상

∘ 해빙기 대비 점검

- 기간 : '11.2.10～3.31

- 결과 : 총7,124개소 점검

▷ 시 : 232개소 점검, 85건 지적

(조치완료 76, 진행 9)

▷ 자치구 : 6,892개소 점검,

175건 지적

(조치완료 31, 진행 134)

∘ 표본안전점검 실시

- 시 관리 시설물

▷ 기간 : '11.1～11월

▷ 대상 : 26개시설

(청사, 문화집회시설등)

▷ 방법 : 전문가 합동점검

- 자치구 관리 시설물

▷ 일시 : '11.7월(우기)

▷ 대상 : 60개소

(축대,옹벽,공사장 등)

▷ 방법 : 전문가 합동점검

※ '11. 4월 : 46개소 표본점검

사업명		사업개요	추진현황		향후계획
④ 도로시설물 안전점검 및 보수		∘ 대상시설물 : 531개소 ∘ 사 업 비 : 565억원('11년) ∘ 사업기간 : '11.1~12 ∘ 사업규모 - 안전점검 및 진단용역 230개소 115억원 - 보수․보강공사 65개소 450억원	∘ 취약시기 안전점검 - 대상시설 : 531개소 - 점검기간 : '11.1.17~3.31 - 주요내용 : 설날, 해빙기 외부전문가 안전점검 실시 ∘ 안전점검 및 진단용역 -'11.1 : 발주계획 수립 -'11.2 : 과업내용서 등 설계서 작성 -'11.3 : 용역발주 및 착공 ∘ 보수․보강공사 -'11.1~2 : 계약심사 -'11.3 : 공사발주 및 착공		∘ 취약시기 안전점검 -'11.5 : 우기대비 안전점검 -'11.9 : 설날대비 안전점검 -'11.11 : 겨울철대비 안전점검 ∘ 안전점검 및 진단용역 -'11.10 : 정밀점검용역 완료 -'11.12 : 정밀안전 진단 용역 완료 ∘ 보수․보강공사 -'11.12 : 보수․보강공사 완료
⑤ 한강교량 보수․보강
	영동대교 보수 (설계 및 공사)	∘ 사업개요 : 단면보수2,300㎡ 균열보수 920m ∘ 사업기간 : '11.2~'11.12 ∘ 사 업 비 : 418백만원		∘'11.2.1 : 실시설계 용역계약 ∘'11.4 : 실시설계중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.5 : 실시설계 완료 ∘'11.6 : 공사계약 및 착공 ∘'11.12 : 공사완료
	동호대교 보수 (설계 및 공사)	∘ 사업개요 : 단면보강800㎡ 도장198㎡ ∘ 사업기간 : '11.2~'11.12 ∘ 사 업 비 : 500백만원		∘'11.2.1 : 실시설계 용역계약 ∘'11.4 : 실시설계중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.5 : 실시설계 완료 ∘'11.6 : 공사계약 및 착공 ∘'11.12 : 공사완료
	한강대교 보수 (설계 및 공사)	∘ 사업개요 : 누수보강 12.4a 받침교체 60개 ∘ 사업기간 : '11.3~11.12. ∘ 사 업 비 : 1,000백만원		∘'11.4.4 : 실시설계 용역계약 ∘'11.4. : 실시설계중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.4 : 용역착수 ∘'11.10 : 용역완료 ∘'11.8 : 공사발주 ∘'11.12 : 공사완료
	행주대교 보수 (설계 및 공사)	∘ 사업개요 : 받침교체 30개 ∘ 사업기간 : '11.3~'11.12 ∘ 사 업 비 : 900백만원		∘'11.3.16 : 실시설계 용역발주 ∘'11.4 : 실시설계 공고중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.8 : 공사착공 ∘'11.12 : 공사완료
	동작대교 보수 (설계)	∘ 사업개요 : 보수공사 실시 설계용역 ∘ 사업기간 : '11.3~'11.10 ∘ 사 업 비 : 750백만원		∘'11.4.11 : 실시설계 용역발주 ∘'11.4.12 : 사업수행능력평가 완료(13개업체) ∘'11.4 : 가격입찰 서류 접수중(재무과)	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.4 : 용역계약 및 착수 ∘'11.10 : 용역완료
	천호대교 보수 (공사)	∘ 사업개요 : 교면포장23a 도장25a 등 ∘ 사업기간 : '11.3~'11.12 ∘ 사 업 비 : 1,550백만원		∘'11.3.29 : 공사계약 및 착공 ∘'11.4 : 공사 시행중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.6 : 포장 및 도장 완료 ∘'11.11 : 콘크리트 보수완료
	서강대교 보수 (공사)	∘ 사업개요 : 교면포장 25a 보도포장 72a ∘ 사업기간 : '11.3~'11.12 ∘ 사 업 비 : 600 백만원		∘'11.3.29 : 공사착공 ∘'11.4 : 공사 시행중	〈'11년말 공정목표 100%〉 ∘'11.7 : 차도포장 완료 ∘'11.10 : 보도포장 완료

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

⑥ 도로시설물  내진성능 개선

∘ 사업기간 : '05~'15년 이후

∘ 내진성능확보 현황

- 보강대상 교량 : 111개소

※ 349개소중 238개소 기확보

∘'11년 사업대상

- 설계용역 : 10개소

- 보강공사 :  6개소

∘ '11년 사업비 : 6,547백만원

- 설계용역 : 878백만원

- 보강공사 : 5,669백만원

∘ 설계용역 : 10건 발주완료

∘ 보강공사

- 3건 : 발주완료

- 3건 : 4월중 발주예정

∘'11.4 : 공사 발주 완료

∘'11.4~12 : 설계용역 및 보강공사 시행

⑦ 한강교량 수중

구조물 상시점검

∘ 사업개요 : 수중우물통 312기

- 한강 : 천호대교 외 8개교

- 지천 : 군자교 외 3개교

∘ 사업기간 : '11.4~12

∘ 사 업 비 : 608백만원

∘'11.4.8 : 계약 및 착수

∘'11.4 현재 : 지천(중랑천)  수중구조물 점검중

〈'11년말 공정목표 100%〉

∘'11.11 : 우물통 점검 완료

2. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

① 지하도상가 운영

개선

∘ 시의원, 유통 전문가, 상인  대표, 등으로 구성한 지하도 상가 발전협의회 운영

∘ 지하도 상가의 합리적인 관리방안 및 상권 활성화 마련

∘'10.11~'11.2 : 지하도 상가 발전협의회 개최(11회)

- 계약 방법 및 임차인 선정 방안 등 검토

∘'11.7 : 강북 24개 지하도상가 순차 계약 추진

② 보도상 영업시설물 관리개선

∘ 사업대상 : 2,550개소

∘ 사업내용

- 시민불편 이전 정비

- 시민모니터링 운영 등 관리개선

∘ 사업예산 : 502백만원

∘ 시민불편 유발 시설물 이전 정비(16개소)

∘ 시민모니터링 실시(2회)

- 929건 적발, 시정명령․벌점․과태료 등 행정조치

∘ 시민불편 유발 시설물 이전 정비 지속 추진('11년 100개소)

∘ 시민 모니터링 실시(연6회)

③ 운행제한 차량단속

∘ 단속기준

〈도로법〉

- 축하중 10t 및 총중량 40t 초과차량

- 차량의폭 2.5m, 높이 4.0m, 길이 16.7m(굴절 19m) 초과차량

〈서울시 공고〉

- 축하중 10t 및 총중량 32t 초과 차량(일부 20t 초과)

- 단속구간 : 중량제한공고된 도로시설물 115개소

(교량, 고가, 입체교차 등)

∘ 사업내용

- 단속반 운영지도감독

․ 4개 고정초소

․ 17개 기동반

∘ 사업비 : 2,277백만원

∘ '11년 분기별 추진계획

- 단속반 조정운영

- 과적근원지 예방활동강화

- 단속체계 확립

- 과적활동 홍보활동

- 과적차량 단속 시스템개선

∘ 단속실적('11.3월말 기준)

- 검차 : 18,428대

- 적발 :  1,082대

- 과태료 부과징수

▷ 부과 : 538건, 269백만원

▷ 징수 : 340건, 148백만원

∘ 예방활동 실적

- 근원지 방문 면담, 행정지도 : 1,971회

- 근원지 점검 및 예방절차 : 8,651회

- 홍보물 등 배부 : 21,023회

- 공한문 발송 : 521건

∘ 지속적 단속활동 강화

∘ 과적근원지 방문 예방활동 강화

∘ 서울시 공고된 중량 제한 도로시설물 적극홍보 사전예방

∘ 단속반 지도점검 지속추진

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

④ 도로조명 개선

∘ 조도 개선 및 노후 선로 교체(72Km, 3,056등)

∘ LED 광원교체(10Km, 600등)

∘ 사업기간 : '11.1~10

∘ 사 업 비 : 13,311백만원

∘ 조도 개선 및 노후 선로 교체

- 15개 기관 중 11개 기관 발주완료(사업추진 중)

∘ LED 광원교체

- 추진계획 수립

∘ 조도 개선 및 노후 선로 교체

- 미발주 4개기관 예산배정

- 10월말까지 사업완료

∘ LED 광원교체

- 사업대상 선정 후 예산배정

- 10월말까지 사업완료

⑤ 투수성 도로포장

설치 기준 마련

∘ 투수 블록 포장 시험시공 모니터링 결과 토대로

- 투수성 포장의 기본계획 및 설계․시공․유지관리 기준수립

∘ 도로정비시 투수성 도로포장(보도, 이면도로) 적용․시행

∘'10.5 : 친환경 투수 블록포장 시험 시공 및 개선방안 용역 착수

∘'10.7~11 : 시험시공 실시

∘'10.11~'11.4 : 시험 시공현장 모니터링

∘ '11.4 : 기본계획 및 기준 수립 중

∘'11.5 : 투수블록 포장 기본계획 수립 및 설계․시공․유지관리 기준제정

∘'11.7 : 투수블록 포장 기준 적용 시행

⑥ 차량용 방호 울타리 및 중앙분리대 설치

∘ 위치 : 성내 유수지교 외 20

∘ 규모

- 중앙분리대 : 3,667m

- 방호울타리 : 3,545m

∘ 사 업 비 : 4,880백만원

∘ 사업기간 : '11.2~12

∘ 공사발주완료(공사중)

∘'11.10 : 공사완료

⑦ 겨울철 제설대책

추진

∘ 기간 : 매년 11.15~다음해 3.15

∘ 제설대책본부 운영 : 33개 기관

∘ 제설작업구간 : 8,101Km

∘ 제설대책본부 운영 : 33개기관

∘ 인력 : 연 267,726명

∘ 장비 : 7종 13,838대

∘ 자제 : 34,511톤

∘'11.10 : 제설워크숍 개최

- 개선방안 마련

∘'11.11.15 ~ : '11/'12년

제설대책 상황실 운영

3. 도로 인프라 확충

① 도시고속도로 연결체계 고도화

강남순환도시 고속도로

∘ 규모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9㎞(사업기간 : '94 ~'14)

∘ 총사업비 : 1조 4,160억원

('11. 1,369억원 : 보상 624, 공사 720, 감리 25)

∘ '07.11.20 : 공사 착공

∘ '11.4 : 보상 및 공사 시행

- 재정구간(4, 8공구)  : 소하 I.C 본선 교각 및 구룡지하차도 가시설 공사 중

- 민자구간(5,6,7공구) : 관악, 신림, 서초터널 굴착공사 중

(11년말 목표 공정 40%)

∘ '11.12 : 공사 지속 시행

- 재정구간(4, 8)공구 : 소하IC 교각기초 및 기둥공사, 주암교 상부 슬라브 공사

- 민자구간(5,6,7공구) : 관악, 신림, 서초터널 굴착 공사

강변북로 확장

(성산~반포)

∘ 규모：폭 8→12차로, 11.6㎞(사업기간 : '08~'17)

∘ 총사업비 : 9,880억원

('11, 60억원 : 설계 58, 감리 2)

∘ 턴키구간(양화~원효) : 실시설계 시행 중('10.07~'11.07)

∘ 기타구간(성산~양화,원효~반포) : 기본설계 시행중('09.11~

'11.06)

(‘11년말 목표 : 실시설계 완료)

∘ '11.6 : 기타구간(성산~양화, 원효~반포대교)기본설계 완료

∘ '11.8 : 기타구간(성산~양화, 원효~반포대교)실시설계 착수

∘ '11.7 : 턴키구간(양화~원효  대교) 실시설계 완료

사업명		사업개요	추진현황	향후계획
	올림픽대로 구조개선 (반포~청담)	∘ 규모 : 부가차로 설치 4.63km (사업기간 : '06~'11) - 반포~한남대교(하남방향) 폭 4→5차로, 연장 1.6km : 공사 중 - 성수~영동대교(양방향)폭 4→5차로, 연장 1.51km : 완료 - 영동~청담(하남 방향) 폭 4→5~6차로, 연장 1.52km : 준비 중 ∘ 총 사업비 : 201억원('11, 138억원 : 공사 131, 감리 7)	∘ '10.9 : 성수~영동대교(1.51km)공사 완료 ∘ '11.2 : 영동~청담 구간 공사 착공	(‘11년말 목표 공정 100%) ∘ '11.12 공사완료 : 반포~한남대교, 영동~청담대교
	동부간선도로 확장 (월계1교~시계)	∘ 규모 : 도로확장 4차로⇒6~7차로, 연장 6.85km (사업기간 : '04~'13) ∘ 총사업비 : 3,155억원 ('11, 443억원 / 보상 119, 공사 306, 감리 18) ※ 시비 1,748, 국비 957, 교통개선분담금 450억원	∘'04.9~'07.8 : 기본 및 실시설계 시행(광역도로 지정 '04.4.21) ∘'11.4 : 경원선 이설구간 보상 및 도봉 지하차도 공사중	('11년말 목표 공정 40%) ∘'11.9 : 철도 구간 보상 시행 ∘'11.12 : 도봉지하차도 공사 시행
	도시고속도로 연결램프 설치	∘ 규모 : 연결램프 설치 4개소 (사업기간 : '08~'13) - 연희로 진출, 정릉길(국민대앞) 진입, 화랑로 진/출입 ∘ 총사업비 : 447억원('11, 설계비 4.9억원)	∘'08.8~'09.12 : 타당성조사 및 기본계획 ∘'11.4 : 기본설계 용역시행 중	∘ '11.5 : 기본설계용역 준공 ∘ '11.6~'11.12 : 실시설계 용역 발주 및 시행
② 간선도로망 확충
	응봉교 재설치	∘ 규모 : 폭 6차로, 연장 693m (사업기간 : '01~'14) ∘ 총사업비 : 785억원 ('11, 90억원 : 공사 85.5, 감리 4.5)	∘'08.10.20 : 공사계약 및 착수 ∘'11.4 : 강교 제작 및 교각 설치중	('11년말 목표 공정 50%) ∘ '11. 6 : 주경간 아치교 상량 ∘ '11.12 : 노후교량 철거 완료
	율곡로(창경궁앞) 도로 구조 개선	∘ 규모 : 도로 확장 폭 4→6차로, 연장 800m(사업기간:'08∼'14) ∘ 총사업비 : 854억원 ('11, 120억원 : 보상 100, 공사 18, 감리 2)	∘'10.10.1 : 공사계약 ∘'11.4 : 돈화문측 문화재 시굴조사 완료 및 보고서 작성중	('11년말 목표 공정 10%) ∘'11.12 : 종묘측 사적지 가시설 공사 시행
	방화대교남단 접속도로 건설	∘ 규모 : 폭 1~3차로 연장 3.53㎞(사업기간:'95~'12) ∘ 총사업비 : 832억원 ('11, 12억원 : 공사 10, 감리 2) ※ 시비 632억, SH공사 200억	∘'05.10 : 공사 착수 ∘'11.4 : 터널 내부 및 시점부 옹벽 공사 중	('11년말 목표 공정 96%) ∘'11.12 : 터널 내부 설비 공사 교량 확장구간 상부 공사 시행
	겸재교 건설	∘ 규모 : 교량 건설 폭 15~18m, 연장 395m 도로 확장 폭 20~25→30~33m, 연장 750m ( 사업기간:'03~'13) ∘ 총사업비 : 1,136억원 ('11, 보상비 52.8억원)	∘'08.10.23 : 공사 착수 ∘'11.4 : 주탑 사재 케이블 공사완료 및 보상 추진중	('11년말 목표 공정 47%) ∘'11.10 : 도로확장 구간 토지보상 시행 ⇒ 추경 편성 시 공사비 확보 필요
	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설	∘ 규모 : 폭 18.5m, 연장 1,075m (사업기간 : '05~'12) ∘ 총사업비 : 790억원 ('11, 250억원 : 공사 242, 감리 8)	∘'08.3.10 : 공사 착공 ∘'11.4 : 지하차도 가시설 및 구조물 공사중	(11년말 목표 공정 67%) ∘'11.10 : 지하차도 가시설 설치 완료 ∘'11.12 : 지하차도 터파기 및 구조물 공사 시행

사업명		사업개요	추진현황	향후계획
	남부순환로(가리봉 균촉지구)지하차도 건설	∘ 규모 : 폭 25m(6차로), 연장 975m (사업기간 : '06~'14) ∘ 총사업비 : 1,115억원 ('11, 설계비 9억원) ※ 시비 765억, LH공사 360억	∘'06.6~'07.8 : 지하 차도 건설 타당성 조사용역 시행 ∘'10.6.16 : 기본 및 실시설계 착수 ∘'11.4 : 기본설계 진행 중	∘'11.9 : 기본 및 실시설계완료
③ 민간투자사업 추진으로 재정부담 완화 및 교통편익 향상
	용마터널	∘ 규모 : 폭 4차로, 연장 3.57km (사업기간 : '09∼'13) ∘ 총사업비 : 1,172억원 (재정지원 없음)	∘'01.5.22 : 민간제안서 접수 ∘'03.8.12 : 실시협약 체결 ∘'09.11.12 : 실시협약 변경체결 (최소 운영수입보장 삭제) ∘'09.11.21 : 공사착수 ∘'11.4. : 공사 추진 중	('11년말 목표 공정 30%) ∘'11.12 : 터널공사 시행(1.7km)
	서부간선지하도로	∘ 규모 : 폭 4차로, 연장 11.0km (사업기간 : '09~'16.) ∘ 총사업비 : 5,894억원 (건설보조금 2,352억원)	∘'07.12.20 : 민간제안서 접수(현대건설 등 7개사) ∘'09.12.18 : 시의회 동의 및 제3자 제안 공고 ∘'10.6.14 : 우선 협상대상자 선정 ∘'11.4 : 설계VE 및 실무협상 진행 중	∘'11.6 : 실시협약 체결 ∘'11년 하반기 : 공사 착공
	서울제물포터널	∘ 규모 : 폭 4차로, 연장 9.72㎞ (사업기간 : '10~ '16) ∘ 총사업비 : 5,551억원 (건설보조금 997억원)	∘'07.7.27 : 사업제안서 접수(금호산업 등 8개사) ∘'10.6.25 : 기획재정부 민간 투자심의위원회 심의 ∘'10.12 : 시의회 동의 ∘'11.1 : 제3자 제안 공고	∘ '11.6 : 우선협상대상자 선정 협상 추진
④ 광역도로건설로 지역간 연결 도로망 구축
	남부순환로 ～부천시계 도로 개설	∘ 규모 : 23∼30m(4∼6차로), 연장 3,974m (사업기간 : '99∼'11) ∘ 총사업비 : 2,006억원('10 이월사업비 152억원 : 보상 31, 공사120, 감리1)	∘'08.6.13 : 남부순환로~광덕교차로(L=1,550m) 공사 완료 ∘'11.4 : 토공 및 생태 터널 공사중	('11년말 목표 공정 100%) ∘'11.12 : 공사완료
	덕송～상계간 도로 개설	∘ 규모 : 폭 4차로(25m) 연장 2.38km(사업기간 : '07~'13) ∘ 총사업비 : 239억원 ('11, 보상비 24억원)	∘'11.4 : 도시관리계획( 도로) 결정 절차 이행 중(도시공원위원회 자문결과 검토․보완중)	('11년말 목표 : 보상 추진) ∘'11.5 : 도시계획시설(도로) 결정 ∘'11.12 : 토지보상 시행
	고양화전～신사간 도로 개설	∘ 규모 : 도로개설 폭 4차로 (25m), 연장 1.08km (사업기간 : '04~'13) ∘ 총사업비 : 405억원 ('11, 66억원 : 보상 24, 공사 41, 감리 1)	∘'04.4.21 : 광역도로 지정(건고시 2004-85호) ∘'05.4~'10.2 : 신사사거리 ~ 덕산중간 공사완료(은평구) ∘'11.4 : 터널구간 고양시와의 공사시행 방안 협의	('11년말 목표 공정 70%) ∘'11.12 : 터널구간 보상 및 터널갱구공사 시행

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

위례성길～성내천 복개도로간 도로 개설

∘ 규모 : 도로개설 폭6차로 (30~35m), 연장 1,360m (사업기간 : '04~'11)

∘ 총사업비 : 821억원

('11, 150억원 : 보상 52, 공사 96, 감리 2)

※ 국비 256, 시비 255, LH공사 310억원

∘'04.4.21 : 광역도로 지정 (건고시 2004-85호)

∘'07.3.13 : 공사착공

∘'11.4 : 서울외곽순환도로 횡단지하보차도 공사중

('11년말 목표 공정 100%)

∘'11.10 : 도로 포장공사 시행

∘'11.12 : 공사 완료

⑤ 한강상 교량확충

월드컵대교 건설

∘ 규모 :  왕복 6차로, 연장 1.98km(사업기간 : '97~'16)

∘ 총사업비 : 3,550억원('11, 100억원 : 공사 95, 감리 5)

∘'10.3 : 공사 착공

∘'11.4 : 교각 가물막이 공사 및 강교 조립

('11년말 목표 공정 9%)

∘'11.12 : 교각 강재 우물통 제작 및 거치 시행

구리암사대교 건설

∘ 규모 : 폭 4~6차로 연장 2.74㎞(사업기간 : '01~'13)

∘ 총사업비 : 3,645억원('11, 540억원 : 보상 200, 공사 327, 감리 등 13)

※ 국비1,822.5, 시비 1,822.5억원

∘'06.4. : 공사 착공

∘'11.4 : 강교 제작 및 접속교량 교각구조물 공사 중

('11년말 목표 공정 73%)

∘'11.12 : 접속교량 강교제작 및 설치 등

4. 쾌적한 물환경 도시 조성

① 하수관거 정비

성수2배수 분구

∘ 위치 : 광진구 화양, 노유, 자양동 일원

∘ 규모 : 33.3㎞

∘ 사업기간 : '07.1~'14.12

∘ 총사업비 : 57,460백만원

∘'11.1 : 차수설계

∘'11.2 : 계약심사 및 계약

(장기계속공사)

※ 실행예산 5,000백만원 배정(71.4%)

∘'11.3  : 공사착공

∘'11.12 : 공사 준공

수유2배수 분구

∘ 위치 : 강북 번1,2,3동,수유1,3동,인수동,미아동 일부

∘ 규모 : 52.0㎞

∘ 사업기간 : '07.1~'15.12

∘ 총사업비 : 64,359백만원

∘'11.1 : 차수설계

∘'11.2 : 계약심사 및 계약

(장기계속공사)

※ 실행예산 3,950백만원 (79.0%)

∘'11.3  : 공사착공

∘'11.12 : 공사 준공

가회배수 분구

∘ 위치 : 광진구 화양, 노유, 자양동 일원

∘ 규모 : 33.3㎞

∘ 사업기간 : '07.1~'14.12

∘ 총사업비 : 57,460백만원

∘'11.1 : 차수설계

∘'11.2 : 계약심사

∘'11.2.23 : 계약(장기계속공사)

∘'11.3.2 : 착공

※ 실행예산 5,000백만원 배정(71.4%)

∘'11.3~12 : 공사 추진

∘'11.12.   : 준공

장안배수 분구

∘ 위치 : 동대문 장안동,

성동 용답동 일부

∘ 규모 : 53.0㎞

∘ 사업기간 : '07.6~'14.12

∘ 총사업비 : 53,663백만원

∘'11.1 : 차수설계

∘'11.3 : 계약심사

∘'11.3.21 : 계약(장기계속공사)

∘'11.3.23 : 착공

※실행예산 5,340백만원(72.7%)

∘'11.3~12 : 공사 추진

∘'11.12.   : 준공

사업명		사업개요	추진현황	향후계획
	면목1배수 분구	∘ 위치 : 중랑구 면목2,5동,중화1,2동,상봉1,2동 일원 ∘ 규모 : 34.4㎞ ∘ 사업기간 : '07.1 ~ '14.12 ∘ 총 사업비 : 54,324백만원	∘'11.1 : 차수설계 ∘'11.2 : 계약심사 ∘'11.3.17 : 계약 및 착공 (장기계속공사) ※ 실행예산 4,000백만원(56.3%)	∘'11.12 : 공사 준공
	등촌1배수 분구	∘ 위치 : 강서 가양3동, 등촌1동,염창동 일대 ∘ 규모 : 32.7㎞ ∘ 사업기간 : '09.1~'14.12 ∘ 총사업비 : 39,311백만원	∘'11.1 : 차수설계 ∘'11.2 : 계약심사 ∘'11.3.11 : 계약 및 착공 (장기계속공사) ※ 실행예산 3,000백만원 배정(60.0%)	∘'11.3~12 : 공사 추진 ∘'11.12 : 준공
	녹번2배수 분구	∘ 위치 : 은평 녹번,역촌,응암1동,대조동 일대 ∘ 규모 : 32.2㎞ ∘ 사업기간 : '08.1~'13.12 ∘ 총사업비 : 34,626백만원	∘'11.1 : 차수설계 ∘'11.2 : 계약심사 ∘'11.2.25 : 계약(장기계속공사) ∘'11.3.2 : 착공 ※ 실행예산 4,000백만원 배정(56.3%)	∘'11.3~12 : 공사 추진 ∘'11.12 : 준공
	남가좌1배수 분구	∘ 위치 : 서대문구 연희,남가좌,홍은2동 일원 ∘ 규모 : 31.87㎞ ∘ 사업기간 : '09.1~'15.12 ∘ 총사업비 : 37,257백만원	∘'11.1 : 차수설계 ∘'11.2 : 계약심사 ∘'11.3.8 : 계약(장기계속공사) ∘'11.3.10 : 착공 ※ 실행예산 3,000백만원 배정(75.0%)	∘'11.3~12 : 공사 추진 ∘'11.12 : 준공
	도림1배수 분구	∘ 위치 : 영등포 대림1,2,3동, 동작 신대방1동 일원 ∘ 규모 : 64.6㎞ ∘ 사업기간 : '09.1~'18.12 ∘ 총사업비 : 79,437백만원	∘'11.1 : 차수설계 ∘'11.2 : 계약심사 ∘'11.3.14 : 계약 및 착공 (장기계속공사)	∘'11.3~12 : 공사 추진 ∘'11.12 : 준공
② 하수악취 저감대책		∘ 정화조 공기주입장치 설치 (300개소) - 악취발생 정화조 자치구별 행정지도 - 신축건물 악취 저감장치 의무화 및 공동주택 보조금 지원 ∘ 취약지역 하수시설물 집중관리 - 하수관로 준설 및 세정 (150km) - 복개하천 시설개선(3개소) - 유수지 시설개선(5개소) ∘ 물재생센터 잔존악취 제거	∘ 정화조 공기주입장치 설치 - 자치구별 악취 발생실태 조사중 - 시 소유 공공건물 공기주입장치 설치추진 - 신축 건물 악취저감장치 설치 조건 부여 및 공동주택 보조금 지원중 ∘ 취약지역 하수시설물 집중관리 - 자치구 빗물받이 진공흡입식청소기 운영비 지원 ▷ 21개 자치구 1,596백만원 - 준설 공사 조기 발주 및 조기 준설 자치구 독려 - 복개 하천 시설개선사업 설계중 - 유수지 시설 개선 사업중('12. 5월 완공) ∘ 물재생센터 복합악취 측정(기준이내) 및 인근주민 모니터링	∘ 정화조 악취발생 실태조사 및 공기입 장치 보급 확대 행정지도 지속추진 ∘ 취약지역 하수관로 우기전 준설 자치구 독려 ∘ 하수악취 해소 기본계획 용역발주

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

5. 물재생시설의 친환경성 증진

① 물재생센터 고도처리 및 시설현대화

∘ 위치 : 4개 물재생센터

∘ 규모 : 452만㎥/일

- 고도처리 : 391만㎥/일

(중랑 88, 난지 86, 탄천 90, 서남 127)

- 현 대 화 : 61만㎥/일

(중랑 25, 서남 36)

∘ 사업기간 : '09.1~'15.8

∘ 총사업비 : 727,820백만원

- 중랑 : 309,000백만원

- 난지 :  40,779백만원

- 탄천 :  92,717백만원

- 서남 : 285,324백만원

∘'08.6 : 기본계획 완료

∘'09.1~11 : 턴키공사 착수

∘'10.1~11 : 우선 시공분 완료(중랑, 탄천, 난지)

- 약품 투입시설, 여과기, 반류수 처리시설 등 설치완료

∘'11.3 : 서남물재생센터 우선 시공분 완료

∘'10.11~11.4 : 총인강화 처리현장실증실험 추진

∘'11.12 : 고도처리 주요시설 완료

∘'11.12 : 총인처리 약품 투입 시설 완료

∘'12.6 : 4개 센터 고도처리 완료

∘'14.1 : 중랑 현대화 완료

∘'15.8 : 서남 현대화 완료

② 서남분뇨처리시설 현대화

∘ 처리시설 현대화

- 처리시설 이전 설치

- 처리용량 증설4,000㎥/일

∘'11.2.7 : 설계 및 사업계획변경(부시장방침18호)

- 설계․시공일괄입찰방법

- 물재생센터 고도처리 및 현대화와 연계

∘'11.2.18 : 설계완료

(기본계획 재검토)

∘'11.4 : 사업 방침 검토 및 입찰안내서 검토작성 중

∘'11.4~5 사업방침수립 및 입찰방법심의

∘'11.5~6 입찰안내서 심의 및 공사 시행의뢰(도시기반시설본부)

③ 광역 하수 슬러지 처리시설 건설

∘ 위치 : 인천 서구 백석동 58

수도권매립지내

∘ 규모 : 3,600톤/일

(서울시지분 1,330톤/일)

- 1단계 : 고화1,000톤/일

(서울시지분 500톤/일)

- 2단계 : 건조1,000톤/일

(서울시지분 500톤/일)

- 3단계 : 건조1,600톤/일

(서울시지분 330톤/일)

※ 시공 : 수도권매립지관리공사

∘ 사업기간 : '06.4~'13.12

∘ 총사업비 : 273,180백만원

(서울시 89,590백만원)

∘'10.2~현재 : 2단계 슬러지 처리시설 공사중

∘'11.4 : 3단계 슬러지 처리시설 설계중

※1단계 : 사업완료

∘'11.9  : 3단계 설계완료

∘'11.11 : 3단계 공사착공

∘'11.12 : 2단계 공사준공

∘'13.12 : 3단계 공사준공

사업명

사업개요

추진현황

향후계획

6. 수해로부터 안전한 도시

① 광화문광장 침수 해소

단기대책

∘ 위치 : 종로 광화문네거리 일원

∘ 규모

- 하수암거 신설 140m

- 임시저류조 3개소

- 빗물받이 확충 36개소 등

∘ 사업기간 : '11.2~'11.6

∘ 총사업비 : 4,340백만원

∘'11.2.18 : 암거신설 설계완료 및 공사의뢰

∘'11.3.10 : 암거신설 공사계약 및 착수

∘'11.3.25 : 노면수 유도 및 우수배제시설 공사착수

∘'11.4. : 지장물 이설 등 공사추진중(공정 7%)

∘'11.6.30 : 공사완료 예정

항구대책

∘ 위치 : 종로 통인동~중구 삼각동

∘ 규모 :

- D=3.5m이상, L=2,000m

- Q=40㎥/sec

∘ 사업기간 : '11.3 ~ '13.12

∘ 총사업비 : 34,600백만원

∘'11.3.28 : 기본계획용역 계약 및 착수

- 기초조사, 기본자료 검토․분석 중

∘'11.5 : 입찰방법 심의

∘'11.6 : 입찰안내서 심의

∘'11.6 : 공사 발주의뢰(도기본)

② 기후변화 대응 침수피해 저감대책

∘ 방재시설 확충 용역 추진

- 대상

<1차용역>

▷ 강서․양천 가로공원길(19억)

▷ 광진 구의․자양동일대(6.4억)

▷ 서초․강남 강남역일대(12억)

<2차용역>

▷ 용산 한강로 일대(18억)

▷ 영등포 대림동 일대(6억)

▷ 강서 화곡동 일대(14억)

▷ 동작․서초 사당역 일대(8.3억)

- 내용 : 방재 시설물간 통합설계

∘ 용역발주 : 2. 24

- 강서․양천 가로공원

- 구의․자양동 일대

- 강남역 일대

- 송정, 용두, 장안2, 중동, 신림펌프장

※ 3. 30 용역계약 착수

∘ 4월 : 2차용역 투자심사

∘ 5월 : 2차용역 발주

∘ 7월 : 1차용역 중간보고

∘ 9월 : 1차용역 기술심의

∘ 11월 : 1차용역 준공

∘ 12월 : 1차용역 지역공사발주

7. 수변 문화공간 조성

① 생태하천 복원

∘ 성북천 등 20개하천 복원  사업 추진

- 하천정비 74.18㎞(호안정비, 유지용수 확보, 수생식물 식재 등)

- 수변카페, 女幸시설, 북  카페 등 테마가 있는 수변공간 조성

- 보행육교, 자전거도로를  통해 하천과 주변지역간  접근성 확보

∘ 중랑천 친수유량 공급

- 중랑천 본류 및 수계 우  이천 등 6개하천에 하천  유지용수공급(20만㎥/일)

※ 대상  : 중랑천,도봉천,방학천,당현천,우이천,묵동천,대동천

∘ 성내천, 묵동천, 반포천 등 11개 생태하천 복원사업 시행중

∘ 중랑천 친수 유량 공급사업 송수관로 부설공사 시행중(공정 33%)

∘'11.12 : 성북천 등 6개하천 생태하천 복원 완료

(성북,홍제,정릉,탄천,목감,대동천)

∘'12.12 : 우이천 등 5개   생태하천 복원완료

(우이,고덕,세곡,방학,당현천)

∘'12년 이후 : 양재천 등 3개 생태하천 복원 추진

(양재, 여의, 망월천)

∘'12.3 : 중랑천수계 친수    유량 공급사업 완료예정

사업명	사업개요	추진현황	향후계획
② 유수지활용 다목적 복합문화공간 조성	∘ 가양․새말 유수지 공원화 및 친수․복합문화공간조성 (시범사업) - 도서관 문화시설, 청소년 시설, 공공시설, 공원 등 - 유수지 복개 후 주민친 화적 공원(1,776㎡)조성, 초기우수 저류조 설치 등 ∘ 유수지 활용 기본계획 및 타당성 조사 용역 - 유수지 활용 기준설정, 활용방안 등	∘'10.6.7 : 유수지 친수․문화 공간 활용 계획 수립 - 유수지 활용 기본계획 및 타당성 조사용역 착수 ∘'11.1~'12.6 : 새말 유수지(성동 송정동) 공원조성(공정율 15%) ∘'11.4 : 가양유수지 복합문화공간조성 설계용역 착수('11.4~'11.12)	∘'11.4. : 유수지 활용기본계획 및 타당성 조사용역 확정 ∘'11.1~'12.6 : 새말유수지(성동 송정동) 공원조성 ∘'11.4~'12.12 : 가양유수지 복합문화공간 조성 설계용역 추진 - 가양유수지 친수․복합문화 공간 공사시행 ('11.12~'12.12) ∘'13년 이후 : 성과분석 결과를 토대로 추가대상사업 시행

	Ⅴ. 시의회 주요 지적사항 조치결과 및 추진현황 - 제229회 시의회 임시회 업무보고('11.2.22) -

시의회 주요 지적사항 조치결과 및 추진현황

(2011.4.15. 현재)

위 원 명	지적사항 및 조치결과	담당부서
장환진 의 원	치수적으로 안전한 생태하천 복원에서 사용한 조경석에서 발암물질인 석면이 검출되었으므로 장기대책 필요 - 조치결과 : 검토중 □시 보건환경연구원에서 공기중 비산여부 조사 등 지속적인 모니터링을 통해 시민 안전에 문제가 없도록 관리하고 있으며, □현재 국회 계류중인 석면안전관리법이 제정되면 관련법 규정에 따라 조치 계획임 - 추진현황 □환경부 조사결과 ․ 기간 : '10. 9.14~'10. 9.28 ․ 결과 : 석면검출 안됨 □석면안전관리법 제정 ․ '10.10.12 : 정부제안 ․ '10.10.13 : 국회 환경노동 위원회 회부 ☞주요내용 : 자연발생 석면관리(분포지역 공고 및 위해성에 따라 관리지역 지정고시 등) □공기중 비산여부 조사 (시 보건환경연구원에서 분기별 시행) ․ '11.3.21~31 : 현장시험 완료 ․ '11.4 : 성분 분석 중	하 천 관리과
오봉수 의 원	난지물재생센터 관련, 고양시 요구사항을 향후 어떻게 협의할 것인지 여부 - 고양시 요구사항 □난지물재생센터내 미허가시설 철거 □서울시내 타센터와 형평성 있는 현대화계획 조기시행 □인근 주민 피해지역에 대한 적절한 보상차원의 대책 - 조치결과 : 추진중 □하수처리와 직접 관련 없는 시설 적극 철거 및 이전 □기타 야적장, 현장사무실 등 6개소 철거 완료('11.1.31) □마포자원재활용시설 : '11.3월부터 반입중단 및 철거추진 □하수처리 등 존치 불가피시설 적법 절차이행 및 법적대응	물재생 시설과

위 원 명	지적사항 및 조치결과	담당부서
오봉수 의 원	□'16년 개발제한구역 관리 계획수립 수요조사 자료제출(3.24, 고양시) □행정대집행('11.2.9) 취소소송 및 집행정지신청(2.23) ․ 집행정지 인용(3.9 의정부지법) - 추진현황 □갈등해소 협상 T/F구성(3.17) 고양시와 실무대화 추진 ․ 고양시 전담반(T/F)구성(4.4) □행정대집행 취소소송 진행 ․ 1차 심리(4.12) : 협상 결과2차 심리(6.14)전 제출 □난지센터 환경개선사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 방침('11.4.11) ․ 용역발주 예정('11. 6.)	물재생 시설과
김춘수 의 원	도로경계석 마감처리가 미관 위주의 광택이 나는 재질로 되어 있어 눈․비가 온 뒤 더욱 미끄러워 보행자에 불편을 초래하므로 건널목(버스승강장, 횡단보도 등)에는 대리석(물갈이 돌)보다 미끄럼 방지용(곰보돌) 재질로 전면 교체하기 바람 - 조치결과 : 완료 □미끄럼에 취약한 기존경계석 개선 계획 수립('11.2.17) - 추진현황 □기존 경계석 개선 계획을 각 자치구에 시달, 자체 계획을 수립․시행토록 조치('11.2.21)	도 로 관리과
정용림 의 원	우이동 도선사 들어가는 입구 차고부지 저류조 설치 필요함 - 조치결과 : 추진중 □기 검토사업으로 절차이행 중(투자심사) - 추진현황 □우이천 저류조 타당성 조사 및 기본계획 용역(강북구) : '08~'09년 □투자심사 : '09년(재검토) □투자심사 재상정 : '11.5월	하 천 관리과

위원명	지적사항 및 조치결과	담당부서
김기덕 의 원	경의선 가좌역 ↔ DMC 구간 철도부지 공원화 사업에 대하여 '02년 개통한 성암로 병목구간(4차선→2차선)이 자동차 학원으로 인해 그간 방치되었는데 학원 이전으로 지역 민원이 해소될 수 있도록 철도시설공단과 협의 등 적극 노력하여 주기 바람. (3.4일 주민설명회에서 설명 필요) - 조치결과 : 추진중 - 추진현황 □'11.2.11 : 성암로 병목구간 확장계획 수립 □'11.3. 3 : 철도시설공단 방문 협의 □'11.3. 4 : 공원화 민원 관련 주민설명회 참석 도로확장사업 추진 상황 설명 □'11.3. 9 : 도로개설 관련 협조 요청(→철도시설공단)	도 로 계획과
주찬식 의 원	잠실대교 남단 지하차도 개설로 장미아파트 뒤편 공원 폐쇄 및 소음 발생, 장미길(장미A 1, 2단지 사이길) 차량증가로 인한 민원해소 대책을 마련하여 주기 바람 - 조치결과 : 검토중 - 추진현황 □'10.12.28 : 실시설계 착수 □'11.4월 현재 : 실시설계 중으로 주민불편 최소화 방안 검토 중	도 로 계획과
서영진 의 원	우이천 예산삭감으로 공사중단 방치되고 있음. 추경 예산 반영 가능한지 - 물 웅덩이 등 안전사고 발생소지 등 있음 - 조치결과 : 추진중 □'10년도 기확보 예산 20,851백만원 중 12,052백만원 집행, '11.4월 현재 사고이월예산 8,799백만원으로 공사중에 있음(총사업비 28,851백만원) - 추진현황 □ 잔여공사비 8,000백만원은 '11년 추경예산 편성시 반영될 수 있도록 추진중	하 천 관리과
오필근 의 원	장기 미집행 도시계획시설중 매입 부지는 주차장 등으로 활용할 필요가 있다고 보는데 매입한 부지는 어떻게 관리하고 있는지 현황자료를 제출해 주기 바람 - 조치결과 : 완료 □'11.3.10 : 현황자료 제출	도 로 계획과

위 원 명	지적사항 및 조치결과	담당부서
이경애 의 원	서남분뇨처리시설 관련 자료제출 바람 - 2009년도 타당성 조사, 각종계약서 - 예산집행(제일엔지니어링과 수의계약 사유 등) - 악취공법 선정시 주고 받은 문서내용, 사업계획 변경 내역 - 조치결과 : 제출 완료 □서남분뇨처리시설 지하화 및 증설 추진경위서 □타당성조사 및 기본계획보고서 □사업관련 방침서 □사업계획 변경방침, 정산보고서 □계약관련 서류 등 제출 - 추진현황 □'11.2.18 : 설계용역 준공 (기본계획 재검토) □'11.4. : 사업방침 검토 및 입찰안내서 검토 작성 중	물재생 시설과