2012 회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연 번	이월사업명	2012 회계연도 예산					지출원인행위액 (2012.12.31 기준)			지출액 (2012.12.31 기준)		2012 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초･추경)
		관･항･세항	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금액	준 공 예정일	월일	금액	관･항･세항	목 (세목)	이월액	준 공 예정일
	합 계			54,154,247				48,445,091			20,864,169			28,291,482 (1,018,350)		4,998,596
1	관용차량 구매 (53101)	자본적지출 가동설비자산 차량운반구 (126-01)	자산취득비등 자산취득비 (405-01)	99,857	86,825	`12.11.22	`12.11.27	86,814	`13.4.25	`12.8.13	23,624	자본적지출 가동설비자산 차량운반구 (126-01)	자산취득비등 자산취득비 (405-01)	63,190	`13.`1.31	13,043	한강유역청에 지원하고 있는 하이브리드 차량 2대가 2012. 9월과 10월에 고장으로 운행이 불가하고 수리비가 과다하여 긴급 구입을 추진하였으나, 차량교체 승인 등 사전절차와 차량제작기간이 소요되어 이월됨 <기타>	당초 (경영관리부)
2	Arisu 인포시스템 재구축 용역(33101)	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	1,570,000	1,570,000	‘12.3.26	‘12.5.14	1,570,000	‘13.3.15	‘12.12.27	1,413,000	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	157,000	‘13.3.15	0	Arisu 인포시스템 재구축 사업은 14개월 (‘12.3~’13.4)로 계획하여 1차년도 10개월, 2차년도 4개월로 설계된 사업이나, 사업 추진시 업무처리 일정 지연으로 5월에 계약되어, 1차년도 계약분이 공기 (10개월)부족으로 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (요금관리부)
3	Arisu 인포시스템 재구축 용역감리(33101)	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	130,000	130,000	‘12.8.1	‘12.10.11	102,291	‘13.7.13	‘12.10.29	51,146	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	51,146	‘13.7.13	27,708	Arisu 인포시스템 재구축사업이 지연됨에 따라 감리용역도 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (요금관리부)
4	자재관리시스템 보완 개발(33101)	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	85,000	85,000	‘12.9.21	‘12.10.25	82,700	‘13.3.24	-	0	자본적지출 무형자산 무형자산 (151-01)	무형자산계정 (전산개발비) (151-02)	82,700	‘13.3.24	2,300	2012년 결산업무 추진 중 계량기관리 관련 자료가 예산회계시스템과 미연계로 전표 오류발생 등 시스템 보완이 시급하여 긴급 발주한 사업으로 당해년도 준공처리가 불가하여 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (요금관리부)
5	광암정수센터 시설현대화 및고도정수처리(전기공사4차)(11101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,064,741	1,064,741		`12.2.2	1,064,741	`12.12.30	`12.9.27	745,210	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	319,531	`13.2.28	0	선행공정인 토목, 건축, 기계, 조경공사의 준공기한(’12.12.30)과 병행되므로 후속 공정으로서 통수 후 계측값 수정 및 조정을 통한 전기 및 계장설비의 안정적인 운전기능을 확보하기 위하여 준공 및 납품기한을 연기하여 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (생산부)
6	광암정수센터 시설현대화 및 고도정수처리통합감시제어시스템구매(11101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	770,000	770,000		`12.2.10	770,000	`12,12.30		0	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	438,771	`13.2.28	331,229		당초 (생산부)
7	삼성배수지 건설전기공사(2차) (22101)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,690,435	1,690,435	‘12.01.31	‘12. 2.6 ~ 12.20	1,550,522	‘13.4.20	‘12.9.13 ~10.29	217,567	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,332,956	2013.4.20	139,912	선행공정인 토목, 건축공사가 배수지 상부 공원조성에 따른 민원 발생 및 배수지 내부 방수공법 재검토 등으로 공사가 중지되어, 후속공정인 전기공사도 순연되어 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (생산부)
			시설비등 (시설 부대비) (401-03)	30,000	20,000	‘12.01.16	‘12. 4.6 ~ 12.12	14,451	‘13.4.20	‘12.4.6 ~ 7.6	8,584		시설비등 (시설 부대비) (401-03)	5,868	2013.4.20	15,548		당초 (생산부)
8	관말지역 재염소 주입 시설 설치(12104)	자본적지출 가동설비자산 기계장치 (125-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,415,000	1,415,000	`12..5.10 ~ 10.23	`12. 9.18	959,816	`13.1.16	`12.10.24	383,926	자본적지출 가동설비자산 기계장치 (125-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	575,890	`13.1.16	455,184	재염소주입시스템 설치장소 재검토 및 협상에 의한 계약에 3개월이 소요되어 이월됨 〈사전절차지연〉	당초 (생산부)
9	정수슬러지 재활용 기술개발 학술용역(12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)		70,000	’12.1	’12.7 ~ ’12.11	65.308	’13.5.14	’12.7 ~ 11	19,838	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	45,470	’13.5.14	50,162	정수슬러지재활용 신증플랜트 운영에 평가 및 최종기술선정을 위한 연구용역으로 용역기간이 12개월로 인한 공기부족으로 이월됨 〈기타〉	당초 (생산부)
10	수도정비기본계획(변경) 용역(2차) (33203)	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	연구개발비 (연구용역비) (208-01)	800,000	800,000	10.22	`12.10.25	800,000	`13.6.30		-	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	연구개발비 (연구용역비) (208-01)	800,000	`13.6.30	-	’11~’13년에 걸쳐 장기계속용역으로 추진하는 사업으로 1차용역이 지연으로 ’12.10.31일에 종료됨에 따라 2차용역도 순연되어 이월됨 <기타>	당초 (급수부)
11	수서배수지 수계 배수관 부설공사 (22102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,760,957	1,760,957	1.17	`12.2.1	1,760,957	`12.12.31	`12.2.20 ~ 12.27	1,362,900	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	398,057	`13.6.30	-	관로 매설구간 기존도로 시설물에 대한 SH공사 보상지연, 도로확장 및 부지조성 공사 지연으로 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (급수부)
12	수서배수지 건설공사 건설폐기물(건설오니) 처리용역 (22102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,186	2,186	1.17	`12.11.22	2,000	`12.12.31	-	-	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,000	`13.2.15	186	공사현장의 상태가 설계서와 상이하여 토목,건설공사가 지연되어 병행 공정인 폐기물처리용역도 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (급수부)
13	수서배수지 건설공사 (2차) 레미콘조달구매 (22102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	326,138	326,138	1.17	`12.4.23	326,138	`12.12.30	`12.10.12 ~ 12.31	234,875	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	91,263	`13.10.25	-	수서배수지 건설공사(2차)의 현장 상태가 설계도서와 상이하여 지연됨에 따라 자재 투입시기 조정으로 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (급수부)
			시설비등 (시설 부대비) (401-03)	4,000	1,800	4.12	`12.4.23	1,673	`12.12.30	`12.10.12 ~ 12.31	1,204		시설비등 (시설 부대비) (401-03)	469		2,327
14	수서배수지 건설공사 시공감리용역(3차) (22102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	445,000	445,000	1.17	`12.12.18	150,380	`13.6.20	-	-	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	150,380	`13.6.20		수서배수지 건설공사(2차)의 현장 상태가 설계도서와 상이하여 관로부설구간 노선변경으로 공기가 4개월 연장되어 감리용역이 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (급수부)
15	강북정수장 고도정수처리시설공사 자재 구매 (레미콘,시멘트)-11102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	526,583	526,583	‘12.01.31	‘12.06.01	526,583	`13.12.31	‘12.12.31	458,455	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	68,128	‘13.12.31	-	관급자재를 구매요청하여 계약하는 시간이 필요하므로 2013. 1월에 사용할 관급자재를 구매하여 이월 됨 〈기타〉	당초 (시설관리부)
			시설비등 (시설 부대비) (401-03)	2,708	2,708	‘12.05.30	‘12.06.01	2,708	`13.12.31	‘12.12.31	2,351		시설비등 (시설 부대비) (401-03)	356	‘13.12.31	-
16	광암정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 전면책임감리용역(11101	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	350,000	350,000	‘12.01.31	‘12.01.31	270,000	`13.12.30	‘12.12.28	250,074	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	19,926	‘13.01.15	-	토목, 건축, 기계, 조경공사가 ’12.12.30 준공됨에 공사준공처리 및 인수인계 등 업무처리를 위하여 감리용역기간을 연기함에 따라 이월 됨 〈유관사업지연〉	당초 (시설관리부)
		자본적지출 가동설비자산 건물 (124-01)		350,000	350,000	‘12.01.31	‘12.01.31	740	`13.12.30	‘12.12.28		자본적지출 가동설비자산 건물 (124-01)		740	‘13.01.15	-
17	삼성배수지건설공사(4차) (21102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	4,554,565	4,554,565	‘12.01.31	‘12.6.26 ~ 11.30	4,554,565	‘13. 4.20	‘12.6.15 ~ 12.31	1,724,120	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,830,445	‘13.4.20	-	배수지 상부 공원조성에 따른 민원 발생 및 배수지 내부 방수공법 재검토 등으로 공사가 중지되어 이월 됨 〈기타〉	당초 (시설관리부)
18	삼성배수지 건설공사 전면책임감리용역(6차)용역(21102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (감리비) (401-02)	345,000	345,000	‘12. 1.31	‘12. 7.30	345,000	‘13. 4.11	‘12.9.17 ~ 11.21	244,200	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-401)	시설비 등 (감리비) (401-02)	100,800	‘13. 4.11	-	선행공사가 중지됨에 따라 공사공정에 맞추어 감리원 투입을 조정하여 이월 됨 <유관사업지연>	당초 (시설관리부)
19	상수도 GIS DB 정확도 개선사업(33202)	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (712-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	3,980,000	3,980,000	'12.2.8	`12.3.26 ~ 12.04	3,979,200	'13.03.31	'12.4.26 ～ 12.27	3,653,176	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (712-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	326,024	'13. 3.31	800	신설관로에 대한 실시간 측량 및 DB구축의 공백이 발생되지 않도록 용역기간을 12개월로 인한 공기부족으로 이월됨 〈기타〉	당초 (시설관리부)
20	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(건축)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,521,361	3,500,000	`12.4.16	`12.5.18	1,781,585	’13.1.15	’12.6.5 ~ 12.6	1,409,374	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	372,210	’13.1.15	739,777	당초 준공기한 (‘13.1.15) 이전 ’12년 12월말 까지 조기 준공 처리 계획이었으나, 1층 중앙 복도 신설 및 별도 공사인 중앙 제어실 감시 제어시스템 이전 공사 지연 등 신규공정이 발생하여 부득이 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (중부수도)
21	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(전기)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	713,849			`12. 5.3	469,572	‘13.1.3	‘12.6.22 ~ 12.11	396,195	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	73,376	‘13.1.20	244,278		당초 (중부수도)
22	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(기계설비)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	415,932			2012 5.3	109,509	‘13.1.4	‘12.8.10 ~ 9.27	71,092	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	38,417	‘13.1.17	306,423		당초 (중부수도)
23	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(정보통신)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	81,735			2012 5.2	70,175	‘13.1.4	‘12.6.21	35,000	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	35,175	‘13.1.4	11,560		당초 (중부수도)
24	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(소방)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	65,784			2012 5.2	62,206	‘13.1.4	-	-	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	62,206	‘13.1.4	3,578		당초 (중부수도)
25	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(건축감리)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	149,300	270,000	2012. 4.16	2012 5.24	124,300	‘13.1.26	‘12.5.29	55,935	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	68,365	‘13.1.26	25,000		당초 (중부수도)
26	중부수도사업소 청사 리모델링 공사(전기외)(53102)	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	120,700			2012 6.22	61,639	‘13.2.17	‘12.7.26	30,819	자본적지출 가동설비자산 건물 (123-01)	시설비 등 (감리비) (401-02)	30,820	‘13.2.17	59,061		당초 (중부수도)
27	장위동 45-2～이문동 212-14 간 송배수관정비공사 (비굴착갱생) (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,255,300	2,255,300	’12.11.07	’12.8.13 ~ 12.18	2,229,403	’13.02.16	’12. 9.13 ~ 12.20	16,604	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,238,060 (25,262)	’13.02.16	636	고도정수로 인한 공릉→용마 대체급수와 관련하여 시행된 공사로 본청 건설신기술활용심의 등 선행 행정절차의 장기화로 발주가 지연되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (중부수도)
28	종로5가 398-3 ~ 삼선동 13-1간 송배수관정비공사 (비굴착갱생) (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,928,200	1,928,200	12.11.07	12. 8.10 ~ 12.20	1,837,500	’13. 2.17	12.12.20 ~ 12.24	417,068	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,510,983 (90,550)	’13.02.17	149	대학로 및 동소문로의 노후 송수관을 정비하여 적수발생 등 수질사고 및 누수발생을 사전에 예방하여 시민들에게 수돗물을 안정적으로 급수코자 시행된 공사로 본청 건설신기술활용심의 등 선행 행정절차의 장기화로 발주가 지연되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (중부수도)
29	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관 정비공사 (22101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	4,124,248	4,124,248	2012.1.3	3.12 ~ 12.24	4,009,090	2013.4.30	11.12	51,966	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	4,072,282 (115,158)	2013.4.30	-	건설 신기술활용 자문 위원회 심의 결과 조건부 수용에 따른 신기술대상 일괄협약체결로 원도급 및 하도급 계약이 2012. 7월 되었으며 서울시 도로점용공사장 교통소통 대책 자문 위원회 심의가 2012. 10월 조건부 시행으로 결과 통보가 지연되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (서부수도)
30	면목역~중랑문화원간 배수관 정비공사(21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	3,040,000	3,040,000	`12.4.24	`12.5.1 ~ 12.10	2,705,342	`13.4.30	`12.5.1 ~ 12.10	1,541,114	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,164,228	`13.4.30	334,658	공사구간내 교통심의(본청) 및 유관기관(서울지방경찰청, 중랑구청 도로과) 업무협의등에 따른 공사착공 지연으로 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (동부수도)
31	광나룻길 배수관정비공사 (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	5,570,898	5,570,898	`12.1.30	`12.5.1 ~ 12.20	4,738,882	`13.1.27	`12.5.1 ~ 12.20	2,278,425	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,565,645 (105,187)	`13.1.27	726,428	공사구간내 유관기관(서울지방경찰청, 성동도로사업소, 광진구청, 성동구청) 업무협의등에 따른 공사착공 지연으로 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (동부수도)
32	중화역~중랑전화국간 송배수관 정비공사(21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	3,000,000	3,000,000	`12.11.8	12.11.8 ~ 12.20	2,497,722	`13.6.28	-	-	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,551,219 (53,497)	`13.6.28	448,781	중랑구 동일로상에 부설된 대형송수관에서 수차에 걸친 누수발생과 그로 인한 성동 도로사업소로부터 도로 동공 발생으로 도로유지관리 업무에 지장을 초래하고 있어 상수도 시설물 점검 요청이 있었으며, 향후 우려되는 대형 누수사고를 사전에 방지코자 이월 됨 〈기타〉	당초 (동부수도)
33	중화역~중랑전화국간 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역 (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	26,180	26,180	`12.11.8	12.11.8 ~ 12.20	22,737	`13.2.4	-	-	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	22,737	`13.2.4	3,443		당초 (동부수도)
34	쌍문역~수유사거리간 송배수관 정비공사 (2공구)(21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,012,519	2,012,519	‘12. 1.3	‘12. 7.19 ~ 12.28	1,781,769	‘13. 4.30	‘12.12.28	1,331,330	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	681,189 (230,750)	‘13. 4.30	-	비굴착 갱생공법으로 추진중에, 공사구간 일부 약 150m구간의 상수도관(900mm)이 수유역상부 슬라브에 약20㎝ 묻혀 있어 비굴착 갱생을 위한 작업구 설치 불가(플랜지설치 불가)로 원인자인 서울매트로와 공사 가능토록 협의 때문에 이월 됨 〈공사중 장애요인 발생〉	당초 (북부수도)
35	신월동 36-1~205-44간 송배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,603,584	2,603,584	`12.1.21~12.21	`12.6.12 ~12.21	2,146,587	`13.1.14	`12.4.12~12.21	1,250,270	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,043,248 (146,931)	`13.1.14	310,066	비굴착으로 개량하는 신기술 공법을 적용한 공사로서, 신기술 공법선정을 위한 비굴착갱생(신기술) 공법선정 기술심의 위원회 개최 결과(2012. 3.15) 및 서울특별시 건설신기술 활용심의회 심의(2012. 5.11)등 행정절차 지연으로 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (강서수도)
36	봉천1동1698-1~ 신림5동1422-54번지 송배수관정비공사 (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	2,233,123	2,233,123	’12.1.3 ’12.8.23	’12.1.10 ~ 12.24	1,900,368	‘13.7.5	‘12.3.9 ~ ‘12.12.27	87,809	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,844,627 (32,068)	’13.7.5	300,687	공사구간이 교통이 복잡한 신림역 주변으로 도로점용 승인시 주말 및 공휴일 야간 에만 공사토록 관악경찰서로부터 승인됨에 공사기간이 많이 소요되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (남부수도)
37	경부선(독산~금천구청역간)철도횡단 상수도관 부설공사(21106)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	500,000	500,000	’12.5.23	’12.12.27	359,479	’13.5.29.	-	-	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	444,053 (84,574)	’13.5.29	55,947	철도횡단 안정성 검토 종합보고서 용역 시행 후 한국철도시설관리공단과 한국 철도공사 수도권 서부본부의 협의기간 이 장기간 소요되어 ’12.12.27일 계약이 체결되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (남부수도)
38	학동역~강남구청역간 외 1개소 송배수관 정비공사(21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,310,000	1,310,000	`12. 1.3 ～7.6	`12.8.9 ~12.31	1,132,631	`13.4.4	`12.8.28 ~ 12.31	455,536	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	702,757 (25,662)	`13.4.4	151,707	건설신기술활용 자문 위원회 심의 결과 조건부수용에 따른 신기술대상 일괄협약체결로 원도급 및 하도급 계약이 지연되어 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (강남수도)
39	서래공원～대법원간 배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	1,200,000	1,200,000	`12.1.3 ～ 7.6	`12.8.1 ～ 11.29	944,021	`13.2.5	`12.8.1 ～12.27	641,382	자본적지출 가동설비자산 구축물 (124-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	411,350 (108,711)	`13.2.5	147,268		당초 (강남수도)
40	수서배수지 건설공사 관급자재 구매 (22102)	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	101,400	101,400	12.3..28	12.4.23	85,643	13.4.30	-	0	자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 (131-01)	시설비 등 (시설비) (401-01)	85,643	13.4.30	15,757	수서배수지 건설공사 2차 공사 준공 기한 연기 및 토지 보상이 지연되어 이월 됨 <유관사업지연>	당초 (수도자재)
41	동파방지용 수도계량기 구매 (32203)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선교체비 (기타교체비) (207-05)	125,352	125,352	12.12.17	12.12.24	112,832	13.1.23	-	0	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선교체비 (기타교체비) (207-05)	112,832	13.1.23	12,520	행정안전부에서 취약계층에 대한 동파 방지용 수도계량기 교체지원 예산이 11월말에 교부되어, 동파방지용 수도 계량기를 구매하는데 납품기간이 3개월 소요되어 이월 됨 <기타>	당초 (수도자재)
42	고품질(전자식, 초음파식) 수도계량기구매 (32203)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선교체비 (기타교체비) (207-05)	317,242	317,242	12.11.26	12.12,14 ~ 12.24	289,750	13.3.14 ~3.24	-	0	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선교체비 (기타교체비) (207-05)	289,750	13.3.14 ~3.24	27,494	행정안전부에서 물가안정에 기여한 인센 티브 특별교부세가 11월에 교부되어 고품질(전자식, 초음파식) 수도계량기를 구매하는데 납품기간이 3개월 소요되어 이월 됨 <기타>	당초 (수도자재)
43	수도계량기교체민간위탁(32202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	민간이전 (민간위탁 대행사업비) (307-04)	9,250	9,250	12.12.13	12.12.18	9,200	13.3.18	-	0	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	민간이전 (민간위탁 대행사업비) (307-04)	9,200	13.3.18	50	종전 디지털계량기 시범사업 100개소는 동일 검침지역이 아닌 장애검침지역으로 분산 설치(2개구 21동)되어, 기기의 안전 성 및 내구성, 통신 방식 등 내습성 등에 중점을 두고 시행해 왔으나, 디지털계량기 내습성에 대한 추가 검증기간이 5~6개월 소요되어 이월 됨 <기타>	당초 (수도자재)

(단위 : 천원)