설계변경 심의 신청서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

접수번호	제2014- 호
구 분	설계변경심의

공사명	2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

신 청 자	시설관리과 이승철
제출년월일	2014. 06.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

□ 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

○ 공사개요 :

․ 당초 : 누수복구 1,140개소   불용관정비 900개소

․ 변경 : 누수복구 840개소     불용관정비 650개소

물량 감소 발생 (설계변경사유서 참조)

○ 계약기간 : 2013. 7. 3 ~ 2014. 6. 30

○ 일   시 : 2014. 6. 26             검토위원 : 지방시설주사  임종진

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
신규공종 단가 산출 적정여부
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최보고서 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

□ 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

○ 공사개요 :

․ 당초 : 누수복구 1,140개소   불용관정비 900개소

․ 변경 : 누수복구 840개소     불용관정비 650개소

물량 감소 발생 (설계변경사유서 참조)

○ 계약기간 : 2013. 7. 3 ~ 2014. 6. 30

○ 일   시 : 2014. 6. 26              검토위원 : 지방시설주사  김만재(인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
신규공종 단가 산출 적정여부
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최보고서 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

□ 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

○ 공사개요 :

․ 당초 : 누수복구 1,140개소   불용관정비 900개소

․ 변경 : 누수복구 840개소     불용관정비 650개소

물량 감소 발생 (설계변경사유서 참조)

○ 계약기간 : 2013. 7. 3 ~ 2014. 6. 30

○ 일   시 : 2014. 6. 26         검토위원 : 지방시설주사  김창열 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	타당함
신규공종 단가 산출 적정여부	적정함
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적적함
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부	적적함
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최보고서 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

□ 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

○ 공사개요 :

․ 당초 : 누수복구 1,140개소   불용관정비 900개소

․ 변경 : 누수복구 840개소     불용관정비 650개소

물량 감소 발생 (설계변경사유서 참조)

○ 계약기간 : 2013. 7. 3 ~ 2014. 6. 30

○ 일   시 : 2014. 6. 26            검토위원 : 지방시설주사보  이문성 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
신규공종 단가 산출 적정여부
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최보고서 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

□ 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

○ 공사개요 :

․ 당초 : 누수복구 1,140개소   불용관정비 900개소

․ 변경 : 누수복구 840개소     불용관정비 650개소

물량 감소 발생 (설계변경사유서 참조)

○ 계약기간 : 2013. 7. 3 ~ 2014. 6. 30

○ 일   시 : 2014. 6. 26               검토위원 : 지방시설주사보  유광창 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
신규공종 단가 산출 적정여부
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최보고서 1부. 끝.

설계변경 심의 결과서 ○ 심의일시 : 2014. 6. 26(목) 09:30 ~10:30 ○ 공사명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속) ○ 심의사항 (당초) 一金이십억육천이백일십사만칠천이백일십원정(\2,062,147,210원) (변경) 一金일십오억팔천사백삼십육만원정(\1,584,360,000원) ※ 검토내용 ○ 시공물량 증․감에 따른 변경 ○ 신공종 발생 : 주철관 부설 D=400mm 외 5종 ○ 심의결과 상기 심의사항을 ( 승인, 보류, 취소 ) 한다. 2014. 6. 26.
	구 분	직 위	성 명	날 인	의견사항
	위 원 장	시설6급	임 종 진
	위 원	시설6급	김 만 재
	위 원	시설6급	김 창 열
	위 원	시설7급	이 문 성
	위 원	시설7급	유 광 창