2013년도 건설기계 사용계획(도로보수과)

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설기계 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
	계	150,000		150,000			12종
1	직 영 (포장도로보수공사)	150,000 (재료비)	-	150,000	1.01	12.31	덤프트럭	8톤	3	3.01 ~ 11.30	1280/160
							덤프트럭	15톤	1	3.01 ~ 11.30	1280/160
							마이티	2.5톤	2	1.01 ~ 12.31	1920/240
							다목적차	5톤	1	3.01 ~ 11.30	560/70
							셀프로더	16.7톤	1	3.01 ~ 11.30	560/70
							굴삭기	0.58㎥	1	1.01 ~ 12.31	560/70
							로우더	0.4㎥	1	3.01 ~ 11.31	500/50
							로울러	2톤	1	3.01 ~ 11.31	560/70
							로울러	6.5톤	1	3.01 ~ 11.31	560/70
							A/P휘니셔	2.5m	1	3.01 ~ 11.31	560/70
							노면파쇄기	1m	1	3.01 ~ 11.31	560/70
							물차	2000ℓ	1	3.01 ~ 11.31	560/70
2	직 영 (도로부속물 유지관리)	-	-	-	1.01	12.31	물차	2000ℓ	1	1.01 ~ 12.31	240/30
							마이티	2.5톤	1	1.01 ~ 12.31	480/60
3	직 영 (교통안전시설물유지관리)	-	-	-	1.01	12.31	물차	2000ℓ	1	1.01 ~ 12.31	160/40
							마이티	2.5톤	1	1.01 ~ 12.31	640/80

2013년도 건설기계 사용계획(시설보수과)

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설기계 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
	계	50,000		50,000			10종		14대
1	직 영 (시설물유지관리)	50,000 (재료비)	-	50,000	1.01	12.31	덤프트럭	8톤	2	3.01 ~ 10.31	240/30
							덤프트럭	15톤	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							마이티	2.5톤	1	1.01 ~ 12.31	2,920/365
							다목적차	5톤	1	2.01 ~ 12.31	960/120
							셀프로더	16.7톤	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							굴삭기	0.58㎥	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							로우더	0.4㎥	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							로울러	2톤	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							로울러	6.5톤	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							A/P휘니셔	2.5m	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							노면파쇄기	1m	1	3.01 ~ 10.31	240/30
							물차	10,000ℓ	1	2.01 ~ 12.31	960/120
							메가트럭	5톤	1	2.01 ~ 12.31	240/30
2	임대 및 자체 교량점검	-	-	-	-	-	고소작업차		1	3.01 ~ 12.31	240/30

2013년도 건설기계 사용계획(교량보수과)

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설기계 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
1	직 영 (도로시설물 유지관리)	-	-	-	1.01	12.31	마이티	(2.5TON)	1	1.01~ 12.31	640/80