2013회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연 번	이월사업명	2013 회계연도 예산					지출원인행위액 (2013.12.31 기준)			지출액 (2013.12.31 기준)		2013 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초･추경)
		관･항･세항	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금액	준 공 예정일	월일	금액	관･항･세항	목 (세목)	이월액	준 공 예정일
	합 계			36,340,959	36,340,959			33,379,465			8,383,683			25,866,285 (870,506)		2,090,991
1	노량진배수지 사고 백서 제작 (41201)	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	19,270	19,270	`13.8.5	`13.8.8	18,691	`14.3.31	`13.12.31	12,200	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	6,491	`14.3.31	579	노량진배수지 사고에 대하여 현재 재판 진행 중으로 재판결과에 따른 내용을 수록하고자 제작기간을 당초 `13.11.30에서 `14.3.31로 변경함에 따라 이월 됨 〈기타〉	당초 (경영관리부)
2	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	6,203,939	6,203,939	`13.1.3 ~ 4.5	`13.1.3	6,203,939	`14.2.6 ~ 4.5	`13.1.9 ~ 12.30	4,907,593	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,296,346	`14.2.6 ~ 4.5	0	안전사고 발생에 따른 작업중지 명령해제 이후 터널 및 기존 시설물 안전성 검토기간 종료시까지(`13.11.14~12.20) 공사가 중단 되어 이월 됨 〈공사중 장애요인 발생〉	당초 (급수부)
3	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 전면책임감리용역 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	412,000	412,000	`13.1.1	`13.1.3	412,000	`14.2.6	`13.1.9 ~ 12.30	164,800	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	247,200		0		당초 (급수부)
4	강북정수센터 고도처리 시설공사 관급자재 구매 (11102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	4,518,903	4,518,903	`13.4.11	`13.11.15	4,518,903	`14.5.31	`13.12.17	12,466	자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	4,506,437	`14.5.31	0	경영난으로 시공업체가 파산절차를 진행중 으로 공사가 중단되어 토목공사 공정 차질 및 관급자재(레미콘,아스콘,입상활성탄) 구매 지연으로 이월 됨 〈기타〉	당초 (시설관리부)
			시설비 및 부대비 (시설부대비)(401-03)	886	886			886			64		시설비 및 부대비 (시설부대비) (401-03)	822		0
5	암사정수센터 고도처리 시설공사 관급자재 구매 (11104)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	8,893,283	8,893,283	`13.3.28 ~ 11.21	`13.3.29 ~ 12.27	8,893,283	`14.3.7 ~ 8.30	`13.6.11 ~ 12.31	1,188,089	자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	7,705,194	`14.3.7 ~ 8.30	0	토목공사 공정차질 및 관급자재(입상활성탄) 구매 지연으로 이월 됨 〈기타〉	당초 (시설관리부)
			시설비 및 부대비 (시설부대비)(401-03)	726	726			726			280		시설비 및 부대비 (시설부대비) (401-03)	446		0
6	남산소월길 송배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	3,638,182	3,638,182	`13.1.3	`13.8.6 ~ 10.29	2,782,820	`14.8.8	`13.10.30	2,587	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	3,208,827 (428,595)	`14.8.8	426,768	비굴착으로 개량하는 신기술 공법을 적용한 공사로서, 공법선정 및 신기술활용심의 등 행정적 절차 및 도로관리청 도로굴착 통제로 인한 승인 지연 (`13.11.1)으로 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (중부수도)
7	불광천~증산교간 송배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	3,438,708	3,438,708	`13.1.3	`13.6.15 ~ 12.24	2,904,115	`14.5.25	`13.11.22	5,348	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	2,962,456 (63,689)	`14.5.25	470,904	비굴착으로 개량하는 신기술 공법을 적용한 공사로서, 공법선정 및 신기술활용심의 등 행정적 절차 및 도로굴착 통제로 인한 협의 지연 으로 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (서부수도)
8	면목2동사거리~장평교간 송배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	4,000,000	4,000,000	`13.1.3	`13.1.17 ~ 6.28	3,228,072	`14.5.26	`13.4.4	20,706	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	3,485,757 (278,391)	`14.5.26	493,537	비굴착으로 개량하는 신기술 공법을 적용한 공사로서, 건설신기술적용 심의후 2013. 7.2일 착공하여 여름철, 겨울철 굴착통제(2개월) 및 유관기관(중랑구청 도로과, 서울지방경찰청)과 업무협의가 지연되어 이월 됨 <사전절차지연〉	당초 (동부수도)
9	방배동2526～사당역간 송배수관 정비공사 (21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	580,000	580,000	`13.5.18 ~ 12.23	`13.10.10 ~ 12.23	426,263	`14.4.9	`13.10.29 ~ 12.23	157,093	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	369,001 (99,831)	`14.4.9	53,906	본공사는 추진기지 설치지점 지하에 예상치 못한 한전 케이블관, 도시가스관(600mm)등 각종 지장물이 있어, 위치변경에 따른 중장비 작업공간을 확보하면 차량통행이 불가능 하여 극심한 차량정체가 예상되고, 동절기 안전사고 대비 해빙기 이후로 공사 연기함으로써 이월 됨 <공사중 장애요인 발생〉	당초 (강남수도)
10	광암 정수지 출입구 및 계단시설 개선 공사(12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	350,000	350,000	`13.1.2	`13.7.9	287,523	`14.3.31	`13.12.31	25,523	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	262,000	`14.3.31	62,477	여름철 장마기간 수질관리를 위해 착공지연이 발생되었으며(70일), 정수지 유출밸브 교체공사외 2건의 병행공사 지연으로 이월 됨 <유관사업지연>	당초 (광암정수)
11	풍납취수장 모터펌프 제작구매설치 (12101)	자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	320,000	320,000	`13.8.16	`13.9.17	180,400	`14.1.10	`13.10.24	108,240	자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	72,160	`14.1.10	139,600	기술진단 및 용량 검토 결과 반영으로 인한 사업발주 지연에 따른 모터펌프 제작설치 기간이 장기간 소요되어 이월 됨 〈사전절차지연〉	당초 (영등포정수)
12	영등포 1정수지 내부방식공사 (12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,000,000	1,000,000	`13.1,1.2 ~ 6.11	`13.9,30 ~ 12.26	886,079	`14.9.30	`13.10.30 ~ 12.27	535,782	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	350,297	`14.9.30	113,921	본공사는 공법별 기술심의 위원회에서 통과하여 사용예정인 부착식 자재에 대하여, 심의회 이전 하자발생 사항이 있어 수차례 진정 민원이 제기되어 현재 소송중으로 공사가 중단으로 이월 됨 〈기타〉	당초 (영등포정수)
13	송배수관정비 관급자재 구매(21101)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,025,102	1,025,102	`13.1,1.5 ~ 6.3	`13.6,11 ~ 7.31	873,059	`14.4,30 ~ 5.31	`13.7,9 ~ 12.11	266,249	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	606,809	`14.4,30 ~ 5.31	152,044	안전사고로 인한 서울지방 고용노동부 공사 중지 명령으로 인한 공사가 중단되어 이월 됨 〈유관사업지연>	당초 (수도자재)
14	고품질 수도계량기 구매 설치 (32203)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (급수계량기교체비) (214-01)	1,852,056	1,852,056	`13.3,27 ~ 9.4	`13.6,26 ~ 12.27	1,681,836	`14.1,19 ~ 12.30	`13.7,12 ~ 12.26	976,663	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (급수계량기교체비) (214-01)	705,172	`14.1,19 ~ 12.30	170,221	대형수도계량기의 고장률 및 검침환경개선에 따른 고품질계량기 교체 사업계획에 따라 발주한 사업으로 계약지연으로 이월 됨 〈사전절차지연>	당초 (수도자재)
15	디지털 수도계량기 원격검침 단말기 설치 용역(32203)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (급수계량기교체비) (214-01)	87,904	87,904	`13.9.4	`13.12.24	80,870	`14.3.24	-	0	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (급수계량기교체비) (214-01)	80,870	`14.3.24	7,034	`검침환경 개선을 위한 디지털계량기 PDA 도보그룹 자동검침 시범사업`을 추진하는 것 으로 디지털계량기와 검침용 단말기 구매의 제작기간이 장기간 소요되어 이월 됨 〈사전절차지연>	당초 (수도자재)

(단위 : 천원)