영등포아리수정수센터

기술진단 분야별(토목 및 수자원 상하수도) 추진계획

영등포아리수정수센터, 풍납취수장 수도시설 기술진단 계획에 따라 토목 및 수자원 상하수도분야 세부추진 계획을 아래와 같이 수립 시행함으로써 효율적이고 체계적인 기술진단업무에 만전을 기하고자 함.

		영등포아리수정수센터 시설 개요

□ 대    상 : 영등포 1, 2정수장

◎ 정수시설 : 60만m3/d(1정수장 : 30만m3/d, 2정수장 : 25만m3/d, 막여과 : 5만m3/d)

◎ 고도시설 : 45만m3/d(1정수장 : 22.5만m3/d, 2정수장 : 22.5만m3/d)

◎ 진단기간 : 2013. 4. 17 ～ 2013. 12. 31

◎ 진단장비

◈ 3차원 전자식 유속 측정기 등 30개 품목

1		도수관로 및 착수정 공정에 대한 기술진단

□ 시설현황

◎ 취수구 : B2.0m×H2.5m×12열

◎ 도수관로 : D2,400mm×L20.96km×1열

◎ 착수정 : W8.0m×L17.5m×5.0m×2지(H.W.L 17.0m)

□ 토목분야 중점진단 사항

◎ 취수구 수중 퇴적물 제거 방안

◎ 침수지 퇴적토 준설 방안

◎ 오일휀스 및 조류 차단막시설 안정적 설치 방안

□ 침사지 현황

◎ 풍납취수장 평면도

◎ 풍납취수장 단면도(2010년도 조사시 퇴적토 50cm)

◎ 풍납취수장 침사지 준설 내용

- 1992년 준공이후 처음으로 2008년 1개지, 2009년 1개지 준설

구분	침사지(1지)	침사지(2지)	접합정(1지)	접합정(2지)	흡수정	비고
2008년	1,247(1.7m)		31(0.6m)		안함	㎥
2009년		1,211(1.7m)		31(0.6m)	안함

※ 인천시는 2년에 1회 준설하다가 2009년부터 침사지 퇴적량이 적어 준설하지 않음

◎ 수도시설 운영에 대한 관리 지침

- 침사지 유지관리 : 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부 제정)

․퇴적토를 항상 조사하여 필요에 따라 준설

․침사지 벽면 청소하여 수질악화 방지

◎ 정수지 등 수도시설 청소에 관한 지침(생산과-1354, 2004. 5.28.)

- 정수지 청소 1년에 1회 이상 청소 시행

- 응집․침전지 등도 자체 방침에 의하여 1년에 1회 이상 청소 시행

※ 배수지 청소 : 연 2회 시행

◎ 2009년 월별 원수의 NH3-N 수질

- 2009년 3~5월간 강우량과 원수의 NH3-N 수질

- 오일 및 조류 차닥막은 홍수시, 동절기 철거하고 재설치 반복

□ 수자원 상하수도분야 중점진단 사항

◎ 도수관의 외부공기 유입에 따른 스컴 과다 발생 방지 방안

◎ 수리학적 안정성 및 회수수 재이용

◎ 원수유입량 감시 및 제어

◎ 수리학적 유량 검토

◎ 통합착수정 정수장별 유량 균등 분배 여부 진단

◎ 통합착수정 원수 수질 파악을 위하여 채수설비의 수질측정 장치 상태

◎ 풍납취수장 도수관로 By-Pass 수리 검토

□ 통합착수정 평면도 및 단면도

<통합 착수정 평면도 및 단면도>

2		기술진단을 위한 공정별 세부 일정

구 분	세부 일정																														비 고
	3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30
▣ 취수구 수중 퇴적물 제거 방안
▣ 침사지 퇴적토 준설 방안
▣ 오일휀스 및 조류 차단막시설 안정적 설치 방안
▣ 풍납취수장 도수관로 By-Pass 수리검토
▣ 도수관로 공기유입에 따른 통수량 및 스컴 발생검토
▣ 통합착수정 유량 분배
▣ 기술진단 보고서 작성